DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 77 del 08-05-17
Reg.Gen.219
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE VORA=
GINE  SU TORRIONE IN VIA BALCONE DELLE MARCHE. AF=
FIDAMENTO AGGIUNTIVO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

----------------------------------------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Visto che con Delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1/bis della L.24/2/1992 n.225 e ss.mm. lo stato di emergenza;

    Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.388 del 27/8/2016 relativa ai primi interevnti urgenti di Protezione civile conseguenti all'evento sismico del 24/8/2016;
	
    Visto che a seguito alle scosse sismiche sono state eseguiti sopralluoghi presso stabili e strutture nel territorio comunale, dai quali è stato rilevato il riuschio di crollo sulla pubblica via;

    Visto in particolare la voragine formatasi sul torrione facente parte delle mura castellane, sito in via Balcone delle Marche;

    	Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 10/02/2017 è stato approvato il progetto/verbale di somma urgenza, predisposto dal R.U.P. in data 09/02/2017, e sono stati affidati i lavori all'Imp. FASIS di Chiatti V.&C. snc con sede in Cingoli, per l'importo di contratto pari a €. 14.537,73 derivante dall'applicazione di un ribasso pari al 31,311% dell'importo a base di gara di € 20.252,68;

Visto che in corso d'opera il direttore dei lavori ha comunicato la necessità di eseguire ulteriori interventi di rafforzamento locale;

Visto che tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con DGM 30/2017 sono disponibili gli importi necessari all'esecuzione degli interventi di rafforzamento locale, oltre alle somme derivanti dal ribasso offerto;

Visto che è stato necessario procedere immediatamente all'esecuzione dei suddetti lavori per garantire la pubblica incolumità affidandoli alla medesima ditta;

Visto il quadro economico aggiornato:
importo lavori                            €. 36.772,15
di cui sicurezza € 626,37
importo base d'asta                     € 36.145,78
ribasso (31,311%)                      € 11.317,61
importo contratto                        € 25.454,54
IVA (10%)                                 €.  2.545,45
spese tecniche                            €   2.000,00
TOT    INTERVENTO              €. 30.000,00

Vista la contabilità finale a firma del direttore lavori per un ammontare pari a € 36.769,36;

Visto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per l'avvio immediato degli interventi urgenti è stato predisposto un primo stanziamento a valere sui Fondi per le Emergenze Nazionali di cui all'art.5, comma 5 quinquies della L.24 Febbraio 1992, n.225 e s.. mm. e ii.;

Visto che in attuazione della suddetta delibera  con Ordinanaze del Capo Dipartimento Protezione Civile del 26 agosto 2016 n. 388 e del 28 agosto 2016 n. 239 sono state impartite le disposizioni per la gestione dell'emergenza e sono state individuate le tipologie di spesa ammissibili;

Visto che tra le spese ammissibili rientrano le misure provvisionali eseguite con interventi di somma urgenza o eseguiti in amministrazione diretta;

Visto perciò che la spesa per la realizzazione dell'intervento è coperta con i fondi per le Emergenze Nazionali stanziati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

Visto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire il codice CUP J69J17000070001 e il CIG ZE61E06A4D;

Visto che lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi in data 15/04/2017;

Acquisite le fatture :
•	n. 000001-2017-el del 03/04/2017 di € 1.999,99 dello studio tecnico associato IANUS dei geom. Massimiliano Borsini, Paolo Bartolelli, Gabriele Falappa e Claudio Canestrari con sede in Via Verga, 2, Loc. Troviggiano, Cingoli (P.IVA: 01517580435) quale saldo spese tecniche per incarico sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 inerente intervento di sistemazione voragine Torrione via Balcone delle Marche;
•	n. FATTPA 4_17 del 19/04/2017 di € 25.452,63 (+ IVA) della ditta Fasis di Chiatti V. e C snc con sede in Via G. Verdi, 8, Cingoli (P.IVA: 00840260434);

Visto che è stata accertata la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC per l'impresa e del certificato di regolarità contributiva della Cassa dei Geometri per il professionista e che perciò si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto la propria competenza sul presente atto ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;
 
DETERMINA

1)  di affidare alla ditta Fasis di Chiatti V. e C. snc l'esecuzione dei lavori aggiuntivi descritti in premessa aumentando l'importo di contratto da €.14.537,73 a  €. 25.454,54+IVA(10%);
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 30.000,00 necessaria alla realizzazione dell'intervento di sistemazione voragine su torrione in via Balcone delle Marche;

3) di imputare la spesa di €.30.000,00 al Cap. 2840 del corrente bilancio provvisorio 2017, dando atto che tali spese verranno rimborsate, previa rendicontazione, con i fondi per le Emergenze Nazionali stanziati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, previa rendicontazione del Comune e secondo le modalità indicate dalla normativa vigente;

4) di liquidare le fatture:
•	n. 000001-2017-el del 03/04/2017 di € 1.999,99 dello studio tecnico associato IANUS dei geom. Massimiliano Borsini, Paolo Bartolelli, Gabriele Falappa e Claudio Canestrari con sede in Via Verga, 2, Loc. Troviggiano, Cingoli (P.IVA: 01517580435) quale saldo spese tecniche per incarico sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 inerente intervento di sistemazione voragine Torrione via Balcone delle Marche;
•	n. FATTPA 4_17 del 19/04/2017 di € 25.452,63 (+ IVA) della ditta Fasis di Chiatti V. e C snc con sede in Via G. Verdi, 8, Cingoli (P.IVA: 00840260434);

5) di imputare le suddette spese al capitolo 2840/0 sull'impegno assunto con il presente atto;
 
6) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Il Responsabile Ufficio LL.PP
Ing. Fabrizio Santori

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Cingoli: .........                    
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dr. BACELLI Rino    

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI