DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 107 del 25-06-18
Reg.Gen.338
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: REALIZZAZIONE ALLOGGI PER STUDENTI PRESSO EX SCUO=
LA  MEDIA  S.  DOMENICO - 1 STRALCIO - APROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO FINALE

----------------------------------------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto che per i lavori di "Realizzazione alloggi per studenti nella ex scuola media San Domenico" a Cingoli è stato approvato il progetto esecutivo con D.G.M. n°22 del 22/02/2013;
- Visto il quadro economico relativo al progetto esecutivo approvato:
lavori 						€. 1.188.556,32
di cui oneri sicurezza €. 60.000,00 
somme a disposizione (€. 299.309,39)
spese tecniche 					€.    124.000,00
CNPAIA 4% 					€.        4.960,00
Incentivo Rup e DL 				€.      14.280,00
Collaudi e spese varie 				€.        5.000,00
Pubblicazione gara e oneri autorità 		€.        2.500,00
Imprevisti e lavori su fattura			€.        2.632,16
IVA su lavori 					€.    118.855,63
IVA spese tecniche 				€.      27.081,60
TOTALE INTERVENTO 			€. 1.487.865,71

- Visto che al finanziamento dell'opera si provvede con i fondi del "Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con DPCM 16/07/2009 per l'intero importo;
- Richiamata la determina n. 44 del 22/04/2013 con cui si stabiliva di indire una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 163/2006;
- Visto che con determina n.88 del 12/09/2013 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CCC Consorzio Cooperative Costruzioni, che ha individuato come ditta esecutrice la propria consorziata Arco Lavori Soc. Coop. Cons., la quale ha a sua volta indicato come esecutrice la propria consorziata Artigiana Elettrika Srl;
-Visto che con prot. 5511 del 07/04/2016 è pervenuta al Comune la comunicazione relativa all'affitto del ramo d'azienza del Consorzio C.C.C. al Consorzio Integra Società Cooperativa con sede a Bologna in via Marco Emilio Lepido 182/2  (P.IVA 03530851207);
-Vista la determinazione n. 61 del 12/04/2016 con cui si prende atto dell'affitto del ramo d'azienda della ditta aggiudicatrice e del conseguente subentro nel contratto d'appalto;
-Dato atto che il Consorzio Integra Soc. Coop. di Bologna ha confermato come esecutore la Ditta Artigiana Elettrika S.R.L.di Jesi (P.IVA 01476820434);
- Visto che l'importo del contratto ammonta a €.882.378,99, al netto del ribasso di €.306.177,33, (27.13%) e al lordo degli oneri per la sicurezza, pari a €. 60.000,00;
- Visto il quadro economico di aggiudicazione:
per lavori 						€.   882.378,99
di cui oneri sicurezza € 60.000,00
somme a disposizione (€. 605.486,72)
spese tecniche 					€.    124.000,00
ribasso d'asta                                                       €     336.795,06
CNPAIA 4% 					€.        4.960,00
Incentivo Rup e DL 				€.      14.280,00
Collaudi e spese varie 				€.        5.000,00
Pubblicazione gara e oneri autorità 		€.        2.500,00
Imprevisti e lavori su fattura			€.        2.632,16
IVA su lavori 					€.      88.237,90
IVA spese tecniche (21%)			€.      27.081,60
TOTALE INTERVENTO 			€. 1.487.865,71

- Visto che con Delibera di Giunta n. 65 del 10/04/2014 è stata approvata la perizia di variante n.1 che hanno portato l'importo contrattuale a €.926.472,88 + IVA (10%):
lavori 						€.    926.472,88
di cui oneri sicurezza € 62.998,30
somme a disposizione (€. 561.392,83)
spese tecniche 					€.    124.000,00
CNPAIA 4% 					€.        4.960,00
IVA spese tecniche (22%)			€.      28.371,20
Incentivo Rup e DL 				€.      14.280,00
Collaudi e spese varie 				€.        5.000,00
Pubblicazione gara e oneri autorità 		€.        2.500,00
Imprevisti e lavori su fattura			€.        2.632,16
IVA su lavori 					€.      92.647,29
somme derivanti dal ribasso d'asta 		€.    287.002,18
TOTALE INTERVENTO 			€. 1.487.865,71

- Visto che con Delibera di Giunta n. 86 del 02/09/2016 è stata approvata la perizia di variante n.2 che hanno portato l'importo contrattuale a €.926.472,88 + IVA (10%)
Lavori 						€.    968.281,20
di cui oneri sicurezza € 65.726,84
Somme a disposizione (€. 519.583,91)
Spese tecniche					€.    122.999,98
CNPAI						€.        4.996,96
IVA spese tecniche				€.      27.606,74
Incentivo Rup e DL 				€.      14.280,00
Collaudi e spese varie 				€.        5.000,00
Pubblicazione gara e oneri autorità 		€.        2.628,13
Imprevisti e lavori su fattura			€.    245.243,91
IVA su lavori 					€.      96.828,18
TOTALE INTERVENTO 			€. 1.487.865,71

- Considerato che i lavori sono iniziati in data 06/11/2013 e terminati in data 28/02/2017;
- Visto che lo stato finale dei lavori ammonta a €.968.281,20 (oltre IVA al 10%);
- Vista la relazione e il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Fernando Mistichelli, assunto all'Ente con prot n. 6664 del 18/04/2018 da cui risulta che le opere sono collaudabili;
- Vista la determina n.63 del 20/04/2018 con cui è stato approvato il certificato di collaudo e liquidata la rata a saldo all'impresa aggiudicataria;
- Visto percio che a consuntivo risultano spesi per la realizzazione dell'intervento la seguenti somme:
lavori eseguiti					€.    968.281,20
di cui oneri sicurezza €. 65.726,84
somme a disposizione (€.517.732,32)
IVA su lavori 					€.      96.828,18
Spese tecniche					€.    122.999,98
CNPAI						€.        4.996,96
IVA spese tecniche				€.      27.606,74
Incentivo Rup e DL 				€.        8.568,00
Collaudi (al lordo oneri) 				€.        5.306,12
Pubblicazione gara e oneri autorità 		€.        1.006,73
lavori in economia e su fattura			€.    250.419,60
totale						€. 1.486.014,12
economia						€.        1.851,59
TOTALE INTERVENTO 			€. 1.487.865,71

- Visto che l'opera è stata finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009 e che perciò è necessario procedere al rendiconto delle spese;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 s.m.i. (Regolamento di di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni);
- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
DETERMINA 
1) di approvare il quadro economico finale dei lavori di realizzazione alloggi per studenti - 1° stralcio di importo pari a  €. 1.486.014,12;
2) di dare atto che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria con i fondi del "Piano nazionale di edilizia abitativa - DPCM 16/07/2009 al Cap. 2634/0 - imp. 63/2012;
3) di dare atto che a conclusione dell'intervento risulta una minore spesa di €. 1.851,59 rispetto all'importo preventivato che costituisce economia per la Regione Marche;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Manuela Giannobi e il Direttore dei Lavori è l'Ing. Fabrizio Santori responsabile dell'Ufficio LL.PP.;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune;

F.to II Responsabile del Servizio
      Ing. Fabrizio Santori

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI