DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 26 del 22-01-19
Reg.Gen.47
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: REALIZZAZIONE  COLLEGAMENTO  TRA  LA PALESTRA E LA
SCUOLA  P.  BORSELLINO DI GROTTACCIA. APPROVAZIONE
STATO FINALE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

----------------------------------------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO

- Visto il DL n. 104/2013 convertito dalla L. n.128/2013, DM 23.01.2015 recanti misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Criteri per la formazione del piano regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 124 del 2 marzo 2015 avente per oggetto "DL n. 104/2013 convertito dalla L. n.128/2013, DM 23.01.2015 che mette a disposizione fondi per la realizzazione di interventi presso scuole e simili;
- Visto il progetto esecutivo per la "Realizzazione del collegamento coperto fra la palestra e l'edificio del polo scolastico P.Borsellino di Grottaccia", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 24/03/2015, per l'importo complessivo di 295.000,00 euro;
- Considerato che la Regione Marche Servizio Infrastrutture e Trasporti - PF Edilizia ed Espropriazione con decreto DDPF 30/09/2016 n.49/EDI comunica l'avvenuto finanziamento dell'opera in oggetto per euro 295.000,00 complessivi, nonchè la necessità di avviare urgentemente la procedura di affidamento dei lavori;
- Visto che il Responsabile del procedimento ha acquisito il codice CUP: J61E15001150002;
- Considerato che con Determina dell'Ufficio LLPP del Comune di Cingoli n. 171 del 20/10/16 veniva affidata all'Ing. Marco Barcaioni l'incarico di aggiornare il progetto esecutivo con il nuovo prezzario  vigente e veniva affidato l'incarico per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, la realizzazione della pratica anticendio, l'accatastamento finale, il deposito presso l'ufficio del Genio Civile, la pratica termica ed acustica;
-   Visto il progetto esecutivo aggiornato che prevede il seguente quadro economico:
        Somme per lavori                                                           217.507,58 €
               di cui oneri per la sicurezza €. 4.611,16    
            Somme a disposizione 
            Imprevisti                                                                           3.253,57 €
            Accantonamento art.12 DPR554/99                                  6.525,23 €
            Spese tecniche                                                                  19.031,92 €
            Indagine geologica                                                                435,02 €
            Collaudo                                                                                600,00 €
            Incentivo RUP                                                                       435,02 €
            Iva sui Lavori                                                                   21.750,76 €
            Iva e imposte su somme a disposizione                           25.460,92 €
            TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                           77.492,42 €
            TOTALE PROGETTO                                                 295.000,00 €   

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 25/11/2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo aggiornato;
-Visto che con determina a contrarre n. 8 del 31/03/2017 il Responsabile dell' Ufficio LL. PP. ha approvato la lettera di invito e l'elenco delle ditte da invitare e ha inviato tutta la documentazione alla S.U.A. per l'indizione della gara d'appalto;
- Visto che il Responsabile del procedimento ha acquisito il codice CIG: 6965164B27;
-Richiamata la determina n.2 del 06/02/2017 della S.U.A. con cui è stata indetta la gara d'appalto per la realizzazione del collegamento coperto tra la palestra e l'edificio scolastico P. Borsellino di Grottaccia;
-Vista la Determina della Stazione Unica Appaltante n. 23 del 12/09/2017 con cui si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Francucci srl per l'importo contrattuale di €.203.669,31 di cui €. 4.611,16 per oneri per la sicurezza;
- Vista la DGM n. 80 del23/05/2018 di Approvazione del quadro economico rimodulato e accertamento delle economie;
- Visto il Quadro economico di aggiudicazione:
 importo contratto                                                                      203.669,31 €
               di cui oneri per la sicurezza €. 4.611,16    
            Somme a disposizione 
            Imprevisti (lordo IVA)                                                       3.253,57 €
            Accantonamento art.12 DPR554/99 (accordi bonari)        6.525,23 €
            Spese tecniche (prog. e direzione lavori)                          17.400,61 €
            Spese tecniche (coordinatore sicurezza)                             1.631,31 €
            Indagine geologica                                                                600,00 €
            Collaudo                                                                                600,00 €
            Incentivo RUP                                                                     3.097,31 €
            Iva sui Lavori                                                                    20.366,93 €
            Iva su spese tecniche                                                          5.423,70 €
            Lavori in economia (lordo IVA)                                       17.209,94 €
            TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                            76.108,59 €
            Ribasso d'asta (Economie)                                                15.222,09 €
            TOTALE PROGETTO                                                 295.000,00 €    

- Visto il contratto n. 12462 di repertorio del 27/04/2018 tra il comune di Cingoli e la ditta Francucci srl, per un importo pari a €.203.669,31 oltre IVA;
- Vista la Determinazione n. 142 del 10/09/2018 di approvazione del 1° SAL per lavori realizzati a tutto il 31/08/2018;
- Vista la D.G.M. n. 198 del 07/12/2018 di approvazione della Variante in corso d'opera per i lavori in oggetto, con la quale il quadro tecnico economico è stato così modificato:
 
 importo contratto                                                                      213.169,35 €
               di cui oneri per la sicurezza €. 4.826,25    
            Somme a disposizione                                                      66.608,56 €
            Ribasso d'asta (Economie)                                                15.222,09 €
            TOTALE PROGETTO                                                 295.000,00 €    

- Visto l'Atto di Sottomissione per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, numero rep. 12551 del 21/12/2018;
- Visto che i lavori sono stati consegnati in data 09/05/2018 e sono stati regolarmente conclusi il 27/12/2018;
- Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Marco Barcaioni ha redatto la contabilità finale dei lavori  realizzati a tutto il 27/12/2018, al raggiungimento di € 213.156,06 così composta:
    - Libretto delle misure n. 2
    - Registro di contabilità
    - Sommario del Registro di Contabilità al SAL 2
    - Stato finale dei lavori
- Visto il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 27/12/2018 dal Direttore Lavori dal quale risulta un credito dell'impresa pari a € 68.022,20 oltre IVA, per un totale complessivo pari a € 74.824,42;
- Viste le Determinazioni n. 153 del 02/10/2018 di liquidazione 1° SAL (€. 104.400,00+ iva) e la Determinazione n. 91 del 07/06/2018 di liquidazione anticipazione sull'importo di contratto (€. 40.733,86 + iva);
- Acquisita la fattura n° 58/PA di €. 68.022,20 oltre IVA (tot. €. 74.824,42) della ditta  Francucci srl (P.IVA: 01241490430) per "Stato finale dei lavori di ampliamento edificio scolastico P. Borsellino e costruzione spogliatoi palestra in loc. Grottaccia" quale rata a saldo sulle lavorazioni eseguite;
- Verificata la regolarità contributiva della ditta Francucci srl tramite l'acquisizione del DURC on line emesso con prot. INAIL_13697527 del 02/11/2018 con scadenza validità al 02/03/2019;
- Considerata la necessità di approvare lo Stato Finale dei lavori a tutto il 27/12/2018;
- Visto il parere del responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 del T.U.E. L. approvato con D.Lgs. 18 agosto n. 267 e succ. mod e int.;
DETERMINA

1)  Di approvare la contabilità dei lavori relativa allo Stato Finale e composta da:
    - Libretto delle misure n. 2
    - Registro di contabilità
    - Sommario del Registro di Contabilità al SAL 2
    - Stato finale dei lavori
    
2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione datato 27/12/2018 dal quale risulta un credito dell'impresa pari a € 68.022,20 oltre IVA, per un totale complessivo pari a € 74.824,42;

3) Di liquidare la fattura n° 58/PA di €. 68.022,20 oltre IVA (tot. €. 74.824,42) alla ditta  Francucci srl (P.IVA: 01241490430) per "Stato finale dei lavori di ampliamento edificio scolastico P. Borsellino e costruzione spogliatoi palestra in loc. Grottaccia" quale rata a saldo sulle lavorazioni eseguite;

4) Di imputare la spesa di €. 74.824,42 al capitolo 2628, impegno num. 237/2018, che presenta la necessaria disponibilità;

5) Di prendere atto che tutte le somme dell'intervento sono a carico del fondo di cui alla Delibera di Giunta Regionale Marche n. 124 del 2 marzo 2015 avente per oggetto "DL n. 104/2013 convertito dalla L. n. 128/2013, DM 23.01.2015" che mette a disposizione fondi per la realizzazione di interventi presso scuole e simili;

6) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune di Cingoli.

              Il Responsabile dell'ufficio LL.PP.
                   Ing. Fabrizio Santori

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI