DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 64 del 23-04-18
Reg.Gen.207
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: REALIZZAZIONE ALLOGGI PER STUDENTI PRESSO EX SCUO=
LA MEDIA SAN DOMENICO - 2 ^ STRALCIO -APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE TERZO E UL=
TIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.
----------------------------------------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che la Regione Marche P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, ha concesso con DDPF n. 1/ERP del 13/01/2011 il finanziamento  per il progetto di "Realizzazione alloggi per studenti presso ex scuola media” per l'importo di euro 1.487.865,71;

Considerato che la Regione Marche con nota prot.7557 del 21/05/2015 ha comunicato l'ulteriore diponibilità finanziaria di euro 565.298,52 per realizzare l'intervento di completamento (2° Stralcio);

Richiamato il progetto esecutivo "Intervento di realizzazione alloggi per studenti ex scuola media San Domenico - 2° STRALCIO"  di importo pari ad euro 565.298,52  approvato con Delibera di Giunta Comunale n.33 del 18/03/2016; 

	Visto il quadro economico allegato al progetto esecutivo "Intervento di realizzazione alloggi per studenti ex scuola media San Domenico- II Stralcio" indicato in seguito:

SOMME PER LAVORI(469.574,83€):
Somme per lavori         \			€. 469.574,83
(Di cui oneri sicurezza € 10.301,47) 			

SOMME A DISPOSIZIONE (95.723,69€):
IVA sui lavori                                                                         €   46.957,48
spese tecniche 				 €.  19.200,00
CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche		 €.  5.160,96
Art. 92 D.Lgs 163/06 				 €.  8.452,35
Collaudi e spese varie 			                    €. 4.000,00
Lavori in economia (iva compresa)                                        €. 5.500,00   
Imprevisti                 	                                                          €. 5.866,27
IVA su imprevisti				 €. 586,63
						===========================
TOTALE INTERVENTO 	                    	€. 565.298,52

 Richiamata la determina S.U.A. n.10 del 05/04/2016 con cui si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori del secondo stralcio alla ditta C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni;

  Visto che la Ditta C.C.C. ha individuato come proprio socio cooperatore il consorzio AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile di Ravenna, cha a sua volta ha designato come esecutore del lavoro la Ditta Artigiana Elettrika S.R.L. di Jesi (P.IVA 01476820434);

Visto che la Ditta ha offerto il ribasso del 27,13 sull'importo a base di gara di €. 469.574,83 (di cui €. 10.301,47 oneri per la sicurezza) e che perciò l'importo del contratto ammonta a €. 344.973,97 + IVA;

Visto che successivamente all'aggiudicazione, con prot. 5511 del 07/04/2016 è pervenuta al Comune la comunicazione relativa all'affitto del ramo d'azienda del Consorzio C.C.C. al Consorzio Integra Società Cooperativa di Bologna che subentra perciò nel contratto in corso di stipula;

Vista la determinazione n. 61 del 12/04/2016 con cui si prende atto dell'affitto del ramo d'azienda della ditta aggiudicatrice e del conseguente subentro nel contratto d'appalto;

Visto perciò che è stato individuato come aggiudicatario il Consorzio Integra Soc. Coop. di Bologna per l'importo di €. 344.973,97 (di cui €. 10.301,47 per la sicurezza) derivante dal ribasso del  27,13%  sull'importo a base di gara; 

Precisato che rimane immutato il socio designato per l'esecuzione dei lavori, Ditta Artigiana Elettrika S.R.L. di Jesi e che non viene modificata l'offerta economica;

Visto il quadro economico di aggiudicazione:

SOMME PER LAVORI(344.973,97€):
Somme per lavori         \			€. 344.973,97
(Di cui oneri sicurezza € 10.301,47) 			

SOMME A DISPOSIZIONE (220.324,55€):
IVA sui lavori                                                                         €   34.497,40
certificazione acustica                                                            €     1.200,00
protocollo ITACA, impianto termico e VFF                          €   12.000,00
coordinamento sicurezza			 €.    6.000,00
CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche		 €.    5.160,96
Art. 92 D.Lgs 163/06 				 €.    8.452,35
Collaudi e spese varie 			                    €.    4.000,00
Lavori in economia (iva compresa)                                        €.  20.000,00   
Imprevisti                 	                                                          €.  41.285,32
IVA su imprevisti				 €.    4.128,52
Economie di gara                                                                    €   76.000,00
IVA su economie di gara                                                        €     7.600,00
						===========================
TOTALE INTERVENTO 	                    	€. 565.298,52

Visto che i lavori relativi al secondo stralcio sono iniziati in data 02/05/2016 e terminati in data 28/02/2017;

Visto che in data 09/05/2017 è stato emesso il terzo SAL - stato finale, di importo pari a €. 20.239,83 + IVA (10%) e che in data  01/09/2017 è stato emesso il certificato di pagamento relativo al 3^ e ultimo SAL; 

Vista la relazione e il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Fernando Mistichelli, assunto all'Ente con prot. 6664 del 18/04/2018 da cui risulta che le opere sono collaudabili e si può procedere alla liquidazione del saldo all'impresa;

Visto perciò che si può procedere alla liquidazione del saldo pari a € 20.239,83 (oltre IVA)=22.263,81;

Acquisita la fattura elettronica n. 180166 del 08/02/2018 di importo pari a €. 22.263,81 (al lordo IVA) - CIG 66455132865 - CUP J66D13000720001;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva e assicurativa della ditta affidataria Consorzio Integra Soc. Coop. e della ditta esecutrice Artigiana Elettrika Srl attraverso l'acquisizione del DURC;

Accertata la propria competenza ai sensi del TUEL- D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori di realizzazione alloggi per studenti - 2^ stralcio di importo pari a € 344.967,08 (oltre IVA 10%);

2) di approvare il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Fernando Mistichelli da cui risulta che le opere sono collaudabili e si può liquidare il saldo all'impresa aggiudicataria;

3) di autorizzare il pagamento del terzo e ulimo stato di avanzamento per i lavori di "Realizzazione alloggi per studenti ex scuola media San Domenico - 2° STRALCIO" al Consorzio Integra Soc. Coop. di Bologna, alla data del 09/05/2017;

4) di liquidare la fattura n. 180166 del 08/02/2018 di importo pari a lordi €. 22.263,81 relativa al 3 SAL - stato finale;

5) di imputare la spesa di €. 22.263,81 al Cap. 2634/0 - imp. 439/2017 che presenta sufficiente disponibilità economica;

6) di dare atto che la somma necessaria alla realizzazione del progetto è interamente finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009;

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Manuela Giannobi e il Direttore dei Lavori è l'Ing. Fabrizio Santori responsabile dell'Ufficio LL.PP.;

F.to Il Responsabile ufficio LL.PP.
Ing. Fabrizio Santori

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI