DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 63 del 20-04-18
Reg.Gen.206
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: REALIZZAZIONE ALLOGGI PER STUDENTI PRESSO SEDE  EX
SCUOLA MEDIA SAN DOMENICO - 1^ STRALCIO - APPROVA=
ZIONE  CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SET=
TIMO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
----------------------------------------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto che per i lavori di "Realizzazione alloggi per studenti nella ex scuola media San Domenico" a Cingoli è stato approvato il progetto esecutivo con D.G.M. n°22 del 22/02/2013;
- Visto il quadro economico relativo al progetto esecutivo approvato:
per lavori (€.1.188.556,32 di cui oneri sicurezza € 60.000,00 )
 opere edili 					€     779.950,36
 impianti elettrici 				            €.    146.195,44
 impianti termoidraulici 				€.    262.410,52
somme a disposizione (euro 299.309,39)
spese tecniche 					€.    124.000,00
CNPAIA 4% 					€.        4.960,00
Incentivo Rup e DL 				€.      14.280,00
Collaudi e spese varie 				€.        5.000,00
Pubblicazione gara e oneri autorità 		€.        2.500,00
Imprevisti e lavori su fattura			€.        2.632,16
IVA su lavori 					€.    118.855,63
IVA spese tecniche 				€.      27.081,60
TOTALE INTERVENTO 			€. 1.487.865,71

- Visto che al finanziamento dell'opera si provvede con i fondi del "Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con DPCM 16/07/2009 per l'intero importo;
- Richiamata la determina n. 44 del 22/04/2013 con cui si stabiliva di indire una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 163/2006;
- Visto che con determina n.88 del 12/09/2013 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CCC Consorzio Cooperative Costruzioni, che ha individuato come ditta esecutrice la propria consorziata Arco Lavori Soc. Coop. Cons., la quale ha a sua volta indicato come esecutrice la propria consorziata Artigiana Elettrika Srl;
-Visto che con prot. 5511 del 07/04/2016 è pervenuta al Comune la comunicazione relativa all'affitto del ramo d'azienza del Consorzio C.C.C. al Consorzio Integra Società Cooperativa con sede a Bologna in via Marco Emilio Lepido 182/2  (P.IVA 03530851207);
-Vista la determinazione n. 61 del 12/04/2016 con cui si prende atto dell'affitto del ramo d'azienda della ditta aggiudicatrice e del conseguente subentro nel contratto d'appalto;
-Dato atto che il Consorzio Integra Soc. Coop. di Bologna ha confermato come esecutore la Ditta Artigiana Elettrika S.R.L.di Jesi (P.IVA 01476820434);
- Visto che l'importo del contratto ammonta a €.882.378,99, al netto del ribasso di €.306.177,33, (27.13%) e al lordo degli oneri per la sicurezza, pari a €. 60.000,00;
- Visto il quadro economico di aggiudicazione:
per lavori (€.882.378,99 di cui oneri sicurezza € 60.000,00)
somme a disposizione (€. 605.486,72)
spese tecniche 					€.    124.000,00
ribasso d'asta                                                       €     306.177,33
CNPAIA 4% 					€.        4.960,00
Incentivo Rup e DL 				€.      14.280,00
Collaudi e spese varie 				€.        5.000,00
Pubblicazione gara e oneri autorità 		€.        2.500,00
Imprevisti e lavori su fattura			€.        2.632,16
IVA su lavori 					€.    118.855,63
IVA spese tecniche 				€.      27.081,60
TOTALE INTERVENTO 			€. 1.487.865,71

- Visto che sono state redatte n.2 perizie di variante che hanno portato l'importo contrattuale a €.968.281,20 + IVA (10%);
- Considerato che i lavori sono iniziati in data 06/11/2013 e terminati in data 28/02/2017;
- Considerato che in data 15/11/2017 è stato emesso il 7° SAL per l'importo di € 52.790,58 (oltre IVA 10%) e che nella medesima data è stato emesso il certificato di pagamento relativo al 7°e ultimo SAL;
- Vista la relazione e il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Fernando Mistichelli, assunto all'Ente con prot n. 6664 del 18/04/2018 da cui risulta che le opere sono collaudabili e si può procedere alla liquidazione del saldo all'impresa;
- Visto perciò che si può procedere alla liquidazione del saldo pari a € 52.790,58 (oltre IVA);
- Vista la fattura n.180167 del 08/02/2018 di importo pari a €. 52.790,58 (oltre IVA)= €. 58.069,64;
- Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva e assicurativa della ditta affidataria Consorzio Integra Soc. Coop. e della ditta esecutrice Artigiana Elettrika Srl attraverso l'acquisizione del DURC;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 s.m.i. (Regolamento di di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni);
- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici concernente il Capitolato Generale ’Appalto s.m.i.;
DETERMINA 

1. di approvare lo stato finale dei lavori di realizzazione alloggi per studenti - 1° stralcio di importo pari a  € 968.281,20 (oltre IVA 10%);
2. di approvare il certificato di collaudo redatto dall'Ing Fernando Mistichelli da cui risulta che le opere sono collaudabili e si può liquidare il saldo all'impresa aggiudicataria;
3. di autorizzare il pagamento del settimo ed ultimo stato di avanzamento per i lavori eseguiti alla data del 15/11/2017 alla Ditta affidataria Consorzio Integra Soc. Coop. di Bologna;
4. di liquidare la fattura n.180167 del 08/02/2018 di importo pari a lordi €. 58.069,64 relativa al settimo ed ultimo SAL;
5. di dare atto che la somma complessiva pari a €. 58.069,64 trova copertura finanziaria con i fondi del "Piano nazionale di edilizia abitativa - DPCM 16/07/2009 al Cap. 2634/0 - imp. 63/2012;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune;

F.to II Responsabile del Servizio
      Ing. Fabrizio Santori

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI