DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 142 del 10-09-18
Reg.Gen.444
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: REALIZZAZIONE  COLLEGAMENTO  TRA  LA PALESTRA E LA
SCUOLA DI GROTTACCIA - APPROVAZIONE 1° STATO DI A=
VANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 31/08/2018.

----------------------------------------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO

- Visto il DL n. 104/2013 convertito dalla L. n.128/2013, DM 23.01.2015 recanti misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Criteri per la formazione del piano regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 124 del 2 marzo 2015 avente per oggetto "DL n. 104/2013 convertito dalla L. n.128/2013, DM 23.01.2015 che mette a disposizione fondi per la realizzazione di interventi presso scuole e simili;
- Visto il progetto esecutivo per la "Realizzazione del collegamento coperto fra la palestra e l'edificio del polo scolastico P.Borsellino di Grottaccia", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 24/03/2015, per l'importo complessivo di 295.000,00 euro;
- Considerato che la Regione Marche Servizio Infrastrutture e Trasporti - PF Edilizia ed Espropriazione con decreto DDPF 30/09/2016 n.49/EDI comunica l'avvenuto finanziamento dell'opera in oggetto per euro 295.000,00 complessivi, nonchè la necessità di avviare urgentemente la procedura di affidamento dei lavori;
- Visto che il Responsabile del procedimento ha acquisito il codice CUP: J61E15001150002;
- Considerato che con Determina dell'Ufficio LLPP del Comune di Cingoli n. 171 del 20/10/16 veniva affidata all'Ing. Marco Barcaioni l'incarico di aggiornare il progetto esecutivo con il nuovo prezzario  vigente e veniva affidato l'incarico per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, la realizzazione della pratica anticendio, l'accatastamento finale, il deposito presso l'ufficio del Genio Civile, la pratica termica ed acustica;
-   Visto il progetto esecutivo aggiornato che prevede il seguente quadro economico:
        Somme per lavori                                                           217.507,58 €
               di cui oneri per la sicurezza €. 4.611,16    
            Somme a disposizione 
            Imprevisti                                                                           3.253,57 €
            Accantonamento art.12 DPR554/99                                  6.525,23 €
            Spese tecniche                                                                  19.031,92 €
            Indagine geologica                                                                435,02 €
            Collaudo                                                                                600,00 €
            Incentivo RUP                                                                       435,02 €
            Iva sui Lavori                                                                   21.750,76 €
            Iva e imposte su somme a disposizione                           25.460,92 €
            TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                           77.492,42 €
            TOTALE PROGETTO                                                 295.000,00 €   

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 25/11/2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo aggiornato;
-Visto che con determina a contrarre n. 8 del 31/03/2017 il Responsabile dell' Ufficio LL. PP. ha approvato la lettera di invito e l'elenco delle ditte da invitare e ha inviato tutta la documentazione alla S.U.A. per l'indizione della gara d'appalto;
- Visto che il Responsabile del procedimento ha acquisito il codice CIG: 6965164B27;
-Richiamata la determina n.2 del 06/02/2017 della S.U.A. con cui è stata indetta la gara d'appalto per la realizzazione del collegamento coperto tra la palestra e l'edificio scolastico P. Borsellino di Grottaccia;
-Vista la Determinazione della Stazione Unica Appaltante n. 4 del 23/03/2017 con la quale si propone l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Francucci srl di Treia dei lavori di realizzazione del corpo di collegamento coperto tra la palestra e la scuola P. Borsellino di Grottaccia;
-Vista la conseguente Determina della Stazione Unica Appaltante n. 23 del 12/09/2017 con si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Francucci srl per l'importo contrattuale di €.203.669,31 di cui €. 4.611,16 per oneri per la sicurezza;
- Vista la DGM n. 80 del23/05/2018 di Approvazione del quadro economico rimodulato e accertamento delle economie;
- Visto il Quadro economico di aggiudicazione:
 importo contratto                                                                      203.669,31 €
               di cui oneri per la sicurezza €. 4.611,16    
            Somme a disposizione 
            Imprevisti (lordo IVA)                                                       3.253,57 €
            Accantonamento art.12 DPR554/99 (accordi bonari)        6.525,23 €
            Spese tecniche (prog. e direzione lavori)                          17.400,61 €
            Spese tecniche (coordinatore sicurezza)                             1.631,31 €
            Indagine geologica                                                                600,00 €
            Collaudo                                                                                600,00 €
            Incentivo RUP                                                                     3.097,31 €
            Iva sui Lavori                                                                    20.366,93 €
            Iva su spese tecniche                                                          5.423,70 €
            Lavori in economia (lordo IVA)                                       17.209,94 €
            TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                            76.108,59 €
            Ribasso d'asta (Economie)                                                15.222,09 €
            TOTALE PROGETTO                                                 295.000,00 €    

- Visto il contratto n. 12462 di repertorio del 27/04/2018 tra il comune di Cingoli e la ditta Francucci srl, per un importo pari a €.203.669,31 oltre IVA;
- Visto che i lavori sono stati consegnati in data 09/05/2018 e risultano in corso d'opera;
- Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Marco Barcaioni ha redatto la contabilità dei lavori al primo Stato di Avanzamento dei lavori realizzati a tutto il 31/08/2018, al raggiungimento di € 131.351,45 così composta:
    - Libretto delle misure n. 1
    - Registro di contabilità
    - Sommario del Registro di Contabilità
    - Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/08/2018
    - Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 emesso dal RUP e datato 31/08/2018 dal quale risulta un credito dell'impresa pari a € 104.400,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari a € 114.840,00;
- Verificata la regolarità contributiva della ditta Francucci srl tramite l'acquisizione del DURC on line emesso con prot. INAIL_12282124 del 04/07/2018 con scadenza validità al 01/11/2018;
- Considerata la necessità di approvarel lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 31/08/2018;
-Visto il parere del responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 del T.U.E. L. approvato con D.Lgs. 18 agosto n. 267 e succ. mod e int.;
DETERMINA

1)  Di approvare la contabilità dei lavori relativa al primo stato di avanzamento e composta da:
    -  - Libretto delle misure n. 1
    - Registro di contabilità
    - Sommario del Registro di Contabilità
    - Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/08/2018

2) Di approvare il certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 emesso dal RUP e datato 31/08/2018 dal quale risulta un credito dell'impresa pari a € 104.400,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari a € 114.840,00;

3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma con successivo atto e dopo l'invio delle fatture relative al 1° SAL;

4) Di prendere atto che tutte le somme dell'intervento sono a carico del fondo di cui alla Delibera di Giunta Regionale Marche n. 124 del 2 marzo 2015 avente per oggetto "DL n. 104/2013 convertito dalla L. n. 128/2013, DM 23.01.2015" che mette a disposizione fondi per la realizzazione di interventi presso scuole e simili;

5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune di Cingoli.

              Il Responsabile dell'ufficio LL.PP.
                   Ing. Fabrizio Santori

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI