DETERMINAZIONE sett. Uff.TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 99 del 10-04-19
Reg.Gen.242
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE  PISTA  DI PATTINAGGIO  - AFFIDA=
MENTO LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO

----------------------------------------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO

  	Premesso che la Giunta Municipale con DGM n. 11 del 18/01/2019 ha approvato il progetto per la riqualificazine dell'ex pista di pattinaggio a Cingoli per l'importo complessivo pari a 170.000,00 euro (compreso iva e somme a disposizione); 
	
	Premesso che i lavori di cui sopra sono stati affidati con Determina LLPP n. 43 del 14/02/2019 per l'importo contrattuale complessivo di euro 91.451,97 oltre iva 22% di cui 1.947,09 euro per somme a disposizione (111.571,40 euro iva compresa);  

        	Premesso che i lavori sono in corso di realizzazione e si ritiene necessario eseguire ulteriori lavorazioni non previste nel contratto iniziale quali la demolizione di un'ulteriore porzione di calcestruzzo della soletta di base, la realizzazoine di ulteriori caditoie di raccolta acque meteoriche ed il risanamento del fondo di appoggio della nuova pavimentazione (in quanto sia il fondo che le caditoie esistenti a seguito della demolizione della pavimentazione sono risutate inadeguate), la posa di ulteriori cordoli in travertino;

	Preso atto che risulta necessario eseguire urgentemente tali lavorazioni al fine di non bloccare i lavroi e permettere il completamento dell'opera entro il termine previsto del 20 aprile p.v. al fine di consentire l'esecuzione delle manifestazioni previste;
	
	Preso atto del progetto realizzato dall'Ufficio LLPP del comune di Cingoli per l'importo complessivo pari ad euro 30.442,28 oltre iva (di cui 1.217,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

	Preso atto che la ditta Paoli Martorelli Mauro & C. Snc, con sede in Treia - C.da Camporota n. 56, CF/PI: 01931600439 si è resa disponibile all'esecuzione di tali nuove opera aggiuntive applicando un ribasso pari al 24,12%, determinando un importo contrattuale pari a 23.393,31 euro oltre iva come per legge (complessivo pari a 28.539,84 euro iva compresa);

	Considerata la ditta idonea alla realizzazione dell'intervento in oggetto e considerato il prezzo offerto congruo al lavoro da eseguire;

            Verificata la regolarità contributiva della ditta tramite l'acquisizione del durc on line prot. INAIL_15357721 del 01/03/2019;

       Acquisito il seguente codice cig: Z42282E1B4;

        Visto il codice CUP attribuito al progetto: J67J18000570004;
                Visto che per la copertura finanziaria dell'appalto è necessario imputare la somma di 28.539,94 euro al capitolo 2806/2 "SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO" impegno n. 93/2019 che presenta sufficiente disponibilità;
               Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016;
               Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
            Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa giunta comunale predeterminati;

DETERMINA

1) Di affidare i lavori edili di completamento della pista di pattinaggio, quali la demolizione di un'ulteriore porzione di calcestruzzo della soletta di base, la realizzazoine di ulteriori caditoie di raccolta acque meteoriche ed il risanamento del fondo di appoggio della nuova pavimentazione, la posa di ulteriori cordoli in travertino, alla ditta Paoli Martorelli Mauro & C. Snc, con sede in Treia - C.da Camporota n. 56, CF/PI: 01931600439 si è resa disponibile all'esecuzione di tali nuove opera aggiuntive applicando un ribasso pari al 24,12%, determinando un importo contrattuale pari a 23.393,31 euro oltre iva come per legge (complessivo pari a 28.539,84 euro iva compresa); 

2) Di imputare la spesa complessiva pari ad euro 28.539,94 (iva compresa) al capitolo 2806/2 "SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO" impegno n. 93/2019, che presenta sufficiente disponibilità;

3) Di dare atto che alla liquidazione dell'importo si procederà dopo la redazione della contabilità finale, redatta in contraddittorio, a cui seguirà fattura elettronica ed apposita liquidazione;

4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Cingoli.

              Il Responsabile dell'ufficio LL.PP.
                   Ing. Fabrizio Santori

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI