COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

C O P I A
---------
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  51   Del  11-07-2017

Oggetto:	APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PERICOLOSI SULLE VIE PUBBLICHE SITI IN LOCALITA'  COLLELEPRE E FRAZIONE GELAGNA BASSA NEL COMUNE DI  SERRAVALLE DI CHIENTI A SEGUITO DI GRAVE CRISI SISMICA CHE HA COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE CON FORTI SCOSSE DAL 26/10/2016, 30/10/2016 E SEGUENTI.	

L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di luglio alle ore 11:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

======================================================================

SANTAMARIANOVA GABRIELE	Sindaco	A	
PIERMARINI ISABELLA	Assessore	P	
RICCI PIETRO	Assessore	P	

======================================================================

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume  la  presidenza il Signor PIERMARINI ISABELLA in qualità di Assessore e partecipa il Segretario Montaruli Angelo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 
- che in data 24/08/2016 si  è verificato un evento sismico di magnitudo mg.6.0 che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale;

- che in data 26/10/2016 si sono verificati due nuovi eventi sismici ancora più gravi del precedente, rispettivamente di magnitudo 5.4 e  5.9 che hanno aggravato le condizioni statiche degli edifici già lesionati;

-	che in data 30/10/2016 si  è verificato un evento sismico di magnitudo mg. 6.5 che ha ulteriormente aggravato le condizioni del patrimonio edilizio del comune di Serravalle di Chienti; 

Considerato che le scosse di notevole intensità che hanno colpito il territorio comunale e le successive scosse di forte intensità ancora in essere hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse, anche di notevole intensità, e che si è reso  necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

Visti  i verbali di somma urgenza redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico:

- Verbale prot. 4241 del 05/07/2017 redatto dalla Responsabile dell’UTC con cui si da atto della  necessità di intervenire con “somma urgenza” ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, così come richiamato dall’ordinanza n. 388/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuando opere di messa in sicurezza mediante demolizione dell’edificio di proprietà privata identificato catastalmente al F. 76  p.lla 148 prospiciente uno spazio pubblico e la via pubblica sito in località Collelepre nel Comune di Serravalle di Chienti e tutto quanto altro necessario per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità affidando alla ditta IMPRESA EDILE PISELLI AMEDEO & C. S.A.S. con sede in fraz. Roti n. 21 – 62036 Pievetorina (MC) - P.IVA  01038080436, la quale contattata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità, ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile l’opera di messa in sicurezza del bene sopra menzionato con opere provvisionali necessarie alla tutela della pubblica e privata incolumità;

- Verbale prot.  4277 del 06/07/2017 redatto dalla Responsabile dell’UTC con cui si da atto della  necessità di intervenire con “somma urgenza” ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, così come richiamato dall’ordinanza n. 388/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuando opere di messa in sicurezza dell’immobile di proprietà privata, identificato catastalmente al F. 26 p.lla 281/282 prospiciente la via principale che attraversa l’abitato della fraz. di Gelagna Bassa (ex SS 77)nel comune di Serravalle di Chienti e tutto quanto altro necessario per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità affidando alla ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI MACCARI LUCA & C. S.N.C. con sede in c.da Gagliano n. 12 – 62032 Camerino (MC) - P.IVA  01449350436, la quale contattata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità, ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile l’opera di messa in sicurezza del bene sopra menzionato con opere provvisionali necessarie alla tutela della pubblica e privata incolumità;

- Verbale prot.  4279 del 06/07/2017 redatto dalla Responsabile dell’UTC con cui si da atto della  necessità di intervenire con “somma urgenza” ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, così come richiamato dall’ordinanza n. 388/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuando opere di messa in sicurezza dell’immobile di proprietà privata, identificato catastalmente al F. 26 p.lla 280 prospiciente la via principale che attraversa l’abitato della fraz. di Gelagna Bassa (ex SS 77) nel comune di Serravalle di Chienti e tutto quanto altro necessario per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità affidando alla ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI MACCARI LUCA & C. S.N.C. con sede in c.da Gagliano n. 12 – 62032 Camerino (MC) - P.IVA  01449350436, la quale contattata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità, ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile l’opera di messa in sicurezza del bene sopra menzionato con opere provvisionali necessarie alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Considerato che ai sensi del c. 4 dell’art. 163 del D.lgs 50/2016 il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori comprendente i seguenti documenti;

Preso atto che sono stati eseguiti i rispettivi seguenti GTS:
- GTS n. 1960 del 03/05/2017 per l’edificio sito in frazione Collelepre F. 76 p.lla 148   nel quale è stato espresso parere relativo alla necessità di demolizione totale (D2) dell’edificio per la messa in sicurezza del fabbricato sopra menzionato;
- GTS n. 2603 del 24/05/2017  per l’edificio sito in frazione Gelagna Bassa F. 26 p.lla 281  nel quale è stato espresso parere relativo alla necessità di realizzare un’opera provvisionale finalizzata a garantire la messa in sicurezza del fabbricato sopra menzionato;
- GTS n. 1842 del 09/03/2017  per l’edificio sito in frazione Gelagna Bassa F. 26 p.lla 280  nel quale è stato espresso parere relativo alla necessità di realizzare un’opera provvisionale finalizzata a garantire la messa in sicurezza del fabbricato sopra menzionato;

Viste:
- la nota prot. 3899 del 19/06/2017 da parte del tecnico incaricato arch. Claudio Mariani di Muccia (MC) con la quale è stata trasmessa la perizia giustificativa comprendente il progetto dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio privato sito in fraz. Collelepre (F. 76 p.lla 148) nel comune di Serravalle di Chienti;
- la nota prot. 3900 del 19/06/2017 da parte del tecnico incaricato arch. Claudio Mariani di Muccia (MC) con la quale è stata trasmessa la perizia giustificativa comprendente il progetto dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio privato sito in fraz. Gelagna Bassa (F. 26 p.lla 281-282)  nel comune di Serravalle di Chienti;
- la nota prot. 3228 del 19/05/2017 da parte del tecnico incaricato ing. Danilo Carlini di Treia (MC) con la quale è stata trasmessa la perizia giustificativa comprendente il progetto dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio privato sito in fraz. Gelagna Bassa (F. 26 p.lla 280)  nel comune di Serravalle di Chienti;

Visti i seguenti documenti di cui si compongono i suddetti progetti:  

EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLELEPRE F. 76 P.LLA 148
- relazione tecnica e QTE;
- computo metrico estimativo;
- Tav. P01 stato attuale e interventi di progetto;
- Elenco prezzi
-EDIFICIO SITO IN FRAZ. GELAGNA BASSA F. 26 P.LLE 281-282
- relazione tecnica e QTE;
- computo metrico estimativo;
- Tav. P01 stato attuale e interventi di progetto;
- Elenco prezzi

-EDIFICIO SITO IN FRAZ. GELAGNA BASSA F. 26 P.LLA 280
- relazione tecnico illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- Costi sicurezza;
- elenco prezzi
- doc. Fotografica;
- piano di manutenzione;
- stato di fatto;
- quadro fessurativo;
- progetto intervento di messa in sicurezza;
- QTE;

Visto gli importi di spesa relativi ai lavori di messa in sicurezza dei suddetti manufatti  mediante opere di demolizione e opere provvisionali necessarie alla tutela della pubblica e privata incolumità e dei beni stessi che di seguito si elencano:

1)	opere di messa in sicurezza mediante demolizione di edificio sito in frazione Collelepre nel comune di Serravalle di Chienti  (MC) F. 76 p.lla 148:
importo totale intervento € 40.828,27  di cui € 30.465,93 per lavori al netto del ribasso del 20% ed € 10.362,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
2)	opere di messa in sicurezza edificio sito in frazione Gelagna Bassa  nel comune di Serravalle di Chienti  (MC) – F. 26 p.lla 281/282:
importo totale intervento € 18.122,67 di cui € 13.517,95 per lavori  al netto del ribasso del 20% ed € 4.604,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
3)	opere di messa in sicurezza edificio sito in frazione Gelagna Bassa  nel comune di Serravalle di Chienti  (MC) – F. 26 p.lla 280:
importo totale intervento € 18.874,25 di cui € 14.077,87 per lavori  al netto del ribasso del 20% ed € 4.796,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Ritenuto pertanto di approvare i suddetti verbali e provvedimenti di somma urgenza;

Preso atto che il sig. Talamonti Giulio in qualità di proprietario dell’edificio sito in  fraz. Collelepre  con nota prot. 3378  del 26/05/2017  ha autorizzato l’esecuzione dei lavori di demolizione del proprio edificio;

Preso atto che il sig. Di Vito Stefano  in qualità di comproprietario dell’edificio sito in frazione Gelagna Bassa  F. 26 p.lla 280 con nota prot. 4357 del 10/07/2017  ha autorizzato l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del proprio edificio;

Preso atto che la sig.ra Szcepanska Jolanta  in qualità di proprietaria dell’edificio sito in frazione Gelagna Bassa F. 26 p.lla 281/282  con nota prot. 4353 del 10/07/2017  ha autorizzato l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del proprio edificio;

Viste le schede di valutazione GTS:

-  SCHEDA VALUTAZIONE GTS  CCR N.  1960 DEL 03/05/2017  SCHEDA N. 07DEL 03/05/2017
“edificio disabilitato in muratura con pietrame a forma irregolare. La copertura leggera non è spingente i danni sono preesistenti. L’edificio è contiguo ad un altro abitato di proprietà di Fedeli Giuseppe (p.lla n. 199).
Quadro delle lesioni:
lesioni gravi alla muratura per oltre 2/3 (vetuste) copertura quasi interamente crollata (vetusta)
Pericolo di crollo:
inagibilità indotta: il presente edificio rende inagibile il fabbricato di proprietà di Fedeli Giuseppe.
Si prescrive la chiusura della strada d’accesso comunale

- SCHEDA VALUTAZIONE GTS  CCR N.  2603 DEL 24/05/2017  SCHEDA N. 2 DEL 24/05/2017
“l’edificio si presenta in condizioni di gravi condizioni strutturali dovute a vetustà e abbandono. Si ritiene necessaria la realizzazione di una opera provvisionale finalizzata a garantire la messa in sicurezza della facciata prospiciente la pubblica via. Sbadaccchiatura delle aperture del piano primo e secondo. richiesta di intervento dei VV.F: per la rimozione delle parti pericolanti del tetto.
- SCHEDA VALUTAZIONE GTS  CCR N.  1842 DEL 09/03/2017  SCHEDA N. 13 DEL 09/03/2017
“per la messa in sicurezza è necessario contenere il tentativo di distacco dell’angolata causata dalla spinta del puntone del padiglione. Le opere necessarie sono quelle di cerchiaggio e contenimento delle pareti murarie distaccate. E’ necessario un progetto specifico per definire la soluzione tecnica più idonea.””

Visto che la suddetta tipologia di spesa è da rendicontare alla Regione Marche mediante il sistema Cohesionworkpa In cui l’amministrazione comunale ha ritenuto indicare già le somme necessarie presunte necessarie per fronteggiare la prima emergenza sismica;

Visto l’art.  163 del D.Lgs 50/2016, così come richiamato dall’ordinanza n. 388/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l’ordinanza n. 388/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista e richiamata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERG16/0072035 del 22/12/2016 in forza della quale Gli    oneri    finanziari     con nessi     con     la     realizzazione     degli     interventi     finalizzati    alla salvaguardia   della   pubblica   incolumità   sono   a   carico   dei   fondi    stanziati    per    la   gestione emergenziale  e  gestiti  mediante  le  contabilità   speciali   istituite   nelle   4   Regioni   interessate, figurando  tali  tipologie  di  spese  tra   quelle   già   segnalate   come   ammissibili  nella   nota   prot. TERAG 16/0044398 del  3 settembre 2016 che,  al punto  7, prevede  le “misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia  in  amministrazione diretta” . In tal senso,  coerentemente con quanto previsto nella citata nota, il Comune procede  direttamente  per  interventi di  importo  complessivo  inferiore  a  40.000,00   euro,  mentre   per   importi  superiori  acquisisce  il preventivo  nulla-osta della direzione di protezione  civile della Regione, che si esprime entro 3 giorni dalla richiesta e può richiedere modifiche finalizzate alla concessione del richiesto  nulla-osta;

Visto che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 della legge 18/8/2000 n.267, ha espresso parere favorevole:

-i responsabili dei servizi interessati, ciascuno  per quanto concerne la propria regolarità  tecnica in base ai verbali di affidamento;

-il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1)	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)	di approvare i verbali e provvedimenti di  somma urgenza prot. 4241 del 05/07/2017, prot.  4277 del 06/07/2017 e prot.  4279 del 06/07/2017 in premessa citati  quale  parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)	di dare atto che con i suddetti verbali di somma urgenza prot. 4241 del 05/07/2017 sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza specificati in premessa alla ditta IMPRESA EDILE PISELLI AMEDEO & C. S.A.S. con sede in fraz. Roti n. 21 – 62036 Pievetorina (MC) - P.IVA  01038080436 di importo totale dell’intervento pari ad € 40.828,27 IVA inclusa ,  con verbali di somma urgenza prot.  4277 del 06/07/2017 e prot.  4279 del 06/07/2017  sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza specificati in premessa alla ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA F.LLI MACCARI LUCA E GIANMARCO S.N.C. con sede in c.da Gagliano n. 12 – 62032 Camerino (MC) P.IVA 01449350436 rispettivamente di importi totali pari ad € 18.122,67  e di 18.874,25 IVA inclusa; 

4)	di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Federica Fallana;

5)	di precisare che le somme a consuntivo che il  Responsabile del servizio determinerà con proprio atto  verranno rendicontate alla Regione Marche con il sistema CohesionworkPA per il rimborso delle stesse.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario	Il Assessore	
f.to Montaruli Angelo	 f.to PIERMARINI ISABELLA	

====================================================================
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura
finanziaria, ai sensi dell'artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.
 
Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.606
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 18-07-17
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo
=====================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, lì 18-07-17
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

======================================================================

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio