COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

C O P I A
---------
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  13   Del  13-02-2018

Oggetto:	SISMA 2016 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FRAZ. TAVERNE COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI F. 51 P.LLE 416 E 286. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di febbraio alle ore 18:00, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

======================================================================

SANTAMARIANOVA GABRIELE	Sindaco	P	
PIERMARINI ISABELLA	Assessore	A	
RICCI PIETRO	Assessore	P	

======================================================================

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume  la  presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Montaruli Angelo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 
- che in data 24/08/2016 si  è verificato un evento sismico di magnitudo mg.6.0 che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale;

- che in data 26/10/2016 si sono verificati due nuovi eventi sismici ancora più gravi del precedente, rispettivamente di magnitudo 5.4 e  5.9 che hanno aggravato le condizioni statiche degli edifici già lesionati;

-	che in data 30/10/2016 si  è verificato un evento sismico di magnitudo mg.6.5 che ha ulteriormente aggravato le condizioni del patrimonio edilizio del comune di Serravalle di Chienti; 

Considerato che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si è reso  necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

Considerato che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il territorio del comune di Serravalle di Chienti gravi danni colpendo il patrimonio edilizio, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili.

Considerato che con Deliberazione n. 79 del 14/11/2017 è stato approvato il verbale di somma urgenza prot. 6912 del 09/11/2017 con il quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza dell’edificio, mediante demolizione dell’intero fabbricato di proprietà privata sito in frazione Taverne  nel comune di Serravalle di Chienti  (MC) – F. 51 p.lle 286-418, in quanto pericoloso su vie pubbliche,  alla ditta CARLINI GIOVANNI con sede in  via Carpinete n. 10, 62020 Belforte del Chienti (MC) - P.IVA 00639510437per l’importo totale pari ad  € 43.107,62 di cui € 31.535,03 per lavori  al netto del ribasso del 20% ed € 11.572,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione IVA inclusa;

Vista e richiamata la determinazione n. 117 del 14/06/2017 e la successiva determina di aumento di impegno di spesa n. 136 del 11/07/2017 con la quale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 163/2006, è stato affidato  al geom. Bruno Simoni iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Macerata al n° 1279, con studio tecnico in via  Rocco Chinnici n. 4 – 62100 Macerata – P. IVA 01438510438, l’incarico per la  progettazione e la D.L. dell’intervento dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI NELLA FRAZIONE DI TAVERNE (F.51 P.LLA 237-416 286 – 243 SUB. 2) (CIG ZD01EFFECD) ed impegnati complessivi € 6.469,48 sui fondi del cap. 2474 “FONDO SPESE EMERGENZA TERREMOTO” cod. bil. 08.01-1.03.02.09.011- cod. Siope 1802 del B.P. 2017 gestione competenza;

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza il D.L. geom. Bruno Simoni nell’eseguire la demolizione prevista ha verificato che le murature presenti in corrispondenza dei fabbricati confinanti risultavano in pessime condizioni di stabilità e che “tale situazione era imprevedibile in fase di progettazione poiché i fabbricati erano inaccessibili e dall’esterno non si riusciva a visionare il reale stato delle murature stesse”  ed ha pertanto ritenuto opportuno integrare gli interventi previsti in progetto per mettere in sicurezza i danni di tali murature che si erano potuti rilevare soltanto a demolizione avviata con l’obiettivo di rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità; 

Considerato che il D.L. geom. Bruno Simoni ha ravvisato la necessità di presentare la variante in corso d’opera che consiste in:
“L’intervento proposto in fase progettuale prevedeva di rimuovere l’intonaco esistente, chiudere le nicchie, eseguire un intonaco di sbruffatura, istallare dei profilati in acciaio di tipo a “C” da 120, su tre livelli equidistanti ed irrigiditi agli angoli con un ferri piatti da 100x7 mm.
Allo stato attuale parte degli interventi non possono essere più eseguiti a causa della precarietà delle murature.
Con la presente variante si prevede di eseguire le seguenti lavorazioni:
-	Istallazione di ponteggio
-	Riprese di murature con metodo scuci-cuci
-	Demolizione intonaco
-	Intonaco di sbruffatura
-	Realizzazione soletta al piano terra
-	Istallazione di profilati in acciaio IPE 180
Come primo intervento sarà necessario realizzare una soletta in c.a. al piano terra e successivamente istallare il ponteggio.
Quest’ultimo si rende necessario poiché gli interventi sulle murature sono pesanti e la piattaforma aerea prevista in progetto risulta non idonea.
Ultimate le murature si procederà allo smontaggio del ponteggio e tramite delle piatteforme aeree si istallerà la struttura di sostegno in acciaio realizzata con profilati in acciaio IPE 180.
Sarà composta per ogni lato da n. 5 profilati in acciaio IPE 180 ancorati verticalmente per tutta la loro altezza alla murature e contrastati da altrettanti profilati in acciaio IPE 180 in senso verticale, di cui i primi n. 5 a circa 3.00 mt di altezza e i restanti n. 5 alla massima estremità possibile.”

Preso atto che il D.L. nella relazione tecnica ha dichiarato che la variante di che trattasi è redatta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 articolo n. 106 comma 1 lettera c) punto 1) “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” e punto 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;

Visto la nota del 15/01/2018  acquisita al prot. 818 del 03/02/2018  con la quale il D.L. geom. Bruno Simoni ha trasmesso  la variante dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio sito in fraz. Taverne del Comune di Serravalle di Chienti, identificato catastalmente al F. 51 p.lle 286-418, composta dai seguenti elaborati di variante :

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici stato di progetto;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro Tecnico Economico Tav. 10;
- Quadro di Raffronto;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Visto gli importi di spesa relativi alla suddetta variante dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio sito in fraz. Taverne nel Comune di Serravalle di Chienti, identificato catastalmente al F. 51 p.lle 286-418 desunti dal seguente QTE di raffronto;

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO
	
LAVORI A MISURA	PROGETTO AGGIUDICATO	
PERIZIA DI VARIANTE	
			
Importo lavori per opere edili	€ 38.932,13	€ 51.380,05	
Importo soggetto a ribasso	€ 36.985,52	€ 48.811,05	
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.946,61	€ 2.569,00	
Adetrarre il ribasso del 20% su 48,811,08	€ 7.397,10	€ 9.762,21	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 31.535,03	€ 41.617,84	

SOMME A DISPOSIZIONE			
I.v.a. sui lavori 22%	€ 6.937,71	€ 9.155,92	
Importo netto spese tecniche 5%	€ 1.946,61	€ 2.569,00	
Accantonamento ex art. 113 d.lgs 50/2016 (2% del 25% dell'importo dei lavori ai sensi del regolamento per la disciplina dell'incentivo dell'attività di progettazione svolta da i dipendenti comunali approvato D.C.C. n. 16 del 24/03/2017)	

€ 194,66	

€ 256,90	
i.v.a. su spese tecniche e cassa	€ 547,00	€ 690,55	
Imprevisti 5%	€ 1.946,61	€ 2.569,00	
TOTALE	€ 11.572,58	€ 15.241,38	

IMPORTO  COMPLESSIVO  DELL'INTERVENTO	€	43.107,61	€ 56.859,22	

Preso atto dalla su menzionata relazione tecnica redatta dal D.L. che “tali circostanze comportano un aumento di spesa conseguente le maggiori lavorazioni così riassunto:
-	Importo di variante (al netto del ribasso d’asta ed inclusi gli oneri di sicurezza) € 41.617,84
-	Importo di aggiudicazione (al netto del ribasso d’asta ed inclusi gli oneri di sicurezza) € 31.535,03
Comportando la presente perizia di variante una maggior spesa di € 10.082,81 pari al 31,97% dell’importo di contratto, pertanto inferiore al 50% come indicato al comma 7 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 sarà possibile modificare il contratto”;

Visto l’art.106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del decreto 18 Aprile 2016, n.50 comma 1): “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
………
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni… :
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamenti o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Visto l’art.106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del decreto 18 Aprile 2016, n.50 comma 7): “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”;

Visto che la suddetta tipologia di spesa è da rendicontare alla Regione Marche mediante il sistema Cohesionworkpa;

Visto che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 della legge 18/8/2000 n.267, ha espresso parere favorevole:

-il responsabile del servizio tecnico, ciascuno  per quanto concerne la propria regolarità  tecnica in base ai verbali di affidamento;

-il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1)	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)	 di dare atto che la Perizia di Variante in corso d’opera al progetto dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio sito in fraz. Taverne nel Comune di Serravalle di Chienti, identificato catastalmente al F. 51 p.lle 286-418, redatta dal D.L. geom. Bruno Simoni di Macerata, la cui necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore di che trattasi, comprende complessivamente i seguenti elaborati e documenti:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici stato di progetto;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro Tecnico Economico Tav. 10;
- Quadro di Raffronto;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

3) di approvare la documentazione di cui al punto 2) ed il conseguente Quadro Tecnico Economico di Variante che risulta così articolato:
		
LAVORI A MISURA	
PERIZIA DI VARIANTE	
		
Importo lavori per opere edili	€ 51.380,05	
Importo soggetto a ribasso	€ 48.811,05	
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.569,00	
Adetrarre il ribasso del 20% su 48,811,08	€ 9.762,21	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 41.617,84	

SOMME A DISPOSIZIONE		
I.v.a. sui lavori 22%	€ 9.155,92	
Importo netto spese tecniche 5%	€ 2.569,00	
Accantonamento ex art. 113 d.lgs 50/2016 (2% del 25% dell'importo dei lavori ai sensi del regolamento per la disciplina dell'incentivo dell'attività di progettazione svolta da i dipendenti comunali approvato D.C.C. n. 16 del 24/03/2017)	

€ 256,90	
i.v.a. su spese tecniche e cassa	€ 690,55	
Imprevisti 5%	€ 2.569,00	
TOTALE	€ 15.241,38	

IMPORTO  COMPLESSIVO  DELL'INTERVENTO	€ 56.859,22	

4)	di dare atto che la presente variante in corso d’opera comporta l’aumento dell’importo dei lavori pari ad € 10.082,81 e che tale aumento non eccede il 50%  del valore del contratto iniziale,  pari ad €  31.535,03, come indicato dal comma 7) dell’art. 106 del decreto 18 Aprile 2016, n.50 e che la variante è stata redatta dal D.L. geom. Bruno Simoni ai sensi della lettera  c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni… :
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamenti o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
del comma 1 dell’art. 106 del decreto 18 Aprile 2016, n.50

5)	Di provvedere alla sottoscrizione della  determina di impegno che sarà redatta dall’Ufficio Tecnico comunale, in luogo della stipula dell'atto contrattuale aggiuntivo di Variante  per un importo suppletivo dei lavori di € 10.082,81 + IVA al 22%, al netto del ribasso d’asta del 20%;

6)	di dare atto che le opere previste nella presente variante, a seguito di quanto descritto nella relazione tecnica di Variante dal D.L. geom. Bruno Simoni di Macerata modificano l'importo totale dell'intervento incrementando la cifra precedentemente impegnata di € 43.107,61, finanziata con i fondi della Regione Marche tramite il sistema CohesionworkPA per un costo aggiuntivo dell'intervento di  € 13.751,61;

7)	di impegnare  l’ulteriore importo di € 13.751,61 da imputare al capitolo 2686/1 Fondo spese emergenza terremoto cod. bilancio 09.02-2.04.01.00.000 del BP 2018 in fase di predisposizione;   

8)	di precisare che le somme verranno rendicontate alla Regione Marche con il sistema CohesionworkPA per il rimborso delle stesse, somme idoneamente stanziate a seguito variazione al bilancio di previsione anno 2018.

9)	di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Federica Fallana in qualità di Responsabile servizio Tecnico;

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi;

                  DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario	Il Sindaco	
f.to Montaruli Angelo	 f.to SANTAMARIANOVA GABRIELE	

====================================================================
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura
finanziaria, ai sensi dell'artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.
 
Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.157
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 14-02-18
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo
=====================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, lì 14-02-18
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

======================================================================

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio