Visto L’Assessore Competente					

Registro Generale n. 34

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

N. 13 DEL 09-04-2018

Ufficio: TECNICO 		    	

Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Corneto e Cataluccia. Approvazione perizia di variante.	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di aprile  nella Sede Comunale.

IL SINDACO
In qualità di responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art. 53 c. 23 della legge n.388/2000 così come modificato dall’art.29 comma 4, della legge n.448 del 2001.

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende realizzare alcuni lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, in particolare lungo Via Corneto e Via Cataluccia;

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 dell’11.12.2017 si è provveduto:
- ad approvare il progetto di fattibilità dei “Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Corneto e Cataluccia”, redatto dal tecnico comunale Geom. Alberto Liberati, nell’importo di euro 45.000,00 di cui euro 39.978,90 per lavori ed euro 5.021,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- ad assegnare al Responsabile del Servizio tecnico la somma di euro 45.000,00 necessaria per l’esecuzione dei lavori in argomento, mediante imputazione al capitolo 2836, codice 10.05-2.02.01.09.012 gestione competenza del vigente bilancio comunale anno 2017;
- a nominare ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, responsabile unico del procedimento di che trattasi, il Geom. Alberto Liberati, addetto all’ufficio tecnico comunale;

VISTO che con determinazione del Responsabile dell’UTC n. 75 del 15.12.2017 si è provveduto:
- ad approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Corneto e Cataluccia”, redatto dal tecnico comunale Geom. Alberto Liberati, nell’importo di euro 45.000,00 di cui euro 39.978,90 per lavori ed euro 5.021,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- ad impegnare la somma di euro 45.000,00 necessaria per l’esecuzione dei lavori in argomento, mediante imputazione al capitolo 2836, codice 10.05-2.02.01.09.012 gestione competenza del vigente bilancio comunale anno 2017;

VISTO che con determinazione del Responsabile dell’UTC n. 2 del 26.01.2018 si è provveduto ad aggiudicare in modo definitivo ed efficace i lavori in argomento alla ditta Ciucaloni Unipersonale srl, con sede a Massa Fermana in via Fontecorata n. 3, per l’importo al netto del ribasso d’asta del 25,70%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di euro 30.012,56;

VISTO il contratto rep. n. 20/2018 del 16.02.2018;

VISTO che il Direttore dei Lavori e tecnico comunale -Geom. Alberto Liberati- ha predisposto la perizia di variante ai lavori in argomento, dell’importo di euro 45.000,00 di cui euro 33.978,39 per lavori al netto del ribasso d’asta ed euro 11.021,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:
-	tav. 1: relazione tecnica-illustrativa;
-	tav. 2: computo metrico estimativo;
-	tav. 3: quadro di raffronto;
-	tav. 4: atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

DATO ATTO che dalla relazione tecnica, allegata alla perizia di variante, si evince che:
- la stessa si giustifica e può essere ammessa ai sensi del comma 2, dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni;
- la perizia di variante in argomento comporta un aumento dell’importo di contratto del 13,2% e non comporta alcun incremento dell’importo del progetto;

VISTI:
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1)- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la perizia di variante dei “Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Corneto e Cataluccia”, predisposta dal Direttore dei Lavori e tecnico comunale -Geom. Alberto Liberati-, dell’importo di euro 45.000,00 di cui euro 33.978,39 per lavori al netto del ribasso d’asta ed euro 11.021,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:
-	tav. 1: relazione tecnica-illustrativa;
-	tav. 2: computo metrico estimativo;
-	tav. 3: quadro di raffronto;
-	tav. 4: atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

3) di dare atto che la perizia di variante in argomento comporta un aumento dell’importo di contratto del 13,02% e non comporta alcun incremento dell’importo del progetto;

4)- di dare atto che non si rende necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto l’approvazione della variante non comporta ulteriore impegno di spesa;

5)- di dare atto altresì che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                      IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Geom. Alberto Liberati                                    FORTI GIUSEPPE

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Li  09-04-2018
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO  
FORTI GIUSEPPE

La presente sarà pubblicata dal 14-04-2018 al 29-04-2018

Esecutiva il 09-04-2018