COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 310 del Reg.   Data 20-12-18                  

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza chiesa Sant'Agostino-
Approvazione perizia di variante.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti

del mese di dicembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
•	con decreto del Sindaco n. 3 del 6.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
•	con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data del 07.04.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la determinazione n.54 del 10.07.2017 del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica con la quale è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori per la Messa in Sicurezza della Chiesa di Sant’Agostino all’Ing. Paolo Voltattorni e all’ Arch. Stefano Novelli e sono stati assunti i relativi  seguenti impegni di spesa al Cap. 2506:
•	Ing. Paolo Voltattorni, Imp. 263/2017, € 3.137,51; 
•	Arch. Stefano Novelli, Imp. 264/2017, € 2.472,82;

Vista la determinazione n.33 del 08.03.2018 del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica con la quale  è stato approvato il progetto di Messa in Sicurezza della Chiesa di Sant’Agostino per un importo complessivo di € 115.460,62, di cui € 94.647,08  oltre IVA per lavori a base d’asta, finanziando le opere con i fondi della contabilità speciale, stanziati con Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016, e con la quale, al contempo, è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori, mediante le modalità previste dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e nel caso specifico previa consultazione di n.4 operatori economici al fine di avere un termine di raffronto, approvando lettera d’invito da inviare alle ditte selezionate, il cui elenco, non soggetto a pubblicazione, è conservato al fascicolo atti dell’ufficio tecnico comunale;

Vista la determinazione n. 59 del 03 maggio 2018, con la quale  a seguito di procedimento di gara, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’impresa Siquini Costruzioni srl, Via Borgo Garibaldi n.154/1, 63072 Castignano (AP) (P. IVA 01338300443). per la somma di € 91.715,18 ( € 89.556,95  per lavori al netto del ribasso d’asta del 3,17% e € 2.158,23  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ) oltre IVA al 10% pari ad € 9.171,52, per un importo complessivo pari ad  € 100.886,70, 

Vista la determinazione n.  176 del 03.09.2018   con la quale è stato revocato, a seguito di rinuncia,  l’incarico di DD.LL. e Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, all’Ing. Paolo Voltattorni, nato a Grottammare il 28.04.1961, con studio in via S. Martino n. 91, Codice Fiscale: VLTPLA61D28E207U Partita IVA: 01325860441 ed all’arch. Stefano Novelli nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 16.11.1979, con studio in Grottammare, via Marche n. 39, C.F. NVLSFN79S16H769H Partita IVA: 02241660444, e di conseguenza affidato  l’incarico di DD.LL. e Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva “Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Agostino” all’Arch. Fernando De Santis, nato a Santa Vittoria in Matenano il 14.09.1961, con studio in Via Vicolo Innominato n. 4, Codice Fiscale: DSNFNN61P14I315L Partita IVA: 01297200444, per l’importo di €. 2.469,67 CNPAIA e IVA compresi

Visto che il suindicato professionista a seguito del subentro in qualità di direttore dei lavori ha ritenuto di dover modificare la parte del progetto sugli interventi previsti per la messa in sicurezza delle due pareti esterne oltre che a ricorrere a modalità di intervento all’interno dell’edificio  con mezzi idonei per assicurare l’assoluta sicurezza delle maestranze, come si evince3 nella relazione tecnica-storica.

Visto che di conseguenza con nota del  04-12-2018 prot. 6527, il Direttore dei Lavori, sentito  il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire  una perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 18.288,21+IVA, che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto a euro 110.003,92+IVA, e composta dei seguenti elaborati di perizia: 
1) Relazione storica-tecnica di variante
2) Computo metrico estimativo
3)Elenco prezzi
4) Quadro comparativo di raffronto
5)Atto di sottomissione
6) Tavola 1 stato di fatto
7) Tavola 2 stato di variante

– che le ragioni per la redazione della perizia di variante identificano la fattispecie di una variante necessaria tra quelle previste dall’art. 106 comma 12 in quanto il maggiore importo dei lavori necessari sono inferiori al 20% di quello affidato;
-che il nuovo quadro economico della spesa totale di € 55.000,00 che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A)	Somme per lavori:
      Importo lavori	euro  113.505,35
     A detrarre importo sicurezza	euro      3.050,00
     Importo soggetto a ribasso	euro  110.455,35
     Ribasso d’asta del 3,17%	euro      3.501,43
     Importo netto	euro  106.953,92
     Importo sicurezza	euro      3.050,00
	-----------------------
     Importo totale lavori di perzia 	euro   110.003,92	           110.003,92

B)	Somme a disposizione dell’amministrazione:
IVA sui lavori 10%	euro    11.000,39
Onorari professionali tutto compreso	euro    15.828,68
Lavori in economia ed imprevisti	euro    11.003,39
IVA sui lavori economia ed imprevisti	euro      1.100,34
	------------------------
Sommano	euro   38.932,80              38.932,80
                                                                                                                   ------------------
Totale importo lavori                                                                                €    148.936,72

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l’approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell’art. 107 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa ed ai sensi dell’art. 106 comma 12 Dlgs n. 50/2016 e smi la  perizia di variante relativa ai lavori di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANT'AGOSTINO, redatta dal direttore dei lavori arch. Fernando De Santis composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo netto contrattuale da euro 91.715,18 + IVA ad euro 110.003,92, oltre IVA contenuto nell’ambito del quinto d’obbligo.

2) Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell’opera di euro 148.936,72 così suddiviso:
C)	Somme per lavori:
      Importo lavori	euro  113.505,35
     A detrarre importo sicurezza	euro      3.050,00
     Importo soggetto a ribasso	euro  110.455,35
     Ribasso d’asta del 3,17%	euro      3.501,43
     Importo netto	euro  106.953,92
     Importo sicurezza	euro      3.050,00
	-----------------------
     Importo totale lavori di perzia 	euro   110.003,92	           110.003,92

D)	Somme a disposizione dell’amministrazione:
IVA sui lavori 10%	euro    11.000,39
Onorari professionali tutto compreso	euro    15.828,68
Lavori in economia ed imprevisti	euro    11.003,39
IVA sui lavori economia ed imprevisti	euro      1.100,34
	------------------------
Sommano	euro   38.932,80              38.932,80
                                                                                                                   ------------------
Totale importo lavori                                                                                €    148.936,72

3)Affidare, di conseguenza, alla all’impresa Siquini Costruzioni srl, Via Borgo Garibaldi n.154/1, 63072 Castignano (AP) (P. IVA 01338300443).i maggiori lavori previsti nella citata perizia per l’importo di € 18.288,21, oltre IVA al 10% pari ad € 1.828,82 e quindi per l’importo totale di € 20.117,03, come da  atto di sottomissione allegato nella perizia medesima, dando atto che l’importo contrattuale si eleva ad € 110.003,92 oltre IVA.

4) Di dare atto che la somma  totale di € 133.692,31 è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  dell’esercizio 2018 da modificare come segue:

Impegno 103/2018 da aumentare di € 20.117,61

Eserc. Finanz.	2018	Imp. 103/2018	
Cap./Art.	2506	Descrizione	Interventi marciapiede, aree destinate a container, camper, ecc.	
Intervento	 	Miss./Progr.	  11.01	PdC finanziario	2.02.01.09.999
	
Affidamento	Art. 36.C 2° lett a) Dlgs 50/2016	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.		
SIOPE		CIG	7432005C88	CUP	F93B17000000002	
Creditore	Siquini Costruzioni srl, Via Borgo Garibaldi n.154/1, 63072 Castignano (AP) (P. IVA 01338300443)	
Causale	Lavori messa in sicurezza chiesa S. Agostino	
Modalità finan.		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 121.004,31 compreso IVA 	Frazionabile in 12	======	

Impegno 244/2018 da aumentare di € 10.218,33

Eserc. Finanz.	2018	 Imp. 244/2018	
Cap./Art.	2506	Descrizione	Emergenza Terremoto, SISMA 2016	
Intervento	 	Miss./Progr.	  11.02	PdC finanziario	2.02.01.09.999
	
Affidamento	Diretto  Fuori MEPA	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.		
SIOPE		CIG	 ZD724DA71C	CUP	F96B17000000002	
Creditore	Arch. Fernando De Santis, nato a Santa Vittoria in Matenano il 14.09.1961, con studio in Via Vicolo Innominato n. 4, Codice Fiscale: DSNFNN61P14I315L Partita IVA: 01297200444,	
Causale	Incarico DD.LL e Coordinatore Sicurezza fase esecutiva e redazione perizia per lavori di Messa in sicurezza Chiesa Sant’Agostino	
Modalità finan.		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 12.688,00 compreso  CNPAIA e IVA 	Frazionabile in 12	======	

5)Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018	 	
Cap./Art.	2506	Descrizione	Emergenza Terremoto, SISMA 2016	
Intervento	 	Miss./Progr.	  11.02	PdC finanziario	2.02.01.09.999
	
Affidamento	Diretto  Fuori MEPA	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.		
SIOPE		CIG	 	CUP	F96B17000000002	
Creditore	Ditte da incaricare e definire	
Causale	Lavori in economia ed imprevisti somme a disposizione Messa in sicurezza Chiesa Sant’Agostino	
Modalità finan.		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 12.103,73 IVA comperesa	Frazionabile in 12	======	

6)Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la somma in entrata al capitolo 517 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, esercizio 2018;

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
 il presente provvedimento  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) Di Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla pubblicazione dello specifico avviso di variante di cui all’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

10) Di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
a)	 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
b)	 Responsabile del Servizio Finanziario ;
c)	 Direttore dei Lavori;

_________________________________________________________________________________
SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.