COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 188 del Reg.   Data 08-07-19                  

Oggetto: Lavori  messa  in  sicurezza patrimonio comunale e
strade  ( Legge n. 145 del 30-12-2018 )-Ristruttu=
razione-sostituzione di ringhiere. Proroga ultima=
zione lavori.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto

del mese di luglio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
•	con decreto del Sindaco n. 3 del 6.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
•	con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data del 07.04.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la determinazione n.124 del 02.05.2018 del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza patrimonio comunale e strade ( Legge n. 145 del 30-12-2018 )-Ristrutturazione-sostituzione di ringhiere. per un importo complessivo di € 40.000,00,  finanziando le opere con fondi dello Stato;

Vista la determinazione n.130 del 07.05.2018 del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi, alla ditta TANUCCI di Roberto e Piero snc  Zona Ind. S. Salvatore n. 1 63086-Force (AP) cf-pIVA 00739310449, per la somma di € 30.828,60 oltre IVA ;

Dato atto che il Legale rappresentante dell’ Impresa Tanucci srl ha dichiarato in sede di gara di avvalersi del subappalto per le seguenti lavorazioni: lavori ”…stradali, categoria OG3 nella misura del 30%...”;

Rilevato che in data 02.07.2019 prot. 3468  è pervenuta al protocollo di questo ente richiesta da parte della ditta Tanucci snc di sub-appaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la posa in opera di balaustre in legno presso il parco delle Rimemebranze per un importo complessivo presunto pari a € 9.190,00, alla ditta   CARDINALETTI srl con sede in Via F.lli Cervi n.55, 63020 Falerone (FM)  (P. IVA 01344390446);

Visto il verbale di consegna dei lavori del 0 maggio 2019 dal quale risulta che  i lavori medesimi devono essere ultimati in data 7 luglio 2019;

Vista la richiesta inoltrata dalla ditta affidataria del 04-07-2019 pervenuta in data 06-07-2019 prot. 3548, volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori di  giorni 31 ( trentuno )

Accertato, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Dlgs 18-04-2016 n. 50 e smi:
-che la causa per la richiesta della proroga è motivata dalle condizioni metereologiche  avversee e concessione autorizzazione da parte della Provincia settore viabilità, la cui domanda è stata presentata in data 05-07-2019, non ancora pervenuta, necessaria per occupare un tratto di strada provinciale con impalcatura per smontare e rimontare la ringhiera in piazza Berardino;
-che la richiesta è pervenuta in tempo utile;
-le cause sopracitate sono  indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili allì’Appaltatore:
-che il direttore dei lavori geom. Mirko Tiburzi ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni trentuno , come da sottoscrizione in calce alla richiesta della ditta, in considerazione delle circostanze e situazioni evidenziate; 

Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il DPR 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che non sussistano motivi per negare l’autorizzazione per la concessione della proroga;

D E T E R M I N A

1-Di concedere  alla ditta TANUCCI di Roberto e Piero snc  Zona Ind. S. Salvatore n. 1 63086-Force (AP) cf-pIVA 00739310449)  ditta affidataria dei lavori  messa in sicurezza patrimonio comunale e strade ( Legge n. 145 del 30-12-2018 )-Ristrutturazione-sostituzione di ringhiere, una proroga di giorni 31 ( trentuno ) per l’ultimazione dei lavori   in premessa specificati, computabili dalla data stabilita nel verbale di consegna al 07-07-2019, fermo restando che l’la ditta non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di affidamento lavori.

2-Di fissare la nuova data di ultimazione dei lavori al 07 Agosto 2019.

3- Di trasmettere copia delle presenrte determinazione alla direzione dei lavori  geom. Mirko Tiburzi ed alla ditta esecutrice TANUCCI di Roberto e Piero snc  Zona Ind. S. Salvatore n. 1 63086-Force

4-Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il Responsabile dell’Area Tecnico – manutentiva e vigilanza, sig. Fabrizio Vergari;

5-Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

_________________________________________________________________________________
SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.