COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 16 del Reg.   Data 08-02-18                  

Oggetto: Lavori  di  " Lavori di realizzazione n. 80 loculi
cimiteriali    [CIG   6934713234   -   CUP   F91E=
15000600007].".Approvazione    perizia di variante
senza  incremento  della spesa complessiva dell'o=

L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto

del mese di febbraio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
-	con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
-	con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data del 12.04.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTO l’atto n. 57 del 04 agosto 2016 con il quale la Giunta Municipale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di “ Realizzazione n. 80 loculi cimiteriali-“ per la somma di € 67.950,00 da finanziare  con fondi comunali derivanti dalla vendita delle concessioni ai singoli cittadini richiedenti;

VISTO l’atto n. 63 del 18.08.2016 con il quale il responsabile dell’area tecnicae ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione n. 80 loculi cimiteriali “per un importo di € 67.950,00, di cui € 51.000,00 oltre IVA per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 1.600,00+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  finanziando le opere da eseguire  con fondi comunali derivanti dalla vendita delle concessioni ai singoli cittadini richiedenti ed avviato una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori ed attribuito alla SUA di Fermo lo svolgimento delle attività di espletamento delle procedure atte all’individuazione della ditta mediante gara, con il seguente quadro economico:

	A) Importo per l'esecuzione dei lavori compresi O.S.                  52.600,00
   	  di cui  per oneri di sicurezza                                       1.600,00
         Importo a base d'asta                                                51.000,00

	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
          Per IVA sui lavori del 10%                                        5.260,00
          Per progettazione, DL, relaz.geol. e sicurezza          7.150,00
          Per collaudo statico                                                    800,00
          CNPAIA 4%                                                               318,00
          IVA 22%  su spese tecniche                                     1.818,96
          per arrotondamenti                                                         3,04                                                                                                             
                                                                                       SOMMA   15.350,00
                                                               TOTALE   PROGETTO      67.950,00

VISTO l’atto n. 423 del 07.10.2016 con la quale la SUA di Fermo ha aggiudicato  i lavori a misura alla ditta F.D.T. srl via Dante Alighieri n. 11  San Nicolo’ a Tordino (TE) per la somma di € 37.574,35 oltre IVA al netto del ribasso del 29,515% praticato in sede di gara;

VISTO l’atto n. 439 del 18.10.2016 con la quale la SUA di Fermo ha dato atto dell’aggiudicazione dei lavori di cui al proprio atto n. 423/2016 a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’art. 216 comma 13 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi;

VISTO l’atto del responsabile del servizio tecnico n. 84 del 14.10.2016 con il quale ha preso atto  dell’aggiudicazioone definitiva dei lavori alla ditta A.F.D.T. srl via Dante Alighieri n. 11  San Nicolo’ a Tordino (TE) per la somma di € 37.574,35 oltre IVA al netto del ribasso d’asta del 29,515 praticato in sede di gara;

VISTO il contratto stipulato in data 13.04.2017 n. 707 con la quale la ditta A.F.D.T. srl via Dante Alighieri n. 11  San Nicolo’ a Tordino (TE)  pIVA 01559020670  ha assunto definitivamente i lavori;

VISTO l’atto n. 150 del 30.12.2017 con il quale si è provveduto alla rideterminazione del nuovo quadro economico come segue:

A)	Importo lavori a base d’sta					€ 51.000,00
	A detrarre il ribasso d’asta del 29,515%			€ 15.052,65
Importo netto							€ 35.947,35
Oneri per la sicurezza						€  1.600,00
								-----------------
Importo netto affidato per l'esecuzione dei lavori      		€ 37.574,35        € 37.574,35

	B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione
Per IVA sui lavori del 10%                                        		€ 3.757,43
Per progettazione, DL, relaz.geol. e sicurezza      			€ 7.950,00
CNPAIA 4%                                                            			€    318,00
IVA 22%  su spese tecniche                                     		€ 1.818,96
Per collaudo statico ( Onorario € 650,00+CNPAIA (4%)+IVA(22%)	€    824,72 
Oneri SUA di Fermo per espletamento gara			€    161,50
Lavori su fattura per sistemazione scale	 (€ 2950.00+IVA (22%)	€ 3.599,00
Lavori in economia, imprevisti, maggiori quantità di categorie lavori, 
opere edilizie vari attinenti ai lavori, etc…				€ 7.114,00
IVA su lavori in economia, imprevisti, etc…			€    711,40
Automazione cancelli ingresso, realizzazione impianto di illuminazione
Opere edilizia varie attinenti al lavoro, a corpo ( IVA compresa)	€  3.068,64
Art. 113 D.Lgs. 50/2016					€  1.052,00
In detrazione							€     -30,00
                                                     			 SOMMA  30.345,65       € 30.345,65
                                                                           		TOTALE   PROGETTO                 € 67.920,00

– con istanza del 25.01.2018, pervenuta in data 29.01.2018. Prot. Gen. n. 497, il Direttore dei Lavori, sentito il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire  una perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 7.499,77, che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto a euro 45.047,12, e composta dei seguenti elaborati di perizia: 
1) Relazione
2) Computo metrico estimativo
3) Quadro comparativo di raffronto
4)Atto di sottomissione con elenco nyuovi prezzi
5) Verbale concorda mento nuovi prezzi
6) Elaborati grafici ( n. 2 )

– la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto e precisamente:
-In fase di esecuzione dei lavori si rende necessario approfondire la platea di fondazione con il conseguente aumento di calcestruzzo e ferro; sul lato sud è stata ampliata la platea di fondazione per la realizzazione di un muro  di contenimento al piano seminterrato.

– le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:
– che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria tra quelle previste dall’art. 106 comma 1 lettera c) in quanto sussistono le condizioni previste dal relativi punti 1 e 2:
1)	la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2)	la modifica non altera la natura generale del contratto;

– il nuovo quadro economico della spesa totale di € 67.920,00 che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A)	Somme per lavori:
1) importo lavori soggetti a ribasso	                      euro   61.640,23
Ribasso d’asta del 29,515%                                                           euro   18.193,11
                                                                                                    -----------------------
Importo netto lavori                                                                        euro  43.447,12
2) costo per la sicurezza dei cantieri 	                       euro    1.600,00
Totale somme per lavori	                       euro  45.047,12
B)	Somme a disposizione dell’amministrazione:
Imprevisti e lav. economia Su fattura 	                         euro    5.675,45………..
Spese tecniche 	                         euro   7.950,00
Spese per CNG 4% ….	                         euro        318,00............
IVA su spese tecniche 22%..................................                                       euro    1.818,96
Per collaudo statico ( Onorario € 650,00+CNPAIA (4%)+IVA(22%)	euro       824,72 
Oneri SUA di Fermo per espletamento gara				euro       161,50
Spesa compenso RUP art. 113 Dlgs 50/2016                                             euro     1.052,00.......
Pubblicità e per opere artistiche	                         euro
IVA 10% sui lavori	                         euro      4.504,71
IVA 10% sui lavori economia	                         euro         567,54
Totale somme a disposizione	                       euro    22.872,88
Totale complessivo                                                                            euro     67.920,00

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l’approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell’art. 107 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa ed ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) in quanto sussistono le condizioni previste dal relativi punti 1 e 2 e comma 12 la  perizia di variante relativa ai lavori di Realizzazione n. 80 loculi cimiteriali, redatta dal direttore dei lavori arch. Ermanno Antolini composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo netto contrattuale da euro . 37.547.35 + IVA ad euro 45.047,12, oltre IVA contenuto nell’ambito del quinto d’obbligo.

2) Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell’opera di euro . 67.920,00così suddiviso:
C)	Somme per lavori:
1) importo lavori soggetti a ribasso	                      euro   61.640,23
Ribasso d’asta del 29,515%                                                           euro   18.193,11
                                                                                                    -----------------------
Importo netto lavori                                                                        euro  43.447,12
2) costo per la sicurezza dei cantieri 	                       euro    1.600,00
Totale somme per lavori	                       euro  45.047,12
D)	Somme a disposizione dell’amministrazione:
Imprevisti e lav. economia Su fattura 	                         euro    5.675,45………..
Spese tecniche 	                         euro   7.950,00
Spese per CNG 4% ….	                         euro        318,00............
IVA su spese tecniche 22%..................................                                       euro    1.818,96
Per collaudo statico ( Onorario € 650,00+CNPAIA (4%)+IVA(22%)	euro       824,72 
Oneri SUA di Fermo per espletamento gara				euro       161,50
Spesa compenso RUP art. 113 Dlgs 50/2016                                             euro     1.052,00.......
Pubblicità e per opere artistiche	                         euro
IVA 10% sui lavori	                         euro      4.504,71
IVA 10% sui lavori economia	                         euro         567,54
Totale somme a disposizione	                       euro    22.872,88
Totale complessivo                                                                            euro     67.920,00

3) Affidare, di conseguenza, alla all’impresa A.F.D.T. srl via Dante Alighieri n. 11  San Nicolo’ a Tordino (TE)  pIVA 01559020670 maggiori lavori previsti nella citata perizia per l’importo di € 7.499,77, oltre IVA al 10% pari ad € 749,98 e quindi per l’importo totale di € 8.249,75, come da  atto di sottomissione allegato nella perizia medesima, dando atto che l’importo contrattuale si eleva ad € 45.047,12 oltre IVA.

4) Dare atto  che i maggiori lavori dell’importo di € 8.249,75 ( CIG 6934713234 -CUP F91E15000600007) sono finanziati con fondi comunali appositamente impegnati al cap. 2732/0 c.i. 217, autorizzando l’ufficio di ragioneria a creare il relativo sub impegno a favore della ditta A.F.D.T. srl via Dante Alighieri n. 11  San Nicolo’ a Tordino (TE)  pIVA 01559020670.

5) Rinviare la trascrizione del relativo sub impegno sul capitolo di cui al punto precedente e per l’importo ivi indicato a favore della ditta A.F.D.T. srl via Dante Alighieri n. 11  San Nicolo’ a Tordino (TE)  pIVA 01559020670 successivamente alla reimputazione del residuo al capitolo di che trattasi.

6) Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi com da Durc Online emesso dall’INAIL prot. 9442048 del 09.11.2017 con scadenza 09.03.2018.

7) Di precisare e ribadire che la liquidazione ed i pagamenti derivanti dal presente provvedimento, potranno avvenire solamente ed esclusivamente da parte del comune di Santa Vittoria in Matenano (FM),  solo dopo che la Giunta Municipale avrà approvato le risultanze del riaccertamento ordinario esercizio 2017 di cui all’art. 3 comma 4 Dlgs n. 118/2011 e s.m.i. dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2017 con relativi allegati e  proceduto, mediante determinazione, alla registrazione contabile della somma di cui sopra a favore della ditta incaricata nell’anno di competenza 2018.

8)-Precisare e ribadire ulteriormente che le liquidazioni ed i pagamenti degli stati di avanzamento e stato finale derivanti dal presente provvedimento, potranno avvenire solamente ed esclusivamente, da parte del comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), oltre a quanto stabilito nel punto precedente, nel rispetto delle vigenti normative di legge in merito al “ patto di stabilità “ e relative regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n. 78 e s.m.i., senza che la ditta possa richiedere interessi, indennità, svalutazione monetaria, risarcimenti o altro a vario titolo in caso di ritardo dei pagamenti medesimi.

9)-Di fare  sottoscrivere  alla ditta A.F.D.T. srl via Dante Alighieri n. 11  San Nicolo’ a Tordino (TE)  pIVA 01559020670  la presente determinazione in segno di presa vision ed accettazione delle clausole ivi contenute con particolare riferimento ai punti precedenti n. 7-8.

10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11) Di Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla pubblicazione dello specifico avviso di variante di cui all’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

12) Di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
a)	 Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
b)	 Direttore dei Lavori;

_________________________________________________________________________________
SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

                                        Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.