COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia	N° 58 del 17-09-2019	

OGGETTO:	D.L. 34/2019, ART. 30 "DECRETO CRESCITA". RIQUALIFICAZIONELA GIUNTA COMUNALE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI P.I. - VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

L'anno  duemiladiciannove, addì  diciassette del mese di settembre alle ore 10:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO  GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Ercoli.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Firma presenti	Qualifica	
CARACENI GILBERTO	Presente	SINDACO	
GIANCAMILLI EROS	Presente	VICESINDACO	
TESEI LUCA	Presente	ASSESSORE	

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:	D.L. 34/2019, ART. 30 "DECRETO CRESCITA". RIQUALIFICAZIONELA GIUNTA COMUNALE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI P.I. - VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

LA GIUNTA COMUNALE

   RICHIAMATI:
•	l’art. 30 del D.L. 34/2019 “Decreto Crescita”, con il quale è stato concesso un contributo, ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, pari ad € 50.000,00 per la realizzazione di opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; 
•	la Delibera di G.C. n. 31 del 07/05/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico impianti di P.I. – progetto di completamento”;

   CONSIDERATO che:
•	è stata  indetta ricerca di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), per l’individuazione delle  ditte da invitare alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, con aggiudicazione al massimo ribasso sull’importo posto a base di gara;
•	a seguito della ricerca di mercato, i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta “MC IMPIANTI s.r.l.”, con sede in Macerata (MC), alla Via D. Concordia n. 73, P. IVA: 01181990431, con lo sconto percentuale pari al 31,03% (trentuno virgola zero tre per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 25.199,72, compresi oneri per la sicurezza, per un importo quindi contrattuale di € 30.428,15 comprensivo di IVA come per legge, giusta Determinazione dell’Area Tecnica n. 37 del 16/05/2019;
•	con verbale di Consegna dei lavori, redatto in data 20 maggio 2019, sottoscritto dall’Impresa affidataria e dal R.U.P., le opere sono state consegnate alla ditta appaltatrice, con scadenza dell’ultimazione delle opere in data 19 giugno 2019;

   DATO ATTO che, successivamente all’inizio delle opere, si sono rese necessarie alcune modifiche sulle quantità di alcune voci di spesa delle opere, con particolare riferimento:
•	alla maggiore quantità di linea elettrica in cavo multipolare, necessaria al rifacimento della nuova linea;
•	alla maggiore quantità di pozzetti prefabbricati da porre in opera, atteso che non è stato possibile recuperare alcuni pozzetti esistenti; 
•	alla maggiore necessità di nolo del mini escavatore, per la pulizia dell’area di Via Fontemenini; 
•	alla maggiore quantità di scavo a sezione obbligata e relativo reinterro;
•	alla maggiore quantità di tubazione corrugata per il passaggio della linea multipolare;
Dette motivazioni hanno determinato la necessità di modificare la proposta progettuale.
   
   CONSIDERATO:
•	che il Geom. Simone Perroni, R.U.P. dell’Ente, ha provveduto a trasmettere il Progetto di Variante dell’opera in parola, costituito da n. 4 elaborati tecnici, come di seguito riportati:
-	Tav. A/v: Relazione tecnica illustrativa;
-	Tav. B/v: Computo metrico estimativo;
-	Tav. C/v: Quadro tecnico economico;
-	Tav. D/v: Quadro di raffronto;

   RILEVATO, dal progetto di variante dell’opera in parola, la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento è pari ad € 50.000,00, cosi divisa: 

Q.T.E.  PROGETTO DI VARIANTE IN  CORSO D’OPERA	
Importo Lavori (a)  €  45.230,12		
(di cui euro 292,17 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	45.230,12			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	292,17			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  44.937,95			
Ribasso di gara 31,03% (d) = (c*d/100)	euro	 13.944,25			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 31.285,87			
Importo Contrattuale	euro	  31.285,87	euro	31.285,87	
	
Somme a disposizione					
B1-I.V.A. 10% su lavori	euro	3.128,59			
B2-Incentivo alla progett. R.U.P. 2%	euro	904,60			
B3-Coordinatore per la sic. in sede di prog/esec.	euro	1.500,00			
B4-CNPAIA 4% ed IVA 22% su spese tecniche sicur.	euro	403,20			
B5-Progetto opere aggiuntive compresa IVA 10%		euro	12.777,74			
Totale somme a disposizione	euro	18.714,13	euro	18.714,13	
Totale generale del progetto esecutivo	€	50.000,00	

   DATO ATTO che il progetto in parola prevede il riutilizzo delle somme relative alle economie derivanti dal ribasso d'asta, nonché quelle relative agli imprevisti, per un miglioramento e completamento dell'opera, sia a livello funzionale che della sicurezza stradale;   

   VISTI: 
•	Il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
•	Il d.lgs. 18/04/2016, n. 50; 
•	Il D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.ii.;
•	I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

   CON voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

•	Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

•	Di approvare il progetto di variante e completamento dei lavori di “Riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico impianti di P.I. Variante in corso d’opera progetto di completamento”, redatto dal R.U.P. Geom. Simone Perroni, dell’importo complessivo di € 50.000,00, così suddiviso: 

Q.T.E.  PROGETTO DI VARIANTE IN  CORSO D’OPERA	
Importo Lavori (a)  €  45.230,12		
(di cui euro 292,17 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	45.230,12			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	292,17			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  44.937,95			
Ribasso di gara 31,03% (d) = (c*d/100)	euro	 13.944,25			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 31.285,87			
Importo Contrattuale	euro	  31.285,87	euro	31.285,87	
	
Somme a disposizione					
B1-I.V.A. 10% su lavori	euro	3.128,59			
B2-Incentivo alla progett. R.U.P. 2%	euro	904,60			
B3-Coordinatore per la sic. in sede di prog/esec.	euro	1.500,00			
B4-CNPAIA 4% ed IVA 22% su spese tecniche sicur.	euro	403,20			
B5-Progetto opere aggiuntive compresa IVA 10%		euro	12.777,74			
Totale somme a disposizione	euro	18.714,13	euro	18.714,13	
Totale generale del progetto esecutivo	€	50.000,00	

•	Di dare atto:
-	che le figure incaricate della realizzazione dell’opera di cui trattasi sono state individuate come appresso indicato: 
a)	Direttore dei lavori, contabilità, e certificazioni finali il R.U.P., Geom. Simone Perroni, Istruttore Direttivo dell’U.T.C.; 
b)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione il Geom. Vincenzo Coscia;
-	che l’intera spesa di € 50.000,00, sarà finanziata con il contributo di cui all’art. 30 del D.L. 34/2019 “Decreto Crescita”;

•	Di demandare al competente Responsabile del Servizio il compimento degli atti di gestione conseguenti.

•	Di approvare l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di portarla a esecuzione. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :	D.L. 34/2019, ART. 30 "DECRETO CRESCITA". RIQUALIFICAZIONELA GIUNTA COMUNALE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI P.I. - VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li  17-09-2019	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  Simone Perroni	
=====================================================================================
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 17-09-2019	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  GIUSEPPE DOTTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to  GILBERTO CARACENI
	SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 01-10-2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana,lì 01-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Massa Fermana, li   17-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

--------------------------------------------------------------------------------------------------

È copia conforme all’originale.
Lì, 01-10-2019

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	 Pasquale Ercoli