COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia	N° 64 del 08-10-2019	

OGGETTO:	RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI P.I. - VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno  duemiladiciannove, addì  otto del mese di ottobre alle ore 10:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO  GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Ercoli.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Firma presenti	Qualifica	
CARACENI GILBERTO	Presente	SINDACO	
GIANCAMILLI EROS	Presente	VICESINDACO	
TESEI LUCA	Presente	ASSESSORE	

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:	RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI P.I. - VARIANTE IN CORSO D'OPERA

LA GIUNTA COMUNALE

     VISTA la deliberazione di G.C. n. 26 del 15/05/2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione”;

   CONSIDERATO che:
•	è stata  indetta ricerca di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), per l’individuazione delle  ditte da invitare alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, con aggiudicazione al massimo ribasso sull’importo posto a base di gara;
•	a seguito indagine di mercato, i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta “MC IMPIANTI s.r.l.”, con sede in Macerata (MC), alla Via D. Concordia n. 73, P. IVA: 01181990431, con lo sconto percentuale pari al 31,03% (trentuno virgola zero tre per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 90.518,91, compresi oneri per la sicurezza, per un importo quindi contrattuale di € 99.570,80 comprensivo di IVA come per legge, giusta determinazione dell’Area Tecnica n. 5 del 13/02/2019;
•	con verbale di consegna, redatto in data 15 febbraio 2019, sottoscritto dall’Impresa affidataria e dal R.U.P., le opere sono state consegnate alla ditta appaltatrice, con scadenza dell’ultimazione delle opere in data 15 giugno 2019;

   DATO ATTO che, successivamente all’inizio delle opere, si sono rese necessarie alcune modifiche sulle quantità di alcune voci di spesa delle opere, con particolare riferimento:
•	della necessità di estendere la nuova linea elettrica, stante la vetustà di quella esistente, anche in località “Madonnetta”;
•	di sostituire i pali di pubblica illuminazione solo il località “Madonnetta”, per n. 6 unità;
•	di effettuare la manutenzione straordinaria dei pali esistenti, all’interno del territorio, consistente nella verniciatura degli stessi, previo trattamento anti ruggine, nonché nella sostituzione di conchiglie e morsettiere (ove necessario).
   
   CONSIDERATO:
•	che il Geom. Simone Perroni, R.U.P. dell’Ente, ha provveduto a trasmettere il Progetto di Variante dell’opera in parola, costituito da n. 6 elaborati tecnici e n. 4 tavole grafiche, come di seguito riportati:
-	ELABORATO A/v - Relazione Tecnica Illustrativa;
-	ELABORATO B/v - Computo Metrico Estimativo;
-	ELABORATO C/v – Elenco Prezzi unitari;
-	ELABORATO D/v – Quadro Tecnico Economico;
-	ELABORATO E/v - Quadro di Raffronto;
-	ELABORATO F/v – Atto di sottomissione e verbale di concorda mento nuovi prezzi;
-	TAVOLA 01/v – Elaborato grafico zona “Via Villa Berarde”;
-	TAVOLA 02/v – Elaborato grafico zona “Madonnetta”;
-	TAVOLA 03/v – Elaborato grafico zona “lott.ne Eredi Iommi”;
-	TAVOLA 04/v – Elaborato grafico zona “Via M. Massini”;

   RILEVATO, dal progetto di variante dell’opera in parola, la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento è di € 143.283,56, cosi divisa: 

Q.T.E.  PROGETTO DI VARIANTE IN  CORSO D’OPERA	
Importo Lavori (a)  €  141.673,95		
(di cui euro 3.473,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	141.673,95			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	3.473,70			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  138.200,25			
Ribasso di gara 31,03% (d) = (c*d/100)	euro	 42.883,54			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 95.316,71			
Importo Contrattuale	euro	  98.790,41	euro	98.790,41	
	
Somme a disposizione					
B1-I.V.A. 10% su lavori	euro	9.879,04			
B2-Incentivo alla progett. R.U.P. 2%	euro	2.833,48			
B3-Coordinatore per la sic. in sede di prog/esec.	euro	1.500,00			
B4-CNPAIA 4% su spese tecniche sicurezza	euro	60,00			
B5-Spese tecniche di progettazione		euro	500,00			
B6-CNPAIA 4% ed IVA 22% su spese tecniche di progettazione	euro	134,40			
B7-Sconto di gara residuo	euro	29.586,23			
Totale somme a disposizione	euro	44.493,15	euro	44.493,15	
Totale generale del progetto esecutivo	€	143.283,56	

   DATO ATTO che il progetto in parola prevede il riutilizzo delle somme relative alle economie derivanti dal ribasso d'asta, per un miglioramento e completamento dell'opera, sia a livello funzionale che della sicurezza impiantistica;   

   VISTI: 
•	Il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
•	Il d.lgs. 18/04/2016, n. 50; 
•	Il D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.ii.;
•	I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

   CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

•	Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

•	Di approvare il progetto di variante e completamento dei lavori di “Riqualificazione, messa a norma ed efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione”, redatto dal R.U.P. Geom. Simone Perroni, dell’importo complessivo di € 143.283,56, così suddiviso: 

Q.T.E.  PROGETTO DI VARIANTE IN  CORSO D’OPERA	
Importo Lavori (a)  €  141.673,95		
(di cui euro 3.473,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	141.673,95			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	3.473,70			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  138.200,25			
Ribasso di gara 31,03% (d) = (c*d/100)	euro	 42.883,54			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 95.316,71			
Importo Contrattuale	euro	  98.790,41	euro	98.790,41	
	
Somme a disposizione					
B1-I.V.A. 10% su lavori	euro	9.879,04			
B2-Incentivo alla progett. R.U.P. 2%	euro	2.833,48			
B3-Coordinatore per la sic. in sede di prog/esec.	euro	1.500,00			
B4-CNPAIA 4% su spese tecniche sicurezza	euro	60,00			
B5-Spese tecniche di progettazione		euro	500,00			
B6-CNPAIA 4% ed IVA 22% su spese tecniche di progettazione	euro	134,40			
B7-Sconto di gara residuo	euro	29.586,23			
Totale somme a disposizione	euro	44.493,15	euro	44.493,15	
Totale generale del progetto esecutivo	€	143.283,56	

•	Di dare atto:
-	che le figure incaricate della realizzazione dell’opera di cui trattasi sono state individuate come appresso indicato: 
a)	direttore dei lavori, contabilità, e certificazioni finali il R.U.P., Geom. Simone Perroni, Responsabile dell’Area Tecnica; 
b)	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione il Geom. Vincenzo Coscia;
-	che l’intera spesa di € 143.283,56, sarà finanziata con i fondi di cui al capitolo n. 2004 del corrente bilancio;

•	Di demandare al competente Responsabile del Servizio il compimento degli atti di gestione conseguenti.

•	Di approvare l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di portarla a esecuzione. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :	RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI P.I. - VARIANTE IN CORSO D'OPERA

REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li  08-10-2019	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  Simone Perroni	
=====================================================================================
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 08-10-2019	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  GIUSEPPE DOTTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to  GILBERTO CARACENI
	SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 23-10-2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana,lì 23-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Massa Fermana, li   08-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

--------------------------------------------------------------------------------------------------

È copia conforme all’originale.
Lì, 23-10-2019

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	 Pasquale Ercoli