COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia	N° 24 del 18-05-2017	

OGGETTO:	STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE FRANOSO IN VIA DELLE MURA CASTELLANE NEI PRESSI DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno  duemiladiciassette, addì  diciotto del mese di maggio alle ore 19:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO  GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Ercoli.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Firma presenti	Qualifica	
CARACENI GILBERTO	Presente	SINDACO	
GIANCAMILLI EROS	Presente	VICESINDACO	
TESEI LUCA	Presente	ASSESSORE	

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:	STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE FRANOSO IN VIA DELLE MURA CASTELLANE NEI PRESSI DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

                                                             LA GIUNTA COMUNALE

   PREMESSO: 
•	Che con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 55 in data 04/12/2014, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Stabilizzazione versante franoso in via Delle Mura Castellane nei pressi del centro storico”, per un importo dei lavori da appaltare di Euro 69.859,01, di cui € 65.016,55 oggetto dell'offerta mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ed € 4.842,46 per oneri per la sicurezza, non oggetto dell'offerta, oltre ad € 30.140,99 quali somme a disposizione, per un totale di € 100.000,00;
•	Che l’opera è finanziata con fondi Regionali, relativi agli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2013, con O.C.D.P.C. n. 141 in data 22/01/2014 e D.C.D. n. 6, C.D.M. n. 13 del 7/08/2014, nonché successivo Decreto del Dirigente Del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n. 340 del 23/10/2015;

   CONSIDERATO:
•	Che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006) , con determinazione del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, n. 153 RS in data 25/03/2016, R.G. n. 354, i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cacciari n. 3", con il ribasso offerto del 10%;
•	Che con Contratto d’Appalto, Repertorio n. 186 in data 07/06/2016, i lavori sono stati affidati alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC), alla Via Cacciari n. 3;
•	Che con verbale di Consegna dei lavori, redatto in data 24/08/2016, sottoscritto dall’Impresa affidataria e dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigino Moglianesi, le opere sono state consegnate alla ditta appaltatrice, con scadenza dell’ultimazione delle opere in data 21/12/2016;

   DATO ATTO:
-	che il Quadro Tecnico Economico di progetto è di seguito riportato:

Q.T.E.  di progetto	
Importo Lavori (a)  €  69859,01		
(di cui euro 4.842,46 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	 69.859,01			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.842,46			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  65.016,55			
Importo Contrattuale (e+b) )	euro	 69.859,01	euro	69.859,01	
	
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% su lavori	euro	6.985,90			
Spese tecniche e generali e rilievi topografici	euro	  10.950,00			
Spese tecniche geologiche	euro	2.420,00			
Collaudi	euro	800,00			
Contributo CNPAIA 4%	euro	470,00			
Contributo EPAP 2% su oneri professionali	euro	48,40			
IVA 22% su onorari, CNPAIA ed EPAP	euro	3.231,45			
Sondaggi, prospezioni geognostiche e geotecniche, prove di laborat. comp. IVA 22%	euro	2.665,70			
Fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.	euro	1.397,18			
Contributo AVCP	euro	30,00			
Lavori in economia, imprevisti, etc.	euro	1.142,36			
Totale somme a disposizione	euro	30.140,99	euro	30.140,99	
Totale generale del progetto esecutivo	€	100.000,00	

-	che il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è il  seguente:

Q.T.E.  Aggiudicazione	
Importo Lavori (a)  € 69.859,01		
(di cui euro 4.842,46 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	Euro	 69.859,01			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.842,46			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	Euro	  65.016,55			
Ribasso di gara 10,00% (d) = (c*d/100)	Euro	 6.501,65			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	Euro	 58.514,90			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.842,46			
Importo Contrattuale (e+b) )	Euro	 63.357,36	euro	63.357,36	
	
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% su lavori	Euro	6.335,74			
Spese tecniche e generali e rilievi topografici	Euro	  10.950,00			
Spese tecniche geologiche	Euro	2.420,00			
Collaudi	Euro	800,00			
Contributo CNPAIA 4%	Euro	470,00			
Contributo EPAP 2% su oneri professionali	Euro	48,40			
IVA 22% su onorari, CNPAIA ed EPAP	Euro	3.231,45			
Sondaggi, prospezioni geognostiche e geotecniche, prove di laborat. comp. IVA 22%	Euro	2.665,70			
Fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.	Euro	1.397,18			
Contributo AVCP	Euro	30,00			
Lavori in economia, imprevisti, etc.	Euro	1.142,36			
Ribasso di gara/economie (iva su sconto) 
(€ 6.501,65 + € 650,16 iva)              	euro 	7.151,81			
Totale somme a disposizione	Euro	36.642,64	euro	36.642,64	
Totale generale del progetto esecutivo	€	100.000,00	

     VISTA la Determinazione U.T.C. n. 51 del 20/12/2016, con la quale sono stati approvati gli atti relativi al I° SAL, e liquidate le seguenti somme, alla ditta appaltatrice ed ai professionisti incaricati:
a)	alla Ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC) alla Via Cocciari n. 3, P. IVA: 01262740432, l’importo di € 52.796,94, oltre IVA come per legge, tenuto conto che l’imposta di € 5.279,69 è stata liquidata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);
b)	all’Ing. Luigino Moglianesi di Montappone (FM), l’importo di € 4.998,28, relativo alla direzione dei lavori fino al 14/11/2016, comprensivo di CAP 4%, come da certificato di pagamento delle spese tecniche n. 2 del 12/12/2016, atteso che la progettazione è già stata liquidata al professionista incaricato;
 
   RICHIAMATI:
•	la relazione tecnica sui lavori aggiuntivi, redatta dal Progettista e D.L., Ing. Luigino Moglianesi di Montappone, trasmessa alla competente Regione Marche con contestuale richiesta di riutilizzo delle somme del ribasso d’asta;
•	l’autorizzazione al riutilizzo delle somme inerenti il ribasso d’asta, per la realizzazione delle opere di cui alla sopra richiamata relazione sui lavori aggiuntivi, della Regione Marche, protocollo n. 0139452 del 20/02/2017, assunta al protocollo comunale n. 655 del 02/03/2017;  

   CONSIDERATO:
•	Che l’Ing. Luigino Moglianesi, con nota assunta al protocollo n. 1324 del 13/05/2017, ha trasmesso la perizia di variante dell’opera, costituita da 7 elaborati tecnici e 1 tavola grafica, come di seguito riportati:
V.1 Opere di fognatura stradale;
V.2 Relazione tecnica;
V.3 Computo metrico estimativo;
V.4 Quadro comparativo;
V.5 Analisi nuovi prezzi;
V.6 Relazione di accompagnamento al verbale dei nuovi prezzi;
V.7 Atto di sottomissione e verbale di concorda mento nuovi prezzi;
V.8 Documentazione fotografica

   RILEVATO che dalla perizia di variante, il Quadro Tecnico Economico è il seguente:

Q.T.E.  Perizia di Variante	
Importo Lavori (a)  € 71.482,20		
(di cui euro 4.954,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	Euro	 71.482,20			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.954,98			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	Euro	  66.527,22			
Ribasso di gara 10,00% (d) = (c*d/100)	Euro	6.652,72			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	Euro	 59.874,50			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.842,46			
Importo Contrattuale (e+b) )	Euro	 64.829,48	euro	64.829,48	
	
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% su lavori	Euro	6.482,95			
Spese tecniche e generali e rilievi topografici	Euro	14.140,14			
Spese tecniche geologiche	Euro	2.420,00			
Collaudi	Euro	250,00			
Contributo CNPAIA 4%	Euro	575,61			
Contributo EPAP 2% su oneri prof. geologo	Euro	48,40			
IVA 22% su onorari, CNPAIA ed EPAP	Euro	724,68			
Sondaggi, prospezioni geognostiche e geotecniche, prove di laborat. comp. IVA 22%	Euro	2.665,70			
Fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.	Euro	1.429,64			
Contributo AVCP	Euro	30,00			
Lavori aggiuntivi in economia diretta, compreso fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., IVA, etc.	Euro	6.338,79			
Arrotondamenti	euro 	64,61			
Totale somme a disposizione	Euro	35.170,52	euro	35.170,52	
Totale generale del progetto esecutivo	€	100.000,00	

VISTI  INOLTRE: 
•	il d. lgs. 18/08/2000, n. 267;
•	il d. lgs. 18/04/2016, n. 50; 
•	il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
•	i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 18/04/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi; 

D E L I B E R A

•	Le premesse fanno parte integrante del presente atto;
•	Di approvare la Perizia di Variante dei lavori di “Ripristino della viabilità in Via Fontemenini a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2015 e marzo 2015”, redatta dall’Ing. Luigino Moglianesi di Montappone (FM), nell’importo complessivo di € 100.000,00, il cui Quadro Tecnico Economico viene di seguito riportato: 

Q.T.E.  Perizia di Variante	
Importo Lavori (a)  € 71.482,20		
(di cui euro 4.954,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	 71.482,20			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.954,98			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  66.527,22			
Ribasso di gara 10,00% (d) = (c*d/100)	euro	6.652,72			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 59.874,50			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.842,46			
Importo Contrattuale (e+b) )	euro	 64.829,48	euro	64.829,48	
	
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% su lavori	euro	6.482,95			
Spese tecniche e generali e rilievi topografici	euro	14.140,14			
Spese tecniche geologiche	euro	2.420,00			
Collaudi	euro	250,00			
Contributo CNPAIA 4%	euro	575,61			
Contributo EPAP 2% su oneri prof. geologo	euro	48,40			
IVA 22% su onorari, CNPAIA ed EPAP	euro	724,68			
Sondaggi, prospezioni geognostiche e geotecniche, prove di laborat. comp. IVA 22%	euro	2.665,70			
Fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.	euro	1.429,64			
Contributo AVCP	euro	30,00			
Lavori aggiuntivi in economia diretta, compreso fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., IVA, etc.	euro	6.338,79			
Arrotondamenti	euro 	64,61			
Totale somme a disposizione	euro	35.170,52	euro	35.170,52	
Totale generale del progetto esecutivo	€	100.000,00	

•	Di dare atto che le figure incaricate della realizzazione dell’opera sono individuate come segue: 
a)	R.U.P., Geom. Simone Perroni - Istruttore direttivo Area Tecnica; 
b)	Progettista, Direttore dei lavori, contabilità, calcoli strutturali, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificazioni finali: Ing. Luigino Moglianesi;

•	Di dare altresì atto che l’opera è finanziata con fondi regionali, relativi agli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2013, con O.C.D.P.C. n. 141 in data 22/01/2014 e D.C.D. n. 6, C.D.M. n. 13 del 7/08/2014, e dal successivo Decreto del Dirigente Del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n. 340 del 23/10/2015.

•	Di demandare al competente Responsabile del Servizio il compimento degli atti di gestione conseguenti.
 
•	Di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

•	Di approvare, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di provvedere in merito, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :	STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE FRANOSO IN VIA DELLE MURA CASTELLANE NEI PRESSI DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li  18-05-2017	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  GILBERTO CARACENI	
=====================================================================================
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 18-05-2017	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  GIUSEPPE DOTTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to  GILBERTO CARACENI
	SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 03-07-2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana,lì 03-07-2017

L’INCARICATO
F.to  Nazario Marini

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Massa Fermana, li   18-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

--------------------------------------------------------------------------------------------------

È copia conforme all’originale.
Lì, 03-07-2017

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	 Pasquale Ercoli