COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia	N° 29 del 05-07-2017	

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, CONTABILITA' E STATO FINALE DEI LAVORI.

L'anno  duemiladiciassette, addì  cinque del mese di luglio alle ore 10:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO  GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Ercoli.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Firma presenti	Qualifica	
CARACENI GILBERTO	Presente	SINDACO	
GIANCAMILLI EROS	Presente	VICESINDACO	
TESEI LUCA	Presente	ASSESSORE	

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, CONTABILITA' E STATO FINALE DEI LAVORI.

                                                             LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: 
•	che con deliberazione di G.C., n. 36 del 21/06/2012, è stato approvato il progetto preliminare relativo alle opere di “Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione del centro storico”, per la previsione di spesa di € 120.000,00, da finanziare con i proventi della vendita di cespiti di beni immobili;
•	che con deliberazione di G.C., n. 62 del 13/12/2012, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in parola, a 
•	firma del Geom. Albano Iommi dell’U.T.C., quale progettista e direttore dei lavori, nella previsione di spesa di € 125.000,00, di cui  
a- Per lavori, a base di appalto                                                 €    100.716,60
b-    Oneri per la sicurezza: 		                                      €        5.861,81
•	c- Per somme varie a disposizione dell’Amministrazione:     €      18.421,59
•	che con determinazione U.T.C. n. 18 del 17/06/2013,   le opere sono state affidate definitivamente alla ditta  “Baghetti Francesco s.r.l. Unipersonale”, con sede in sede in Montegiorgio (FM), Via Faleriense Ovest n. 29, con un ribasso offerto del 22,171%, per l’importo contrattuale di € 84.248,53 oltre ad IVA 10% come per legge;
•	che il contratto d’appalto è stato stipulato in data 27/06/2013, Repertorio n. 184;

DATO ATTO:
•	che l’opera è stata finanziata con fondi del bilancio comunale, derivanti dalla vendita della nuda proprietà di alcuni cespiti comunali, per la somma di € 125.000,00, di cui al Capitolo di Bilancio n. 281010/1; 
•	che con verbale di consegna delle opere, in data 02/10/2013, le stesse furono consegnate alla ditta aggiudicataria; 
•	che con determinazione U.T.C., n. 29 del 03/10/2015, è stato approvato e liquidato il I° SAL dei lavori nell’importo complessivo di € 64.587,88 oltre ad IVA 10% come per legge;
•	che, stante la prolungata assenza per malattia e, successivamente il decesso del Geom. Albano Iommi, avvenuto nel mese di maggio 2016, con determinazione U.T.C. n. 53 del 21/12/2016 è stato nominato professionista esterno, nella persona dell’Ing. Dante Cesetti, al fine di assumere l’incarico di progettista dell’opera e per l’espletamento di:
-	relazione esplicativa circa i lavori eseguiti ed alla contabilizzazione del I SAL;
-	redazione di variante al progetto approvato;
-	stesura della contabilità finale delle opere;
-	collaudo e/o certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, 
nonché alla redazione di ogni e qualsiasi ulteriore mansione correlata alla figura del progettista, necessaria al completamento ed al collaudo dell’opera in parola;
•	che l’incarico di Coordinatore della Sicurezza, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, era già stato affidato al Geom. Marco Verdicchio, con studio in Mogliano (MC) alla Via G. Oberdan n. 7, con Determinazioni U.T.C. n. 3 del 25/01/2013 e n. 18 del 17/06/2013;
•	che in esecuzione di quanto sopra, il tecnico incaricato ha predisposto un progetto di variante delle opere che contiene il seguente Quadro Economico:

Q.T.E.  Progetto iniziale	
Importo Lavori (a)  €  106.578,41		
(di cui euro 5.861,81 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), (a) 	euro	106.578,41			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	5.861,81			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	100.716,60			
Importo Contrattuale 	euro	 106.578,41	euro	106.578,41	
	
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% su lavori	euro	10.657,40			
Oneri Tecnici Progett. - Direz. Lav.  e  RUP 2% 	euro	2.131,57			
Per Autorità di Vigilanza 	euro           	           30,00			
Oneri Resp. della Sicurezza per Prog. ed Esec.	euro	2.000,00			
Iva e cnpaia ed altre somme su spese tecniche	euro	516,80			
Imprevisti	euro 	3.085,82			
Totale somme a disposizione	euro	18.241,59	euro	18.241,59	
Totale generale del progetto esecutivo	euro	125.000,00	

Q.T.E.  Aggiudicazione	
Importo Lavori (a)  €  106.578,41		
(di cui euro 5.861,81 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	106.578,41			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	5.861,81			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	100.716,60			
Ribasso si gara 22,171% (d) = (c*d/100)	euro	22.329,88			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 78.386,72			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	5.861,81			
Importo Contrattuale (e+b) )	euro	 84.248,53	euro	84.248,53	
	
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% su lavori	euro	8.424,85			
Oneri Tecnici Progett. - Direz. Lav.  e  RUP 2% 	euro	2.131,57			
Per Autorità di Vigilanza 	euro           	           30,00			
Oneri Resp. della Sicurezza per Prog. ed Esec.	euro	2.000,00			
Iva e cnpaia ed altre somme su spese tecniche	euro	516,80			
Imprevisti	euro 	3.085,82			
Ribasso di gara/IVA su ribasso (€ 22.329,88 + € 2.232,55)              	euro 	24.562,43			
Totale somme a disposizione	euro	40.751,47	euro	40.751,47	
Totale generale del progetto esecutivo	euro	125.000,00	

                                                       Q.T.E. - VARIANTE

(Trasmessa con gli elaborati e la contabilità finale, costituita da n. 12 elaborati tecnici e n. 1 tavola grafica, come di seguito riportati:
1) Tav. 3, Rilievo dei lavori eseguiti ed elaborato planimetrico di contabilità;
2) Computo metrico progetto approvato;
3) Elenco prezzi di variante;
4) Computo metrico di variante;
5) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
6) Quadro comparativo variante;
7) Relazione perizia di variante;
8) Libretto delle misure;
9) Sommario del registro di contabilità;
10) Registro di contabilità;
11) Stato finale dei lavori;
12) Relazione di accompagnamento al conto finale;
13) Certificato di regolare esecuzione

Q.T.E.  Perizia di Variante	
Importo Lavori (a)  € 134.818,95		
(di cui euro 7.415,04 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	Euro	 134.818,95			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	7.415,04			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	Euro	  127.403,91			
Ribasso di gara 22,171% (d) = (c*d/100)	Euro	28.246,72			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	Euro	 99.157,19			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	7.415,04			
Importo di Variante (e+b) )	Euro	 106.572,23	euro	106.572,23	
	
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% su lavori	Euro	10.657,22			
Spese tecniche per perizia di variante e contabilità finale	Euro	4.110,00			
CAP 4% ed IVA 22 su spese tecniche	Euro	1.104,77			
Per Autorità di Vigilanza 	euro           	           30,00			
Oneri Resp. della Sicurezza per Prog. ed Esec.	euro	2.000,00			
CAP 4% su Oneri Resp. Sicurezza	euro	80,00			
Imprevisti	euro 	445,78			
Totale somme a disposizione	Euro	18.427,77	euro	18.427,77	
Totale generale del progetto esecutivo	€	125.000,00	

            RILEVATO:
•	che la perizia di variante in corso d’opera e per lavori supplementari, si è resa necessaria in virtù delle maggiori e diverse lavorazioni rispetto al progetto iniziale, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità;
•	che le lavorazioni suddette non alterano il contratto principale e la sostanza del progetto;
•	che le opere aggiuntive realizzate, dedotte  dalla Relazione di accompagnamento al conto finale, a firma del tecnico incaricato Ing. Dante Cesetti, costituiscono un miglioramento dell’opera nel suo complesso e sono state correttamente  e regolarmente eseguite;   
•	che il Quadro Tecnico Economico, relativo alla Perizia di Variante dell’opera è nell'importo complessivo invariato di € 125.000,00, senza oneri aggiunti rispetto alle previsioni iniziali di progetto;

            VISTO l'articolo 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recante "Modifiche dei contratti durante in periodo di efficacia", per il quale sono consentite varianti supplementari e in corso d'opera nei limiti del 50 per cento dell'importo di contratto (comma 7), a condizione che:
per lavori supplementari: i lavori non possono superare il 50% dell’importo originario del contratto e sono affidabili allo stesso soggetto senza una nuova procedura di gara soltanto se necessari e non inclusi nel contratto originario ed a condizioni che il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, ed il cambiamento del contraente comporti notevoli disguidi.
in corso d’opera: sono possibili varianti derivano da circostanze impreviste o imprevedibili, non sia alterata la natura del contratto e non si superi il 50% dell’importo originario del contratto;

               VISTA la specifica disciplina in materia di varianti contenuta nell'articolo 149 del d.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

              RITENUTO di approvare la variante per lavori supplementari e in corso opera regolarmente eseguit, e gli atti di contabilità finale conseguenti;

              VISTI:   
•	il d. lgs. 18/08/2000, n. 267;
•	il d. lgs. 18/04/2016, n. 50; 
•	il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
•	i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 18/04/2000, n. 267;

              CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

•	Di approvare le premesse alla narrativa, dichiarandole parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto.

•	Di approvare gli elaborati inerenti la perizia di variante, nonché la contabilità finale dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione del centro storico”, costituiti da n. 12 elaborati tecnici e n. 1 tavola grafica, come di seguito riportati:
1) Tav. 3, Rilievo dei lavori eseguiti ed elaborato planimetrico di contabilità;
2) Computo metrico progetto approvato;
3) Elenco prezzi di variante;
4) Computo metrico di variante;
5) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
6) Quadro comparativo variante;
7) Relazione perizia di variante;
8) Libretto delle misure;
9) Sommario del registro di contabilità;
10) Registro di contabilità;
11) Stato finale dei lavori;
12) Relazione di accompagnamento al conto finale;
13) Certificato di regolare esecuzione;

•	Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico, relativo alla Perizia di Variante, è quello di seguito riportato: 

Q.T.E.  Perizia di Variante	
Importo Lavori (a)  € 134.818,95		
(di cui euro 7.415,04 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	Euro	 134.818,95			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	7.415,04			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	Euro	  127.403,91			
Ribasso di gara 22,171% (d) = (c*d/100)	Euro	28.246,72			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	Euro	 99.157,19			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	7.415,04			
Importo di Variante (e+b) )	Euro	 106.572,23	euro	106.572,23	
	
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% su lavori	Euro	10.657,22			
Spese tecniche per perizia di variante e contabilità finale	Euro	4.110,00			
CAP 4% ed IVA 22 su spese tecniche	Euro	1.104,77			
Per Autorità di Vigilanza 	euro           	           30,00			
Oneri Resp. della Sicurezza per Prog. ed Esec.	euro	2.000,00			
CAP 4% su Oneri Resp. Sicurezza	euro	80,00			
Imprevisti	euro 	445,78			
Totale somme a disposizione	Euro	18.427,77	euro	18.427,77	
Totale generale del progetto esecutivo	€	125.000,00	

•	Di dare atto che le figure incaricate della definizione dell’opera sono individuate come segue: 
a)	R.U.P., Geom. Gilberto Caraceni – Sindaco e Responsabile dell’Area Tecnica; 
b)	Perizia di variante, contabilità finale e collaudo, Ing. Dante Cesetti di Montegiorgio (FM);
c)	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Geom. Marco Verdicchio di Mogliano (MC); 

•	Di approvare espressamente il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 08/03/2017 dall’Ing. Dante Cesetti.

•	Di demandare al competente Responsabile del Servizio il compimento degli atti di gestione conseguenti.

•	Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

•	Di approvare l'immediata esecutività del presente atto, considerata l'urgenza di portarlo ad esecuzione, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, CONTABILITA' E STATO FINALE DEI LAVORI.

REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li  22-06-2017	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  GILBERTO CARACENI	
=====================================================================================
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 22-06-2017	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  GIUSEPPE DOTTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to  GILBERTO CARACENI
	SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 14-07-2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana,lì 14-07-2017

L’INCARICATO
F.to  Nazario Marini

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Massa Fermana, li   05-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

--------------------------------------------------------------------------------------------------

È copia conforme all’originale.
Lì, 14-07-2017

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	 Pasquale Ercoli