COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia	N° 69 del 26-11-2019	

OGGETTO:	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventisei del mese di novembre alle ore 10:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO  GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Ercoli.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Firma presenti	Qualifica	
CARACENI GILBERTO	Presente	SINDACO	
GIANCAMILLI EROS	Presente	VICESINDACO	
TESEI LUCA	Presente	ASSESSORE	

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

LA GIUNTA COMUNALE

   PREMESSO CHE:
•	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2018, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2018, il bilancio pluriennale 2018-2020, il bilancio armonizzato 2018-2020; 
•	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici; 
•	con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 07/08/2018, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di “Ampliamento del Civico Cimitero”, per una spesa complessiva di € 200.000,00 di cui € 148.196,27 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, ed € 51.803,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

   CONSIDERATO CHE:
•	è stata indetta apposita ricerca di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), per l’individuazione delle 10 ditte da invitare alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di che trattasi, con aggiudicazione al criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara (art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016), giusta determinazione a contrarre dell’area tecnica, n. 42 del 13/09/2018;
•	a seguito della ricerca di mercato, la S.U.A. di Fermo ha provveduto ad espletare la relativa gara d’appalto, a margine della quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta “Impresa Edile Paoloni Fabrizio”, con sede in Loro Piceno (MC), alla C.da Acquaviva San Paterniano n. 27, P. IVA: 00922770433, con uno sconto percentuale pari al 15,63% (quindici virgola trentasei per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 121.346,70 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.369,43, per un importo quindi contrattuale di € 125.716,13 oltre ad IVA come per legge, giusto verbale di gara del 23/10/2018 e Determinazioni della Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti, n. 439 del 05/11/2018 (aggiudicazione definitiva, registro generale n. 945) e n. 465 del 20/11/2018 (aggiudicazione efficace, registro generale n. 987);
•	che è stato avviato il procedimento di verifica di congruità, secondo quanto disposto dal comma 6, ultimo periodo, dell’articolo  97 del d.lgs. 50/2016; 
•	che la SUA di Fermo ha espletato, con esito positivo, le verifiche dei requisiti di carattere generale, auto dichiarate in sede di istanza di partecipazione dalla ditta aggiudicataria;
•	che l’art. 3 comma 2, lett. J della convenzione stipulata in data 20/04/2018, tra il Comune di Massa Fermana e la SUA di Fermo, con oggetto “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56, attribuisce alla SUA la sottoscrizione dell’atto di aggiudicazione definitiva ed efficace;
•	con contratto d’appalto in data 15/01/2019, Tepertorio n. 193, sono stati affidati all'“IMPRESA EDILE PAOLONI FABRIZIO” di Loro Piceno (MC), C.da Acquaviva San Paterniano n. 27, partita IVA 01028790432, i lavori specificati in epigrafe, con l'offerta a ribasso del 15,63% (quindici virgola sessantatre per cento);
•	con verbale di consegna, redatto in data 7 febbraio 2019, sottoscritto dall’Impresa affidataria e dal R.U.P., le opere sono state consegnate alla ditta appaltatrice, con scadenza dell’ultimazione delle opere in data 11 giugno 2019;

   RILEVATO:
•	che il Quadro Tecnico Economico, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è il seguente:

Q.T.E.  Aggiudicazione	
Importo Lavori (a)  €  148.196,27		
(di cui euro 4.369,43 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	 148.196,27			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.369,43			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  143.826,84			
Ribasso di gara 15,63% (d) = (c*d/100)	euro	 22.480,14			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 121.346,70			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.369,43			
Importo Contrattuale (e+b) )	euro	 125.716,13	euro	125.716,13	
	
Somme a disposizione					
B1- Lavori in economia compresa IVA 10% per rimozione essenza arborea protetta, canalizzazioni e sottoservizi nell’area di cantiere	euro	1.100,00			
B3- Imprevisti ed arrotondamenti	euro	426,21			
B5- Spese tecniche e generali di progettazione,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, etc..	euro	22.000,00			
B6- INPS 4% e contributo integrativo cassa previdenza 4% su spese tecniche di progettazione e sicurezza progett.	euro	1.795,20			
B7- Spese tecniche per collaudo statico amministrativo	euro	2.730,00			
B8- INPS 4% e contributo integrativo cassa previdenza 4% su spese tecniche per collaudo statico	euro	109,20			
B9- Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2%)	euro	2.963,93			
B14- IVA 22% su spese tecniche di progettazione e sicurezza progett.	euro	5.234,94			
B15- IVA 22% su spese tecniche per collaudo statico	euro	624,62			
B16- I.V.A. 10% su lavori	euro	12.571,61			
Ribasso di gara/economie (iva su sconto) 
(22.480,14 + 2.248,02 iva)              	euro 	24.728,16			
Totale somme a disposizione	euro	74.283,87	euro	74.283,87	
Totale generale del progetto esecutivo	€	200.000,00	

•	che si è reso necessario apportare in corso d'opera alcune modifiche all’impostazione progettuale ed alle categorie di lavorazione, con particolare riferimento:
a)	alla realizzazione delle opere strutturali inerenti le Cappelline n. 3-4-5-6-7-8, inizialmente previste quale stralcio n. 2 delle opere; 
b)	alla realizzazione delle opere di finitura e di sistemazione esterna con successivo progetto di completamento;

   CONSIDERATO:
•	che il Geom. Simone Perroni, R.U.P. dell’Ente, unitamente ai tecnici incaricati Ing. Andrea Schiavoni ed Arch. Claudio Agostinelli, hanno trasmesso il progetto di variante dell’opera in parola, costituito da n. 8 elaborati tecnici e n. 5 tavole grafiche, come di seguito riportati:
-	ELABORATO A/v - Relazione Tecnica Illustrativa;
-	ELABORATO B/v - Computo Metrico Estimativo;
-	ELABORATO C/v – Elenco Prezzi unitari;
-	ELABORATO D/v – Quadro Tecnico Economico;
-	ELABORATO E/v - Quadro di Raffronto;
-	ELABORATO F/v – Atto di sottomissione e verbale di concorda mento nuovi prezzi;
-	ELABORATO G/v – Incidenza della manodopera;
-	ELABORATO H/v – Computo metrico estimativo della sicurezza speciale;
-	TAVOLA P.01/v – Elaborato grafico “Planimetria interventi”;
-	TAVOLA P.02/v – Elaborato grafico “Piante, prospetti e sezioni part. corpi A-B”;
-	TAVOLA P.03/v – Elaborato grafico “Opere strutturali part. A-B”;
-	TAVOLA P.04/v – Elaborato grafico “Piante, sezioni strutture part. corpo C”;
-	TAVOLA P.05/v – Elaborato grafico “Prospetti e sezioni part. corpo C”;

   RILEVATO, dal progetto di variante dell’opera, che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento è di € 200.000,00, invariati, cosi divisi: 

Q.T.E.  PROGETTO DI VARIANTE IN  CORSO D’OPERA	
Importo Lavori (a)  €  170.197,73		
(di cui euro 4.767,05 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	170.197,73			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.767,05			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  165.430,68			
Ribasso di gara 31,03% (d) = (c*d/100)	euro	 25.856,82			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 139.573,86			
Importo Contrattuale	euro	  144.340,91	euro	144.340,91	
	
Somme a disposizione					
B1-I.V.A. 10% su lavori	euro	14.434,09			
B2-Incentivo per funzioni tecniche R.U.P. 2%	euro	3.403,95			
B3-Imprevisti ed arrotondamenti	euro	109,15			
B4- Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	euro	22.000,00			
B5-Spese tecniche per collaudo statico	euro	2.730,00			
B6-CNPAIA 4% su spese tecniche per collaudo statico	euro	109,20			
B7-CNPAIA 4% ed IVA 22% su spese tecniche di progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		euro	5.234,94			
B8-Spese tecniche per Direzione Lavori opere strutturali	euro	5.200,00			
B9-CNPAIA 4% ed IVA 22% su spese tecniche per Direzione Lavori opere strutturali	euro	1.397,76			
B10-Spese tecniche per la sicurezza in sede di esecuzione	euro	1.000,00			
B11-CNPAIA 4% su spese tecniche per la sicurezza in fase di esecuzione		euro	40,00			
Totale somme a disposizione	euro	55.659,09	euro	55.659,09	
Totale generale del progetto esecutivo	€	200.000,00	

      RAFFRONTANDO il valore contrattuale iniziale con quello finale, oggetto di variante, vi sono maggiori lavori per €  18.624,78, al netto del ribasso, funzionali al miglioramento e al completamento dell'opera, e  possono essere finanziati con le economie del ribasso d'asta;

      VISTO l'articolo 106  del d.lgs. 18 aprile 2016, contenente disposizioni in materia di "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", per il quale le varianti vanno sempre motivate dal RUP con il supporto della direzione lavori al fine di valutarne l’ammissibilità, e sono comunque ammesse per valori inferiori al 15% dell'importo contrattuale;

     VISTI: 
•	il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
•	il d.lgs. 18/04/2016, n. 50; 
•	il D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.ii.;
•	i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

   CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

•	Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

•	Di approvare il progetto di variante dei lavori di “Ampliamento del civico cimitero”, redatto dal Geom. Simone Perroni, R.U.P. dell’Ente, unitamente ai tecnici incaricati Ing. Andrea Schiavoni ed Arch. Claudio Agostinelli, nell’importo complessivo invariato di € 200.000,00, così diviso: 

Q.T.E.  PROGETTO DI VARIANTE IN  CORSO D’OPERA	
Importo Lavori (a)  €  170.197,73		
(di cui euro 4.767,05 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	170.197,73			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	4.767,05			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  165.430,68			
Ribasso di gara 31,03% (d) = (c*d/100)	euro	 25.856,82			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 139.573,86			
Importo Contrattuale	euro	  144.340,91	euro	144.340,91	
	
Somme a disposizione					
B1-I.V.A. 10% su lavori	euro	14.434,09			
B2-Incentivo per funzioni tecniche R.U.P. 2%	euro	3.403,95			
B3-Imprevisti ed arrotondamenti	euro	109,15			
B4- Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	euro	22.000,00			
B5-Spese tecniche per collaudo statico	euro	2.730,00			
B6-CNPAIA 4% su spese tecniche per collaudo statico	euro	109,20			
B7-CNPAIA 4% ed IVA 22% su spese tecniche di progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		euro	5.234,94			
B8-Spese tecniche per Direzione Lavori opere strutturali	euro	5.200,00			
B9-CNPAIA 4% ed IVA 22% su spese tecniche per Direzione Lavori opere strutturali	euro	1.397,76			
B10-Spese tecniche per la sicurezza in sede di esecuzione	euro	1.000,00			
B11-CNPAIA 4% su spese tecniche per la sicurezza in fase di esecuzione		euro	40,00			
Totale somme a disposizione	euro	55.659,09	euro	55.659,09	
Totale generale del progetto esecutivo	€	200.000,00	

•	Di dare atto:
-	che le figure incaricate della realizzazione dell’opera di cui trattasi sono state individuate come appresso indicato: 
a)	progettazione delle opere strutturali, Ing. Andrea Schiavoni ed Arch. Claudio Agostinelli;
b)	direzione lavori delle opere strutturali, Ing. Andrea Schiavoni; 
c)	progettazione e direzione lavori delle opere architettoniche, contabilità, il R.U.P., Geom. Simone Perroni, Responsabile dell’Area Tecnica; 
d)	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il Geom. Vincenzo Coscia;
-	che l’intera spesa di € 200.000,00, è finanziata con i proventi della concessione dei loculi e delle cappelle in corso di realizzazione e, parzialmente, con fondi comunali, al capitolo n. 2732 del corrente bilancio.

•	Di demandare al competente Servizio tecnico il compimento degli atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

•	Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo  125 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

•	Di approvare, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li  26-11-2019	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  Simone Perroni	
=====================================================================================
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 26-11-2019	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  GIUSEPPE DOTTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to  GILBERTO CARACENI
	SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 09-12-2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana,lì 09-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Massa Fermana, li   26-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

--------------------------------------------------------------------------------------------------

È copia conforme all’originale.
Lì, 09-12-2019

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	 Pasquale Ercoli