COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia	N° 48 del 16-07-2019	

OGGETTO:	L.R. n. 51 DEL 28/12/2018. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DENOMINATE VIALE DELLA LIBERTA' E BORGO CAVOUR. VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno  duemiladiciannove, addì  sedici del mese di luglio alle ore 10:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO  GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Ercoli.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Firma presenti	Qualifica	
CARACENI GILBERTO	Presente	SINDACO	
GIANCAMILLI EROS	Presente	VICESINDACO	
TESEI LUCA	Presente	ASSESSORE	

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:	L.R. n. 51 DEL 28/12/2018. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DENOMINATE VIALE DELLA LIBERTA' E BORGO CAVOUR. VARIANTE IN CORSO D'OPERA

LA GIUNTA COMUNALE

   RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 16 in data 12 marzo 2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di strade comunali denominate Viale Della Libertà e Borgo Cavour”, redatto dal Tecnico Comunale - Geom. Simone Perroni,  costituito da dieci elaborati tecnici e due tavole grafiche, per la spesa complessiva di € 33.000,00, finanziata con il contributo di  € 30.000,00, di cui alla Legge Regionale n. 51 del 28 dicembre 2018 - “Contributo straordinario al Comune di Massa Fermana per manutenzioni straordinarie stradali” e per la rimanenza con fondi comunali; 

   CONSIDERATO che:
•	è stata  indetta ricerca di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), per l’individuazione delle  ditte da invitare alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, con aggiudicazione al massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, giusta determinazione a contrarre dell’area tecnica, n. 21 del 04/04/2019;
•	a seguito della ricerca di mercato, i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta “ASFALTI S.r.l.”, con sede in Grottazzolina (FM), alla Via Molino n. 14, P. IVA: 02160820441, con lo sconto percentuale pari al 5,00% (cinque per cento), pertanto ad un importo netto dei lavori pari ad € 25.199,72, compresi oneri per la sicurezza, per un importo quindi contrattuale di € 30.743,66 comprensivo di IVA come per legge, giusta Determinazione dell’Area Tecnica n. 30 del 23/04/2019;
•	con verbale di Consegna dei lavori, redatto in data 6 maggio 2019, sottoscritto dall’Impresa affidataria e dal R.U.P., le opere sono state consegnate alla ditta appaltatrice, con scadenza dell’ultimazione delle opere in data 5 giugno 2019;
•	con Determinazione U.T.C., n. 45 del 21/06/2019, sono stati approvati gli atti relativi al I° SAL dei lavori e saldate le seguenti somme:
a)	alla ditta “ASFALTI s.r.l.”, con sede in Grottazzolina (FM), alla Via Molino n. 14, P. IVA: 02160820441, l’importo dei lavori relativo al I° SAL di € 23.674,68, oltre IVA come per legge, oltre all’imposta di € 5.208,43, versata direttamente a favore dell’Erario (Split payment);

   DATO ATTO che, successivamente all’inizio delle opere, si è reso necessario effettuare alcune considerazioni sull’esecuzione lavori, che in fase di redazione del progetto esecutivo non è stato possibile prevedere, relative alla:
•	necessità di estendere la nuova pavimentazione a valle di Viale Della Libertà, in prossimità dell’intersezione con Via Roma e Via O. Licini, stante la vetustà dell’attuale pavimentazione;
•	modifica della previsione progettuale di rifacimento delle zanelle stradali, da non eseguirsi in Via Borgo Cavour, atteso che le stesse sono state realizzate dal Tennacola S.p.A., unitamente al rifacimento delle linee idriche, da estendere invece in Viale Della Libertà, senza comunque modificare le quantità progettuali;
•	modifica delle quantità di nuova pavimentazione stradale in Viale Della Libertà;

   CONSIDERATO:
•	che il Geom. Simone Perroni, R.U.P. dell’Ente, ha provveduto a trasmettere il Progetto di Variante dell’opera in parola, costituito da n. 4 elaborati tecnici e n. 1 tavole grafiche, come di seguito riportati:
-	Tav. A/v: Relazione tecnica illustrativa;
-	Tav. B/v: Computo metrico estimativo;
-	Tav. D/v: Quadro tecnico economico;
-	Tav. K/v: Computo metrico della sicurezza inclusa nei prezzi;
-	Tav. E1/v: Elaborato grafico;

Che in data 13 maggio 2019 il R.U.P., ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 50/2016, ha sottoposto a verifica il progetto esecutivo dei lavori ed alla validazione dello stesso; 

RILEVATO, dal progetto di variante dell’opera in parola, la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento è pari ad € 33.000,00, cosi divisa: 

Q.T.E.  PROGETTO DI VARIANTE IN  CORSO D’OPERA	
Importo Lavori (a)  €  27.939,26		
(di cui euro 689,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	 27.939,26			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	689,92			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  27.939,26			
Ribasso di gara 5,00% (d) = (c*d/100)	euro	 1.396,96			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 26.542,30			
Importo Contrattuale	euro	  26.542,30	euro	26.542,30	
	
Somme a disposizione					
B1-I.V.A. 22% su lavori	euro	5.839,31			
B2-Incentivo alla progett. R.U.P. 2%	euro	558,79			
B3-Imprevisti ed arrotondamenti		euro	59,60			
Totale somme a disposizione	euro	6.457,70	euro	6.457,70	
Totale generale del progetto esecutivo	€	33.000,00	

   DATO ATTO che il progetto in parola prevede il riutilizzo delle somme relative alle economie derivanti dal ribasso d'asta e dalla minore incidenza dell'IVA, nonché quelle relative agli imprevisti, per un miglioramento e completamento dell'opera, sia a livello funzionale che della sicurezza stradale;   

   VISTI: 
•	Il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
•	Il d.lgs. 18/04/2016, n. 50; 
•	Il D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.ii.;
•	I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

   CON voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

•	Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

•	Di approvare il progetto di variante e completamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria di strade comunali denominate Viale Della Libertà e Borgo Cavour”, redatto dall’Ing. Giovanni Verdicchio di Mogliano (MC), dell’importo complessivo di € 33.000,00, così suddiviso: 

Q.T.E.  PROGETTO DI VARIANTE IN  CORSO D’OPERA	
Importo Lavori (a)  €  27.939,26		
(di cui euro 689,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 	euro	 27.939,26			
Importo oneri sicurezza (b)	euro 	689,92			
Importo soggetto a ribasso (c) = (a-b)	euro	  27.939,26			
Ribasso di gara 5,00% (d) = (c*d/100)	euro	 1.396,96			
Importo al netto del ribasso (e) = (c-d)	euro	 26.542,30			
Importo Contrattuale	euro	  26.542,30	euro	26.542,30	
	
Somme a disposizione					
B1-I.V.A. 22% su lavori	euro	5.839,31			
B2-Incentivo alla progett. R.U.P. 2%	euro	558,79			
B3-Imprevisti ed arrotondamenti		euro	59,60			
Totale somme a disposizione	euro	6.457,70	euro	6.457,70	
Totale generale del progetto esecutivo	€	33.000,00	

•	Di dare atto:
-	che in data 13/05/2019 il R.U.P., Geom. Simone Perroni, ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n.50/2016; 
-	che le figure incaricate della realizzazione dell’opera di cui trattasi sono state individuate come appresso indicato: 
a)	Direttore dei lavori, contabilità, e certificazioni finali il R.U.P., Geom. Simone Perroni, Istruttore Direttivo dell’U.T.C.; 
-	che l’intera spesa di € 33.163,51, sarà finanziata con il contributo di  € 30.000,00, di cui alla Legge Regionale n. 51 del 28 dicembre 2018 - “Contributo straordinario al Comune di Massa Fermana per manutenzioni straordinarie stradali” e per la rimanenza con fondi comunali;

•	Di demandare al competente Responsabile del Servizio il compimento degli atti di gestione conseguenti.

•	Di approvare l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di portarla a esecuzone. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :	L.R. n. 51 DEL 28/12/2018. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DENOMINATE VIALE DELLA LIBERTA' E BORGO CAVOUR. VARIANTE IN CORSO D'OPERA

REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li  16-07-2019	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  Simone Perroni	
=====================================================================================
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 16-07-2019	IL RESPONSABILE DELL'AREA	
	F.to  GIUSEPPE DOTTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to  GILBERTO CARACENI
	SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 03-09-2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana,lì 03-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Massa Fermana, li   16-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pasquale Ercoli

--------------------------------------------------------------------------------------------------

È copia conforme all’originale.
Lì, 03-09-2019

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	 Pasquale Ercoli