COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Edilizia Scolastica Post Sisma

DETERMINAZIONE

N. 19 del 05-06-2019

Ufficio: EDILIZIA SCOLASTICA POST SISMA

Oggetto:	Realizzazione delle strutture di fondazione e delle opere di urbanizzazione per struttura scolastica provvisoria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.   Codice CUP: G29H18000180001 Cig: Z2426E1B66
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che in seguito agli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 nonché delle continue scosse di assestamento che si sono susseguite si sono verificati danni ingenti al patrimonio edilizio ed alle proprietà Comunali;
Dato atto che in seguito ai sopralluoghi effettuati dalle strutture preposte al controllo dell’agibilità degli immobili, gli edifici ospitanti la scuola primaria e la secondaria di Poggio Bustone sono stati dichiarati inagibili;
Dato atto cha la popolazione studentesca ha trovato collocazioni temporanee che richiedono sacrificio agli studenti, alle loro famiglie nonché organizzazione di trasporti e relativi oneri a carico della contabilità speciale sisma 2016;
Dato atto della disponibilità manifestata da parte del MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al finanziamento di un plesso realizzato mediante moduli prefabbricati su aree reperite e messe a disposizione direttamente dal comune e su progetto e D.L. a cura e finanziamento del comune stesso;
Dato atto della volontà dell’amministrazione comunale di realizzare un nuovo plesso scolastico temporaneo al fine di ridurre o annullare i sacrifici richiesti alla popolazione studentesca del comune di Poggio Bustone;
Visto il Decreto prot. 5281 del 12/09/2017 di nomina dell'ing. Massimiliano Giansanti a Responsabile del Settore Edilizia scolastica post sisma;
Vista la Determinazione n°2/2017 di individuazione del R.U.P. relativo alla costruzione del nuovo plesso scolastico temporaneo  in Poggio Bustone; 
Vista la Delibera di G.C. n° 75 del 19.10.2017 ad Oggetto: Sisma 2016. Approvazione I aggiornamento progetto di fattibilità tecnico economica "Intervento plesso scolastico provvisorio";
Visto il Decreto del MIUR, REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI. 578 del 29-11-2017 con il quale all’art. 1 è disposto in favore del Comune di Poggio Bustone (RI) il finanziamento dell’importo di € 650.000,00, comprensivo di I.V.A., sul cap. 7545 a valere sui residui di stanziamento dell’esercizio finanziario 2016 di lettera f), per finanziare la realizzazione di una struttura modulare da destinare a sede scolastica dell’Istituto comprensivo “D’Angeli – Cantalice”, dichiarato inagibile, nel Comune di Poggio Bustone (RI);
Vista la D.G.C. n°16 del 08/02/2018 ad oggetto: “Sisma 2016. Approvazione progetto definitivo "Intervento plesso scolastico provvisorio".
Dato atto che con det. N°  13 del 13.08.2018   veniva aggiudicata la fornitura delle strutture prefabbricate;
Dato atto che, con nota prot.n. 5903 DEL 11/09/2018  inviata a mezzo PEC in data 11/09/2018 è stata convocata Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto per la “MESSA IN OPERA DI STRUTTURE PROVVISORIE AD USO SCOLASTICO PER IL PLESSO SCOLASTICO DI POGGIO BUSTONE” ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, legge n. 241/1990,  
Dato atto che, in seguito all’offerta economicamente vantaggiosa ricevuta dalla ditta aggiudicataria la fornitura delle strutture prefabbricate,  con Deliberazione di Giunta Comunale N° 90  del 20/09/2018  veniva approvato il progetto esecutivo per "Intervento plesso scolastico provvisorio".

Dato atto che Con Determinazione n. 19 del 17/10/2018 è stata indetta la gara con procedura aperta per l’appalto relativo alla realizzazione delle strutture di fondazione e delle opere di urbanizzazione per struttura scolastica provvisoria; 

Vista la nota del  Ministero per i Beni e le attività culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina, Frosinone e Rieti prot. 14380 del 08/11/2018 pervenuta in data 09/11/2018 ed annotata al protocollo generale al n. 7401, con la quale lo stesso Ente esprime parere favorevole, per i soli aspetti di propria competenza,  ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 con le  prescrizioni di seguito elencate: 

-	“dato il potenziale interesse archeologico dell’area oggetto di intervento che siano realizzati dei sondaggi archeologici preventivi….  Eseguiti da ditta specializzata ovvero  operatore archeologico… che agirà sotto la direzione scientifica della Scrivente ed il cui curriculum dovrà essere sottoposto all’approvazione di questo Ufficio…. “

Vista la Determina n° 24 del 05/12/2018 con la quale si aggiudica definitivamente l’appalto relativo alla realizzazione delle strutture di fondazione e delle opere di urbanizzazione per struttura scolastica provvisoria alla Ditta EDILSTADE S.R.L. U.S. con P.IVA/C.F. 09194761004 e sede legale in Viale Gianluigi Bonelli n. 40 - Roma (RM); 

Vista la Determina n° 25 del 05/12/2018 di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi di cui sopra che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate; 

Vista la Determina n° 26 del 05/12/2018 con la quale si rimodulava il Quadro Economico post aggiudicazione lavori con la previsione di spesa per la stesura della relazione geologica per complessivi € 1.952,00 omnicomprensivi e del collaudo amministrativo e statico per complessivi €  11.612,75 + inarcassa al 4% pari ad €464,51 iva al 22% pari ad € 2.657,00 per un totale lordo di € 14.734,26 così come previsto dal D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013; 

Vista la Determina n° 27 del 13/12/2018 con la quale si affidava alla Dott.ssa Grazia Dionisi con studio in Cantalice – Via A. Costa n. 110 – CF.: DNS GRZ 77C43 H282G l’incarico per Consulenza archeologica, Redazione documentazione fotografica Stesura relazione archeologica finale così come previsto e concordato con il al  Ministero per i Beni e le attività culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina, Frosinone e Rieti; 

Vista la Determina n° 28 del 13/12/2018 con la quale si affidava all’Ing. Di Liginio Serafino nato a Petrella Salto (RI) il 31/07/1956 – C.F.  DLGSFN56L31G513A – iscritto all’albo degli ingegneri di Rieti al n. 277 , l’incarico per il collaudo amministrativo e statico, relativamente al progetto per  “MESSA IN OPERA DI STRUTTURE PROVVISORIE AD USO SCOLASTICO PER IL PLESSO SCOLASTICO DI POGGIO BUSTONE”; 

Vista la Determina n° 01 del 22/01/2019 con la quale si affidava alla Ditta DSD Costruzioni di Desideri Raul con sede in  Via della Vicenda snc  - 02018 Poggio Bustone  C.F. DSD RLA 65C15 G756F  – P. IVA 01160480578 –  l’incarico per l’esecuzione dei lavori di  “scavi e ripristino stato dei luoghi per attraversamento/fiancheggiamento Strada Provinciale per  allacci a pubblici servizi presso strutture modulari provvisorie ” per un importo di € 6.555,69 al netto di IVA al 22% pari ad € 1.442,25 per un totale quindi di € 7.997,94; 

Constatato che con relazione del 05/06/2019, il Direttore dei Lavori, ing. Massimiliano Giansanti, ha trasmesso di variante dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati:
a)	disegni e/o elaborati progettuali;
b)	computo metrico estimativo dei nuovi lavori;
c)	elenco dei nuovi prezzi;
d)	verbale per il concordamento dei nuovi prezzi;
e)	prospetto comparativo delle previsioni di spesa;
f)	schema atto di sottomissione.

Esaminati gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge come, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario prevedendo alcune variazioni realizzative sopravvenute durante l’esecuzione delle opere;

Ritenuto che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall’art. 106, comma C, lett. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;
Posto che la variante prevede il differimento del termine previsto per l’ultimazione dei lavori che sarà funzione della riconsegna lavori; 
Considerato che la variante proposta:
- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 4 dell’art. 106 precedentemente citato;
- comporta un aumento della spesa di € 630,10, pari al 0,452 % dell’importo originario del contratto e che pertanto rientra limiti fissati dall’art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e che non occorre prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già originariamente previst nel Quadro Economico di progetto;
Visto lo schema dell’atto di sottomissione del 05/06/2019 con cui la ditta Edilstrade appaltatrice dell’opera, dichiara di accettare l’esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d’opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 271 del 14/02/2019;
Autorizzata dal Responsabile del procedimento, ing. Massimiliano Giansanti la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori di cui in oggetto;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

DETERMINA

•	di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dal Direttore Lavori, ing. Massimiliano Giansanti in data 05/06/2019, composta dagli elaborati su richiamati, con proroga di giorni 30;
•	dare atto che la variante comporta un aumento della spesa di € 630,10 pari al 0,452 % del valore iniziale del contratto di lavori finanziato all’interno del Quadro Economico di progetto;
•	di assegnare, a tale lo scopo, le necessarie risorse finanziarie, ammontanti a complessivi € 630.10 + IVA al 10% al capitolo al cap. 2542 codice 04.02.2-02.01.09.003 “Strutture modulari da destinare a sede scolastica”; 
•	di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
•	di trasmettere il presente atto all’Ufficio Amministrativo ai fini di ottemperare agli obblighi di pubblicità nonché agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. Massimiliano Giansanti	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-07-2019 al 03-08-2019 al numero 619

Poggio Bustone  Lì  19-07-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 19-07-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. Massimiliano Giansanti