COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Edilizia Scolastica Post Sisma

DETERMINAZIONE

N. 5 del 04-03-2019

Ufficio: EDILIZIA SCOLASTICA POST SISMA

Oggetto:	Appalto relativo alla realizzazione delle strutture di fondazione e delle opere di urbanizzazione per struttura scolastica provvisoria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari ad Euro 139.551,92 (IVA esclusa). Codice CIG: 76604947A0 - Codice CUP: G29H18000180001 Approvazione e liquidazione I S.A.L.  Liquidazione Anticipazione
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che:
-	Con determina n. 24 del 05.12.2018, i lavori di realizzazione delle strutture di fondazione e delle opere di urbanizzazione per struttura scolastica provvisoria in oggetto sono stati affidati alla ditta EDILSTADE S.R.L. U.S. con P.IVA/C.F. 09194761004 e sede legale in Viale Gianluigi Bonelli n. 40 - Roma (RM)  per un importo netto di € 96.364,51 che sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.582,08 danno un importo contrattuale di € 101.946,59;
-	Il contratto relativo all’appalto di cui al precedente punto veniva firmato in  data 14.01.2019 con  rep. 271; 
-	Si procedeva alla consegna dei lavori in data 06.12.2018;
Vista la richiesta di anticipazione del 20% dell’importo delle lavorazioni presentata dalla ditta esecutrice; 
Visto l’articolo 24, comma 1, lettera c) del Decreto Correttivo 56/2017 introduce l’ultima modifica in ordine temporale precisando che il 20% deve essere rapportato all’importo del contratto d’appalto e non all’importo stimato dell’appalto;
Dato atto che per quanto previsto al punto precedente, l’importo dell’anticipazione ammonta ad € 22.428,25 + interessi; 
Vista la Polizza fidejussoria n°2019/50/2506563 emessa in data 28/02/2019 dalla compagnia Reale Mutua agenzia di 817 Lecce, dell’importo di € 20.076,00 a lordo degli interessi, a corredo della richiesta di anticipazione pervenuta in data 28/02/2019; 
Dato atto che essendo nel frattempo maturato il I SAL si deve procedere al parziale recupero dell’anticipazione che nella fattispecie ammonta ad € 6.486,48, pari al 28,92%, da scalare dalle somme in pagamento;
Dato atto quindi che l’anticipazione verrà erogata per un totale di € 15.941,77, inferiore alla somma garantita con la  polizza fidejussoria fornita;
Visti gli atti contabili relativi al I stato d’avanzamento depositato dal direttore dei lavori in data 28.2.2019, annotato sul protocollo informatico del Comune al numero 1357, dal quale risulta che la ditta appaltatrice EDILSTRADE  S.R.L. U.S  ha eseguito opere per l’importo netto di  € 29.484,00;
Visto il Certificato di Pagamento n°1 a tutto il 28/02/2019 per € 29.484,00 + iva al 10% pari ad € 2.948,40 per un totale di € 32.432,40;
Vista la Fattura n° 3 del 28.02.2019 presentata dalla ditta EDILSTRADE  S.R.L. U.S  pervenuta in data 01.03.2019 ed annotata al protocollo generale dell’Ente al n. 1390 di complessivi € 32.432,40 di cui € 29.484,00 per lavori ed € 2.948,40 per IVA al 10%; 
Vista la Fattura n° 4 del 01.03.2019 presentata dalla ditta EDILSTRADE  S.R.L. U.S  pervenuta in data 01.03.2019 ed annotata al protocollo generale dell’Ente al n. 1392 di complessivi € 33.771,56 di cui € 30.701,42  per ANTICIPAZIONE SUI  LAVORI ed € 3.070,14 per IVA al 10%;
Dato atto che la fattura è errata e quindi verrà richiesta nota di credito per la somma di € 17.829,79;
Considerato  che presa visione degli atti a disposizione dell’ufficio ed il sopralluogo effettuato nell’area di cantiere è possibile procedere all’approvazione e liquidazione del I stato d’avanzamento lavori;
-	Visto il d. Lgs 267/2000 e s.m.i;
-	Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-	Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante sostanziale del presente provvedimento che qui s’intendono riportate;

1.	Di approvare gli atti contabili relativi al I Stato d’Avanzamento dei Lavori di “realizzazione delle strutture di fondazione e delle opere di urbanizzazione per struttura scolastica provvisoria, eseguiti dall’impresa appaltatrice “EDILSTRADE  S.R.L. U.S  “ per l’importo di € 29.484,00;

2.	Di liquidare all’impresa appaltatrice la somma di € 32.432,40 di cui alla Fattura n. 3/2019 come sotto determinata:

-	Importo I. S.A.L.                   € 29.484,00
-	I.V.A al 10%	                     €   2.948,40
-	Importo complessivo             €  32.432,40

3.	Di liquidare all’impresa appaltatrice la somma di € 15.941,77 di cui alla Fattura n. 3/2019 come sotto determinata;

-	Imponibile ANTICIPAZIONE.                     	€  14.492,52
-	I.V.A al 10%	                    		 	€    1.449,25
-	Importo complessivo ANTICIPAZIONE     	€  15.941,77

4.	Di richiedere alla soc. Edilstrade nota di credito per errata fatturazione dell’anticipazione dell’importo lordo di € 17.829,79; 

5.	Di imputare la spesa complessiva di € 48.374,17 di cui imponibile € 43.976,52 ed iva al 10% pari ad € 4.397,65, sul capitolo 2542 codice 04.02.2-.02.01.09.003 “STRUTTURE MODULARI DA DESTINARE A SEDE SCOLASTICA” del bilancio provvisorio 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità;

6.	Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimento consequenziali;

7.	Dare altresì atto che responsabile unico del procedimento per l'attuazione dei lavori è l’ing. Massimiliano Giansanti dipendente del comune di Poggio Bustone con qualifica di Responsabile del Settore Edilizia Scolastica post-sisma;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. Massimiliano Giansanti	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-03-2019 al 19-03-2019 al numero 222

Poggio Bustone  Lì  04-03-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 04-03-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. Massimiliano Giansanti