COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Edilizia Scolastica Post Sisma

DETERMINAZIONE

N. 9 del 29-05-2018

Ufficio: EDILIZIA SCOLASTICA POST SISMA

Oggetto:	Appalto dei lavori di "Recupero dell'agibilità in conseguenza all'evento sismico del 24/08/2016 relativamente alla SCUOLA DELLINFANZIA DON GIOVANNI MINOZZI classificata parzialmente inagibile con il sopralluogo del 02.09.2016". Approvazione e liquidazione STATO FINALE Codice CUP: G24H16001250005  - Codice CIG: Z21C84B28.
Cig: Z21C84B28	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che:

-	Con determina n. 87 del 28.12.2016, i lavori di sistemazione dell’edificio scolastico in oggetto sono stati affidati alla ditta La Futura 95 di Rubimarca Maurizio con sede in Poggio Bustone per l’importo di € 32.222,59 al netto degli oneri di sicurezza stimati in €1.995,18 a cui corrisponde un importo contrattuale di € 34.217,77;
-	Il contratto relativo all’appalto di cui al precedente punto veniva firmato in  data 24.01.2017 con  rep. 264;
-	Si procedeva alla consegna dei lavori in data 27.1.2017;

Considerato che in corso d’opera, sulla parte di edificio in muratura,  venivano riscontrate  carenze strutturali della copertura   qualificate pre sisma 2016,  non rilevate in sede di verifiche AeDES e seguenti; 

Considerato che per quanto rilevato in corso d’opera,  ai fini della corretta applicazione dell’ ordinanza 388/2016, in data 02.2.2017 l’ingegnere Trinetta Andrea in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori,  disponeva la sospensione dei lavori e chiedeva autorizzazione alla elaborazione di una perizia di variante; 

Vista la Determina n° 65 del settore Tecnico LL.PP.  del 26.08.2017 con la quale si procedeva all’approvazione di una Perizia di Variante presentata dal Direttore dei Lavori che prevede un  aggiornamento in diminuzione di spesa  con il Quadro Economico dell’opera, come di seguito in dettaglio: 

A 	LAVORI			
A1	Lavori a misura		€ 27.226,34	
A2	Oneri di sicurezza	€    1.685,82		
				
	Totale A 		€ 28.912,16	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori imprevisti  su lavori i.v.a esclusa	€    1.685,84		
B.2	Spese tecniche per progettazione globale, preliminare, definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori, contabilità e misure. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 	€    5000,00		
B3	Oneri previdenziali 4% su B2	   €  200,00		
B.3	Accantonamento  ex art. 92 D.Lgs 163/06	€      134,87		
B.4	C.N.P.A.IA.  al 4% su  B2	€      200,00		
B.5	I.V.A. al 10% su   lavori e imprevisti	€    3.059,80		
B.6	I.V.A al 22%  su spese tecniche	€    1.144,00		
	TOTALE B		€ 11.224,51	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 40.136,67	

Vista la Determina n° 7 del 12.02.2018 con la quale si approvava e liquidava il I Stato di Avanzamento dei Lavori per un importo pari ad per € 16.234,77 + iva al 10% pari ad € 1.623,48 per un totale di € 17.858,25; 
Visti gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori depositato dal direttore dei lavori in data 27.09.2017, annotato sul protocollo informatico del Comune al numero 5784, dal quale risulta che la ditta appaltatrice La Futura 95 di Rubimarca Maurizio ha eseguito opere per l’importo complessivo  netto di  € 28.912,16 distinto in € 27.226,34 per netto lavori a corpo ed € 1.685,82 per Oneri della Sicurezza, dal quale detratta la somma di € 16.234,77 relativa al PRIMO S.A.L. resta un credito dell’Impresa pari ad € 12.677,39 
Visto il Certificato di Pagamento n°2 a tutto il 04/09/2017 per € 12.677,39 + iva al 10% pari ad € 1.267,74 per un totale di € 13.945,13;
Visto il Certificato di Ultimazione Lavori alla data del 12/09/2017;  
Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione presentata dal direttore dei lavori in data 07/10/2017 annotata sul protocollo informatico del Comune al numero 6085;
Vista la Fattura n° 01/PA del 25.03.2018 presentata dalla ditta La Futura 95 di Rubimarca Maurizio pervenuta in data 05.04.2018 ed annotata al protocollo generale dell’Ente al n. 2161 di complessivi € 13.945,13 di cui € 12.677,39 per lavori ed € 1.267,74 per IVA al 10%;  
Considerato  che presa visione degli atti a disposizione dell’ufficio ed il sopralluogo effettuato nell’area di cantiere è possibile procedere all’approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei lavori;
-	Visto il d. Lgs 267/2000 e s.m.i;
-	Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-	Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante sostanziale del presente provvedimento che qui s’intendono riportate;

1.	Di Approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “Recupero dell'agibilità in conseguenza all'evento sismico del 24/08/2016 relativamente alla SCUOLA DELL’INFANZIA DON GIOVANNI MINOZZI, eseguiti dall’impresa appaltatrice “La Futura 95 di Rubimarca Maurizio “ con il seguente Quadro Economico

A	LAVORI			
A1	Lavori a misura		€ 27.226,34	
A2	Oneri di sicurezza	€    1.685,82		
				
	Totale A		€ 28.912,16	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori imprevisti  su lavori i.v.a esclusa	€    1.685,84		
B.2	Spese tecniche per progettazione globale, preliminare, definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori, contabilità e misure. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	€    5000,00		
B3	Oneri previdenziali 4% su B2	€  200,00		
B.3	Accantonamento  ex art. 92 D.Lgs 163/06	€      134,87		
B.4	C.N.P.A.IA.  al 4% su  B2	€      200,00		
B.5	I.V.A. al 10% su   lavori e imprevisti	€    3.059,80		
B.6	I.V.A al 22%  su spese tecniche	€    1.144,00		
	TOTALE B		€ 11.224,51	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 40.136,67	

2.	Di approvare il II ed ultimo SAL dal quale si evince il credito dell’imresa di € 12.677,39 + iva;
3.	Di Liquidare all’impresa appaltatrice  A SALDO la somma di € 13.945,13 di cui alla Fattura n. 01/PA/2018 come sotto determinata:
-	Importo Stato Finale.                   € 12.677,39
-	I.V.A al 10%	                     	  €   1.267,74
-	Importo complessivo            	  €  13.945,13

4.	Di imputare la spesa di € 13.945,13 sul capitolo 2541 codice 04.02.-2.02.01.09.000 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici a seguito sisma” del Bilancio Comunale 2018 in conto residui;

5.	Dare altresì atto che responsabile unico del procedimento per l'attuazione dei lavori è l’ing. Massimiliano Giansanti dipendente del comune di Poggio Bustone con qualifica di Responsabile del Settore Edilizia Scolastica post-sisma;

6.	Di Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimento consequenziali;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Massimiliano Giansanti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	

Poggio Bustone lì  29-05-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-06-2018 al 22-06-2018 al numero 374

Poggio Bustone  Lì  07-06-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 07-06-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Arch. Massimiliano Giansanti