COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 23 del 27-03-2017

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	PROGETTO DI   MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE AMBULATORIO MEDICO -   APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE SENZA AUMENTO DI SPESA. CUP 12000460002. CIG.4684772C24
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  PREMESSO :

- che con  comunicazione protocollo 355187 del 10.08.2012 pervenuta al Comune di Poggio Bustone in data 17 agosto 2013 protocollo 3898 la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio metteva a conoscenza l’Amministrazione comunale che l’edificio di proprietà comunale “ Ambulatorio medico” era stato individuato tra quelli destinatari di fondi per gli interventi di miglioramento sismico;   

- che con note protocollo 397205 e del 12 settembre 2013 pervenuta a questo comune in data 18 settembre 2013 protocollo 4310 venivano stabilite le modalità ed i tempi di attuazione del progetto. 

- che con determina dirigenziale n 128 in data 08.11.2012 è stato incaricato il Dott. Chiaretti Francesco di Leonessa della predisposizione della relazione geologica

- che  con determina dirigenziale n 130 in data 12.11.2012 è stato incaricato della progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e sicurezza in fase di progettazione l’Ing. Romeo Bucci e l’Ing. Silvi Emanuele riuniti in associazione temporanea;

- che con determina dirigenziale n 129 in data 08.11.2012 è stato affidata la sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Spadoni Massimiliano; 

-	Con delibera di C.C. N. 16 del 12.09.2012 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il programma triennale per il periodo 2012,2013,2014 e l'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare per il 2013;
-	Con delibera di Giunta Comunale n° 24 del 12.02.2013 sono stati approvati gli elaborati del PROGETTO DEFINITIVO dei lavori di “Miglioramento sismico ambulatorio medico” ed il relativo Quadro Tecnico Economico; 
-	Che con determina dirigenziale n 75 del 01.07.2013 è stato approvato con allegato il quadro tecnico economico sotto riportato:

A	LAVORI	 	 	
  	Importo lavori a base d’asta	€	 469.603,24	
 1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  23.140,77	
 2	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	 446.462,47	
				
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1	Lavori in economia	€	  10.000,00	
b2 	Indagine geologica certificata	€	  12.000,00	
b3	Relazione geologica	€	  17.000,00	
b4	Indagine certificata sulle strutture	€	   9.700,00	
b5	Rilievi topografici 	€	   2.000,00	
b6	Allacciamento pubblici servizi 	€	   3.128,23     	
b7	Imprevisti	€	  16.110,69	
b8	Collaudo	€	   5.000,00	
b9 	Spese tecniche progettazione,DL,contabilità  
Sicurezza in fase di progettazione 	€	  78.000,00	
b10 	Spese per attività tecnico amministrativa	€	   9.326,22	
b11	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€	  10.012,32	
b12	Spesa per eventuali commissioni	€	   3.000,00	
b13	Spese per pubblicità	€	   1.500,00	
b14	CNPAIA 4% su 3+5+8+9+11	€	   4.480,29	
b15	I.V.A.	€	  79.563,81	
b16	Versamento autorità LLPP	€	     225,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 261.046,76	
				
	TOTALE GENERALE	€	 730.650,00	

-	Che il R.U.P. ha appaltato i lavori mediante PROCEDURA NEGOZIATA ed affidamento con il criterio DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA;
-	Che con verbale di aggiudicazione provvisoria in data 19.11.2013 protocollo 4884 è risultata aggiudicataria la ditta  COGEAS srl con sede in Poggio Bustone, Via della Vicenda che ha offerto un ribasso del 3.15 %  con un punteggio finale di 78,5 punti su 100 ;

Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione e del conseguente ribasso del 3,15 % è stato  rideterminato il Quadro Tecnico Economico dell’opera come di seguito riportato :

A	LAVORI	 	 	
  	Importo lavori a base d’asta	€	 455.539,67	
 1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  23.140,77	
 2		€	 	
				
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1	Lavori in economia	€	  10.000,00	
b2 	Indagine geologica certificata	€	  12.000,00	
b3	Relazione geologica	€	  17.000,00	
b4	Indagine certificata sulle strutture	€	   9.700,00	
b5	Rilievi topografici 	€	   2.000,00	
b6	Allacciamento pubblici servizi 	€	   3.128,23     	
b7	Imprevisti	€	  16.110,69	
b8	Collaudo	€	   5.000,00	
b9 	Spese tecniche progettazione,DL,contabilità  
Sicurezza in fase di progettazione 	€	  78.000,00	
b10 	Spese per attività tecnico amministrativa	€	   9.326,22	
b11	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€	  10.012,32	
b12	Spesa per eventuali commissioni	€	   3.000,00	
b13	Spese per pubblicità	€	   1.500,00	
b14	CNPAIA 4% su 3+5+8+9+11	€	   4.480,29	
b15	I.V.A.	€	  78.143,16	
b16	Versamento autorità LLPP	€	     225,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 259.626,11	
				
	TOTALE GENERALE	€	 715.165,78	

-	Che con determina n 119 in data 03.12.2013 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva alla ditta COGEAS srl con sede in Poggio Bustone, Via della Vicenda s.n.c.;
-	Che  in data 3.12.2013 è stato rogato il contratto d’appalto rep. 253/2013;
-	Che i lavori sono iniziati il 5.12.2013 contestualmente alla elaborazione e sottoscrizione del verbale di consegna; 
-	Che in data 03.11.2014, con determina n. 68, è stata approvata la prima perizia di variante senza aumento di spesa;
Vista la comunicazione della Direzione Lavori  in data 05.08.2015 annotata la protocollo generale al n° 3253 con la quale la stessa D.L.  propone la SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA composta dai sotto elencati elaborati:
1.	Relazione tecnica illustrativa
2.	Elaborato grafico – stato futuro
3.	Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi
4.	Computo metrico estimativo;  5)Quadro comparativo  

Vista la nota protocollo n. 2015-0000452762 dell’8.9.2015 Posizione 1254/C/V Rilasciata dalla Regione Lazio Area Genio civile Lazio Nord, ad oggetto autorizzazione sismica per inizio lavori;

Visto la nota protocollo 18241 del 6.10.2015 con la quale La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma Frosinone, Latina e Viterbo hanno confermato parere favorevole alla esecuzione dei lavori portati nella perizia di Variante in argomento;

Vista la nota integrativa espressamente richiesta dal R.U.P. scrivente, depositata  dalla Direzione Lavori in data 12.08.2015 annotata al protocollo generale al n° 3375, a corredo ed integrazione della perizia di Variante Suppletiva testè richiamata 

Vista la determina n. 78 del 24.10.2015  con la quale è stata approvata la  II°  perizia di variante suppletiva  dei lavori  per  l’importo di € 706.697,99 come di seguito determinata:

A	LAVORI	 	 	
 1 	Importo lavori a misura 	€	 461.880,10	
 2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  23.140,77	
 		€	 	
				
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1	Lavori in economia	€	  0,00	
b2 	Indagine geologica certificata	€	  12.000,00	
b3	Relazione geologica	€	  17.000,00	
b4	Indagine certificata sulle strutture	€	   9.700,00	
b5	Rilievi topografici 	€	   2.000,00	
b6	Allacciamento pubblici servizi 	€	   3.128,23     	
b7	Imprevisti	€	  0,00	
b8	Collaudo	€	   5.000,00	
b9 	Spese tecniche progettazione,DL,contabilità  
Sicurezza in fase di progettazione 	€	  87.329,28	
b10 	Spese per attività tecnico amministrativa	€	   9.326,22	
b11	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€	  10.012,32	
b12	Spesa per eventuali commissioni	€	   3.000,00	
b13	Spese per pubblicità	€	   1.500,00	
b14	CNPAIA 4% su 3+5+8+9+11	€	   4.853,66	
b15	I.V.A.	€	  79.743,18	
b16	Versamento autorità LLPP	€	     225,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 244.817,89	
				
	TOTALE GENERALE	€	 706.697,99	

Visto l’atto di sottomissione repertorio 260 del  3.12.2015  sottoscritto dall’appaltatore in segno di accettazione dei lavori di variante;

Vista l’autorizzazione ai sensi  degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 sulla variante al progetto già approvato con posizione 1254  dell’11.3.2013 rilasciato dalla Regione Lazio Assessorato Infrastrutture politiche abitative, Ufficio del Genio di Rieti;
Vista la determinazione n. 26/2015, rilasciata ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004in data  2.11.2015 ai sensi  della legge regionale 59 del 19.12.1995
Visto l’accertamento di conformità all’articolo 146 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42, rilasciato dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina Rieti e Viterbo in data 6.10.2015;

Vista la nota trasmessa in data 22.3.2017, protocollo numero 1781, con la quale la direzione dei lavori ha trasmesso perizia di assestamento finale costituita dai seguenti elaborati:
-	Quadro comparativo;
-	Computo perizia  assestamento finale;
-	Quadro tecnico economico; 

Dato atto che la perizia  testè richiamata  riporta il quadro tecnico economico assestato seguente:

A	LAVORI	 	 	
  	Importo lavori a misura 	€	 463.873,00	
 1	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  23.140,77	
 2		€	 	
				
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1	Lavori in economia	€	  0,00	
b2 	Indagine geologica certificata	€	  12.000,00	
b3	Relazione geologica	€	  17.000,00	
b4	Indagine certificata sulle strutture	€	   9.700,00	
b5	Rilievi topografici 	€	   2.000,00	
b6	Allacciamento pubblici servizi 	€	   3.128,23     	
b7	Imprevisti	€	  0,00	
b8	Collaudo	€	   5.000,00	
b9 	Spese tecniche progettazione,DL,contabilità  
Sicurezza in fase di progettazione 	€	  87.329,28	
b10 	Spese per attività tecnico amministrativa	€	   9.326,22	
b11	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€	  10.012,32	
b12	Spesa per eventuali commissioni	€	   3.000,00	
b13	Spese per pubblicità	€	   1.500,00	
b14	CNPAIA 4% su 3+5+8+9+11	€	   4.816,78	
b15	I.V.A.	€	  87.176,08	
b16	Versamento autorità LLPP	€	     225,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 251.291,99	
				
	TOTALE GENERALE	€	 715.165,88	

Ritenuto, in relazione agli atti trasmessi procedere alla perizia di assestamento finale dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio di proprietà comunale adibito ad ambulatorio medico;

Visto il D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
Visto il D.lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
Visto il d.Lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Per la causale in narrativa che qui s’intende integralmente richiamata ed approvata:

1.	di approvare la PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE dei lavori di Miglioramento sismico dell’edificio comunale adibito ad ambulatorio medico trasmessa il 22.3.2017  dal direttore dei lavori ingegnere Bucci Romeo;
2.	Di approvare il nuovo quadro tecnico economico assestato  come di seguito dettagliato

A	LAVORI	 	 	
  	Importo lavori a misura 	€	 463.873,00	
 1	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  23.140,77	
 2		€	 	
				
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1	Lavori in economia	€	  0,00	
b2 	Indagine geologica certificata	€	  12.000,00	
b3	Relazione geologica	€	  17.000,00	
b4	Indagine certificata sulle strutture	€	   9.700,00	
b5	Rilievi topografici 	€	   2.000,00	
b6	Allacciamento pubblici servizi 	€	   3.128,23     	
b7	Imprevisti	€	  0,00	
b8	Collaudo	€	   5.000,00	
b9 	Spese tecniche progettazione,DL,contabilità  
Sicurezza in fase di progettazione 	€	  87.329,28	
b10 	Spese per attività tecnico amministrativa	€	   9.326,22	
b11	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€	  10.012,32	
b12	Spesa per eventuali commissioni	€	   3.000,00	
b13	Spese per pubblicità	€	   1.500,00	
b14	CNPAIA 4% su 3+5+8+9+11	€	   4.816,78	
b15	I.V.A.	€	  87.176,08	
b16	Versamento autorità LLPP	€	     225,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 251.291,99	
				
	TOTALE GENERALE	€	 715.165,88	

3.	Di dare atto che la perizia di assestamento  di cui sopra non comporta aumento di spessa rispetto al Quadro Tecnico Economico dell’opera post gara; 

4.	Di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento è imputabile al capitolo di bilancio 2361 cod.02.01.02.01.00 “miglioramento sismico edifici di interesse strategico”

5.	Trasmettere la presente al Sindaco al Segretario comunale ed  ragioniere capo per il seguito di competenza

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2017 al 18-05-2017 al numero 338

Poggio Bustone  Lì  03-05-2017

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 03-05-2017 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti