COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 48 del 15-05-2018

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	" Fondo unico regionale per il turismo" lavori di  manutenzione straordinaria dei rifugi montani prati San Giacomo e Capo Lupo. LR 4/2006 ART. 175. APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso: 
Con delibera di G.C. n   123  del  30.09.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2011,2012,2013 ed il Piano annuale delle opere pubbliche da realizzare nel 2010.

Che nel suddetto Piano Annuale delle opere pubbliche 2011  è stato prevista l’opera di cui all’oggetto.

Che con  il n 13147 del registro cronologico degli atti in data 10 settembre 2010 è stata registrata la Convenzione tra la Regione Lazio  e l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. quale soggetto erogatore dei contributi concessi con Determine Dirigenziale n C0409 del 24.02.2010 tra i quali è compreso quello in oggetto per un importo di € 180.000,00 su totale di progetto di € 216.000,00.

Che con delibera di G.C. n n 144 in data 15.10.2009 il comune di Poggio Bustone adottava l’atto di impegno con cui  contribuiva all’importo   con il 20%  al costo totale della spesa.

Che con determinazione n 61 in data 05.11.2009 veniva incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e della contabilità il Geom. Sabetta Daniele.

Che con determinazione n 62 del 05.11.2009  è stato incaricato il Geom. Rosi Fausto  della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Che in data 23.11.2009 il Geom. Sabetta Daniele provvedeva a rimettere il progetto definitivo ed esecutivo, per il quale nella stessa data veniva sottoscritto con il RUP il verbale di validazione.
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del  23.11.2009   veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori  di “LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIFUGI MONTANI PRATI SAN GIACOMO E CAPO LUPO ” dell’importo complessivo di € 216.000,00 .
Visto il Verbale di gara redatto in data 28.04.2011 con il quale si affidano i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIFUGI MONTANI PRATI SAN GIACOMO E CAPO LUPO” alla ditta FERRI SIMONE srl Strada di Passo Corese 020240 Vavone (RI) che ha offerto il ribasso del 3,57%% (TRE,CINQUATASETTE%) e quindi per un importo netto di € 152.744,69 diconsi euro centocinquantaduemilasettecentoquarantaquattro/69; 
Vista la Determina n° 42 del 28.04.2011 con la quale si approva il verbale di gara ed il Q.T.E. rideterminato a seguito del ribasso in sede di gara;   
Vista la Determina n 67 del 21.07.2011 di aggiudicazione definitiva alla ditta Ferri Simone;
Vista la perizia di variante rimessa dal Direttore dei lavori  10 gennaio 2013 protocollo 146 che senza alterare le finalità dell’intervento tiene conto del nuovo stato di fatto;
Vista la determina  n 52 del 16 maggio 2013 che approva la perizia di variante; determinando il quadro economico come di seguito riportato :

A	LAVORI	 	 	
 1	Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€	153.340,52	
 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  6.326,61	
				
	TOTALE LAVORI	€	159.667,13	
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
 1	Spese tecniche	€	 20.000,00	
 2	Incentivo ex art. 18 2,0%	€	  2.614,16	
 3	Imprevisti IVA compresa 	€	   	
 4	Spese coordinatore sicurezza compreso IVA e cassa	€	 10.000,00	
 5	Spese per accertamenti di laboratorio 	€	   	
 6 	I.V.A. sui lavori 10 %	€	 15.966,71	
 7	I.V.A. 21% e cassa su spese tecniche 4%	€	  7.752,00	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 56.332,87	
				
	TOTALE GENERALE	€	216.000,00	

Vista la determina n 65  del 24.10.2014 che approva il primo stato di avanzamento lavori ed il primo certificato di pagamento rimesso dal Direttore dei lavori Geom Sabetta Daniele in data 25 ottobre 2014 protocollo per un importo di € 21.800,00 oltre IVA 10%  € 2.180,00 per un totale di € 23.980,00; 

Vista la disposizione n° 67 del 03.11.2014 con la quale si liquida il PRIMO S.A.L. dell’importo di € 21.800,00 + IVA 10 % (€ 2.180,00)  per un totale di € 23.980,00;

Vista la determina n 80  del 24.10.2015 che approva e liquida il SECONDO S.A.L. unitamente al Certificato di Pagamento n° 2,   per un importo di € 50.000,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 5.000,00 per un totale di € 55.000,00; 

Considerato che il direttore dei lavori, geometra Sabetta Daniele in relazione a sopravvenute modifiche normative sullo smaltimento delle acque reflue,  ha chiesto autorizzazione ad effettuare specifica perizia di variante necessaria a rendere agibili i rifugi;

Considerato che   con lettera n. 6682 dell’8.12.2016 questo Ufficio ha chiesto alla Regione Lazio, Area Regionale del Turismo autorizzazione  per la redazione di una seconda variante in corso d’opera al progetto presentato;

Preso atto che la Regione Lazio  Assessorato Agenzia Regionale del Turismo, con lettera in data 15.12.2016, protocollo numero 624002, ha comunicato che deve essere trasmesso provvedimento di adozione della variante, del nuovo quadro economico, di idonea relazione tecnica  e nuovo crono programma;

Vista la nota in data 20.2.2017,  pervenuta a mezzo posta elettronica certificata con la quale il direttore dei lavori geometra Daniele Sabetta ha comunicato che per dare corso alla perizia di variante e quindi alla tipologia  di impianto fognario da prevedere nel rifugio Capo Lupo” si deve effettuare una verifica sulla natura e stratigrafia del terreno; 

Considerato che è stato contattato il Geologo Federico Sabatini il quale con nota del  24.3.2017 prot. numero 1824, dichiara di essere disposto ad effettuare le indagini sopra riportate per l’importo di € 1500,00 I.V.A. e c.p.a. compresi;

Vista la Determina n° 40 del 12.05.2017 con la quale si incarica il Geologo Sabatini Federico – dello Studio S.G.A. per le indagini necessarie al prosieguo dei lavori;

Vista la Relazione Geologica trasmessa dal professionista incaricato Geologo Sabatini Federico  in data 12.05.2017 annotata al protocollo al n. 2887;

Dato atto che il Direttore dei lavori Geom. Sabetta Daniele ha trasmesso in data 01.02.2018 una SECONDA PERIZIA DI VARIANTE inerente le lavorazioni di cui: 
-	all’impianto fognario, 
-	realizzazione della recinzione in legno
-	apposizione pavimentazione in lastre di gres  con finitura “finto” legno

composta dai seguenti elaborati:

1.	ELABORATO GRAFICO ARCHITETTONICO (RIFUGIO CAPO LUPO)
2.	RELAZIONE TECNICA (RIFUGIO CAPO LUPO)
3.	ELABORATO GRAFICO ARCHITETTONICO (RIFUGIO PRATI S. GIACOMO
4.	RELAZIONE TECNICA (RIFUGIO PRATI S. GIACOMO)
5.	QUADRO ECONOMICO
6.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7.	ELENCO PREZZI
8.	QUADRO COMPARATIVO
9.	ATTO DI SOTTOMISSIONE
10.	CRONOPROGRAMMA

Dato atto che la SECONDA PERIZIA DI VARIANTE in parola modifica il Quadro Tecnico Economico dell’opera come di seguito in dettaglio: 

A	LAVORI	 	 	
 1	Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€	154.664,58	
 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  6.682,94	
				
	TOTALE LAVORI	€	161.347,52	
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
 1	Spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità 	€	 22.447,94	
2	Spese per sondaggio e Relazione Geologica compreso Iva e cassa 	€	1.500,00	
 2	Incentivo ex art. 18 2,0%	€	  3.341,47	
 3	Imprevisti IVA compresa 	€	   	
 4	Spese coordinatore sicurezza compreso IVA e cassa	€	 8.500,00	
 5	Spese per accertamenti di laboratorio 	€	   	
 6 	I.V.A. sui lavori 10 %	€	 16.134,75	
 7	I.V.A. 21% e cassa 4% su spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità	€	  2.728,32	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 54.652,48	
				
	TOTALE GENERALE	€	216.000,00	

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della SECONDA PERIZIA DI VARIANTE presentata dal Direttore dei Lavori 

Dato atto che la spesa trova copertura tra le somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico dell’opera con imputazione al capitolo  3075 del  codice 2.09.06.01 “contributi della regione Lazio per la sistemazione dei rifugi montani”; 

Vista la documentazione prodotta;
Visto il Decreto Lgs 267/2000
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 163/2006
Visto il D.Lgs 50/2016

DETERMINA

Per la causale in narrativa che qui s’intende integralmente richiamata ed approvata:

1.	di approvare la perizia di variante proposta dal tecnico incaricato Geom. Sabetta Daniele in    
      data 02 febbraio 2018 protocollo 735 composta dai seguenti elaborati ;

1.	ELABORATO GRAFICO ARCHITETTONICO (RIFUGIO CAPO LUPO)
2.	RELAZIONE TECNICA (RIFUGIO CAPO LUPO)
3.	ELABORATO GRAFICO ARCHITETTONICO (RIFUGIO PRATI S. GIACOMO
4.	RELAZIONE TECNICA (RIFUGIO PRATI S. GIACOMO)
5.	QUADRO ECONOMICO
6.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7.	ELENCO PREZZI
8.	QUADRO COMPARATIVO
9.	ATTO DI SOTTOMISSIONE
10.	CRONOPROGRAMMA

2.	di dare atto che  il quadro economico rideterminato in base al ribasso del 3,57 % ed alla variante presentata dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIFUGI MONTANI PRATI SANGIACOMO E CAPO LUPO” il 02 febbraio 2018 protocollo 735 per l'importo di € 216.000,00 risulta come di seguito riportato ;

A	LAVORI	 	 	
 1	Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€	154.664,58	
 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  6.682,94	
				
	TOTALE LAVORI	€	161.347,52	
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
 1	Spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità 	€	 22.447,94	
2	Spese per sondaggio e Relazione Geologica compreso Iva e cassa 	€	1.500,00	
 2	Incentivo ex art. 18 2,0%	€	  3.341,47	
 3	Imprevisti IVA compresa 	€	   	
 4	Spese coordinatore sicurezza compreso IVA e cassa	€	 8.500,00	
 5	Spese per accertamenti di laboratorio 	€	   	
 6 	I.V.A. sui lavori 10 %	€	 16.134,75	
 7	I.V.A. 21% e cassa 4% su spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità	€	  2.728,32	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 54.652,48	
				
	TOTALE GENERALE	€	216.000,00	

3.	Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Angelo Battisti ;
.
4.	Di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento è imputabile al capitolo 3075 del  codice 2.09.06.01 contributi della regione Lazio per la sistemazione dei rifugi montani per € 180.000,00 e 3075 art.1  per € 36.000,00 avanzo di amministrazione dell’anno 2008;

5.	Trasmettere la presente al Segretario comunale ed al ragioniere capo per il seguito di competenza

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-05-2018 al 06-06-2018 al numero 357

Poggio Bustone  Lì  22-05-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 22-05-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti