COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 75 del 05-07-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	LAVORI DI "INCREMENTO DELLEFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SERVIZI E CAMPO DI CALCIO COMUNALE" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE Cig: 6424139734
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-	che  il  comma  9  dell’art.  18  del  decreto-legge 21  giugno 2013, n.  69,  concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 – S.O.n.63, ha destinato l’importo di 100 milioni di euro alla realizzazione di “Misure per il rilancio delle infrastrutture” nei piccoli Comuni;

-	che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2014)”,  ha  destinato l’ulteriore importo di 50 milioni di euro per il rifinanziamento delle medesime misure;

-	che il Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 164 dell’11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014 n. 262 – S.O., all’art. 3 prevede il finanziamento di una serie di opere elencate al comma 2, suddivise in tre tipologie contraddistinte con la lettera a), b) e c).;

-	che il successivo comma 3 prevede che le suddette richieste, inviate ai sensi dell’art. 18, comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013, possano essere riferite anche a “nuovi progetti di interventi secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del  territorio, mediante  recupero e  riqualificazione di  volumetrie esistenti e  di  aree dismesse, nonché alla  riduzione del  rischio idrogeologico; b)  alla  riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione  di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

-	che lo stesso comma stabilisce in 100 milioni di euro l’importo stanziato per finanziare i suddetti nuovi progetti;

-	che per l'ammissione al predetto programma di finanziamento è prevista una soglia minima per singolo importo di progetto non inferiore ad € 100.000,00 e non superiore ad € 400.000,00 dovendosi prevedere, nel caso di importo progettuale superiore a detta soglia massima, la copertura economica dell'eccedenza a carico del soggetto richiedente,  nonché l’approvazione del progetto dell’intervento redatto almeno a livello definitivo,.

-	che il Decreto 6 Marzo 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in GU Serie Generale n.97 del 28-04-2014,  approva la convenzione MIT-ANCI  disciplinante i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse del programma “Nuovi Progetti di interventi”

VISTA E RICHIAMATA la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Anci, sottoscritta in data 05 marzo 2015 approvata con DM 88 del 06.03.2015, che disciplina, in ottemperanza al Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 164 dell’11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014 n. 262 – S.O., i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi “Nuovi progetti di Interventi”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30.04.2015 di approvazione del progetto definitivo avente per oggetto la realizzazione degli interventi di riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale, nonché di realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili  e denominato “Lavori di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili in edificio comunale adibito a servizi e campo sportivo comunale”; e costituito dai seguenti elaborati:

•	Relazione generale (Elaborato 01);
•	Relazione tecnica (Elaborato 02);
•	Elaborati grafici (Elaborati 03 - 06);
•	Elenco prezzi unitari (Elaborato 07);
•	Analisi nuovi prezzi (Elaborato 08);
•	Computo metrico estimativo (Elaborato 09);
•	Quadro economico (Elaborato 10);
•	Cronoprogramma lavori (Elaborato 11);
•	Piano di Sicurezza e Coordinamento (Elaborato 12);
•	Schema di contratto (Elaborato 13);
•	Capitolato speciale d’appalto (Elaborato 14);
•	Documentazione fotografica  (Elaborato 15).

ATTESO che l'importo totale del progetto, al lordo degli accantonamenti di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010, è di € 399.321,08 come risultante nel quadro economico di progetto di seguito riportato ;

QUADRO ECONOMICO

	A)	LAVORI	€	331.579,57			
									
		A.1.	Lavori a base d'asta	€	324.665,62			
									
		A.2.	Oneri per la Sicurezza	€	6.913,96			
	B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	67.741,51			
								
		B.1.	Art.92 D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. (IVA Inclusa)	€	7.105,28			
									
			B.1.1.	Art.92 D.Lgs 163/06 ss.mm.ii.	€	5.600,00			

			B.1.2.	Inarcassa 4%	€	224,00			
			B.1.3.	IVA 22%	€	1.281,28			
		B.2.	Spese Tecniche Progettazione Esecutiva (IVA Inclusa)	€	5.836,48			
								
			B.2.1.	Progettazione esecutiva	€	4.600,00			

			B.2.2.	Inarcassa 4%	€	184,00			
			B.2.3.	IVA 22%	€	1.052,48			
		B.3.	Spese Tecniche Direzione Lavori e contabilità (IVA Inclusa)	€	5.709,60			
								
			B.3.1.	Direzione dei Lavori e Contabilità	€	4.500,00			

			B.3.2.	Inarcassa 4%	€	180,00			
			B.3.3.	IVA 22%	€	1.029,60			
		B.4.	Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza (IVA Inclusa)	€	5.709,60			
								
			B.4.1.	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori	€	4.500,00			

			B.4.2.	Inarcassa 4%	€	180,00			
			B.4.3.	IVA 22%	€	1.029,60			
		B.5.	Imprevisti (IVA Inclusa)	€	3.647,39			
								
			B.5.1.	Imprevisti	€	3.315,81			
			B.5.2.	IVA 10%	€	331,58			
									
		B.4.	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA Inclusa)	€	3.806,40			
								
			B.4.1.	Rilievi, accertamenti e indagini	€	3.000,00			

			B.4.2.	Inarcassa 4%	€	120,00			
			B.4.3.	IVA 22%	€	686,40			
									
		B.7.	Allacciamento a pubblici servizi (IVA Inclusa)	€	1.500,00			
								
		B.8.	Collaudo Tecnico e/o Amministrativo (IVA Inclusa)	€	1.268,80			
								
			B.8.1.	Consulenza	€	1.000,00			
									
			B.8.2.	Contributi Previdenziali 4%	€	40,00			
			B.8.3.	IVA 22%	€	228,80			
		B.9.	IVA Lavori 10%	€	33.157,96			
	(A+B)		TOTALE	€	399.321,08			

Vista la Determina n° 46 del 23/06/2016 con la quale si aggiudicano definitivamente i lavori in parola alla ditta RI.EL.CO. IMPIANTI S.R.L e viene rideterminato il Quadro Tecnico Economico dell’opera come di seguito riportato   a seguito del ribasso del 3,827 (tre e ottocentoventisette) %  :

	A)	LAVORI	€	319.154,63		
	 	 	 	 	 	 		
	 	A.1.	Lavori ribassati 	€	312.240,67		

	 	 	 	 	 	 		
	 	A.2.	Oneri per la Sicurezza	€	6.913,95		
 	B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	67.741,51	 	
	 	 	 	 	 		
	 	B.1.	Art.92 D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. 	€	5.000,00		
	 	 	 	 	 	 		
	 	B.2	indagine geologica 	 	 	6.588,00		
	 	 						
	 	 	 	 	 	5.400,00		
	 	 	 	 	 			
	 	 	IVA 22%	 	 	1.188,00		
	 	 		 				
	 	B.3	relazione geologica	 		2.537,60		
	 	 	onorario	 		2.000,00		
	 	 	cassa 4%	 		80,00		
	 	 	iva22%	 		457,60		
	 	 		 				
	 	B.4.	Spese Tecniche Progettazione Esecutiva (IVA Inclusa)	€	5.613,12		
	 	 	 	 	 		
	 	 	B.4.1.	Progettazione esecutiva	€	4.423,95		

	 	 	B.4.2.	Inarcassa 4%	€	176,96		
	 	 	B.4.3.	IVA 22%	€	1.012,21		
	 	B.5.	Spese Tecniche Direzione Lavori e contabilità (IVA Inclusa)	€	5.709,60		
	 	 	 	 	 		
	 	 	B.5.1.	Direzione dei Lavori e Contabilità	€	4.500,00		

	 	 	B.5.2.	Inarcassa 4%	€	180		
	 	 	B.5.3.	IVA 22%	€	1.029,60		
	 	B.6.	Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza (IVA Inclusa)	€	5.075,20		
	 	 	 	 	 		
	 	 	B.6.1.	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori	€	4.000,00		

	 	 	B.6.2.	Inarcassa 4%	€	160		
	 	 	B.6.3.	IVA 22%	€	915,20		
	 	B.7.	Imprevisti (IVA Inclusa)	€	1.647,39		
	 	 	 	 	 		
	 	 	B.7.1.	Imprevisti	€	1.497,63		
	 	 	B.7.2.	IVA 10%	€	149,76		
	 	 	 	 	 	 		
	 	B.8.	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA Inclusa)	€	634,40		
	 	 	 	 	 		
	 	 	B.8.1.	Rilievi, accertamenti e indagini	€	500,00		

	 	 	B.8.2.	Inarcassa 4%	€	20		
	 	 	B.8.3.	IVA 22%	€	114,4		
	 	 	 	 	 	 		
	 	B.9.	Allacciamento a pubblici servizi (IVA Inclusa)	€	286,08		
	 	 	 	 	 		
	 	B.10.	Collaudo Tecnico e/o Amministrativo (IVA Inclusa)	€	1.268,80		
	 	 	 	 	 		
	 	 	B.10.1.	Consulenza	€	1.000,00		
	 	 	 	 	 	 		
	 	 	B.10.2.	Contributi Previdenziali 4%	€	40		
	 	 	B.10.3.	IVA 22%	€	228,8		
	 	B.11.	IVA Lavori 10%	€	31.915,46		

TOTALE PROGETTO 	 	 	 	 	385.430,28	 	

Visto il contratto d’appalto Repertorio 262 del 15:12:2016;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 03/07/2017 come da verbale di inizio lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Rappresentante legale della Ditta RIELCO IMPIANTI SRL;

Preso atto della  relazione tecnica  del 04/07/2019, pervenuta in data 074/07/2019, prot. n. 4454, a firma del  Direttore dei Lavori, Ing. Panfilo Fabrizio dalla quale emerge: “… l’accertamento delle pessime condizioni di manutenzione delle gronde e del manto di copertura delle due falde lato sud dell’edificio ex ambulatorio, tali da non consentire l’installazione dei pannelli fotovoltaici ….. alla luce di dover provvedere alla sistemazione dell’area di sedime della pensilina del campo sportivo … si è reso necessario procedere ad una Perizia di Variante in corso d’opera…”   

Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori relativi a INCREMENTO DELLEFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SERVIZI E CAMPO DI CALCIO COMUNALE, composta dai segue nti elaborati:

1.	Analisi nuovi prezzi ;
2.	Elenco dei nuovi prezzi
3.	Verbale per il concordamento dei nuovi prezzi ;
4.	Computo metrico Estimativo di Perizia;
5.	Quadro Comparativo di confronto dei Computi;
6.	Quadro Economico di Variante
7.	Atto di sottomissione

che modifica l’importo dei lavori aggiudicati per la somma di Euro 12.398,49 IVA esclusa (al netto del ribasso d’asta del 3,827%; 

Considerato  che i motivi addotti possono essere riconducibili a quelli previsti dall’art. 106, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;

Visto lo schema dell’atto di sottomissione del 04/07/2019 con cui la ditta RI.EL.CO. IMPIANTI SRL, appaltatrice dell’opera, dichiara di accettare l’esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d’opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. Repertorio 262 del 15:12:2016  nonché il differimento del termine di ultimazione lavori e la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale ammonta ad € 13.638,34, Iva inclusa;

Visto l’Art. 4 comma 3 del Disciplinare sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed il Comune di Poggio Bustone che testualmente riporta: “I ribassi d’asta ed altre economie di spesa, potranno essere utilizzati dal Comune per le eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera e che …, dovranno trovare copertura economica nell’ambito del Quadro Economico finanziato ….”; 

Dato atto che per finanziare il maggiore importo dei lavori sarà utilizzato il ribasso d’asta (pari ad € 12.424,95);   

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

DETERMINA

•	di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dal Direttore Lavori, Ing. Panfilo Fabrizio  in data 04/07/2019, composta dagli elaborati su richiamati, con proroga dei termini contrattuali di n. 7 giorni ;
•	dare atto che la variante  comporta un aumento della spesa di € 12.398,49 oltre IVA.10% pari ad  € 1.239,85 per un totale di € 13.638,34  non eccedente il 5 % del valore iniziale del contratto di lavori che verrà finanziato tramite utilizzo del ribasso d’asta.;
•	di assegnare, a tale lo scopo, le necessarie risorse finanziarie, ammontanti a complessivi € 13.638,34, IVA compresa, al capitolo 2390 codice 01.05-2.02.01.09.002  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E DEL PATRIMONIO COMUNALE  del bilancio 2016, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014; 
•	di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-07-2019 al 31-07-2019 al numero 616

Poggio Bustone  Lì  16-07-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 16-07-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli