COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 	Del 03-05-2018

Oggetto: Lavori di miglioramento della fruibilità del Centro Faunistico "Il Cervo" di Castelsantangelo sul Nera 1^ stralcio progettuale - Approvazione variante suppletiva.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  tre del mese di maggio alle ore 14:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Falcucci Mauro	SINDACO	P	
VALENTINI OVIDIO	VICE SINDACO	P	
MARINELLI MAURIZIO	ASSESSORE ESTERNO	A	

ne risultano presenti n.    2 e assenti n.    1.

Assume la presidenza il Signor Falcucci Mauro in qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA.

 Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso che:
•	il Comune di Castelsantangelo sul Nera è proprietario di una struttura denominata “Centro faunistico il Cervo”, realizzata nel 2004 in collaborazione con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini con i fondi di cui al Programma Triennale Aree Protette;
•	tale struttura, entrata in funzione dall’anno 2006, e gradualmente ampliata nei servizi offerti, svolge molteplici funzioni tra le quali quella di centro di primo soccorso, recupero e riabilitazione della fauna selvatica (C.R.A.S.) ed ulteriori funzioni di tipo scientifico – naturalistico, didattico – educativo e sviluppo turistico del territorio;
•	preso atto della sempre maggiore rilevanza ed importanza del ruolo che tale Centro svolge nell’ambito del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sono state ipotizzate tutta una serie di misure tese in buona sostanza ad ampliare la fruibilità dello stesso al più elevato numero possibile di utenti;

Tutto ciò premesso;

Atteso che le misure individuate ai fini dell’incremento della fruibilità del Centro sono le seguenti:
•	realizzazione di un nuovo recinto per il lupo con relativo sentiero interno di accesso;
•	realizzazione di un nuovo ingresso al centro faunistico, situato lungo la strada comunale per la frazione Vallinfante;
•	realizzazione di una struttura di accoglienza,  con annesso servizio igienico, da destinare a biglietteria, da collocare nei pressi del nuovo ingresso come sopra;
•	realizzazione di un’area da destinare a parcheggio a servizio di tutta la struttura;
Considerato che per le finalità di cui sopra è stato redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, geom. Giovanni Battista Ricci, uno specifico progetto denominato “Lavori di miglioramento della fruibilità del Centro Faunistico “Il Cervo” di Castelsantangelo su Nera” – 1° stralcio”;
Vista la propria precedente Deliberazione n. 8 del 01/04/2014 con la quale è stato approvato il progetto di cui sopra ed in particolare il quadro tecnico economico dell’intervento per un totale complessivo di € 141.419,03 di cui per lavori € 106.500,75 e per somme a disposizione dell’Amministrazione € 34.918,28, dando atto che la spesa trovava copertura con finanziamenti concessi dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini con decreto del Direttore n. 651 del 20.12.2013;
Visto che a seguito di una rivisitazione del progetto è stato deciso di estrapolare dai lavori oggetto di appalto la fornitura e posa in opera del manufatto da adibire a biglietteria con relative opere elettriche e idrauliche connesse, in quanto, trattandosi di struttura con caratteristiche particolari, da valutare attentamente nei minimi dettagli, provvederà direttamente l’Ufficio Tecnico Comunale con ditta specializzata nel settore;
Vista la propria precedente Deliberazione n. 5 del 14/01/2015 con la quale è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico dell’intervento che riporta un totale complessivo di € 141.419,03 di cui per lavori € 92.000,75 e per somme a disposizione dell’Amministrazione € 49.418,28;

	Descrizione	Importo (euro)	
A	Importo lavori compresi oneri sicurezza e costo manodopera	92.000,75	
a1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	1.380,03	
a2	Costo manodopera non soggetto a ribasso (16,47% come da avviso comune del 28/10/2010	15.152,52	
a3	Lavori a base d'asta al netto costi sicurezza e costo manodopera (soggetti a ribasso)	75.468,20	
A	Importo totale lavori	92.000,75	
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B	IVA sui lavori (A) al 22 %	20.240,17	
1	art. 113 D. Lgs 50/2016 Responsabile procedimento	345,00	
2	Progettazione interna, D.L., misura e contab., certificato regolare esecuzione - art. 113 D. Lgs 50/2016	1.035,01	
3	Coordinatore sicurezza in fase esecuzione, relazione geologica, collaudo strutturale	4.000,00	
4	Contributo integrativo 4%	160,00	
5	IVA sulle spese tecniche 22 % e su cap 4 %	915,20	
6	Oneri Stazione Unica Appaltante	500,00	
7	Imprevisti, lavori su fattura, acquisto terreno (IVA compresa)	22.222,90	
20	Totale somme a disposizione	49.418,28	
	TOTALE GENERALE	141.419,03	
	Totale finanziamento disponibile	141.419,03	

Ritenuto che il direttore dei lavori, geom. Giovanni Battista Ricci, ha trasmesso la documentazione tecnica costituente la 1^ Perizia di Variante dei lavori di cui trattasi, composta dagli elaborati di seguito elencati:
•	relazione tecnica integrativa, planimetria generale quotata, documentazione fotografica e punti di vista;
•	quadro economico di variante;
	
ed avente il seguente quadro tecnico economico:

	Descrizione	Importo (euro)	
A	Importo lavori compresi oneri sicurezza e costo manodopera	111.295,44	
a1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	1.669,45	
a2	Costo manodopera non soggetto a ribasso (16,47% come da avviso comune del 28/10/2010	0	
a3	Lavori a base d'asta al netto costi sicurezza e costo manodopera (soggetti a ribasso)	109.625,99	
A	Importo totale lavori	83.329,85	
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1-a	IVA sui lavori (47.504,89 + 15.707,85) al 22 %	13.906,80	
1-b	IVA sui lavori (20.114,27) al 10 %	2.011,43	
2	art. 113 D. Lgs 50/2016 Responsabile procedimento	417,36	
3	Progettazione interna, D.L., misura e contab., certificato regolare esecuzione - art. 113 D. Lgs 50/2016	1.252,07	
4	Collaudo strutturale e varie	4.000,00	
5	Contributo integrativo 4%	80,00	
6	IVA sulle spese tecniche 22 % e su cap 4 %	897,60	
7	Imprevisti, lavori su fattura, acquisto terreno (IVA compresa)	22.401,02	
8 	Allaccio ENEL	1.978,63	
9	Oneri Stazione Unica Appaltante	500,00	
20	Totale somme a disposizione	47.444,91	
	TOTALE GENERALE	130.774,76	
	Totale finanziamento disponibile	141.419,03	
	Risparmio	10.644,27	

Considerato che tale perizia di variante rientra nei casi previsti per legge, in virtù di quanto disposto dall’art. 106 comma 1), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Ritenuto necessario approvare detta perizia di variante n. 1 che risponde alle necessità di questa Amministrazione Comunale;
Acquisiti i seguenti pareri di cui all’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
-	in ordine alla regolarità tecnica: geom. Giovanni Battista Ricci, Responsabile ufficio tecnico comunale – parere favorevole;
-	in ordine alla regolarità contabile: p.a. Alfredo Riccioni, Responsabile servizio finanziario – parere favorevole;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1)	la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)	di approvare la perizia di variante n. 1 relativa ai Lavori di miglioramento della fruibilità del Centro Faunistico “Il Cervo” di Castelsantangelo su Nera” – 1° stralcio – “Lavori di miglioramento della fruibilità del Centro Faunistico “Il Cervo” di Castelsantangelo su Nera” – 1° stralcio”, redatta dal direttore dei lavori, geom. Giovanni Battista Ricci, responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, composta dagli elaborati di seguito elencati:
•	relazione tecnica integrativa, planimetria generale quotata, documentazione fotografica e punti di vista;
•	quadro economico di variante.

3)	di approvare specificatamente il seguente quadro tecnico economico di variante n. 1:

	Descrizione	Importo (euro)	
A	Importo lavori compresi oneri sicurezza e costo manodopera	111.295,44	
a1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	1.669,45	
a2	Costo manodopera non soggetto a ribasso (16,47% come da avviso comune del 28/10/2010	0	
a3	Lavori a base d'asta al netto costi sicurezza e costo manodopera (soggetti a ribasso)	109.625,99	
A	Importo totale lavori	83.329,85	
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1-a	IVA sui lavori (47.504,89 + 15.707,85) al 22 %	13.906,80	
1-b	IVA sui lavori (20.114,27) al 10 %	2.011,43	
2	art. 113 D. Lgs 50/2016 Responsabile procedimento	417,36	
3	Progettazione interna, D.L., misura e contab., certificato regolare esecuzione - art. 113 D. Lgs 50/2016	1.252,07	
4	Collaudo strutturale e varie	4.000,00	
5	Contributo integrativo 4%	80,00	
6	IVA sulle spese tecniche 22 % e su cap 4 %	897,60	
7	Imprevisti, lavori su fattura, acquisto terreno (IVA compresa)	22.401,02	
8 	Allaccio ENEL	1.978,63	
9	Oneri Stazione Unica Appaltante	500,00	
20	Totale somme a disposizione	47.444,91	
	TOTALE GENERALE	130.774,76	
	Totale finanziamento disponibile	141.419,03	
	Risparmio	10.644,27	

4)	di approvare specificamente il quadro economico dell’intervento che riporta un totale complessivo di € 130.774,76 di cui per lavori € 83.329,85 e per somme a disposizione dell’Amministrazione € 47.444,91 con un risparmio di € 10.644,27;
5)	di dare atto che la spesa trova copertura con finanziamenti concessi dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini con decreto del Direttore n. 651 del 20.12.2013 e la relativa somma sarà prevista nel bilancio di previsione 2018, gestione residui passivi;
6)	di dichiarare con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, considerata l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 09-04-2018	Il Responsabile del servizio	
	Ricci Giovanni Battista	

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 09-04-2018	Il Responsabile del servizio	
	Riccioni Alfredo	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                    f.to IL SINDACO	    f.to IL SEGRETARIO COMUNALE	
Falcucci Mauro	DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA	

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000 e per le finalità di cui al successivo art.125, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione è comunicata ai capigruppo consiliari.

Castelsantangelo Sul Nera,	……………………				

                                                                          f.to Il Responsabile della Pubblicazione
             Riccioni Alfredo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 3^ e 4^ comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[  ] È divenuta esecutiva il giorno…………………………decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
[    ] È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell’organo adottante il giorno stesso della pubblicazione.

Castelsantangelo Sul Nera,	………………………………				

                                                                                          f.to Il Responsabile del Servizio
----------------------------------------

La presente copia è conforme all’originale.

Castelsantangelo Sul Nera, …………………………….

				         			 Il Responsabile del Servizio										Riccioni Alfredo