COMUNE DI CORTINO
PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data 24-09-2019	Atto n. 48	

OGGETTO:	POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AZIONE 5.1.1. LAVORI DI "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE PADULA - LOTTO 3°". CUP: F37B15000640006. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.	

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro, del mese di settembre, alle ore 08:40, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P	
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P	
Di Fortunato Domenico	ASSESSORE	P	

P=Presenti n.    3	A=Assenti n.    0.	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara. 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
•	la deliberazione di Giunta Comunale n°80 del 30.12.2015 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori in  oggetto per un importo complessivo di €uro 1.450.000,00 di cui €uro 942.805,29 per lavori, €uro 17.194,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €uro 490.000,00 per somme in amministrazione;  
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°7 del 08/03/2018 (R.G. 56)   con la quale si determinava a contrarre per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°11 del 27/03/2018 (R.G. 75)  con la quale si determinava a contrarre per l’affidamento di servizi per le indagini geologiche, la redazione della relazione geologica/geotecniche ed assistenza nell’esecuzione; 
•	la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°14 del 03/04/2018 (R.G. 81) con la quale si “aggiudicava in via efficace” l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria, per il progetto dei lavori in oggetto, all’operatore economico libero professionista Ing. Giovanni Consorte con sede in via F. Crispi – 64100 Teramo (TE) per un importo complessivo di €uro 28.273,77 di cui €uro 22.283,87 per onorario, €uro 891,35 per CNPAIA ed €uro 5.098,55 per l’IVA al 22%;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°23 del 18/05/2018 (R.G. 120)   con la quale si determinava l’avvio di procedura informativa mediante avviso di preinformazione per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la direzione dei lavori; 
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°24 del 18/05/2018 (R.G. 121)   con la quale si determinava l’avvio di procedura informativa mediante avviso di preinformazione per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la verifica e collaudo statico delle opere;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°26 del 21/05/2018 (R.G. 123)   con la quale si determinava l’avvio di procedura informativa mediante avviso di preinformazione per l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°27 del 24/05/2018 (R.G. 124) con la quale si “aggiudicava in via efficace” l’appalto dei servizi di indagini geologiche, per il progetto dei lavori in oggetto, all’operatore economico libero professionista Geol. Luciano Lucenti con sede in via Contrada Cretone 28 – 64030 Basciano (TE) per un importo complessivo di €uro 15.112,51 di cui €uro 12.144,43 per onorario, €uro 242,88 per EPAP ed €uro 2.725,21 per l’IVA al 22%;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°49 del 20/08/2018 (R.G. 177)  con la quale si determinava a contrarre per l’affidamento di servizi per il collaudo statico / sismico in corso d’opera e a costruzione completata; 
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°50 del 29/08/2018 (R.G. 180)  con la quale si determinava a contrarre per l’affidamento di servizi per la direzione, il controllo e la contabilità dei lavori; 
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°56 del 21/09/2018 (R.G. 191)   con la quale si determinava l’avvio di procedura informativa trasparente mediante avviso di preinformazione per l’affidamento dei lavori principali necessari all’esecuzione delle opere per un importo della procedura di complessivi €uro 994.300,00 di cui €uro 788.969,81 per lavori e somministrazione a “misura soggetti a ribasso d’asta”, €uro 26.030,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €uro 179.300,00 per l’IVA al 22%;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°59 del 05/10/2018 (R.G. 204)  con la quale si determinava a contrarre per l’affidamento di servizi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere; 
•	la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°60 del 08/10/2018 (R.G. 207) con la quale si “aggiudicava in via efficace” l’appalto dei servizi per il collaudo statico/sismico, per i lavori in oggetto, all’operatore economico libero professionista Ing. Carmelo Ridolfo con sede in via C. Colombo 185 – 98066 Patti (ME) per un importo complessivo di €uro 11.416,12 di cui €uro 9.001,51 per onorario, €uro 360,06 per CNPAIA ed €uro 2.059,55 per l’IVA al 22%;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°63 del 22/10/2018 (R.G. 215) con la quale si “aggiudicava in via efficace” l’appalto dei servizi di direzione, controllo e contabilità, per i lavori in oggetto, all’operatore economico libero professionista Ing. Giovanni Consorte con sede in via Francesco Crispi 27 – 64100 Teramo (TE) per un importo complessivo di €uro 16.350,06 di cui €uro 12.886,24 per onorario, €uro 515,45 per CNPAIA ed €uro 2.948,37 per l’IVA al 22%;
•	la deliberazione di Giunta Comunale con la quale si “approvava il progetto esecutivo”  dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €uro 1.240.000,00 di cui €uro 788.969,81 per lavori, somministrazioni e forniture a base d’asta, €uro 26.030,19 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d’asta ed €uro 425.000,00 per somme in amministrazione;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°71 del 26/11/2018 (R.G. 244) con la quale si “aggiudicava in via efficace” l’appalto dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori in oggetto, all’operatore economico libero professionista Ing. Massimo Centrone con sede in via Atropo 61 – 70044 Polignano a Mare (BA) per un importo complessivo di €uro 12.689,15 di cui €uro 10.000,90 per onorari, €uro 400,04 di contributo CNPAIA ed €uro 2.288,21 per l’I.V.A. al 22%;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°73 (Reg. Gen. 251) del 11/12/2018 con la quale si dava atto di contrarre l’appalto dei lavori principali in oggetto, mediante “procedura negoziata ristretta con invito rivolto a quindici operatori economici sorteggiati (art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016) in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016;
•	la determinazione della centrale unica di committenza n. 07 del 15/03/2019 (Reg. Gen. 27), con la quale si aggiudicavano con efficacia l’impresa IERVELLI COSTRUZIONI S.R.L. – Ponte Vezzola, snc – 64100 Teramo (TE), ad un ribasso percentuale pari a 30,871% per l’importo di contratto di €uro 571.437,13 comprensivi degli oneri per la sicurezza di €uro 26.030,19 oltre l’I.V.A.
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°25 del 27/03/2019 (R.G. 54) con la quale si prendeva atto dell’aggiudicazione con efficacia dell’appalto dei lavori principali per il progetto dei lavori di “intervento di consolidamento e risanamento del dissesto idrogeologico nel territorio comunale in località Padula – 3° lotto” impegnando l’importo di €uro 697.153,30 di cui €uro 545.406,94 per lavori e forniture (ribassati del 30,871%) , €uro 26.030,19 per costi sulla sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ed €uro 125.716,17 per IVA al 22%;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°37 del 27/04/2019 (R.G. 79) con la quale si approvava lo schema di contratto per i lavori da consegnare in appalto all’operatore economico IERVELLI COSTRUZIONI S.R.L. – Ponte Vezzola, snc – 64100 Teramo (TE);
•	il contratto di appalto dei lavori Rep. 1249 del 30/04/2019 registrato a TERAMO in data 20/05/2019 al n°25 serie 1;
•	la determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°55 (R.G. 115) del 29/05/2019 con la quale si approvava l’anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 all’impresa IERVELLI COSTRUZIONI S.R.L.” con sede in Loc. Ponte Vezzola, snc – 64100 Teramo (TE), per l’importo complessivo di €uro 139.430,66 di cui €uro 114.287,43 per lavori ed oneri della sicurezza ed €uro 25.143,23 per l’IVA al 22%;

PRESO ATTO:
•	che la Giunta Regionale con determinazione n. DPC027/35 del 28/06/2017, nell’ambito del POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse V, ammetteva a finanziamento l’intervento di consolidamento e risanamento del dissesto idrogeologico località Padula lotto 4 per l’importo complessivo di €. 1.240.000,00;

DATO ATTO:
•	che in data 09/05/2019 venivano consegnati i lavori in oggetto all’impresa IERVELLI COSTRUZIONI S.R.L.” con sede in Loc. Ponte Vezzola, snc – 64100 Teramo (TE);
•	che in data 19/07/2019 si accertava con verbale di somma urgenza dell’area tecnica, uno smottamento del terreno a monte dell’area di cantiere causato da uno scivolamento di un trovante ciclopico in roccia, che ha innescato un cedimento congiunto ad una traslazione del muro posto a monte della scarpata a sostegno di uno slargo adibito a parcheggio auto; 
•	che con ordine di servizio del 22/07/2019 redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, si ordinavano all’impresa IERVELLI COSTRUZIONI S.R.L.” con sede in Loc. Ponte Vezzola, snc – 64100 Teramo (TE), l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la rimozione del muro di contenimento a sostegno di uno slargo adibito a parcheggio auto e la messa in sicurezza del versante;

VISTO che con istanza pervenuta in data 12/08/2019 prot. n. 2985, il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Consorte ha fatto pervenire una proposta di modifica, variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di €uro 244.428,52 che stabilisce l’importo complessivo del contratto a €uro 815.865,65 composta dei seguenti elaborati di perizia;  
	Progetto di Perizia suppletiva e di variante;	
	01.V Relazione Tecnica Illustrativa
02.V Documentazione Fotografica
04.V Rilievo dello Stato Attuale
05a.V Planimetria di Tracciamento
05b.V Planimetria di Progetto
06a.V Sezione Tipo dell’Intervento
06b.V Sezioni Trasversali
07.V Particolari Costruttivi e Opere Complementari
08a.V Carpenteria muro in C.A. – Pianta
08b.V Carpenteria muro in C.A. – Profilo Longitudinale
08c.V Carpenteria muro in C.A. – Sezioni ed Armature
08d.N Carpenteria muro in C.A. – Pianta, Profilo Longitudinale e Sezioni ed Armature
09.V Relazione Tecnica e di Calcolo
10.V Relazione Geotecnica e Piano delle Indagini
11.V Relazione sulle Fondazioni
12.V Relazione Illustrativa Qualità e Dosatura Materiali
13.V Piano di Manutenzione delle Strutture
14.V Relazione Sintetica del Progetto Strutturale
15.V Sezione I – Generale
19.V Quadro Economico
20.V Elenco Prezzi Unitari
22. Computo Metrico Estimativo di Progetto
22a.N Computo Metrico Estimativo di Variante
22b.N Quadro di raffronto
22c.N Computo Metrico Estimativo Somma Urgenza
24.V Stima Incidenza Oneri della Sicurezza
25.V Stima Incidenza della Manodopera
26c.N Schema atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
33a.N Integrazione alla Relazione Geologica
35.N Relazione Paesaggistica	

PRESO ATTO che la proposta di modifica, variazione e/o variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
a)	durante l’esecuzione dei lavori un trovante ciclopico in roccia è scivolato a valle provocando uno smottamento del terreno a monte che ha innescato un cedimento congiunto ad una traslazione del muro posto a monte della scarpata a sostegno di uno slargo adibito a parcheggio auto. A tal proposito ci si è attivati allertando in prima analisi gli operatori dell’Enel affinché rimuovessero i cavi elettrici, a servizio di abitazioni, collegati ad un palo in cemento posto in posizione critica;
b)	presenza di continui sversamenti della fognatura esistente posta in aderenza lungo quasi tutto il tratto di strada di accesso al cantiere, così come dimostrano le indagini eseguite anche dall’Ente gestore (Ruzzo Reti), che comportano continui livellamenti da parte dell’Impresa esecutrice con mezzi meccanici al fine di rimodellare il tratto di strada di accesso al cantiere;
c)	periodiche riprofilature a seguito della presenza del fiume che, durante gli eventi di pioggia maggiormente copiosi, determina locali piccoli cedimenti che comportano continui limitati interventi da parte dell’Impresa esecutrice con mezzi meccanici;
d)	presenza di un pozzetto in c.a. della fognatura esistente non segnalato da alcun documento e rinvenuto in corrispondenza della costruenda fondazione del muro h=7.00 mt completamente interrato ad una quota di circa -1.30 mt dal p.c. e peraltro privo di chiusino ispezionabile

VERIFICATO:
•	che nel caso di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore e può rientrare anche la sopravvenienza alla tutela di interessi rilevanti e che la modifica non altera la natura generale del contratto;
•	che per quanto all’articolo 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari l’aumento del contratto modificato non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
•	che ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del D.M. 07/03/2018, essendovi variazione di importo contrattuale e nuove lavorazioni non previste nel contratto principale si rendono necessari atti di sottomissioni e/o verbali di concordamento dei nuovi prezzi;
•	che la presente va comunicata all’Osservatorio di cui all’ articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 106, comma 14, del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto, ai sensi dell’ art.22 comma 2 del D.M. 07/03/2018 n.42, all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art.106 del D.lgs. 50/2016 consentono di disporre di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

ACCERTATO che la modifica in esame è suppletiva e rispetta i limiti di Legge;

ACCERTATO che l’entità della modifica sarà reperita all’interno del quadro economico senza prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell’opera di €uro 1.240.000,00 già previsti e impegnati al Capitolo 2785 articolo 0 codice 2.02.01.09.014 del bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2019;

ACCERTATO che non vi sono maggior oneri economici per l’intervento rispetto al quadro economico derivante dalle risultanze di aggiudicazione dei lavori giusta determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°25 del 27/03/2019 (R.G. 54) e comparato in base alla perizia nel modo che segue: 
CUP: F37B15000640006	RIFERITO A:	ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	
	A) Lavori e forniture aggiudicati CIG: 7755364482 di cui:	 	 €          545.406,94 	 €    789.835,46 	
	a.1) Lavori (comprensivi degli oneri di sicurezza aziendali) base	 €    788.969,81 	 €          788.969,81 	 € 1.142.553,00 	
	a.2) Oneri della sicurezza da P.S.C.	 €      26.030,19 	 €            26.030,19 	 €      26.030,19 	
	Totale A sommano lavori AFFIDATI	 €    815.000,00 	 €          571.437,13 	 €    815.865,65 	
	 	Economie A per ribasso d’asta del [30,871% di ( a1 )]	 	 €          243.562,87 	 	
	 	Economie A per ribasso d’asta rimanenti post variante	 	 	 €    352.717,54 	
	TOTALE A 	 	 €          815.000,00 	 € 1.168.583,19 	
	 	 	 	 	 	
	B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
	B1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	B2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche integrative di cui:	 €      18.000,00 	 €            18.000,00 	 €                   -   	
	 	a) Smart CIG: Z3D23134D7 (ribassato già affidato)	 	 	
	 	Lavori complementari per indagini geognostiche, geotecniche e sismiche.	 €        5.459,48 	 €              5.459,48 	 €        5.459,48 	
	 	Oneri Sicurezza	 €           144,33 	 €                 144,33 	 €           144,33 	
	Restano da affidare	 €      12.396,19 	 	 	
	 	TOTALE  B2) AFFIDATI	 	 €              5.603,81 	 €        5.603,81 	
	 	ECONOMIE B2) PER RIBASSO D'ASTA	 	 €            12.396,19 	 	
	 	ECONOMIE B2) PER RIBASSO D'ASTA RIMANENTI POST VARIANTE	 	 	 €        6.792,38 	
	B3) allacciamenti ai pubblici servizi	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	B4) Economie-Imprevisti/Riduzione derivante dalla perfomance framework del 31/12/2018 (6,5798%).	 €      19.263,53 	 €            19.263,53 	 €      81.847,81 	
	B5) acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	 €      50.000,00 	 €            50.000,00 	 €      35.072,00 	
	B6) accantonamento art. 205/206 e revisione prezzi 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	B7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle relazioni e studi geologici, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti e corrispettivi ed incentivi art.113 comma 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 (D.G.R. 21/02/2003/ n°101) di cui:	 €      97.800,00 	 €            97.800,00 	 	
	 	a) – Smart CIG Z5422AC20C (ribassato già affidato)
Affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura nei S.O. (Prog. e coord. Esecutivo)	 €      22.283,87 	 €            22.283,87 	 €      22.283,87 	
	 	b) – CIG 7497384CFD (ribassato già affidato)
Affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura nei S.O. (Direzione lavori)	 €      12.886,24 	 €            12.886,24 	 €      16.684,10 	
	 	c) – CIG 7631575EE7 (ribassato in corso di affidamento efficace)
Affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura nei S.O. (Coordinatore esecuzione)	 €      10.000,90 	 €            10.000,90 	 €      13.192,53 	
	 	d) – Smart CIG ZFA22EFC20 (ribassato già affidato)
Affidamento del sevizio relativo alle consulenze e perizie geologiche	 €      12.144,43 	 €            12.144,43 	 €      14.511,72 	
	 	e) – Smart e/o CIG ……….
Affidamento del sevizio per attività di regolarizzazione Agenzia del Territorio	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	 	f) – Smart e/o CIG ……….
Affidamento del sevizio per attività di supporto al R.U.P.	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	 	g) – Smart e/o CIG ……….
Affidamento del sevizio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	 	h) – Smart e/o CIG ……….
Eventuale archeologia preventiva e/o restauri su patrimonio tutelato	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	 	i) Incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) su Totale A	 €      13.040,00 	 €            13.040,00 	 €      18.697,33 	
	 	j) Fondo innovazione art.113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%) su Totale A	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	 Restano da affidare 	 €      27.444,56 	 	 	
	 	TOTALE B7) AFFIDATI	 	 €            57.315,44 	 €      85.369,55 	
	 	ECONOMIE B7) PER RIBASSO D'ASTA	 	 €            27.444,56 	 	
	 	ECONOMIE B7) PER RIBASSO D'ASTA RIMANENTI POST VARIANTE	 	 	 €                   -   	
	B8) casse previdenziali spese tecniche su €. 97.800,00 – 7i	 €        3.390,40 	 €              3.390,40 	 	
	 	TOTALE B8) AFFIDATI	 	 €              2.049,73 	 €        2.376,65 	
	 	ECONOMIE B8) PER RIBASSO D'ASTA	 	 €              1.340,67 	 	
	 	ECONOMIE B8) PER RIBASSO D'ASTA RIMANENTI POST VARIANTE	 	 	 €                   -   	
	B9) Spese per attività tecnico amministrative (cassa previdenziale inclusa) connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	B10) Eventuali spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	B11) Spese per pubblicità	 €                   -   	 €                        -   	 €                   -   	
	B12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo (cassa previdenziale inclusa), collaudo statico (cassa previdenziale inclusa) ed altri eventuali collaudi specialistici (cassa previdenziale inclusa)	 €      24.000,00 	 €            24.000,00 	 	
	 	a) – CIG: 7497556AEE (ribassato già affidato)
Affidamento del sevizio relativo al collaudo statico delle opere Onorario	 €        9.001,51 	 €              9.001,51 	 €      11.544,36 	
	 	Cassa previdenza 4% 	 €           360,06 	 €                 360,06 	 €           461,77 	
	 	b) - Smart CIG: Z7E28F8AA3 (ribassato già affidato)                                                                       Affidamento prove di laboratorio	 	 €              2.400,00 	 €        2.400,00 	
	 Restano da affidare 	 €      14.638,43 	 	 	
	 	TOTALE  B12) AFFIDATI	 	 €            11.761,57 	 €      14.406,13 	
	 	ECONOMIE B12) PER RIBASSO D'ASTA	 	 €            12.238,43 	 	
	 	ECONOMIE B12) PER RIBASSO D'ASTA RIMANENTI POST VARIANTE	 	 	 €                   -   	
	B13a) IVA (22%) sui lavori A	 €    179.300,00 	 	 	
	 	TOTALE  B13a) AFFIDATI	 	 €          125.716,17 	 €    179.490,44 	
	 	ECONOMIE B13a) PER RIBASSO D'ASTA	 	 €            53.583,83 	 	
	 	ECONOMIE B13a) PER RIBASSO D'ASTA RIMANENTI POST VARIANTE	 	 	 €                   -   	
	B13b) IVA (22%) su B1 + B2 + B3 + B4 + (B7-7i) + B8 + B9 + B10 + B11 + B12	 €      32.871,07 	 	 	
	 	TOTALE  B13b) AFFIDATI	 	 €            32.576,12 	 €      19.592,94 	
	 	ECONOMIE B13b) PER RIBASSO D'ASTA	 	 €                 294,95 	 	
	 	ECONOMIE B13b) PER RIBASSO D'ASTA RIMANENTI POST VARIANTE	 	 	 €                   -   	
	B14) Contributo ANAC	 €           375,00 	 €                 375,00 	 €           375,00 	
	Sommano somme a disposizione	 €    425.000,00 	 	 	
	 	TOTALE AFFIDAMENTO A)	 	 €          571.437,13 	 €    815.865,65 	
	 	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	 	 €          235.397,83 	 €    424.134,34 	
	 	TOTALE PROGETTO POST GARA	 	 €          806.834,96 	 	
	 	ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA RIMANENTI A)+B)	 	 €          433.165,03 	 	
	TOTALE PROGETTO	 € 1.240.000,00 	 €       1.240.000,00 	 € 1.240.000,00 	

SENTITO il progettista e direttore dei lavori in data 19/09/2019;

VISTA la nota n. 257780 del 16/09/2019 della Regione Abruzzo Dipartimento difesa idraulica, idrogeologica e della costa – DPE013 acquisita al protocollo n. 3247 del 19/09/2019, con la quale si autorizzano i lavori di perizia chiedendo altresì un perfezionamento della documentazione;

VISTA la nota n. 3339 del 23/09/2019 con la quale ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 46/2004 e s.m.i. veniva trasmessa la perizia di variante e suppletiva alla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio dell’Abruzzo;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:
e)	Realizzazione di una nuova struttura di elevazione costruita con paramento in c.a. opportunamente tirantata costituita da tre muri di tipo A – B – C, mitigata mediante rivestimento in pietra arenaria parimenti alla nota n. 8628 del 17/06/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo;
f)	Stralcio di una parte dei muri previsti nel progetto principale che non subiranno variazioni rispetto all’intero sviluppo dell’opera per una lunghezza complessiva di circa 30 mt.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.M. 7 marzo 2016 n°49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

CIÒ PREMESSO e considerato non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.	DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell’articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;

2.	DI APPROVARE per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la modifica contrattuale suppletiva per i lavori attinenti al “intervento di consolidamento e risanamento del dissesto idrogeologico nel territorio comunale in località Padula – 3° lotto” così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Consorte, composta dagli elaborati richiamati in premessa, che stabilisce l’importo contrattuale dei lavori ad €uro 815.865,65 e dunque con aumento del contratto principale di €uro 244.428,52;

3.	DI DARE ATTO che viene riformulato il quadro economico derivante dalle risultanze di aggiudicazione dei lavori giusta determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°25 del 27/03/2019 (R.G. 54) e le risultanze post perizia sono evidenziate nella parte narrativa premessa al presente deliberato;

4.	DI DARE ATTO che l’entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo dell’opera di €uro 1.240.000,00 già previsti e impegnati al Capitolo 2785 articolo 0 codice 2.02.01.09.014 del bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2019;

5.	DI SUB-IMPEGNARE al Capitolo 2785 articolo 0 codice 2.02.01.09.014 l’importo a copertura dell’aumento contrattuale per l’importo complessivo pari ad €uro 298.202,79 dei quali €uro 244.428,52 per lavori suppletivi ed €uro 53.774,27 per l’IVA al 22%;

6.	DI DISPORRE che tutta la documentazione venga conservata agli atti di questo Comune;

7.	DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 della D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 nella persona dell’Istruttore Direttivo dell’Ufficio Tecnico Geom. Loris Taraschi.

8.	DI COMUNICARE altresì in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 267/2000;

9.	VISTO l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO	
F.to Di Gesualdo Sara	F.to Minosse Gabriele	

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 24-09-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Taraschi Loris	

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 24-09-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Marcone Irena	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 30-09-2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:
•	Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 30-09-2019
	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	F.to Di Domenico Esterina	

È copia conforme all’originale.

Cortino, li 30-09-19 
IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________