IL SINDACO

AI SENSI:
-degli articoli: 48(Competenze delle giunte), e 50(Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-degli articoli 21(Il sindaco), 22 (Attribuzione di amministrazione) e 24(Attribuzioni di amministrazione) comma 1 lett.c) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006; 
-degli articoli:5 (Indirizzo politico e gestionale) commi 1 e 2, e 39(Le deliberazioni), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo “Statuto comunale” adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

PREMESSO:
-che in data 10.03.2015 al prot.1445 di questo Comune, veniva acclarata la nota della Regione Marche-Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia-PF Edilizia ed Espropriazione trasmessa a mezzo pec in data 09.03.2015 prot.167127, ad oggetto:
“Art.10 D.L. 104/2013, conv. con legge 128/2013 – DM 23.01.2015 (G.U. 51 del 03.03.2015) –DGR n.124 del 2.03.2015: formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015-2017 e del piano annuale 2015. Trasmissione Decreto n.9/EDI del 09.03.2015 (bando e modulistica)”, con la quale in sintesi testualmente si comunicava:
“Al fine della formazione del piano regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica da predisporre in attuazione alle norme richiamate in oggetto, si trasmette in allegato alla presente il decreto dirigenziale con il quale è emanato il bando regionale, sono approvati il modello di domanda, con attestazioni e la scheda per autocertificazione punteggi.
Il termine perentorio per la trasmissione alla Regione delle domande di accesso al finanziamento, complete della documentazione indicata nel bando, è fissato al 31 Marzo 2015.”
(omissis)

DATO ATTO:
-che con D.G.C. n.31 del 30.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)
09)-APPROVARE, ai fini della richiesta di finanziamento di cui al “bando” Regione Marche, adottato con D.D.PF Edilizia ed Espropriazione-EDI n9/EDI del 09.03.2015,
il “progetto definitivo”, redatto dall’Ing.Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno)e relativo ai “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA “CITTA’ DEL SOLE”- composto dai seguenti elaborati:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI A MISURA..............€ 111.398,53
(Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)
A1)-IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.€   9.264,12
A2)-SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE...........€ 102.134,41
(art. 82 co. 3-bis D.Lgs n. 163/2006)
                                                   TOTALE LAVORI...€ 308.804,10
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE		
(omissis)
SOMMANO					                               €  91.195,90
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO					             € 400.000,00
(omissis)

CONSIDERATO:
-che con nota di questo Comune prot.1944 del 31.03.2015, per le finalità di cui alla sopra richiamata nota regionale prot.167127, veniva formulata “Richiesta di accesso al finanziamento per i lavori di che trattasi;

DATO ATTO:
-che con D.G.C. n.6 del 26.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)
10)-APPROVARE, ai fini della richiesta di finanziamento di cui al “bando” Regione Marche, adottato con D.D.PF Edilizia ed Espropriazione-EDI n9/EDI del 09.03.2015,
il “progetto esecutivo”, redatto dall’Ing.Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno)e relativo ai “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA “CITTA’ DEL SOLE”- composto dai seguenti elaborati:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI A MISURA..............€ 111.398,53
(Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)
A1)-IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.€   9.264,12
(art.16 comma 1 lett.a.2) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)
A2)-SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE...........€ 102.134,41
(art. 82 co. 3-bis D.Lgs n. 163/2006)
                                                   TOTALE LAVORI...€ 308.804,10
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
SOMMANO					                               € 91.195,90
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO					             €400.000,00
(omissis)

TENUTO CONTO:
-che con nota prot.74808 del 03.02.2016, acclarata al protocollo comunale al n.949 del 04.02.2016, la Regione Marche-Servizio I.T.E.-P.F.Edilizia ed Espropriazione,  
nel comunicare l’inclusione di questo Comune nella programmazione triennale 2015-2017 di edilizia scolastica, invitava, qualora interessato, questo Comune a integrare la richiesta di finanziamento;

DATO ATTO:
-che con nota prot.1414 del 24.02.2016, inviata alla Regione Marche-Servizio I.T.E.-P.F.Edilizia ed Espropriazione, veniva integrata la domanda di accesso al finanziamento prot.1944 del 31.03.2015;

CONSIDERATO:
-che la Regione Marche, con D.D.della PF Edilizia ed Espropriazione n.9/EDI del 14.04.2016, disponeva di approvare la graduatoria unica del piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e la proposta di Piano annuale 2016, comprendente gli interventi da ammettere a finanziamento;
-che questo Comune è inserito(quarto posto regionale e primo provinciale) nel Piano annuale regionale 2016, per l’intervento ed importo di cui trattasi;
-che la Regione Marche-Servizio I.T.E.-P.F.Edilizia ed Espropriazione, con nota prot.541128 del 02.08.2016, acclarata al protocollo comunale al n.6114 del 03.08.2016, nel trasmettere il D.I.(MIUR-MIT-MEF) del 03.06.2016, recante: “Nuovi termini per l’ano 2016 per la definizione dei piani annuali 2016 della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica” informava che:
“Gli adempimenti posti in capo al MIUR (…) non sono ancora stati assolti, si fa presente quindi che la Programmazione Regionale 2016 predisposta con DDPF n.9/EDI/2016 non è ancora stata approvata dal Ministero competente.
Il termine per l’aggiudicazione provvisoria, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, dei lavori relativi agli interventi inclusi nel piano annuale 2016 è comunque fissato al 31 dicembre 2016 (…)”

TENUTO CONTO:
-che con D.G.C. n.117 del 11.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000, veniva disposto di:
(omissis)
03)-PRENDERE ATTO
-che in data 19.04.2016 (cfr.G.U. n.91 del 19.04.2016) entrava in vigore il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori ei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
-che l’art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per servizi) comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, testualmente recita:
“3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.”;
-che l’art.216(Disposizione transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, testualmente dispone:
“4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.”
04)-PRENDERE ATTO:
-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.9813 del 08.11.2016, il tecnico incaricato, ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, rimetteva:
-Quadro economico................................................Tav.n.20;
  (artt. 16 e 42 del D.P.R..05.10.2010, n.207);
-Capitolato speciale d’appalto...................................Tav.n.26;
  (art. 43 del D.P.R..05.10.2010, n.207);
in aggiornamento al D.Lgs. n.50/2016, nonchè:
-Elenco prezzi unitari...........................................Tav.n.18;
  (art. 41 del D.P.R..05.10.2010, n.207);
05)-PRENDERE ATTO:
-che la Regione Marche-Servizio I.T.E.-P.F.Edilizia ed Espropriazione, con nota prot.541128 del 02.08.2016, acclarata al protocollo comunale al n.6114 del 03.08.2016, nel trasmettere il D.I.(MIUR-MIT-MEF) del 03.06.2016, recante: “Nuovi termini per l’ano 2016 per la definizione dei piani annuali 2016 della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica” informava che:
“Gli adempimenti posti in capo al MIUR (…) non sono ancora stati assolti, si fa presente quindi che la Programmazione Regionale 2016 predisposta con DDPF n.9/EDI/2016 non è ancora stata approvata dal Ministero competente.
Il termine per l’aggiudicazione provvisoria, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, dei lavori relativi agli interventi inclusi nel piano annuale 2016 è comunque fissato al 31 dicembre 2016 (…)”
06)-APPROVARE il “progetto esecutivo”, aggiornato alle nuove disposizioni del D.Lgs. n.50/2016, redatto dall’Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, relativo ai “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA “CITTA’ DEL SOLE”- composto dai seguenti elaborati:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI A MISURA...............€ 299.539,98
(Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)
A1)-IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.€   9.264,12
(art.16 comma 1 lett.a.2) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)
                                                   TOTALE LAVORI...€ 308.804,10
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE		
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
   dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura......€     0,00
2. Spese geologiche........................................ €     0,00
2a. contributo previdenziale su spese geologiche 2%........ €     0,00
4. allacciamenti ai pubblici servizi....................... €     0,00
5. imprevisti.............................................. €13.105,68
6. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.... €     0,00
7. accantonamento di cui all’art. 133, co. 3 e 4 
   del D.Lgs 163/06........................................ €     0,00
8. spese tecniche relative alla progettazione, alle 
   necessarie attività preliminari, al coordinamento
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
   alla direzione dei lavori............................... €30.000,00
8a.contributo previdenziale su 8) 4%........................€ 1.200,00
9. spese di cui all’art. 92 commi 7-bis del D.Lgs 163/06... €     0,00
10.fondo per l’innovazione di cui all’art. 113 comma 4
   del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% dell’importo
   posto a base di gara.................................... € 1.235,22
11.incentivo per il responsabile del procedimento 
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016
   pari al 80% del 2% dell’importo posto a base di gara:
   €4.940,87 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)................. € 2.223,39
12.spese per attività tecnico amministrative connesse alla
   progettazione,di supporto al responsabile del 
   procedimento, e di verifica e validazione............... €     0,00
13.eventuali spese per commissioni giudicatrici............ €     0,00
14.spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
   Artistiche.............................................. €     0,00
15.contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art.1
   Comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)...€  225,00
16.contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015
   (0,15% di € 308.134,41)...................................€  462,20
17.spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
   previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
   tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
   collaudi specifici...................................... € 5.000,00
18. IVA lavori 10%......................................... €30.880,41
19. IVA spese tecniche(8+8a)22%............................ € 6.864,00
SOMMANO					                               € 91.195,90
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO					             €400.000,00
06)-PRENDERE ATTO che il sopra richiamato Decreto 3 giugno 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. n.174 del 27.07.2016) all’art.1    comma 1 lett.e), testualmente recita:
Il termine per l’aggiudicazione provvisoria, dei lavori relativi agli interventi inclusi nel piano annuale 2016 che risultano beneficiari dei finanziamenti è fissato per il 31 dicembre 2016 (…)”
07)-DOVERSI PROCEDERE, all’affidamento dei lavori di cui trattasi, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 06);
08)-PRENDERE ATTO che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.60 del 28.10.2016, veniva disposto di:
(omissis)
05)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.3(Definizioni) comma 1 lett.uuu) del D.Lgs. n.50/2016;
-dell'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. n. 50/2016;
-dell’art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D.Lgs.18.04.2016, 
-dell’art.35(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;
-dell’art.36(Contratti sotto soglia) commi: 1, 2 lett.c), 6 e 7 del D.Lgs. n.50/2016;
-dell'art.53(Accesso agli atti e riservatezza), commi: 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016;
-dell’art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 9 del D.Lgs. n.50/2016;
06)-POTERSI PROCEDERE all’avvio della procedura di affidamento dell’appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;
07)-APPROVARE lo schema di “Avviso esplorativo” per “Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura negoziata, dei <Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia – Città del sole-“ finalizzato alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
08)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli: 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016;
09)-STABILIRE:
-che l’ “Avviso esplorativo” di cui al precedente punto 07) venga pubblicato: all’albo pretorio on line  e sul sito del Comune di Roccafluvione, nella sezione “amministrazione trasparente” – “avvisi, bandi e inviti”;
-che il termine della ricezione delle istanze di manifestazione di interesse, sia di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’ “Avviso esplorativo”;
(omissis)
09)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli:4(Compiti degli enti o altri organismi aderenti) comma 2 e 7 (Responsabile Unico del Procedimento) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015;
10)-DARE ATTO che relativamente al sopra citato articolo 4 comma 2:
a)-Comunicano alla SUAPAP e alla Prefettura – UTG di Ascoli Piceno, entro trenta giorni dall’approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, servizi e delle forniture di cui prevede l’affidamento nel corso dell’anno, mediante il ricorso all’opera della SUAPAP, indicando anche il presumibile periodo in cui l’affidamento dovrà essere effettuato;
-il bilancio di previsione per l’anno 2016, è stato approvato con D.C.C. n.25 del 17.05.2016 e successiva variazione con D.C.C. n.29 del 28.07.2016;
-l’affidamento dovrà essere effettuato, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 06);
b)-nominano il RUP ai sensi dell’art.10, del D.Lgs.n.163/2006 comunicando, immediatamente  alla SUAPAP, il nominativo;
-il R.U.P. è il Geom. Carlo Trobbiani, Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio;
11)-DARE ATTO:
-che la spesa di € 400.000,00 viene finanziata dalla Regione Marche, 
con D.D.della PF Edilizia ed Espropriazione n.9/EDI del 14.04.2016, con il quale si disponeva l’approvazione della graduatoria unica del piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e la proposta di Piano annuale 2016, comprendente gli interventi da ammettere a finanziamento;
-che questo Comune è inserito(quarto posto regionale e primo provinciale) nel Piano annuale regionale 2016, per l’intervento ed importo di cui trattasi;
12)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) “il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara”.

DATO ATTO:
-che con D.R.S.OO.PP E Patrimonio n. 84 del 24.12.2016, veniva disposto di:
01)-PRENDERE ATTO che con nota in data 21.12.2016, trasmessa a mezzo posta elettronica ed acclarata al protocollo comunale al n.11519 del 23.12.2016, la S.U.A.P.AP., rimetteva: “Verbale di gara e proposta di aggiudicazione”, relativo alla procedura negoziata di cui trattasi da cui discende:
(omissis)
“ultimate le operazioni di gara IL PRESIDENTE
approva la graduatoria finale degli offerenti come sopra riportata;
propone all’Ente Committente, Comune di Roccafluvione, l’aggiudicazione all’operatore economico LORIS COSTRUZIONI Via Salaria, 40/b – Basciano (TE)-P.I. 01574840672 che ha presentato il ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara del 27,953%(ventisette virgola novecentocinquantatre), pari ad un importo contrattuale di € 225.073,60 (di cui € 215.809,57 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso dl 27,953% su € 299.539,98 ed € 9.264,12 per oneri della sicurezza a cui non viene  applicato il ribasso d’asta);
evidenzia che il suddetto operatore economico, proposto quale aggiudicatario, ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione, ei limiti di legge del 30%:
•	Opere provvisionali, demolizioni e rimozioni, scavi, opere in c.a., intonaci, massetti, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature, impermeabilizzazioni e coibentazioni, infissi e serramenti, impianto idrico-sanitario, impianto termico, impianto elettrico, impianto di elevazione;
trasmette il presente verbale all’Ente Committente al fine di procedere all’aggiudicazione;
dispone di pubblicare il presente verbale sul sito internet SUAPAP, per le finalità previste dal’art.29 c.1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016.”
02)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli: 32(Fasi delle procedure di affidamento) commi: 5, 6 e 7 e, 33(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016;
03)-APPROVARE il “Verbale di gara e proposta di aggiudicazione” di cui al precedente punto 1);
04)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.32(Fasi delle procedure di affidamento) commi 7 e 8 del D.Lgs. n.50/2016;
05)-APPROVARE con successivo e separato atto, l’aggiudicazione definitiva previa “verifica del possesso dei prescritti requisiti” da parte dell’operatore economico “aggiudicatario provvisorio”, da parte della S.U.A.AP.;
06)-PRENDERE ATTO:
che l’art.1 comma 1 lett.e) del D.I. 3 giugno 2016, testualmente prevede:
“e) il termine per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi agli interventi inclusi nei annuali 2016 che risultano beneficiari dei finanziamenti è fissato per il 31 dicembre 2016.”
-che la Regione Marche-Servizio Infrastrutture, Trasporti Energia-P.F. Edilizia ed Espropriazione, con nota prot.541128 del 02.08.2016, acclarata al protocollo comunale al n.6114 del 03.08.2016, ad oggetto: “Edilizia scolastica – art.10 DL n.104/2013 convertito con modificazioni dalla L.n.128/2013 – D.I. 23.01.2015 (cd. “decreto mutui Bei”)-Piano triennale 2015-2017, Annualità 2016 – Trasmissione D.I. (MIUR-MIT-MEF) del 3 giugno 2016”, con il quale altresì veniva a comunicare:
“Il termine per l’aggiudicazione provvisoria, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, dei lavori relativi agli interventi inclusi nel piano annuale 2016 è comunque fissato al 31 dicembre 2016 (art.1 comma e) del D.I. 3 giugno 2016).”;
07)-COMUNICARE alla Regione Marche-Servizio Infrastrutture, Trasporti Energia-P.F. Edilizia ed Espropriazione- per le finalità di cui al precedente punto, l’avvenuta “aggiudicazione provvisoria”, in data 21.12.2016, dell’appalto dei lavori di cui trattasi;
(omissis)

CONSIDERATO:
-che in attuazione del punto 07) del dispositivo della sopra citata determinazione, con nota di questo Comune prot.11576 del 27.12.2016, veniva data comunicazione alla Regione Marche-Servizio I.T.E.-P.F.Edilizia ed Infrastrutture, dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

TENUTO CONTO:
-che la Regione Marche-Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia – P.F. Edilizia ed Espropriazione, con nota trasmessa a mezzo pec in data 09.06.2017, prot.548477, acclarata al protocollo comunale al n.4629 del 10.06.2017, rimetteva il DDPF 09.06.2017, n.44/EDI di “Concessione del contributo”, con la quale:
“(...) si è provveduto alla concessione del finanziamento in oggetto ed alla richiesta di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (...)”;
-che l’art.4(Finanziamento: Entità e modalità di erogazione) comma 2, della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017, testualmente prevede:
“2.Il finanziamento approvato è solo provvisoriamente assegnato e costituisce limite massimo di spesa a valere sul mutuo. L’importo definitivo ammesso a finanziamento sarà rideterminato sottraendo al finanziamento provvisoriamente assegnato l’ammontare delle eventuali economie di spesa derivanti dal ribasso d’asta che l’Ente beneficiario è tenuto a trasmettere alla Regione entro 15 giorni dalla aggiudicazione definitiva del contratto.”

CONSIDERATO:
-che in conseguenza a quanto sopra, “l’importo definitivo ammesso a finanziamento  (...) rideterminato sottraendo al finanziamento provvisoriamente assegnato l’ammontare delle eventuali economie di spesa derivanti dal ribasso d’asta (...)”. risulta:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI A MISURA...............€ 215.809,57
(Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)
A1)-IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.€   9.264,12
(art.16 comma 1 lett.a.2) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)
                                                   TOTALE LAVORI...€ 225.073,69
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE		
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
   dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura......€     0,00
2. Spese geologiche........................................ €     0,00
2a. contributo previdenziale su spese geologiche 2%........ €     0,00
4. allacciamenti ai pubblici servizi....................... €     0,00
5. imprevisti.............................................. €13.105,68
6. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.... €     0,00
7. accantonamento di cui all’art. 133, co. 3 e 4 
   del D.Lgs 163/06........................................ €     0,00
8. spese tecniche relative alla progettazione, alle 
   necessarie attività preliminari, al coordinamento
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
   alla direzione dei lavori............................... €30.000,00
8a.contributo previdenziale su 8) 4%........................€ 1.200,00
9. spese di cui all’art. 92 commi 7-bis del D.Lgs 163/06... €     0,00
10.fondo per l’innovazione di cui all’art. 113 comma 4
   del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% dell’importo
   posto a base di gara.................................... € 1.235,22
11.incentivo per il responsabile del procedimento 
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016
   pari al 80% del 2% dell’importo posto a base di gara:
   €4.940,87 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)................. € 2.223,39
12.spese per attività tecnico amministrative connesse alla
   progettazione,di supporto al responsabile del 
   procedimento, e di verifica e validazione............... €     0,00
13.eventuali spese per commissioni giudicatrici............ €     0,00
14.spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
   Artistiche.............................................. €     0,00
15.contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art.1
   Comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)...€  225,00
16.contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015
   (0,15% di € 308.134,41)...................................€  462,20
17.spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
   previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
   tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
   collaudi specifici...................................... € 5.000,00
18. IVA lavori 10%......................................... €22.507,37
19. IVA spese tecniche(8+8a)22%............................ € 6.864,00
SOMMANO					                               € 82.822,86
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO					             €307.896,55

DATO ATTO:
-che con la formale “Concessione del contributo” di cui sopra, appare possibile procedere all’ “aggiudicazione definitiva”, con contestuale assunzione dell’impegno di spesa, sul quale è possibile l’ottenimento della relativa esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la “copertura finanziaria” dei lavori (cfr.art.151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.);

CONSIDERATO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.10 del 13.06.2017, veniva disposto di:
(omissis)
07)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia “Citta’ del sole”- all’operatore economico LORIS COSTRUZIONI con sede in Via Salaria, 40/b – Basciano (TE)-P.I. 01574840672, per l’importo contrattuale di € 225.073,69 (di cui € 215.809,57 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso dl 27,953% su € 299.539,98 ed € 9.264,12 per oneri della sicurezza a cui non viene  applicato il ribasso d’asta) oltre IVA di legge;
08)-DICHIARARE efficace l’aggiudicazione definitiva come disposta al precedente punto, in quanto le verifiche, di cui al punto 06 e relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo;
09)-PRENDERE ATTO:
-dell'art.76(Informazioni dei candidati e degli offerenti) commi 1, 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
10)-COMUNICARE gli estremi della presente al S.U.AP.AP. presso la Provincia di Ascoli Piceno per le comunicazioni di cui al precedente punto e la pubblicazione del’esito ai sensi di legge;
11)-DARE ATTO: 
-che trattasi di “lavori di adeguamento sismico di edificio scolastico”;
-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l’Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti “eventi” sismici:
01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte “repliche” e “scosse di assestamento”;
02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte “repliche” e “scosse di assestamento”;
03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci)con molte “repliche” e “scosse di assestamento”;
04)-sisma del giorno 17 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell’Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto)con molte “repliche” e “scosse di assestamento”;
-che la suddetta sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, come da ultimo aggiornamento da parte dell’I.N.G.V.(cfr.INGV comunicazione dal sito ufficiale),  alle ore 15:00 del 28.04.2017, ha determinato più di 65.500 eventi sismici, di cui: oltre 1000 di magnitudo compresa tra 3 e 4; 57 di magnitudo compresa tra 4 e 5; 7 di magnitudo compresa tra 5 e 6 e n.2 di magnitudo pari, superiore a 6;
12)-DOVERSI PROCEDERE, in conseguenza a quanto sopra,“all’esecuzione di urgenza”(cfr.art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), in quanto detti lavori, da ultimarsi “prima dell’inizio delle attività scolastiche 2017/2018(Agosto 2017)” (cfr.punto 9 di pag.2 della “Lettera d’invito” prot.32481 del 29.11.2016) concorrono ad  “ovviare a situazioni di pericolo per persone (…), ovvero per l’igiene e la salute pubblica, (…) ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare,(…)”;
13)-PRENDERE ATTO:
-che trattasi di “procedura negoziata” di cui all’art.36 comma 2 lett.c)del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
-dell’art.32(Fasi delle procedure di affidamento) commi 14 e 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-del paragrafo 5(La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro”, delle “Linee Guida n.4”, recanti: ”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
14)-APPROVARE lo schema di "contratto" inerente l’appalto di che trattasi, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, ancorchè non materialmente allegato;
15)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.103(Garanzie definitive) commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
16)-DOVERSI ACQUISIRE dall’operatore economico affidatario:
a)-“garanzia definitiva” di cui all’art.103 comma 1 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 35,91 per cento dell'importo contrattuale;
b)-polizza di assicurazione che copra:
-i danni di esecuzione di cui all’art.103 comma 7 primo e secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., fino alla concorrenza di € 225.073,60;
-la responsabilità civile verso terzi di cui all’art.103 comma 7 terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, fino alla concorrenza di € 500.000,00;
ai sensi dell’art.103 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., le “garanzie fideiussorie e le polizze assicurative (...) sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.”;
17)-POTERSI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.93 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei confronti degli operatori economici non aggiudicatari, allo svincolo della garanzia di cui all'art.93 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
18)-DOVERSI PROCEDERE alla pubblicazione dell’”avviso sui risultati della procedura di affidamento”, nei modi e termini di cui agli articoli:36 comma 2 lett.c) e 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonchè nei modi e termini di cui agli articoli: 1 commi 16, lett.b) e 32 della L.06.11.2012, n.190; 23 comma 1 lett.b) del D.Lgs.14.03.2013, n.33;
(omissis)

DATO ATTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.16 del 06.07.2017, veniva disposto di:
(omissis)
08)-POTERSI CONFERIRE all’ Ing.Gianluigi Capriotti in qualità di dipendente della Provincia di Ascoli Piceno dall’utilizzo congiunto, a tempo parziale, con questo Comune, il “collaudo statico” di cui all’art. 65 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., inerente i “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia “Citta’ del sole”-
(omissis)

TENUTO CONTO:
-che con nota di questo Comune prot.4823 del 15.06.2017, si è proceduto alla “Notifica preliminare piano di sicurezza dei lavori” di cui articoli: 99 del D.Lgs..09.04.2008, n.81 e s.m.i.; 10 commi 2 e 3 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.m.i.;

CONSIDERATO:
-che con “(...) verbale d consegna parziale lavori in via d’urgenza”, acclarato al protocollo comunale al n6247 del 28.07.2017, il D.LL. Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno: “L’anno duemiladieciassette il giorno 10(dieci) del mese di luglio in Roccafluvione (...)”, procedeva alla “formale consegna parziale in via d’urgenza dei lavori suindicati, i quali senza eccezioni di sorta dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n.150 (...).”
(omissis)

DATO ATTO:
-che con “Contratto d’appalto” Rep. n.307 del giorno 08.09.2017, i “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia <Città del sole>”, venivano affidati all’operatore economico Loris Costruzioni di Loris Florio di Basciano (TE), per un corrispettivo pari ad € 225.073.69, di cui € 9.264,12 per oneri della sicurezza, per effetto del ribasso del 27,953%;

TENUTO CONTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.44 del 25.11.2017, veniva disposto di:
(omissis)
03)-PRENDERE ATTO:
-che con nota in data 18.09.2017, acclarata al protocollo comunale al n.7518 del 19.09.2017, l’operatore economico affidatario, Loris Costruzioni di Loris Florio: “Comunica(va) che intende stipulare, ai sensi dell’art.105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, il seguente sub-contratto non assimilabile al subappalto, con la seguente impresa:
Denominazione/Ragione sociale: PEDICONE SERRAMENTI SNC DI PEDICONE VINCENZO & C.;
P.iva e Cod.Fisc.: 01426690671
Prestazioni: MONTAGGIO INFISSI;
Importo presunto: € 1.500,00 oltre iva come di legge. Così ripartito: importo presunto lavori € 1.300,00; oneri della sicurezza € 200,00;
A tal fine si precisa che l’affidamento in oggetto è conforme all’art. sopra citato e, pertanto, risponde a tutti i requisiti ivi richiesti:
-importo non superiore al 2% dell’appalto principale;
-importo non superiore a 100.000,00 euro;
-l’incidenza del costo del personale o della manodopera non è superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.”
Allegando altresì:
-Dichiarazione (dell’affidatario) ex art.2359 C.C. controllo-collegamento;
-Dichiarazione (del sub-contraente) possesso requisiti art.80 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
-Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (del sub-contraente);
-Copia del DURC(del sub-contraente);
-Piano Operativo di Sicurezza (del sub-contraente);
-Idoneità tecnico professionale;
04)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.105(Subappalto) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
05)-PRENDERE ATTO, per le finalità di cui all’art.105(Subappalto) comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-che nella sopra riportata comunicazione in data 18.09.2017, acclarata al protocollo comunale al n.7518 del 19.09.2017, l’operatore economico affidatario, Loris Costruzioni di Loris Florio: “Comunica(va):
a)-Nome del sub-contraente: “PEDICONE SERRAMENTI SNC DI PEDICONE VINCENZO & C.;
   P.iva e Cod.Fisc.: 01426690671”
b)-Importo del sub-contratto: “Importo presunto: € 1.500,00 oltre iva come di legge. 
   Così ripartito: importo presunto lavori € 1.300,00; oneri della sicurezza € 
   200,00;2
c)-L’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati: “Prestazioni: MONTAGGIO 
   INFISSI;”
(omissis)

DATO ATTO:
-che il Sindaco, con Ordinanza n.277 del 30.09.2017, trasmessa altresì: al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Scolastico, all’Impresa esecutrice dei lavori, al Direttore dei Lavori, al Collaudatore statico, al Responsale del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio in qualità di R.U.P., ed inoltre: a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno e alla Regione Marche-Servizio I.T.E.-P.F.Edilizia ed Espropriazione di Ancona, con la quale:
(omissis)
Tenuto conto:
-che, (...), con “Processo verbale di consegna lavori in via d’urgenza” sottoscritto in data 10.07.2017, ed acclarato al protocollo comunale al n.6247 del 28.07.2017, i lavori di cui trattasi venivano consegnati, dal D.L. ing.Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, all’operatore economico Loris Costruzioni di Lori Florio;
 -che per i lavori di che trattasi, veniva stipulato con atto pubblico informatico, contratto d’appalto Rep.n.307 in data 08.09.2017,  in corso di registrazione;

Dato atto:
-che all’art.11(Tempi di esecuzione) del contratto d’appalto Rep.307/2017, dispone che il termine dei lavori deve “comunque intervenire prima dell’inizio delle attività scolastiche 2017/2018 (cfr.punto 9 del parafgrafo “Ammontare dell’appalto” di pag.2 della lettera d’invito prot.32481 del 29.11.2016).”;

Tenuto conto:
-che il ritardo nella consegna ed esecuzione dei lavori, sono dipesi da situazioni non dipendenti dalla volontà del Comune di Roccafluvione né della direzione dei lavori nè dall’impresa; (cfr.punto 4) del dispositivo della D.R.S.OO.PP. e Patr. n.10/2017 come sopra riportata)

Considerato:
-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.7904 del 30.09.2017, il D.L. Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, rimetteva, relativamente agli interventi di cui trattasi,  “Verbale di riconsegna parziale delle opere eseguite”, nel quale, in sintesi veniva testualmente riportato:
(omissis)
Premesso che:
-in data 10/07/2017 è avvenuta la consegna dei lavori all’impresa appaltatrice “Loris Costruzioni di Loris Florio” (…);
-gli stessi relativamente alle opere interne del piano primo (Foglio 22 part.424 Sub.7 – Disimpegno, Aula, Attività libere e cucina interessate dai lavori) risultano essere stati parzialmente ultimati dall’appaltatore in data 29 settembre 2017;
-le opere strutturali eseguite al piano primo, anche se parziali rispetto al progetto complessivo, hanno di fatto migliorato la condizione strutturale complessiva dell’edificio rispetto alle condizioni pre-intervento; (N.B. L’edificio in argomento, a seguito dei sopralluoghi dei tecnici della protezione civile conseguenti agli eventi sismici di cui sopra, ha avuto sempre esiti di agibilità <cfr.schede Aedes: 002 – Squadra P24 in data 01.09.2016; 004 – Squadra P343 in data 15.11.2016) 
-il sottoscritto Direttore dei Lavori ritiene che le lavorazioni relative alle opere mancanti non pregiudicano la stabilità e la fruibilità del piano completato;
-l’ente appaltante di concerto con l’amministrazione scolastica, così come ribadito nel presente verbale, ha chiesto all’impresa appaltatrice e al direttore dei lavori la necessità di avere in uso l’opera prima del completamento del piano inferiore (autonomamente utilizzabile per l’intervento) e quindi, del collaudo definitivo;
(omissis)
I convenuti procedono ad una dettagliata ricognizione dei luoghi e ad una verifica funzionale delle opere oggetto della consegna di seguito descritte:
-unità posta al piano primo composta da ingresso (Disimp.), 2 aule (aula e attività libere) e zona cucina ad esclusione del bagno ad uso del personale di servizio che dovrà essere ancora oggetto dei lavori di completamento.
Gli intervenuti hanno constatato che tutte le opere consegnate sono in perfetto stato di conservazione e manutenzione e sono privi di difetti o vizi palesi di alcun genere.
(omissis)
Si procede quindi alla riconsegna parziale delle opere al legale rappresentante dell’ente appaltante riconsegnandone le chiavi in data odierna.”

Richiamato, quanto riportato al punto 11) del dispositivo della sopra citata D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 10 del 13.06.2017;

Dato atto:
-che in conseguenza a quanto sopra richiamato, l’art.16 sexies (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l’efficacia delle attività di protezione civile) comma  2 del D.L. n.91/2017 convertito con modificazioni dalla L. n.123/2017, ha disposto che “la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione agli eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo di centottanta giorni. (…)”;

Ravvisato:
-per quanto sopra motivato e per quanto riportato nel suddetto “Verbale di riconsegna parziale delle opere eseguite”, potersi procedere, in pendenza dell’ultimazione dei lavori e collaudo, all’utilizzo dell’unità posta la piano primo composta da ingresso (Disimp.), 2 aule (aula e attività libere) e zona cucina ad esclusione del bagno ad uso del personale di servizio che dovrà essere ancora oggetto dei lavori di completamento.(da eseguirsi nel corso delle vacanze natalizie);”
(omissis)
Ordinava:
(omissis)

01)-potersi procedere, in pendenza: dell’ultimazione, del collaudo statico e accertamento della regolare esecuzione, dei “lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia “Citta’ del sole”, di cui trattasi,  all’utilizzo dell’unità posta la piano primo composta da ingresso (Disimp.), 2 aule (aula e attività libere) e zona cucina, ad esclusione del bagno ad uso del personale di servizio che dovrà essere ancora oggetto dei lavori di completamento;

(omissis)

TENUTO CONTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.45 del 25.11.2017, veniva disposto di:
(omissis)
04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 29.09.2017, acclarata al protocollo comunale al n.7881 del 29.09.2017, integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.9062 del 07.11.2017, il D.LL., ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, rimetteva:
01)-Relazione tecnica sulla redazione dei nuovi prezzi;
02)-Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 (debitamente sottoscritto dal D.LL. e dall’operatore economico affidatario) contenente:
    a)-Elenco (nuovi) prezzi unitari da NP1 a NP15;
    b)-Analisi (nuovi) prezzi: NP09, NP10, NP11 e NP12;
ed inoltre:
03)-Relazione tecnica di accompagnamento al S.A.L. (art.35 della convenzione n.462 
    del 07.09.2017)...............TAV. n.1;
03a)-Quadro comparativo;
03b)-Disegni contabili;
04)-Documentazione fotografica....TAV. n.2;
05)-Libretto delle misure;
06)-Registro di contabilità;
07)-Stato di Avanzamento n.1 a tutto  il 26.09.2017;
08)-Certificato n.1 di pagamento;
inerente i “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia <Città del sole>”;
05)-PRENDERE ATTO in particolare:
-della “Relazione tecnica di accompagnamento al S.A.L. (art.35 della convenzione n.462 del 07.09.2017);
-della “Relazione tecnica sulla redazione dei nuovi prezzi”;
(omissis)
08)-APPROVARE per quanto sopra motivato:
01)-Relazione tecnica sulla redazione dei nuovi prezzi;
02)-Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 (debitamente sottoscritto dal D.LL. 
    e dall’operatore economico affidatario) contenente:
    a)-Elenco (nuovi) prezzi unitari da NP1 a NP15;
    b)-Analisi (nuovi) prezzi: NP09, NP10, NP11 e NP12;
inerente i “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia <Città del sole>”;
(omissis)

DATO ATTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.46 del 25.11.2017, veniva disposto di:
(omissis)
12)-APPROVARE gli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, relativi al 1^ S.A.L.di “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia <Città del sole>”, eseguiti dall’affidatario, operatore economico LORIS COSTRUZIONI di Loris Florio di Basciano (TE), a tutto il 26.09.2017,dell’importo di € 96.881,53, di cui € 2.906,44 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, predisposti dal D.LL. Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno;
(omissis)
14)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 70.259,61, oltre IVA di legge e  al netto: delle ritenute di legge e del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza;
(omissis)

TENUTO CONTO:
-che con nota in data 22.12.2017, acclarata al protocollo comunale al n.10452 del 23.12.2017, il D.LL.Ing.Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, trasmetteva “Perizia di variante”, relativa ai lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di € 328.713,12, di cui € 250.871,34 per lavori al netto del ribasso del 27,953% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.229,87, non soggetti a ribasso;
-che il Direttore dei Lavori, ing. Pierluigi Pelliccioni, nella “Relazione generale - Tav.n.01”, in sintesi, testualmente riporta:
(omissis)
“Tenuto conto:
-che il Comune di Roccafluvione, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l’Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti “eventi” sismici:
01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte “repliche” e “scosse di assestamento”;
-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016  e successivi;
(omissis)
-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, all’art.1 comma 1, veniva disposto:
“1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1.”
-che nel suddetto “Allegato 1” riportante l’ “Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016”, per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n.”31” è inserito il Comune di “Roccafluvione AP”;
02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte “repliche” e “scosse di assestamento”;
-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell’eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;  
03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci)con molte “repliche” e “scosse di assestamento”;
-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell’eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;  
04)-sisma del giorno 17 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell’Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto)con molte “repliche” e “scosse di assestamento”;
-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta  ad estendere, in conseguenza dell’eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;  

Tenuto conto:
-che il capoluogo ove ha sede la scuola oggetto d’intervento, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:
01)-di km. 26,00 circa, dall’epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI), relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;
02)-di km. 29,00 circa, dall’epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;
03)-di km. 29,00 circa, dall’epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;
04)-di km. 34,00 circa, dall’epicentro, nei pressi dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto della provincia dell’Aquila, relativamente alle scosse delle ore 10:25, 11:14, 11:25 e 14:33 del giorno 18 gennaio 2017,  rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter;
con “effetti macrosismici” (cfr. pubblicazioni a cura di “redazione MeteoWeb” dei giorni 24.08.2016,27.10.2016, 31.10.2016 e 18.01.2017) sul nostro territorio, che vanno dalla “scossa considerevole” del giorno 18.01.2017, fino alla “scossa dannosa” del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio; 

Dato atto:
-che il “progetto esecutivo”, che come sopra riportato, veniva predisposto ed approvato “prima” dei devastanti eventi sismici sopra elencati, salvo la “sua riapprovazione” (D.G.C. n.117 del 11.11.2016) per adeguarlo alle intervenute disposizioni del D.Lgs. n.50/2016 (c.d. nuovo codice dei contratti)

Fatte le necessarie ed opportune valutazioni, come sopra indicate, stante: la imprevedibilità, eccezionalità ed estrema gravità delle stesse;

(omissis)
Il sottoscritto direttore dei lavori sulla base di quanto previsto dall’art.106 c.1 (lett.c) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 redige la seguente relazione per esplicitare tutte le circostanze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione che comportano la necessià di redigere una perizia di variante in corso d’opera nonché la redazione di n.2 verbali nuovi prezzi.
Precisando che, sempre ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 comma 1 lett.c) p.2 le modifiche apportate non alterano la natura generale del contratto, nel corso dei lavori si sono riscontrati i seguenti imprevisti:
•	(1)I pilastri al piano primo e in parte al piano terra, una volta messi a nudo dalle tramezzature e dall’intonaco, hanno mostrato notevoli zone ammalorate causate da un mix design del calcestruzzo non adatto (grossi inerti) con evidenti nidi di ghiaia soggetti a disfacimento sotto la minima azione meccanica dovuta anche ad una mancata vibrazione in fase di getto. (vedi foto) Una volta accertato che le caratteristiche meccaniche del materiale usato erano simili a quelle ipotizzate in fase di progetto (si sono ripetute prove di schiacciamento su 3 campioni prelevati nei pilastri al piano primo maggiormente danneggiati che si allegano alla presente relazione) è imprescindibile  ricostruzione e la riprofilatura delle parti ammalorate con apposita malta strutturale previa asportazione del materiale incoerente e preventivo trattamento della gabbie metalliche a vista. Sono stati quindi redatti i seguenti NP.: -N.P.01: pulizia superficiale del calcestruzzo; N.P.02:trattameno a mano dei ferri; N.P.03: riprofilatura applicata a mano. La condizione generale rinvenuta sui pilastri al piano primo consiglia inoltre la fasciatura completa degli stessi per almeno un giro con materiale in fibra di carbonio oltre ai due giri previsti in progetto alle estremità. (N.P.11 riparazione di elementi ... Esecuzione di n.1 strato).

•	(2)E’ emerso nel corso dei lavori che alcune pareti di tamponamento perimetrali anziché insistere sulla struttura della scuola materna gravano sull’adiacente struttura della scuola elementare e pertanto non è possibile nell’ottica di separazione delle due strutture, ancorare detti tramezzi alle strutture della materna al fine di evitarne il ribaltamento.
Inoltre sempre in riferimento all’adiacenza eccessiva delle due strutture i pilastri di confine non hanno uno spazio sufficiente per essere fasciati per tutto il loro perimetro.(vedi foto) Per risolvere queste due problematiche si è optato nel primo caso nella realizzazione nel lato scuola materna di contro pareti sismiche in cartongesso doppia lastra lasciando quelle esistenti gravare sulla struttura della scuola elementare; così facendo si evita il ribaltamento di queste ultime nelle stanze ad uso materna e si dà la possibilità di intervenire su quelle esistenti durante il futuro consolidamento della scuola elementare. La seconda problematica relativa alla chiusura delle fasciature in fibra dei pilastri adiacenti all’altra struttura può essere superata realizzando delle asole sulle tamponature esistenti che facilitano l’inserimento di fiocchi in fibra di carbonio di adeguato diametro a passo adeguato che hanno la funzione di chiudere puntualmente l’intero perimetro della fasciatura:N.P.04 – Fornitura e posa di resina epossidica tixotropica per ancoraggi; N.P.05 – Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere; N.P.06 – Collegamento perimetrale con fiocchi di connessione realizzate in fibre composite; N.P.12 – controparete in lastre di cartongesso;

•	(3)Per accelerare i tempi di lavorazione e avere un risparmio sui costi sé optato per delle soglie in alluminio verniciato in sostituzione delle esistenti soglie in travertino: N.P.09 – Fornitura e posa in opera di soglie per finestre realizzate in lamiera metallica zincata e verniciata ... che ha prodotto un risparmio rispetto a quelle in travertino previste in progetto.

•	(4)Si sono rinvenuti, ad intonaco asportato, parti di impianto elettrico che andavano a incidere porzioni d strutture (vedi foto) E’ necessario modificare l’impianto elettrico e ripristinare le condizioni originarie della struttura previa ricostruzione e riprofilatura delle parti mancanti: N.P.10 – realizzazione di derivazione a vista di dorsali elettriche.

•	(5)Una volta messe a nudo le pareti delle aule dai decori esistenti, si è resa la necessità di effettuare degli scrostamenti e raschiature delle superfici per permettere una corretta tinteggiatura a causa della presenza di decori appesi con nastro adesivo. (N.P.14 – scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente) (vedi foto)

•	(6)È stato redatto N.P.07 – taglio di superfici in quanto, verificata l’armatura esistente della scala, per non peggiorare la condizione statica della stessa, si è deciso di tagliare le rampe delle scale anziché effettuare una demolizione controllata; Nell’ambito della stessa lavorazione si è reso necessario lo smontaggio della ringhiera (N.P. 13 – rimozione di ringhiera) (vedi foto)

•	(7)Si è avuta la necessità di redigere i seguenti nuovi nuovi prezzi al fine di accelerare la riconsegna delle aule: “N.P. 08 – compenso agli infissi per meccanismo antiribalta”, per motivi di sicurezza dei bambini; “N.P.15 – pittura a smalto ...” per la realizzazione di no zoccolo lavabile di 1,5m di altezza sulle pareti perimetrali degli ambienti migliorando così le condizioni igieniche sanitarie degli stessi.

•	(8)La fase di progettata è stata espletata e conclusa prima delle sequenze sismiche del 24 agosto 2016 e seguenti e pertanto all’epoca non si erano evidenziati nelle tamponature del piano terra deli evidenti segni nei tamponamenti esterni a rischio ribaltamento. (vedi foto) Considerato che l’intervento è previsto anche al piano terra si ritiene indispensabile agire anche qui con l’antiribaltamento delle pareti esterne che non subiscono modifiche di prospetto mentre dove si cambia la disposizione degli infissi, al fine di evitare tali fenomeni di ribaltamento, si tampona direttamente con dei blocchi termici portanti in poroton (art.03.02.018.002). La maggior spesa  parte si compensa con le minori quantità di contropareti da effettuare.

•	(9)Al piano terra sono emerse in fase di scavo travi d fondazione a quote diverse  (vedi foto) (...) Questa problematica ha comportato l’aumento di alcune lavorazioni come la posa di nuove ringhiere e la redazione dei seguenti nuovi prezzi: N.P.16 – casseformi e N.P. 17 – pavimento industriale.
(omissis)
Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento dell’11,46% con una maggiore spesa netta pari ad € 25.797,65.
Come si evince dal quadro comparativo la maggior parte degli imprevisti (49,99%<cfr.”Discostamenti” del Quadro di raffronto – Tav.n.27) riguarda il capitolo “Adeguamento sismico” (in aumento per € 36.978,21 lordi).

CONSIDERATO
-per le motivazioni contenute nella sopra riportata “Relazione generale - Tav.n.01”,con D.G.C. n.46 del 16.04.2018, veniva disposto di:
(omissis)
11)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06)(eventi sismici) e 09)(Relazione generale), la perizia di “variante in corso d’opera”, redatta dal D.LL.Ing.Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, dell’importo complessivo di € 328.713,12, di cui € 250.871,34 per lavori al netto del ribasso del 27,953% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.229,87, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO A BASE D’ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA.€ 334.006,23
(Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)
B)-IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.€  10.229,87
(art.16 comma 1 lett.a.2) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)
  -TOTALE LAVORI...................................€ 344.236,10
  -Ribasso d’asta del 27,953% su A)...............-€  93.364,76
C)-IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO.....................................€ 250.871,34
(Di cui € 10.229,87 per l’attuazione dei piani di sicurezza)
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE		
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
   dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura......€ 3.300,00
2. Spese geologiche........................................ €     0,00
2a. contributo previdenziale su spese geologiche 2%........ €     0,00
4. allacciamenti ai pubblici servizi....................... €     0,00
5. imprevisti.............................................. €     0,00
6. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.... €     0,00
7. accantonamento di cui all’art. 133, co. 3 e 4 
   del D.Lgs 163/06........................................ €     0,00
8. spese tecniche relative alla progettazione, alle 
   necessarie attività preliminari, al coordinamento
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
   alla direzione dei lavori............................... €30.000,00
8a.contributo previdenziale su 8) 4%........................€ 1.200,00
8.1. spese tecniche perizia di variante.....................€ 3.442,18
8.1a.contributo previdenzia su 8.1) 4% .....................€   137,69
9. spese di cui all’art. 92 commi 7-bis del D.Lgs 163/06... €     0,00
10.fondo per l’innovazione di cui all’art. 113 comma 4
   del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% dell’importo
   posto a base di gara.................................... € 1.235,22
11.incentivo per il responsabile del procedimento 
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016
   pari al 80% del 2% dell’importo posto a base di gara:
   €4.940,87 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)................. € 2.223,39
12.spese per attività tecnico amministrative connesse alla
   progettazione,di supporto al responsabile del 
   procedimento, e di verifica e validazione............... €     0,00
13.eventuali spese per commissioni giudicatrici............ €     0,00
14.spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
   Artistiche.............................................. €     0,00
15.contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art.1
   Comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)...€  225,00
16.contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015
   (0,15% di € 308.134,41)...................................€  462,20
17.spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
   previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
   tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
   collaudi specifici...................................... € 3.000,00
18. IVA lavori 10%......................................... €25.087,13
19. IVA spese tecniche(8+8a+8.1+8.1a)22%................... € 7.651,57
SOMMANO					                                € 77.964,38
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO					              €328.835,72
da cui scaturisce una economia, rispetto all’importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.117 del 11.11.2016> pari ad € 71.164,28 ed un aumento di € 20.939,17 rispetto all’art.4(Finanziamento: Entità e modalità di erogazione) comma 2, della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017;(cfr. punto 03)presente dispositivo)
12)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell’art.161 commi 4, primo periodo, e 12 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
-del sub-paragrafo “1.5 Esecuzione dei lavori: varianti in corso d’opera e contestazioni dell’esecutore” delle “Linee guida (...)” di proposta dell’A.N.A.C. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.111, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
13)-APPROVARE l’ “atto di sottomissione - Tav.n.25.a”, “sottoscritto” dall’affidatario-operatore economico Loris Costruzioni di Loris Florio di Basciano (TE)”in segno di accettazione”, dell’importo pari ad € 25.797,74 (euro venticinquemilasettecentonovantasette/74) come appresso specificato:
Importo complessivo lavori di perizia al netto				€  250.871,34 
del 27,953% e comprensivo degli oneri della sicurezza
A dedurre importo contratto principale al netto				€  225.073,60 
del 27,953% e comprensivo degli oneri della sicurezza
Restano								         	€   25.797,74;
(omissis)
16)-DARE ATTO che trattasi di intervento finanziato  dalla la Regione Marche, con DDPF 09.06.2017, n.44/EDI, di cui all’art.10 DL n.104/2013 convertito con modificazioni dalla L.n.128/2013 – D.I. 23.01.2015 (cd “decreto mutui Bei”) – Piano triennale 2015-2017, Annualità 2016 di Edilizia scolastica;
17)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.2 comma 5 del D.I. 23.01.2015;
-dell’art.2 comma 2 lett.n) della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017;
18)-COMUNICARE alla Regione, al MIUR, alla Struttura di Missione del Governo ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., le indispensabili modifiche (di cui trattasi) al progetto iniziale, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 09);
19)-IMPUTARE la spesa di € 20.939,17 afferente la predetta “variante in corso d’opera”, al: 
-codice (missione-programma-titolo):04012059999999 -ex Cap.:2855 -Descrizione: “da contributo regionale per edilizia scolastica annualità 2016 edificio scuola materna”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
-in subordine, al:
-codice (missione-programma-titolo):______________ -ex Cap.______ -Descrizione: “__________________________________________”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
(omissis)

DATO ATTO:
-che in applicazione: dell’art.2 comma 5 del D.I. 23.01.2015, nonché -l’art.2 comma 2 lett.n) della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017, nonché del punto 18) della sopra citata deli8berazione, questo Comune con  nota prot.3660 del 21.04.2018, trasmessa a mezzo PEC a:
-REGIONE MARCHE-Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energie – P.F. Edilizia ed Espropriazione;
-M.I.U.R.-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica;
-CASSA DEPOSITI E PRESTITI-Area Enti Pubblico;
trasmetteva “Perizia di variante in corso d’opera” e richiedeva l’utilizzo somma (di € 20.939,17)  da economie derivanti da ribasso d’asta (pari ad € 92.103,45) per “indispensabili modifiche al progetto iniziale”, per quanto sopra motivato; 

TENUTO CONTO:
-che dalla data di ricevimento della suddetta richiesta (21.04.2018) da parte dei soggetti pubblici sopra indiati, alla data della presente, non è pervenuta alcuna risposta;
-che questo Comune, stante il “silenzio da parte dei suddetti soggetti pubblici”,  ha inoltrato: il 31 maggio 2018 e il 13 luglio 2018 a mezzo di posta elettronica, al Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F.Edilizia ed Espropriazione,  richiesta di notizie circa l’esito della suddetta “perizia di variante” e della possibilità di utilizzo della somma di € 20.939,17 sull’economie di ribasso d’asta pari ad € 92.103,45;
-che anche queste richieste non hanno avuto alcun riscontro scritto;

CONSIDERATO:
-che in conseguenza a quanto sopra, il Sindaco, con nota prot.6889 del 08.08.2018 con la quale:
(omissis)
“Ravvisato:
-come altresì comunicato nelle email sopra riportate:
-che dalla suddetta nota prot.3660 del 21.04.2018, sono passati, (alla data della presente) senza alcuna risposta 118 giorni ( tre mesi e diciotto giorni) e che i lavori in conseguenza a quanto sopra stanno subendo un notevole rallentamento (RICORDO CHE SONO SCUOLE di un Comune terremotato), che determinerà lo slittamento della loro ultimazione; 
-che si è nell’imminenza altresì del periodo feriale anche per gli operatori economici coinvolti nei lavori;
-che si è nell’imminenza dell’inizio (17.09.2018) del nuovo anno scolastico;

Tenuto conto:
-che l’art.2 (impegni e dichiarazioni) comma 2 lett.n) della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” testualmente dispone:
1.	Impegni in relazione ai Progetti
Il Comune di Roccafluvione (AP) in relazione al progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia <Città del sole>” cod. 0440640368 per importo di € 400.000,00 si impegna, a pena di decadenza dal finanziamento, a:
(omissis)
n)	comunicare alla Regione, al MIUR, alla Struttura di Missione del Governo ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. eventuali ed indispensabili modifiche al progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del Piano triennale regionale autorizzativo dell’intervento;
(omissis)

Ritenuto:
-che da quanto sopra, appare sempre più evidente che dai suddetti soggetti pubblici, non verrà autorizzato questo Comune all’utilizzo della somma di € 20.939,17 (aumento pari al 9,30325% dell’importo contrattuale e quindi ampiamente nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici);

Ribadito:
-che il “progetto esecutivo”,  dell’intervento di che trattasi è stato predisposto ed approvato “prima” dei devastanti eventi sismici sopra elencati, con tutte le circostanze di imprevedibilità, eccezionalità ed estrema gravità interessanti l’edificio scolastico in argomento;
-che le modifiche al progetto, di cui alla variante in argomento, risultano assolutamente indispensabili, come riportate nella “Relazione generale -Tav.n.01.v” della variante; 

Dato atto:
-che questo Comune, per sopperire a quanto sopra e cercare di ultimare i lavori prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, ha deciso nell’immediato di anticipare con “fondi propri” la copertura dell’aumento di spesa di € 20.939,17 per le “indispensabili modifiche al progetto iniziale”;
(omissis)
richiedeva alla Regione Marche:
“-un contributo, per quanto sopra motivato, di € 20.939,17 per la copertura dell’aumento di spesa “per le indispensabili modifiche al progetto iniziale” dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia “Citta’ del sole”.

RAVVISATO:
-che in attesa di un favorevole riscontro da parte della Regione Marche, circa la concessione del contributo di € 20.939,17, necessita nell’interesse di uno sviluppo dei lavori senza eccessivi ritardi, procedere alla “copertura dell’aumento di spesa “per le indispensabili modifiche al progetto iniziale” dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia “Citta’ del sole”, con fondi di bilancio;

RITENUTO:
-a tale scopo, potersi utilizzare parte del contributo di € 50.000,00, concesso dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui al Codice 08.01-2.05.99.99.999 ex Cap.2649 (v.Cap.521-5, E) del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

TENUTO CONTO INOLTRE:
-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.6788 del 04.08.2018, il D.LL. Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, rimetteva il II^ S.A.L. eseguiti a tutto il 31.07.2018, dell’importo complessivo di € 141.328,75 al netto del ribasso del 27,953% e comprensivi degli oneri per la sicurezza, da cui discende un certificato di pagamento di € 70.362,50, al netto: del ribasso del 27,953%, della ritenuta dello 0,50% e comprensivi degli oneri per la sicurezza;

ACCERTATO:
-che a seguito di rendicontazione del I^ S.A.L., la Cassa DD.PP. ha erogato la spesa sostenuta con il suddetto S.A.L. dell’importo di € 77.285,57 IVA 10% compresa;

CONSIDERATO:
-che con D.G.C. n.116 del 28.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)
03)-DARE ATTO
-che come disposto all’art.4 commi 3 e 4 secondo periodo della citata “convenzione” l’ultima finestra utile per la richiesta di erogazione alla Regione Marche, risulta quella del 15 settembre di ogni anno;
-che come riportato al punto 03) del dispositivo della succitata D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 46/2017, il D.LL., ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno rimetteva i documenti contabili relativi al I^ S.A.L. con nota in data 29.09.2017, acclarata al protocollo comunale al n.7881 del 29.09.2017, integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.9062 del 07.11.2017;
-che in conseguenza a quanto sopra, non è stato possibile	“inoltra(re) la richiesta di erogazione sulla base degli stati di avanzamento (I^SAL) relativi al progetto ed alle spese effettivamente sostenute (...) entro il 15 settembre (...);
-che in conseguenza a quanto sopra, la prossima finestra utile è quella de 15 febbraio 2018, con valuta di erogazione del 25 marzo 2018;
04)-DARE ATTO che ciò comporterebbe un ritardato pagamento, rispetto alla fattura emessa dall’affidatario, qualora l’erogazione intervenisse entro il 25 marzo 2018(cfr.art.4 comma 5 “convenzione”), di circa quattro mesi, con notevole disagio per l’operatore economico affidatario, nonché sull’andamento dei lavori;
05)-POTERSI PROCEDERE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, alla liquidazione, in soli termini di cassa con le disponibilità dell’Ente che ammontano ad Euro ___.___,__ (conto di diritto tratto dalla procedura on line di tesoreria in data __.__.____ con pronto reintegro non appena pervenuti i fondi del MIUR pari ai predetti € 77.285,57, come da D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.46/2017;
06)-DARE ATTO che trattasi di intervento finanziato  dalla la Regione Marche, con DDPF 09.06.2017, n.44/EDI, di cui all’art.10 DL n.104/2013 convertito con modificazioni dalla L.n.128/2013 – D.I. 23.01.2015 (cd “decreto mutui Bei”) – Piano triennale 2015-2017, Annualità 2016 di Edilizia scolastica;
07)-IMPUTARE la spesa di € 77.285,57, al: 
-codice (missione-programma-titolo):04012059999999 -ex Cap.:2855 -Descrizione: “da contributo regionale per edilizia scolastica annualà 2016 edificio scuola materna”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
(omissis)

RAVVISATO:
-doversi dare indirizzo ai servizi interessati (Servizio Finanziario e Servizio OO.PP. e Patrimonio) circa le attività da intraprendere conseguenti a quanto sopra;

TENUTO CONTO:
-che trattasi di intervento finanziato  dalla la Regione Marche, con DDPF 09.06.2017, n.44/EDI, di cui all’art.10 DL n.104/2013 convertito con modificazioni dalla L.n.128/2013 – D.I. 23.01.2015 (cd “decreto mutui Bei”) – Piano triennale 2015-2017, Annualità 2016 di Edilizia scolastica;

VISTO:
-L'art.5-Indirizzo politico e gestionale:distinzioni- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;
-L'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi",adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;
-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006; 
-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;

PROPONE
-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
-per i motivi in premessa esposti e che quì s'intendono richiamati, di:
01)-DARE ATTO che con D.G.C. n.46 del 16.04.2018, veniva disposto di:
(omissis)
11)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06)(eventi sismici) e 09)(Relazione generale), la perizia di “variante in corso d’opera”, redatta dal D.LL.Ing.Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, dell’importo complessivo di € 328.713,12, di cui € 250.871,34 per lavori al netto del ribasso del 27,953% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.229,87, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO A BASE D’ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA.€ 334.006,23
(Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)
B)-IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.€  10.229,87
(art.16 comma 1 lett.a.2) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)
  -TOTALE LAVORI...................................€ 344.236,10
  -Ribasso d’asta del 27,953% su A)...............-€  93.364,76
C)-IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO.....................................€ 250.871,34
(Di cui € 10.229,87 per l’attuazione dei piani di sicurezza)
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE		
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
   dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura......€ 3.300,00
2. Spese geologiche........................................ €     0,00
2a. contributo previdenziale su spese geologiche 2%........ €     0,00
4. allacciamenti ai pubblici servizi....................... €     0,00
5. imprevisti.............................................. €     0,00
6. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.... €     0,00
7. accantonamento di cui all’art. 133, co. 3 e 4 
   del D.Lgs 163/06........................................ €     0,00
8. spese tecniche relative alla progettazione, alle 
   necessarie attività preliminari, al coordinamento
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
   alla direzione dei lavori............................... €30.000,00
8a.contributo previdenziale su 8) 4%........................€ 1.200,00
8.1. spese tecniche perizia di variante.....................€ 3.442,18
8.1a.contributo previdenzia su 8.1) 4% .....................€   137,69
9. spese di cui all’art. 92 commi 7-bis del D.Lgs 163/06... €     0,00
10.fondo per l’innovazione di cui all’art. 113 comma 4
   del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% dell’importo
   posto a base di gara.................................... € 1.235,22
11.incentivo per il responsabile del procedimento 
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016
   pari al 80% del 2% dell’importo posto a base di gara:
   €4.940,87 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)................. € 2.223,39
12.spese per attività tecnico amministrative connesse alla
   progettazione,di supporto al responsabile del 
   procedimento, e di verifica e validazione............... €     0,00
13.eventuali spese per commissioni giudicatrici............ €     0,00
14.spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
   Artistiche.............................................. €     0,00
15.contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art.1
   Comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)...€  225,00
16.contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015
   (0,15% di € 308.134,41)...................................€  462,20
17.spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
   previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
   tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
   collaudi specifici...................................... € 3.000,00
18. IVA lavori 10%......................................... €25.087,13
19. IVA spese tecniche(8+8a+8.1+8.1a)22%................... € 7.651,57
SOMMANO					                                € 77.964,38
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO					              €328.835,72
da cui scaturisce una economia, rispetto all’importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.117 del 11.11.2016> pari ad € 71.164,28 ed un aumento di € 20.939,17 rispetto all’art.4(Finanziamento: Entità e modalità di erogazione) comma 2, della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017;(cfr. punto 03)presente dispositivo)
(omissis)
17)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.2 comma 5 del D.I. 23.01.2015;
-dell’art.2 comma 2 lett.n) della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017;
18)-COMUNICARE alla Regione, al MIUR, alla Struttura di Missione del Governo ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., le indispensabili modifiche (di cui trattasi) al progetto iniziale, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 09);
19)-IMPUTARE la spesa di € 20.939,17 afferente la predetta “variante in corso d’opera”, al: 
-codice (missione-programma-titolo):04012059999999 -ex Cap.:2855 -Descrizione: “da contributo regionale per edilizia scolastica annualità 2016 edificio scuola materna”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
-in subordine, al:
-codice (missione-programma-titolo):______________ -ex Cap.______ -Descrizione: “__________________________________________”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
(omissis)
02)-PRENDERE ATTO che in applicazione: dell’art.2 comma 5 del D.I. 23.01.2015, nonché -l’art.2 comma 2 lett.n) della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017, nonché del punto 18) della sopra citata deli8berazione, questo Comune con  nota prot.3660 del 21.04.2018, trasmessa a mezzo PEC a:
-REGIONE MARCHE-Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energie – P.F. Edilizia ed Espropriazione;
-M.I.U.R.-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica;
-CASSA DEPOSITI E PRESTITI-Area Enti Pubblico;
trasmetteva “Perizia di variante in corso d’opera” e richiedeva l’utilizzo somma (di € 20.939,17)  da economie derivanti da ribasso d’asta (pari ad € 92.103,45) per “indispensabili modifiche al progetto iniziale”, per quanto sopra motivato; 
03)-PRENDERE ATTO
-che il Sindaco, con nota prot.6889 del 08.08.2018 richiedeva alla Regione Marche:
“-un contributo, per quanto sopra motivato, di € 20.939,17 per la copertura dell’aumento di spesa “per le indispensabili modifiche al progetto iniziale” dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia “Citta’ del sole”.
04)-POTERSI UTILIZZARE, in attesa di un favorevole riscontro da parte della Regione Marche, parte del contributo di € 50.000,00, concesso dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui al Codice 08.01-2.05.99.99.999 ex Cap.2649 (v.Cap.521-5, E) del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
05)-PRENDERE ATTO:
-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.6788 del 04.08.2018, il D.LL. Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, rimetteva il II^ S.A.L. eseguiti a tutto il 31.07.2018, dell’importo complessivo di € 141.328,75 al netto del ribasso del 27,953% e comprensivi degli oneri per la sicurezza, da cui discende un certificato di pagamento di € 70.362,50, al netto: del ribasso del 27,953%, della ritenuta dello 0,50% e comprensivi degli oneri per la sicurezza;
-che a seguito di rendicontazione del I^ S.A.L., la Cassa DD.PP. ha erogato la spesa sostenuta con il suddetto S.A.L. dell’importo di € 77.285,57 IVA 10% compresa;
-che con D.G.C. n.116 del 28.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)
03)-DARE ATTO
-che come disposto all’art.4 commi 3 e 4 secondo periodo della citata “convenzione” l’ultima finestra utile per la richiesta di erogazione alla Regione Marche, risulta quella del 15 settembre di ogni anno;
-che come riportato al punto 03) del dispositivo della succitata D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 46/2017, il D.LL., ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno rimetteva i documenti contabili relativi al I^ S.A.L. con nota in data 29.09.2017, acclarata al protocollo comunale al n.7881 del 29.09.2017, integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.9062 del 07.11.2017;
-che in conseguenza a quanto sopra, non è stato possibile	“inoltra(re) la richiesta di erogazione sulla base degli stati di avanzamento (I^SAL) relativi al progetto ed alle spese effettivamente sostenute (...) entro il 15 settembre (...);
-che in conseguenza a quanto sopra, la prossima finestra utile è quella de 15 febbraio 2018, con valuta di erogazione del 25 marzo 2018;
04)-DARE ATTO che ciò comporterebbe un ritardato pagamento, rispetto alla fattura emessa dall’affidatario, qualora l’erogazione intervenisse entro il 25 marzo 2018(cfr.art.4 comma 5 “convenzione”), di circa quattro mesi, con notevole disagio per l’operatore economico affidatario, nonché sull’andamento dei lavori;
05)-POTERSI PROCEDERE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, alla liquidazione, in soli termini di cassa con le disponibilità dell’Ente che ammontano ad Euro ___.___,__ (conto di diritto tratto dalla procedura on line di tesoreria in data __.__.____ con pronto reintegro non appena pervenuti i fondi del MIUR pari ai predetti € 77.285,57, come da D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.46/2017;
06)-CONFERMARE, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto, ai fini della liquidazione del II^ S.A.L. eseguiti a tutto il 31.07.2018, quanto stabilito con la sopra richiamata D.G.C. n.116 del 28.11.2017;

07)-POTERSI IMPUTARE:
-la spesa di € 20.939,17 per la copertura dell’aumento di spesa “per le indispensabili modifiche al progetto iniziale” dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia “Citta’ del sole”, di cui alla D.G.C. n.46/2018, al Codice 08.01-2.05.99.99.999 ex Cap.2649 -Descrizione: Spese per interventi vari da contributo Unione Montana (v.Cap.521-5, E);
-la spesa di € 77.398,75, al codice 04.01-2.05.99.99.999 -ex Cap.:2855 -Descrizione: “da contributo regionale per edilizia scolastica annualità 2016 edificio scuola materna”;
entrambi del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
08)-DEMANDARE, l’attuazione della presente al Servizio Finanziaro e Servizio opere pubbliche e patrimonio, ognuno per quanto di competenza.

                                                     IL SINDACO
                                                 Rag. Francesco Leoni

LA GIUNTA COMUNALE

[X]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano 
    pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[ ]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità 
    tecnica;
[ ]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità 
    tecnica;
[ ]-Il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio per quanto concerne la 
    regolarità tecnica;
[ ]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne 
    la regolarità tecnica;
[ ]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per 
    quanto concerne la regolarità tecnica;
[ ]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne 
    la regolarità tecnica;
[ ]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità 
    contabile: 

         CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
-per i motivi in premessa esposti e che quì s'intendono richiamati, di:
01)-DARE ATTO che con D.G.C. n.46 del 16.04.2018, veniva disposto di:
(omissis)
11)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06)(eventi sismici) e 09)(Relazione generale), la perizia di “variante in corso d’opera”, redatta dal D.LL.Ing.Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, dell’importo complessivo di € 328.713,12, di cui € 250.871,34 per lavori al netto del ribasso del 27,953% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.229,87, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO A BASE D’ASTA DELLE LAVORAZIONI A MISURA.€ 334.006,23
(Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)
B)-IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.€  10.229,87
(art.16 comma 1 lett.a.2) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)
  -TOTALE LAVORI...................................€ 344.236,10
  -Ribasso d’asta del 27,953% su A)...............-€  93.364,76
C)-IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO.....................................€ 250.871,34
(Di cui € 10.229,87 per l’attuazione dei piani di sicurezza)
D)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE		
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
   dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura......€ 3.300,00
2. Spese geologiche........................................ €     0,00
2a. contributo previdenziale su spese geologiche 2%........ €     0,00
4. allacciamenti ai pubblici servizi....................... €     0,00
5. imprevisti.............................................. €     0,00
6. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.... €     0,00
7. accantonamento di cui all’art. 133, co. 3 e 4 
   del D.Lgs 163/06........................................ €     0,00
8. spese tecniche relative alla progettazione, alle 
   necessarie attività preliminari, al coordinamento
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
   alla direzione dei lavori............................... €30.000,00
8a.contributo previdenziale su 8) 4%........................€ 1.200,00
8.1. spese tecniche perizia di variante.....................€ 3.442,18
8.1a.contributo previdenzia su 8.1) 4% .....................€   137,69
9. spese di cui all’art. 92 commi 7-bis del D.Lgs 163/06... €     0,00
10.fondo per l’innovazione di cui all’art. 113 comma 4
   del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% dell’importo
   posto a base di gara.................................... € 1.235,22
11.incentivo per il responsabile del procedimento 
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016
   pari al 80% del 2% dell’importo posto a base di gara:
   €4.940,87 x 45% (art. 12 Reg.to Com.le)................. € 2.223,39
12.spese per attività tecnico amministrative connesse alla
   progettazione,di supporto al responsabile del 
   procedimento, e di verifica e validazione............... €     0,00
13.eventuali spese per commissioni giudicatrici............ €     0,00
14.spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
   Artistiche.............................................. €     0,00
15.contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art.1
   Comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)...€  225,00
16.contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015
   (0,15% di € 308.134,41)...................................€  462,20
17.spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
   previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
   tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
   collaudi specifici...................................... € 3.000,00
18. IVA lavori 10%......................................... €25.087,13
19. IVA spese tecniche(8+8a+8.1+8.1a)22%................... € 7.651,57
SOMMANO					                                € 77.964,38
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO					              €328.835,72
da cui scaturisce una economia, rispetto all’importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.117 del 11.11.2016> pari ad € 71.164,28 ed un aumento di € 20.939,17 rispetto all’art.4(Finanziamento: Entità e modalità di erogazione) comma 2, della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017;(cfr. punto 03)presente dispositivo)
(omissis)
17)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.2 comma 5 del D.I. 23.01.2015;
-dell’art.2 comma 2 lett.n) della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017;
18)-COMUNICARE alla Regione, al MIUR, alla Struttura di Missione del Governo ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., le indispensabili modifiche (di cui trattasi) al progetto iniziale, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 06) e 09);
19)-IMPUTARE la spesa di € 20.939,17 afferente la predetta “variante in corso d’opera”, al: 
-codice (missione-programma-titolo):04012059999999 -ex Cap.:2855 -Descrizione: “da contributo regionale per edilizia scolastica annualità 2016 edificio scuola materna”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
-in subordine, al:
-codice (missione-programma-titolo):______________ -ex Cap.______ -Descrizione: “__________________________________________”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
(omissis)
02)-PRENDERE ATTO che in applicazione: dell’art.2 comma 5 del D.I. 23.01.2015, nonché -l’art.2 comma 2 lett.n) della “Convenzione tra la Regione Marche ed il Comune di Roccafluvione per la realizzazione del progetto “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia-Città del Sole-(CUP h61e1600039002) ex D.L. n.104/2013, convertito dalla L. n.128/2013 – DGR n.123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n.1307” sottoscritta in modalità elettronica in data 26.05.2017, nonché del punto 18) della sopra citata deli8berazione, questo Comune con  nota prot.3660 del 21.04.2018, trasmessa a mezzo PEC a:
-REGIONE MARCHE-Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energie – P.F. Edilizia ed Espropriazione;
-M.I.U.R.-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica;
-CASSA DEPOSITI E PRESTITI-Area Enti Pubblico;
trasmetteva “Perizia di variante in corso d’opera” e richiedeva l’utilizzo somma (di € 20.939,17)  da economie derivanti da ribasso d’asta (pari ad € 92.103,45) per “indispensabili modifiche al progetto iniziale”, per quanto sopra motivato; 
03)-PRENDERE ATTO
-che il Sindaco, con nota prot.6889 del 08.08.2018 richiedeva alla Regione Marche:
“-un contributo, per quanto sopra motivato, di € 20.939,17 per la copertura dell’aumento di spesa “per le indispensabili modifiche al progetto iniziale” dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia “Citta’ del sole”.
04)-POTERSI UTILIZZARE, in attesa di un favorevole riscontro da parte della Regione Marche, parte del contributo di € 50.000,00, concesso dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui al Codice 08.01-2.05.99.99.999 ex Cap.2649 (v.Cap.521-5, E) del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
05)-PRENDERE ATTO:
-che con nota acclarata al protocollo comunale al n.6788 del 04.08.2018, il D.LL. Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, rimetteva il II^ S.A.L. eseguiti a tutto il 31.07.2018, dell’importo complessivo di € 141.328,75 al netto del ribasso del 27,953% e comprensivi degli oneri per la sicurezza, da cui discende un certificato di pagamento di € 70.362,50, al netto: del ribasso del 27,953%, della ritenuta dello 0,50% e comprensivi degli oneri per la sicurezza;
-che a seguito di rendicontazione del I^ S.A.L., la Cassa DD.PP. ha erogato la spesa sostenuta con il suddetto S.A.L. dell’importo di € 77.285,57 IVA 10% compresa;
-che con D.G.C. n.116 del 28.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)
03)-DARE ATTO
-che come disposto all’art.4 commi 3 e 4 secondo periodo della citata “convenzione” l’ultima finestra utile per la richiesta di erogazione alla Regione Marche, risulta quella del 15 settembre di ogni anno;
-che come riportato al punto 03) del dispositivo della succitata D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 46/2017, il D.LL., ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno rimetteva i documenti contabili relativi al I^ S.A.L. con nota in data 29.09.2017, acclarata al protocollo comunale al n.7881 del 29.09.2017, integrata con nota acclarata al protocollo comunale al n.9062 del 07.11.2017;
-che in conseguenza a quanto sopra, non è stato possibile	“inoltra(re) la richiesta di erogazione sulla base degli stati di avanzamento (I^SAL) relativi al progetto ed alle spese effettivamente sostenute (...) entro il 15 settembre (...);
-che in conseguenza a quanto sopra, la prossima finestra utile è quella de 15 febbraio 2018, con valuta di erogazione del 25 marzo 2018;
04)-DARE ATTO che ciò comporterebbe un ritardato pagamento, rispetto alla fattura emessa dall’affidatario, qualora l’erogazione intervenisse entro il 25 marzo 2018(cfr.art.4 comma 5 “convenzione”), di circa quattro mesi, con notevole disagio per l’operatore economico affidatario, nonché sull’andamento dei lavori;
05)-POTERSI PROCEDERE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, alla liquidazione, in soli termini di cassa con le disponibilità dell’Ente che ammontano ad Euro ___.___,__ (conto di diritto tratto dalla procedura on line di tesoreria in data __.__.____ con pronto reintegro non appena pervenuti i fondi del MIUR pari ai predetti € 77.285,57, come da D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.46/2017;
06)-CONFERMARE, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto, ai fini della liquidazione del II^ S.A.L. eseguiti a tutto il 31.07.2018, quanto stabilito con la sopra richiamata D.G.C. n.116 del 28.11.2017;
07)-POTERSI IMPUTARE:
-la spesa di € 20.939,17 per la copertura dell’aumento di spesa “per le indispensabili modifiche al progetto iniziale” dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico destinato a scuola dell’infanzia “Citta’ del sole”, di cui alla D.G.C. n.46/2018, al Codice 08.01-2.05.99.99.999 ex Cap.2649 -Descrizione: Spese per interventi vari da contributo Unione Montana (v.Cap.521-5, E);
-la spesa di € 77.398,75, al codice 04.01-2.05.99.99.999 -ex Cap.:2855 -Descrizione: “da contributo regionale per edilizia scolastica annualità 2016 edificio scuola materna”;
entrambi del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
08)-DEMANDARE, l’attuazione della presente al Servizio Finanziaro e Servizio opere pubbliche e patrimonio, ognuno per quanto di competenza.

Inoltre,
                          LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

   VISTO l’articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

         CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

                               DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.