IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:
-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006; 
-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità),  del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo “Statuto comunale” adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
-del decreto prot.10192 del 13.12.2017, con il quale il Sindaco:
“VISTO il proprio decreto prot.n.11436 del 22.12.2016 con il quale si provvedeva a confermare, per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2017, in via temporanea i precedenti decreti sindacali riferiti ai Responsabili dei Servizi del Comune di Roccafluvione;
(omissis)
RITENUTO in questa sede, dover attribuire, in via temporanea, per l'anno 2018, i n°4 provvedimenti avanti elencati dal 01.01.2017 al 31.12.2017;
(omissis)
decretava:
(omissis)
“-di attribuire ai dipendenti la titolarità di Posizione Organizzativa e la Responsabilità di Servizio per l’anno 2018 dal 01.01.2018 al 31.12.2018 salvo ulteriori proroghe;
(omissis)
AI SENSI inoltre:
-dell’art.16 (Durata e revoca dell’incarico di Responsabile) comma 2 del “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m.i.;

PREMESSO:
-che con D.G.C. n.31 del 06.03.2018, esecutiva ai sensi di legge veniva disposto di:
 (omissis)
08)-APPROVARE, ai fini della “domanda di prestito” alla Cassa Depositi e Prestiti, il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – I^ Stralcio”, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	€ 385.002,71
    di cui:
(omissis)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
                                                  SOMMANO		€ 114.997,29
TOTALE								            € 500.000,00
09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la “verifica preventiva della progettazione” di cui  all’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata  “prima dell'inizio delle procedure di affidamento”;
10)-DARE ATTO che la spesa di € 500.000,00 verrà finanziata, previa domanda di prestito, con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, giusta D.C.C. n.8/2017.

CONSIDERATO:
-che con D.G.C. n. 74 del 05.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)
02)-PRENDERE ATTO che con nota in data 04.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4921 del 04.06.2018, il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva nota ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – I^ Stralcio – PROGETTO DEFINITIVO – Integrazione e sostituzione elaborati e tavole”,  con la quale, il progettista:
“In sostituzione degli elaborati di progetto, trasmessi con nota prot.2015 del 28.02.2018 si trasmette:
(omissis);
03)-PRENDERE ATTO dell’art.3 comma 1 lett.oo-quinquies del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
04)-DARE ATTO che trattasi di lavori di “straordinaria manutenzione” tesi alla riparazione di strade pubbliche gravemente danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici come sopra descritti;
05)-PRENDERE ATTO del vigente Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. n. 2 del 17/02/99, è successive varianti;
06)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi)  commi 3, 4 e 7, 216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15(Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche),16(Quadri economici),24(Documenti componenti il progetto definitivo) e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;
-dell’art.26(Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
07)-DARE ATTO:
-che l’art.26(Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i testualmente dispone:
“1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.” 
-che “La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;” 
-che l’approvazione del progetto di che trattasi è ai fini della “domanda di prestito” alla Cassa Depositi e Prestiti;
08)-APPROVARE, ai fini della “domanda di prestito” alla Cassa Depositi e Prestiti, ed in sostituzione del progetto approvato, con la sopra citata D.G.C. n.31/2018, il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – I^ Stralcio, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	€ 385.002,71
    di cui:
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  8.855,06
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera;				€ 26.950,19
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
                                                  SOMMANO		€ 114.997,29
TOTALE								            € 500.000,00
09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la “verifica preventiva della progettazione” di cui  all’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata  “prima dell'inizio delle procedure di affidamento”;
10)-DARE ATTO che la spesa di € 500.000,00 verrà finanziata, previa domanda di prestito, con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, giusta D.C.C. n.8/2017;

TENUTO CONTO:
-che la Cassa DD.PP., con nota prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018, recante: “Affidamento in relazione al prestito di € 500.000,00, per Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico interna ed esterna agli abitati, infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa”, in sintesi comunicava:
“(...) che, in seguito all’esito favorevole dell’istruttoria, è stato deliberato il prestito in oggetto, (pos.6045738) in data 21.06.2018. (...)”;

DATO ATTO:
-che con D.G.C. n.111 del 09.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, veniva disposto di:
(omissis)
06)-PRENDERE ATTO che con verbale prot.6934 del 09.08.2018, veniva disposta la “Verifica preventiva del progetto definitivo” di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione:
” Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati, fermo restando le eventuali e necessarie integrazioni in sede di “progettazione esecutiva” e “proporzionalmente” alla natura e complessità dell’opera di cui trattasi: DICHIARA Verificato il “progetto definitivo” inerente i – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA, DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI E SISMICI – I^ STRALCIO”.;
07)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
08)-APPROVARE il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – I^ Stralcio”, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	€ 385.002,71
    di cui:
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  8.855,06
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera;				€ 26.950,19
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
                                                  SOMMANO		€ 114.997,29
TOTALE								            € 500.000,00
09)-DARE ATTO che l’intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;
10)-IMPUTARE la spesa di € 500.000,00 al Tit.2-Codice 10.05-2.02.01.09.012-Cap.2913-Denominato: “Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP.”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

CONSIDERATO:
-che con D.G.C. n.113 del 16.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:
(omissis)
03)-PRENDERE ATTO:
a)-con verbale prot.7011 del 16.08.2018, veniva disposta la “Verifica preventiva del progetto esecutivo” di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, geom. Mauro Strambi:
“Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e “proporzionalmente” alla natura e complessità dell’opera di cui trattasi: DICHIARA Verificato il “progetto esecutivo” inerente i “LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA – I^ STRALCIO”.
b)-con nota prot.7011-bis del 16.08.2018, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani rimetteva il “rapporto conclusivo”, con il quale veniva “accertato”:
“01)-che con verbale prot.6934 del 09.08.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, la “Verifica preventiva del progetto definitivo ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016”;

02)- )-che con verbale prot.7011 del 16.08.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, la “Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016”;

03)-che il progettista, geom. Mauro Strambi, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati “verbali”, senza formulare alcuna controdeduzione;

04)-che il Direttore dei Lavori, geom. Mauro Strambi, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6994 del 14.08.2018, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:
“Per quanto attiene al progetto esecutivo relativo ai: “LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA – I^ STRALCIO”. 
a) l’ accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 
   dagli elaborati progettuali;
b) l’ assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione   
   del progetto;
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al  
   sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.”;.
c)-con nota prot.7011-ter del 16.08.2018, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
“ACCERTA(TO)
01)-che con verbale prot.6934 del 09.08.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, CON ESITO POSITIVO, la “Verifica preventiva del progetto definitivo ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016”;

02)-che con verbale prot.7011 del 16.08.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, CON ESITO POSITIVO la “Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016”;

IN RIFERIMENTO

-al “rapporto conclusivo (…) riporta (nte) le risultanze dell’attività svolta”, prot.7011-bis del 16.08.2018, in applicazione dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui altresì, veniva “accertato”:
“-che il Direttore dei Lavori, geom. Mauro Strambi, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6994 del 14.08.2018, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:
“Per quanto attiene al progetto esecutivo relativo ai: “LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA – I^ STRALCIO”
a) l’ accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 
   dagli elaborati progettuali;
b) l’ assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione   
   del progetto;
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al  
   sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.”;

Visto:
-l’art.7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) comma 1 lett.c) del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., che testualmente dispone:
“1.Non si applicano le disposizioni del presente titolo (cfr.titoli abilitativi) per:
(omissis)
c)-opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.” (ora art.26 del D.Lgs. n.50/2016)

Per quanto sopra riportato:

VALIDA

Il progetto esecutivo inerente i “LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA – I^ STRALCIO”, redatto dal geom. Mauro Strambi e trasmesso con nota prot.6994 del 14.08.2018.”
04)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell’art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-degli articoli:15,16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 
05)-APPROVARE il “progetto esecutivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – I^ Stralcio”, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	€ 385.002,71
    di cui:
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;			      	€  8.855,06
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera;				      € 26.950,19
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
1. I.V.A. lavori 22%					      € 84.700,60
2. Lavori in economia, previsti in progetto
   ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
   previa fattura					            €      0,00
3. I.V.A. 10% su 2)					      €      0,00
4. Rilievi, accertamenti e indagini			      €      0,00
5. I.V.A. 22% su 4)					      €      0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi			€      0,00
7. Imprevisti	I.V.A.22% compresa		      €  4.868,67
8. Acquisizione aree o immobili e
   pertinenti indennizzi               	      	€      0,00
9. Accantonamento di cui all’art. 133,
   commi 3 e 4, del codice	(vedi imprevisti)	      €      0,00
10.Spese tecniche per progettazione, direzione, 
   coord.sicurez.,contab.e accert.reg.re esec.	      € 16.010,00
11.C.I.4% su 10)			       	      	€    640,40
12.Iva 22% su 10+11) 		            	      €  3.663,09
13.Fondo per l’innovazione di cui all’art.113
   comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
   2% (€ 7.700,05)dell’importo lavori(€ 385.002,71)   	€  1.540,01
14.Incentivo per il responsabile del procedimento		
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016	
   pari al 80% del 2%(€ 7.700,05)dell’importo lavori
   (€ 385.002,71) (45% dell’80% del 2%-Reg.to com.le)	      €  2.772,02
15.Spesa di cui all’art. 92 comma 7-bis del
   D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.				      €      0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione
   di cui all’articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	      €      0,00
17.Contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi 
   dell’art.1 comma 67 della L.266/2005			      
   (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)                             €    225,00
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
   del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71)		      €    577,50
19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
   per opere artistiche					      €      0,00
20.Spese per accertamenti di laboratorio e
   Verifiche tecniche previste dal capitolato
   Speciale d’appalto, collaudo tecnico
   Amministrativo, collaudo statico ed altri
   eventuali collaudi specialistici		      	€      0,00
21.Cnpaia 4% su 20				            €      0,00
22.Iva 22% su 20+21  				            €      0,00
                                                      SOMMANO	€ 114.997,29
TOTALE								            € 500.000,00
(omissis)

DATO ATTO:
-che il direttore dei lavori: geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), con “verbale” in data 12.11.2018, debitamente sottoscritto dall’appaltatore Impresa SATO S.r.l. di Ascoli Piceno, procedeva alla “consegna lavori in via d’urgenza”; 
-che con “Contratto d’appalto” Rep. n.310 del 15.01.2019, i “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”- venivano affidati all’operatore economico SATO S.R.L. di Ascoli Piceno -P.I.0074319044902731570616, per l’importo contrattuale di € 297.766,46  (di cui euro € 288.881,40 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del 23,20% su € 376.147,65 ed € 8.885,06  per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d’asta),oltre IVA di legge;

TENUTO CONTO:
-che con con D.G.C. n. 40 del 30.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:
(omissis)
02)-PRENDERE ATTO che con nota in data 28.03.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2789 del 30.03.2019, il D.LL. Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), trasmetteva “Perizia suppletiva e di variante”, relativa ai lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di € 445.000,00, di cui € 342.386,72 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso;
03)-PRENDERE ATTO in particolare della “Relazione generale - Elab. A.v1”; 
04)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell’art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;
05)-DARE ATTO che la “variante suppletiva n.1” di che trattasi:
a)- circa il fatto che “la modifica non altera la natura generale del contratto;”  del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., geom. Mauro Strambi, alla lett.C) della sopra citata “relazione”:
Oltre agli interventi attuati su nuovi tratti stradali non previsti nel progetto originario, tutte le lavorazioni introdotte con i nuovi prezzi non alterano la natura generale del contratto in quanto trattasi di lavorazioni di cui si è riscontrata la necessità in sede esecutiva anche per rendere pienamente funzionali le opere realizzate in relazione a condizioni riscontrate e riscontrabili solo in fase esecutiva.”

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad “errori o omissioni di progettazione” di cui al comma 10, da parte del progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), in quanto, come riportato dal d.ll., geom. Mauro Strambi, alla lett.D) della sopra citata “relazione”:
“a)-Confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;
b)-Escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr. art. 15 comma 15 del D.P.R. n. 207/2010 
   e s.m.i.);
c)-Non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;
d)-Non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali; 
   e pertanto:
-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’ opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzaizone da parte degli utenti.”

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.” risulta soddisfare tale condizione in quanto:
“Le modifiche di cui alla precedente lettera a) determinano un aumento (€ 44.620,26) pari al 14,86% dell’ importo contrattuale di euro 297.766,46 e quindi:
-	Al di sotto del valore (15%) di cui all’ art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-	Con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell’ importo di euro 297.766,46 del contratto di appalto n. 310 del 15.01.2019 pari ad euro 59.553,29.
-	Determinano l’ applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 106 comma 12 del D:Lgs  n. 50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n. 49/2018;
-	La sottoscrizione di apposito atto di sottomissione dell’ importo di euro 44.620,26.
-	Determinano un avanzo di euro 55.000,00 rispetto al progetto principale che passa da euro 500.000,00 ad euro 445.000,00.”
(cfr. lett.E) della sopra citata “relazione”)

d)- rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento dell’14,86%, inferiore ad un “quinto dell'importo del contratto” e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all’art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;
06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la perizia di “variante suppletiva n.1”, redatta dal D.LL.Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), dell’importo complessivo di € 444.994,84, di cui € 342.386,72 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:
e con il seguente quadro economico:
Aa)-IMPORTO LORDO DELLE LAVORAZIONI:
Aa1)-a misura:   				      	€ 442.739,92
        di cui:
Aa2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Aa3)-Importi per manodopera;				€  30.991,79
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ab)-IMPORTO RIBASSATO DELLE LAVORAZIONI:
Ab1)-a misura al netto del ribasso offerto
    in sede di gara pari al 23,20% e comprensivo
    dell’importo per manodopera:              	€ 332.203,70
Ab2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ac)-IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PERIZIA                             € 342.386,72

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
1. I.V.A. lavori 22%					      € 75.325,08
2. Lavori di cui all’art.14 comma 3 del
   D.M.I.T. n.49/2018 (rimborsi previa fattura        €  2.145,75
3. I.V.A. 22% su 2)					      €    472,06
4. Rilievi, accertamenti e indagini			      €      0,00
5. I.V.A. 22% su 4)					      €      0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi			€      0,00
7. Imprevisti	I.V.A.22% compresa		      €      0,00
8. Acquisizione aree o immobili e
   pertinenti indennizzi               		      €      0,00
9. Accantonamento di cui all’art. 133,
   commi 3 e 4, del codice	(vedi imprevisti)	      €      0,00
10a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	                  € 14.855,00
10b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di
    progettazione ed esecuzione                  	€  1.155,00
11a.C.I.4% su 10a			       		      €    594,20
11b.C.I.4% su 10b			       		      €     46,20
12a.Iva 22% su 10a+11a 		            	      €      0,00
12b.Iva 22% su 10b+11b 		            	      €    264,26
13.Fondo per l’innovazione di cui all’art.113
   comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
   2% (€ 7.700,05)dell’importo lavori(€ 385.002,71)	      €  1.540,01
14.Incentivo per il responsabile del procedimento		
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016	
   pari al 80% del 2%(€ 7.700,05)dell’importo lavori
   (€ 385.002,71) (45% dell’80% del 2%-Reg.to com.le)	      €  2.772,02
15.Spesa di cui all’art. 92 comma 7-bis del
   D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.				      €      0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione
   di cui all’articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	      €      0,00
17.Contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi 
   dell’art.1 comma 67 della L.266/2005			      
   (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)                            €    225,00
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
   del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71)		      €    577,50
19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
   per opere artistiche					      €      0,00
20.Spese per accertamenti di laboratorio e
   Verifiche tecniche previste dal capitolato
   Speciale d’appalto, collaudo tecnico
   Amministrativo, collaudo statico ed altri
   eventuali collaudi specialistici			      €      0,00
21.Cnpaia 4% su 20				            €      0,00
22.Iva 22% su 20+21  				            €      0,00
23a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	- variante        €  2.325,00
23b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di
    progettazione ed esecuzione - variante       	€    175,00
24a.C.I.4% su 23a			       		      €     93,00
24b.C.I.4% su 23b			       		      €      7,00
25a.Iva 22% su 23a+24a 		            	      €      0,00
25b.Iva 22% su 23b+24b 		                  	€     40,04
                                                  SOMMANO		€ 102.608,12
TOTALE								            € 444.994,84
da cui scaturisce una economia, rispetto all’importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.113 del 16.08.2018>, pari ad € 55.005,16 ed un aumento contrattuale di € 44.620,26 (€ 342.386,72 - € 297.766,46);
07)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell’art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;
08)-APPROVARE l’ “atto di sottomissione - Elab.T.a.v1”, “sottoscritto” dall’affidatario-operatore economico SATO S.r.l. di Ascoli Piceno”in segno di accettazione”, dell’importo pari ad € 44.620,26 (euro quarantaquattromilaseicentoventi/26) come appresso specificato:
Importo complessivo lavori di perizia al netto				
del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza             €  342.386,72
A dedurre importo contratto principale al netto				
del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza             €  297.766,46
Restano								         	€   44.620,26
09)-DARE ATTO che l’intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;
10)-IMPUTARE la spesa di € 444.300,00 oltre IVA di legge  al Tit.2-Codice 10.05-2.02.01.09.012-Cap.2913-Denominato: “Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP.”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
(omissis)
13)-DEMANDARE, per quanto di competenza, il Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), alla predisposizione di  apposita progettazione,  finalizzata ad un secondo stralcio “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici”;
14)-PRENDERE ATTO:
-della “Sez.12 – Diverso utilizzo” della Circolare Cassa dd.pp. n.1280 del 27.06.2013 e s.m.i.;
-l’art.8 (Diverso utilizzo della somma prestata) delle “Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)” pos.6045738 del 25.06.2018;
15)-UTILIZZARE la somma di € 55.005,16, “in conseguenza della minore spesa, derivante dal ribasso d’sta nell’aggiudicazione dei lavori”,  per le medesime finalità di quelle per le quali è stato richiesto e concesso dalla Cassa DD.PP.il “prestito di scopo ordinario” pos.6045738 del 25.06.2018;
16)-DEMANDARE al servizio competente, l’inoltro alla Cassa dd.pp. l’istanza di “Diverso utilizzo” con la relativa documentazione necessaria.

CONSIDERATO:
-che con nota in data 04.04.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2951 del 04.04.2019, il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – II^ Stralcio”, composto dai seguenti elaborati:
01)-Relazione generale..................................................Elab. A; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.a) e 25 del D.P.R.n.207/2010)
02)-Relazione geologica (dichiarazione).................................Elab. B; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.a)del D.P.R.n.207/2010)
03)-Relazione idrologica e idraulica(dichiarazione).....................Elab. C; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.b)del D.P.R.n.207/2010)
04)-Relazione sulle strutture (dichiarazione)...........................Elab. D; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.c)del D.P.R.n.207/2010)
05)-Relazione geotecnica (dichiarazione)................................Elab. E; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.d)del D.P.R.n.207/2010)
06)-Relazione archeologica(dichiarazione)...............................Elab. F; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.e)del D.P.R.n.207/2010)
07)-Relazione tecnica delle opere architettoniche.......................Elab. G; 
     (artt. 15 co.15, 24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.f) del D.P.R.n.207/2010)
08)-Relazione tecnica impianti(dichiarazione)...........................Elab. H; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.g)del D.P.R.n.207/2010)
09)-Relazione che descrive la concezione del sistema di
    sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto.........Elab. I; 
     (artt. 15 co.15, 24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.h) del D.P.R.n.207/2010)
10)-Relazione sulla gestione delle materie..............................Elab. J;
    (artt. 15 co.15, 24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.i) del D.P.R.n.207/2010)
11)-Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo....................Elab. K;
    (art.26 co.1 lett.i) del D.P.R.n.207/2010 e D.P.R. 13.06.2017, n.120);
12)-Relazione sulle interferenze........................................Elab. L;
    (artt.24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.l) del D.P.R.n.207/2010)
13)-Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale.....Elab. M;
    e/o Relazione paesaggistica (D.P.C.M.12.12.2005 + Accordo tra Regione
     Marche e Ministero per i BB e le Attività Culturali);
    (artt.24 co.2 let.e) e 27 del D.P.R.n.207/2010)
14)-Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 
    tecnici del progetto definitivo.....................................Elab. N;
     (artt.24 co.2 let.g) e 30 del D.P.R.n.207/2010)
15)-Piano particellare di esproprio.....................................Elab. O;
     (artt.24 co.2 let.i) e 31 del D.P.R.n.207/2010);
16)-Elenco prezzi unitari...............................................Elab. P;
     (artt. 24 co.2 lett. l) e m) e 32 del D.P.R.n.207/2010);
17)-Computo metrico.....................................................Elab. Q;
     (artt. 24 co.2 lett. l) e m) e 32 del D.P.R.n.207/2010);
18)-Quadro di incidenza manodopera......................................Elab. R;
    (art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
19)-Quadro economico, con l’indicazione dei costi della sicurezza.......Elab. S;
     (artt. 16, 24 co.2 lett.l). m) e o)  e 32 del D.P.R.n.207/2010);
20)-Documento contenente le prime indicazioni e 
    disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza..................Elab. T;
     (art. 24 co.2 lett. n) del D.P.R..05.10.2010, n.207);
21)-“Dichiarazioni del progettista”.....................................Elab. U;
    (artt.: 15 D.P.R.n.207/2010; 24 L.n.104/1992 e 21 L. n.503/1996) 
        ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO DEFINITIVO
        (artt.24 co.2 let.d) e 28 del D.P.R..05.10.2010, n.207/2010)
22)-Corografia di inquadramento territoriale strade frazioni –
    Scala 1:12500.....................................................TAV.01.F;
       (artt.24 co.2 let.d) e 28 co.5 lettere:a),b), m) e r) del D.P.R.n.207/2010)
23)-Strumento urbanistico generale, sui quali sono indicati i tracciati
    stradali interessati relativi alle frazioni – Scala 1:25000.......TAV.02.F;
       (artt.24 co.2 let.d) e 28 co.5 lettere:a),b), m) e r) del D.P.R.n.207/2010)
24)-Elaborato “STRADA PONTE PAOLETTI-CASE BASTIANI” contenente:
    Stralcio corografia in scala 1:25000, Immagine satellitare,
    Planimetria Catastale scala 1:10.000; Documentazione
    fotografica; Sezione tipo stradale in Scala 1:200-................TAV.03.F22;
25)-Elaborato “STRADA TICCHIO” contenente:
    Stralcio corografia in scala 1:25000, Immagine satellitare,
    Planimetria Catastale scala 1:10.000; Documentazione
    fotografica; Sezione tipo stradale in Scala 1:200-................TAV.03.F23
26)-Elaborato “CIMITERO DI OSOLI - CROCE” contenente:
    Stralcio corografia in scala 1:25000, Immagine satellitare,
    Planimetria Catastale scala 1:10.000; Documentazione
    fotografica; Sezione tipo stradale in Scala 1:200-................TAV.04.F3);
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	 € 39.800,00
    di cui:
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€    915,40
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera;				€  2.786,00
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
1. I.V.A. lavori 22%						€  8.756,00
2. Lavori in economia, previsti in progetto
   ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
   previa fattura					     		€      0,00
3. I.V.A. 10% su 2)					      €      0,00
4. Rilievi, accertamenti e indagini				€      0,00
5. I.V.A. 22% su 4)					      €      0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi			€      0,00
7. Imprevisti	I.V.A.22% compresa		      €  2.276,24
8. Acquisizione aree o immobili e
   pertinenti indennizzi               			€      0,00
9. Accantonamento di cui all’art. 133,
   commi 3 e 4, del codice	(vedi imprevisti)	      €      0,00
10.1Spese tecniche per progettazione, direzione, 
    contab.e accert.reg.re esec.				€  2.897,44
10.2Spese tecniche per coord.sicurez.			€    286,56
11.C.I.4% su 10.1)+10.2)	       			€    127,36
12.Iva 22% su 10.2)+11)		            		€     65,56
13.Fondo per l’innovazione di cui all’art.113
   comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
   2% (€ 796,00)dell’importo lavori(€ 39.800,00)		€    159,20
14.Incentivo per il responsabile del procedimento		
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016	
   pari al 80% del 2%(€ 796,00)dell’importo lavori.     €    636,80
15.Spesa di cui all’art. 92 comma 7-bis del
   D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.					€      0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione
   di cui all’articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016		€      0,00
17.Contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi 
   dell’art.1 comma 67 della L.266/2005			      
   (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)                        	€      0,00
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
   del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71)			€      0,00
19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
   per opere artistiche						€      0,00
20.Spese per accertamenti di laboratorio e
   Verifiche tecniche previste dal capitolato
   Speciale d’appalto, collaudo tecnico
   Amministrativo, collaudo statico ed altri
   eventuali collaudi specialistici				€      0,00
21.Cnpaia 4% su 20				            €      0,00
22.Iva 22% su 20+21  				      	€      0,00
                                                  SOMMANO		€  15.205,16
TOTALE								            €  55.005,16

RAVVISATO:
-che trattasi lavori di “manutenzione straordinaria” riguardanti ulteriori strade di pertinenza comunale danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici, quali: “STRADA PONTE PAOLETTI-CASE BASTIANI”, “STRADA TICCHIO” e strada “CIMITERO DI OSOLI - CROCE”;

TENUTO CONTO:
-che l’art.3 comma 1 lett.oo-quinquies del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente recita:
1. Ai fini del presente codice si intende per:
(omissis)
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

VISTO:
-gli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi)  commi 3, 4, e 7, 216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15(Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche),16(Quadri economici), 24(Documenti componenti il progetto definitivo) e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
-l’art.26(Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

DATO ATTO:
-che l’art.26(Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
“1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.” 

TENUTO CONTO:
-che “La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;” 
-che l’approvazione del progetto di che trattasi è finalizzato alla richiesta di (Diverso utilizzo della somma prestata) delle “Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)” pos.6045738 del 25.06.2018, della Cassa Depositi e Prestiti;

RAVVISATO:
-che in conseguenza a quanto sopra, l’approvazione del “progetto definitivo” resta subordinato alle procedure di “verifica preventiva della progettazione” di cui al sopra citato art.26 e che pertanto la stessa verrà effettuata con successivo e separato atto “prima dell'inizio delle procedure di affidamento”;

VISTO:
-l’art.27(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)  commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

TENUTO CONTO:
-che l’art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 4 e  9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:
“4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”
(omissis)
“9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.”

DATO ATTO:
(PRGC)
- che con D.C.C. n. 2 del 17/02/99, è stato adottato il Piano Regolatore Generale;
- che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 100 del 31/07/2001, relativa agli stralci, modifiche e prescrizioni con cui la Provincia di Ascoli Piceno intende approvare il Piano Regolatore Generale di questo Comune adeguato al PPAR;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/01/2001, tra l'altro, sono stati accolti integralmente gli stralci, le modifiche e le prescrizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 31/07/2001;
- che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 147 del 06/11/2001, ha approvato con modifiche e prescrizioni, ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42 e dell'art. 3 della L.R. 34/92, il Piano Regolatore Generale in adeguamento al PPAR, adottato da questo Comune con la richiamata deliberazione CC. n. 2/99; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/05/2002 è stato preso atto della richiamata deliberazione del C.P. n. 147/2001 e degli elaborati aggiornati alle prescrizioni, stralci e modifiche impartiti dalla Provincia di Ascoli Piceno con la richiamata delibera di approvazione;

(1^ variante al PRGC)
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 20/07/2004, esecutiva, è stato disposto di adottare ai sensi dell'art. 26 c. 1 Della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni la variante al PRG;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/01/2005, il Consiglio Comunale si é espresso in merito alle osservazioni presentate ed ha adottato definitivamente la variante al P.R.G.;
- che con deliberazione della G.P. n. 92 del 20/03/2006 è stato espresso il parere favorevole con rilievi in ordine alla variante, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2006, è stata approvata ai sensi dell'art. 26 c. 6 lett. a) della L.R. 34/92 e successive modificazioni e integrazioni, la variante al Piano Regolatore, in adeguamento al parere espresso dalla Provincia di Ascoli Piceno con deliberazione G.P. n. 92 del 20/03/2006;

(2^ variante al PRGC)
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 29/11/2008, esecutiva, è stato disposto di adottare ai sensi dell'art. 26 c. 1 Della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni successiva variante al PRG;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/04/2009, il Consiglio Comunale si é espresso in merito alle osservazioni presentate ed ha adottato definitivamente la variante al P.R.G.;
- che con deliberazione della G.P. n. 354 del 04/11/2009 è stato espresso il parere favorevole con rilievi in ordine alla variante, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2010, è stata approvata ai sensi dell'art. 26 c. 6 lett. a) della L.R. 34/92 e successive modificazioni e integrazioni, la variante al Piano Regolatore, in adeguamento al parere espresso dalla Provincia di Ascoli Piceno con deliberazione G.P. n. 354 del 04/11/2009;

(3^ variante al PRGC)
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2011, esecutiva, è stato approvato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i.,  il progetto preliminare già oggetto di approvazione da parte della Provincia di Ascoli Piceno con la richiamata deliberazione della G.P. n. 59 del 16/03/2011 ed è stata adottata   la  variante  al  Piano  Regolatore Generale  ai  sensi dell'art.   26   della   L.R.  34/92  e  successive  modificazioni  ed integrazioni;                                                         
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/09/2011, esecutiva, è stato approvato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i.,  del progetto preliminare già oggetto di approvazione da parte della Provincia di Ascoli Piceno con la richiamata deliberazione della G.P. n. 59 del 16/03/2011, è stata adottata definitivamente  la  variante  al  Piano  Regolatore Generale  ai  sensi dell'art.   26   della   L.R.  34/92  e  successive  modificazioni  ed integrazioni; 
- che con deliberazione della G.P. n. 285 del 01/12/2011 è stato espresso il parere favorevole con rilievi in ordine alla variante, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2011, è stata approvata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni e integrazioni, la variante al Piano Regolatore, in adeguamento al parere espresso dalla Provincia di Ascoli Piceno con deliberazione G.P. n.  285 del 01/12/2011;

(4^ variante al PRGC)
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2011, esecutiva, è stato disposto di adottare ai sensi dell'art. 26 c. 1 Della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni successiva variante al PRG;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2012, il Consiglio Comunale si é espresso in merito alle osservazioni presentate ed ha adottato definitivamente la variante al P.R.G.;
- che con deliberazione della G.P. n. 270 del 20/12/2012  è stato espresso il parere favorevole con rilievi in ordine alla variante, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/03/2013, è stata approvata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni e integrazioni, la variante al Piano Regolatore, in adeguamento al parere espresso dalla Provincia di Ascoli Piceno con deliberazione G.P. n. 270 del 20/12/2012;

(5^ variante al PRGC)
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2012, esecutiva, è stato disposto di adottare definitivamente ai sensi dell'art. 26 c. 2 Della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni successiva variante al PRG;
- che con deliberazione della G.P. n. 33 del 21/02/2013  è stato espresso il parere favorevole con rilievi in ordine alla variante, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/07/2013, è stata approvata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni e integrazioni, la variante al Piano Regolatore, in adeguamento al parere espresso dalla Provincia di Ascoli Piceno con deliberazione G.P. n. 33 del 21/02/2013;

DATO ATTO:
-che l’intervento di che trattasi, verrà finanziato mediante  “diverso utilizzo” di contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;

TENUTO CONTO:
-della “Sez.12 – Diverso utilizzo” della Circolare Cassa dd.pp. n.1280 del 27.06.2013 e s.m.i.;

VISTO INFINE:   
-Il D.L.gs.18.08.2000, n.267 e s.m. e i.;                         
-gli artt.5 e 39 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con D.G.C. n.109/98 e s.m. e i.;
-l'art.32 dello Statuto Comunale adottato co D.C.C. n.28/2006;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
-per i motivi in premessa esposti e che quì s'intendono riportati di:
01)-PRENDERE ATTO che con con D.G.C. n. 40 del 30.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:
(omissis)
06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la perizia di “variante suppletiva n.1”, redatta dal D.LL.Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), dell’importo complessivo di € 444.994,84, di cui € 342.386,72 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:
e con il seguente quadro economico:
Aa)-IMPORTO LORDO DELLE LAVORAZIONI:
Aa1)-a misura:   				      	€ 442.739,92
        di cui:
Aa2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Aa3)-Importi per manodopera;				€  30.991,79
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ab)-IMPORTO RIBASSATO DELLE LAVORAZIONI:
Ab1)-a misura al netto del ribasso offerto
    in sede di gara pari al 23,20% e comprensivo
    dell’importo per manodopera:              	€ 332.203,70
Ab2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ac)-IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PERIZIA                             € 342.386,72

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
                                                  SOMMANO		€ 102.608,12
TOTALE								            € 444.994,84
da cui scaturisce una economia, rispetto all’importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.113 del 16.08.2018>, pari ad € 55.005,16 ed un aumento contrattuale di € 44.620,26 (€ 342.386,72 - € 297.766,46);
07)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell’art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;
08)-APPROVARE l’ “atto di sottomissione - Elab.T.a.v1”, “sottoscritto” dall’affidatario-operatore economico SATO S.r.l. di Ascoli Piceno”in segno di accettazione”, dell’importo pari ad € 44.620,26 (euro quarantaquattromilaseicentoventi/26) come appresso specificato:
Importo complessivo lavori di perizia al netto				
del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza             €  342.386,72
A dedurre importo contratto principale al netto				
del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza             €  297.766,46
Restano								         	€   44.620,26
09)-DARE ATTO che l’intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;
10)-IMPUTARE la spesa di € 444.300,00 oltre IVA di legge  al Tit.2-Codice 10.05-2.02.01.09.012-Cap.2913-Denominato: “Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP.”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
(omissis)
13)-DEMANDARE, per quanto di competenza, il Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), alla predisposizione di  apposita progettazione,  finalizzata ad un secondo stralcio “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici”;
14)-PRENDERE ATTO:
-della “Sez.12 – Diverso utilizzo” della Circolare Cassa dd.pp. n.1280 del 27.06.2013 e s.m.i.;
-l’art.8 (Diverso utilizzo della somma prestata) delle “Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)” pos.6045738 del 25.06.2018;
15)-UTILIZZARE la somma di € 55.005,16, “in conseguenza della minore spesa, derivante dal ribasso d’sta nell’aggiudicazione dei lavori”,  per le medesime finalità di quelle per le quali è stato richiesto e concesso dalla Cassa DD.PP.il “prestito di scopo ordinario” pos.6045738 del 25.06.2018;
16)-DEMANDARE al servizio competente, l’inoltro alla Cassa dd.pp. l’istanza di “Diverso utilizzo” con la relativa documentazione necessaria.
02)-PRENDERE ATTO, in applicazione del punto 13) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n.40/2019, che con nota in data 04.04.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2951 del 04.04.2019, il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – II^ Stralcio”, dell’importo complessivo di € 55.005,16 di cui € 39.800,00  per lavori a misure;
03)-PRENDERE ATTO dell’art.3 comma 1 lett.oo-quinquies del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
04)-DARE ATTO che trattasi di lavori di “manutenzione straordinaria” riguardanti ulteriori strade di pertinenza comunale danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici, quali:“STRADA PONTE PAOLETTI-CASE BASTIANI”, “STRADA TICCHIO” e strada “CIMITERO DI OSOLI - CROCE”;
05)-PRENDERE ATTO del vigente Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. n. 2 del 17/02/99, è successive varianti;
06)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi)  commi 3, 4 e 7, 216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15(Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche),16(Quadri economici),24(Documenti componenti il progetto definitivo) e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;
-dell’art.26(Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
07)-DARE ATTO:
-che l’art.26(Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i testualmente dispone:
“1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.” 
-che “La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;” 
-che l’approvazione del progetto di che trattasi è finalizzato alla richiesta di (Diverso utilizzo della somma prestata) delle “Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)” pos.6045738 del 25.06.2018, della Cassa Depositi e Prestiti;
08)-APPROVARE, ai fini della richiesta “diverso utilizzo della somma prestata” alla Cassa Depositi e Prestiti, il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – II^ Stralcio”, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
01)-Relazione generale..................................................Elab. A; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.a) e 25 del D.P.R.n.207/2010)
02)-Relazione geologica (dichiarazione).................................Elab. B; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.a)del D.P.R.n.207/2010)
03)-Relazione idrologica e idraulica(dichiarazione).....................Elab. C; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.b)del D.P.R.n.207/2010)
04)-Relazione sulle strutture (dichiarazione)...........................Elab. D; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.c)del D.P.R.n.207/2010)
05)-Relazione geotecnica (dichiarazione)................................Elab. E; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.d)del D.P.R.n.207/2010)
06)-Relazione archeologica(dichiarazione)...............................Elab. F; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.e)del D.P.R.n.207/2010)
07)-Relazione tecnica delle opere architettoniche.......................Elab. G; 
     (artt. 15 co.15, 24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.f) del D.P.R.n.207/2010)
08)-Relazione tecnica impianti(dichiarazione)...........................Elab. H; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.g)del D.P.R.n.207/2010)
09)-Relazione che descrive la concezione del sistema di
    sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto.........Elab. I; 
     (artt. 15 co.15, 24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.h) del D.P.R.n.207/2010)
10)-Relazione sulla gestione delle materie..............................Elab. J;
    (artt. 15 co.15, 24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.i) del D.P.R.n.207/2010)
11)-Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo....................Elab. K;
    (art.26 co.1 lett.i) del D.P.R.n.207/2010 e D.P.R. 13.06.2017, n.120);
12)-Relazione sulle interferenze........................................Elab. L;
    (artt.24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.l) del D.P.R.n.207/2010)
13)-Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale.....Elab. M;
    e/o Relazione paesaggistica (D.P.C.M.12.12.2005 + Accordo tra Regione
     Marche e Ministero per i BB e le Attività Culturali);
    (artt.24 co.2 let.e) e 27 del D.P.R.n.207/2010)
14)-Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 
    tecnici del progetto definitivo.....................................Elab. N;
     (artt.24 co.2 let.g) e 30 del D.P.R.n.207/2010)
15)-Piano particellare di esproprio.....................................Elab. O;
     (artt.24 co.2 let.i) e 31 del D.P.R.n.207/2010);
16)-Elenco prezzi unitari...............................................Elab. P;
     (artt. 24 co.2 lett. l) e m) e 32 del D.P.R.n.207/2010);
17)-Computo metrico.....................................................Elab. Q;
     (artt. 24 co.2 lett. l) e m) e 32 del D.P.R.n.207/2010);
18)-Quadro di incidenza manodopera......................................Elab. R;
    (art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
19)-Quadro economico, con l’indicazione dei costi della sicurezza.......Elab. S;
     (artt. 16, 24 co.2 lett.l). m) e o)  e 32 del D.P.R.n.207/2010);
20)-Documento contenente le prime indicazioni e 
    disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza..................Elab. T;
     (art. 24 co.2 lett. n) del D.P.R..05.10.2010, n.207);
21)-“Dichiarazioni del progettista”.....................................Elab. U;
    (artt.: 15 D.P.R.n.207/2010; 24 L.n.104/1992 e 21 L. n.503/1996) 
        ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO DEFINITIVO
        (artt.24 co.2 let.d) e 28 del D.P.R..05.10.2010, n.207/2010)
22)-Corografia di inquadramento territoriale strade frazioni –
    Scala 1:12500.....................................................TAV.01.F;
       (artt.24 co.2 let.d) e 28 co.5 lettere:a),b), m) e r) del D.P.R.n.207/2010)
23)-Strumento urbanistico generale, sui quali sono indicati i tracciati
    stradali interessati relativi alle frazioni – Scala 1:25000.......TAV.02.F;
       (artt.24 co.2 let.d) e 28 co.5 lettere:a),b), m) e r) del D.P.R.n.207/2010)
24)-Elaborato “STRADA PONTE PAOLETTI-CASE BASTIANI” contenente:
    Stralcio corografia in scala 1:25000, Immagine satellitare,
    Planimetria Catastale scala 1:10.000; Documentazione
    fotografica; Sezione tipo stradale in Scala 1:200-................TAV.03.F22;
25)-Elaborato “STRADA TICCHIO” contenente:
    Stralcio corografia in scala 1:25000, Immagine satellitare,
    Planimetria Catastale scala 1:10.000; Documentazione
    fotografica; Sezione tipo stradale in Scala 1:200-................TAV.03.F23
26)-Elaborato “CIMITERO DI OSOLI - CROCE” contenente:
    Stralcio corografia in scala 1:25000, Immagine satellitare,
    Planimetria Catastale scala 1:10.000; Documentazione
    fotografica; Sezione tipo stradale in Scala 1:200-................TAV.04.F3);
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	 € 39.800,00
    di cui:
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€    915,40
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera;				€  2.786,00
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
1. I.V.A. lavori 22%						€  8.756,00
2. Lavori in economia, previsti in progetto
   ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
   previa fattura					     		€      0,00
3. I.V.A. 10% su 2)					      €      0,00
4. Rilievi, accertamenti e indagini				€      0,00
5. I.V.A. 22% su 4)					      €      0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi			€      0,00
7. Imprevisti	I.V.A.22% compresa		      €  2.276,24
8. Acquisizione aree o immobili e
   pertinenti indennizzi               			€      0,00
9. Accantonamento di cui all’art. 133,
   commi 3 e 4, del codice	(vedi imprevisti)	      €      0,00
10.1Spese tecniche per progettazione, direzione, 
    contab.e accert.reg.re esec.				€  2.897,44
10.2Spese tecniche per coord.sicurez.			€    286,56
11.C.I.4% su 10.1)+10.2)	       			€    127,36
12.Iva 22% su 10.2)+11)		            		€     65,56
13.Fondo per l’innovazione di cui all’art.113
   comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
   2% (€ 796,00)dell’importo lavori(€ 39.800,00)		€    159,20
14.Incentivo per il responsabile del procedimento		
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016	
   pari al 80% del 2%(€ 796,00)dell’importo lavori.     €    636,80
15.Spesa di cui all’art. 92 comma 7-bis del
   D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.					€      0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione
   di cui all’articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016		€      0,00
17.Contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi 
   dell’art.1 comma 67 della L.266/2005			      
   (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)                        	€      0,00
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
   del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71)			€      0,00
19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
   per opere artistiche						€      0,00
20.Spese per accertamenti di laboratorio e
   Verifiche tecniche previste dal capitolato
   Speciale d’appalto, collaudo tecnico
   Amministrativo, collaudo statico ed altri
   eventuali collaudi specialistici				€      0,00
21.Cnpaia 4% su 20				            €      0,00
22.Iva 22% su 20+21  				      	€      0,00
                                                  SOMMANO		€  15.205,16
TOTALE								            €  55.005,16
09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la “verifica preventiva della progettazione” di cui  all’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata  “prima dell'inizio delle procedure di affidamento”;
10)-PRENDERE ATTO:
-della “Sez.12 – Diverso utilizzo” della Circolare Cassa dd.pp. n.1280 del 27.06.2013 e s.m.i.;
-dell’art.8 (Diverso utilizzo della somma prestata) delle “Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)” pos.6045738 del 25.06.2018;
11)-DEMANDARE al servizio competente, l’inoltro alla Cassa dd.pp. l’istanza di “Diverso utilizzo” con la relativa documentazione necessaria.
                                
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                     Geom. Carlo Trobbiani

LA GIUNTA COMUNALE

[ ]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non 
    necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[ ]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità 
    tecnica;
[ ]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità 
    tecnica;
[X]-Il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio per quanto concerne la regolarità 
    tecnica:
Parere favorevole, per quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli: 23, commi 3, 4,7 e 9, e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e.s.m.i.; 15, 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. Dando atto che la “verifica preventiva della progettazione” di cui all’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., potrà avvenire con successivo e separato atto, dopo l’avvenuta autorizzazione da parte della Cassa  DD.PP. al “diverso utilizzo della somma prestata – art.8 del contratto di mutuo” (cfr.sub-paragrafo 5.1.4.lett.j) delle “Linee guida n.3 – approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n.1096 del 26.10.016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’ANAC n.1007 dell’11.10.2017)
[ ]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne 
    la regolarità tecnica;

[ ]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per 
    quanto concerne la regolarità tecnica:

[ ]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità 
    tecnica;
[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità 
    Contabile: ”Favorevole p.q.c. nei limiti del mutuo”;

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
-per i motivi in premessa esposti e che quì s'intendono richiamati, di:
01)-PRENDERE ATTO che con con D.G.C. n. 40 del 30.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:
(omissis)
06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la perizia di “variante suppletiva n.1”, redatta dal D.LL.Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), dell’importo complessivo di € 444.994,84, di cui € 342.386,72 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:
e con il seguente quadro economico:
Aa)-IMPORTO LORDO DELLE LAVORAZIONI:
Aa1)-a misura:   				      	€ 442.739,92
        di cui:
Aa2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Aa3)-Importi per manodopera;				€  30.991,79
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ab)-IMPORTO RIBASSATO DELLE LAVORAZIONI:
Ab1)-a misura al netto del ribasso offerto
    in sede di gara pari al 23,20% e comprensivo
    dell’importo per manodopera:              	€ 332.203,70
Ab2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ac)-IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PERIZIA                             € 342.386,72

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
                                                  SOMMANO		€ 102.608,12
TOTALE								            € 444.994,84
da cui scaturisce una economia, rispetto all’importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.113 del 16.08.2018>, pari ad € 55.005,16 ed un aumento contrattuale di € 44.620,26 (€ 342.386,72 - € 297.766,46);
07)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell’art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;
08)-APPROVARE l’ “atto di sottomissione - Elab.T.a.v1”, “sottoscritto” dall’affidatario-operatore economico SATO S.r.l. di Ascoli Piceno”in segno di accettazione”, dell’importo pari ad € 44.620,26 (euro quarantaquattromilaseicentoventi/26) come appresso specificato:
Importo complessivo lavori di perizia al netto				
del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza             €  342.386,72
A dedurre importo contratto principale al netto				
del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza             €  297.766,46
Restano								         	€   44.620,26
09)-DARE ATTO che l’intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;
10)-IMPUTARE la spesa di € 444.300,00 oltre IVA di legge  al Tit.2-Codice 10.05-2.02.01.09.012-Cap.2913-Denominato: “Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP.”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
(omissis)
13)-DEMANDARE, per quanto di competenza, il Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), alla predisposizione di  apposita progettazione,  finalizzata ad un secondo stralcio “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici”;
14)-PRENDERE ATTO:
-della “Sez.12 – Diverso utilizzo” della Circolare Cassa dd.pp. n.1280 del 27.06.2013 e s.m.i.;
-l’art.8 (Diverso utilizzo della somma prestata) delle “Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)” pos.6045738 del 25.06.2018;
15)-UTILIZZARE la somma di € 55.005,16, “in conseguenza della minore spesa, derivante dal ribasso d’sta nell’aggiudicazione dei lavori”,  per le medesime finalità di quelle per le quali è stato richiesto e concesso dalla Cassa DD.PP.il “prestito di scopo ordinario” pos.6045738 del 25.06.2018;
16)-DEMANDARE al servizio competente, l’inoltro alla Cassa dd.pp. l’istanza di “Diverso utilizzo” con la relativa documentazione necessaria.
02)-PRENDERE ATTO, in applicazione del punto 13) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n.40/2019, che con nota in data 04.04.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2951 del 04.04.2019, il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – II^ Stralcio”, dell’importo complessivo di € 55.005,16 di cui € 39.800,00  per lavori a misure;
03)-PRENDERE ATTO dell’art.3 comma 1 lett.oo-quinquies del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
04)-DARE ATTO che trattasi di lavori di “manutenzione straordinaria” riguardanti ulteriori strade di pertinenza comunale danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici, quali:“STRADA PONTE PAOLETTI-CASE BASTIANI”, “STRADA TICCHIO” e strada “CIMITERO DI OSOLI - CROCE”;
05)-PRENDERE ATTO del vigente Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. n. 2 del 17/02/99, è successive varianti;
06)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi)  commi 3, 4 e 7, 216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15(Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche),16(Quadri economici),24(Documenti componenti il progetto definitivo) e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;
-dell’art.26(Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
07)-DARE ATTO:
-che l’art.26(Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i testualmente dispone:
“1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.” 
-che “La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;” 
-che l’approvazione del progetto di che trattasi è finalizzato alla richiesta di (Diverso utilizzo della somma prestata) delle “Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)” pos.6045738 del 25.06.2018, della Cassa Depositi e Prestiti;
08)-APPROVARE, ai fini della richiesta “diverso utilizzo della somma prestata” alla Cassa Depositi e Prestiti, il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – II^ Stralcio”, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
01)-Relazione generale..................................................Elab. A; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.a) e 25 del D.P.R.n.207/2010)
02)-Relazione geologica (dichiarazione).................................Elab. B; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.a)del D.P.R.n.207/2010)
03)-Relazione idrologica e idraulica(dichiarazione).....................Elab. C; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.b)del D.P.R.n.207/2010)
04)-Relazione sulle strutture (dichiarazione)...........................Elab. D; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.c)del D.P.R.n.207/2010)
05)-Relazione geotecnica (dichiarazione)................................Elab. E; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.d)del D.P.R.n.207/2010)
06)-Relazione archeologica(dichiarazione)...............................Elab. F; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.e)del D.P.R.n.207/2010)
07)-Relazione tecnica delle opere architettoniche.......................Elab. G; 
     (artt. 15 co.15, 24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.f) del D.P.R.n.207/2010)
08)-Relazione tecnica impianti(dichiarazione)...........................Elab. H; 
     (artt.15 co.15, 24 co.2 lett.b) e 26 co.1 lett.g)del D.P.R.n.207/2010)
09)-Relazione che descrive la concezione del sistema di
    sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto.........Elab. I; 
     (artt. 15 co.15, 24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.h) del D.P.R.n.207/2010)
10)-Relazione sulla gestione delle materie..............................Elab. J;
    (artt. 15 co.15, 24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.i) del D.P.R.n.207/2010)
11)-Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo....................Elab. K;
    (art.26 co.1 lett.i) del D.P.R.n.207/2010 e D.P.R. 13.06.2017, n.120);
12)-Relazione sulle interferenze........................................Elab. L;
    (artt.24 co.2 let.b) e 26 co.1 lett.l) del D.P.R.n.207/2010)
13)-Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale.....Elab. M;
    e/o Relazione paesaggistica (D.P.C.M.12.12.2005 + Accordo tra Regione
     Marche e Ministero per i BB e le Attività Culturali);
    (artt.24 co.2 let.e) e 27 del D.P.R.n.207/2010)
14)-Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 
    tecnici del progetto definitivo.....................................Elab. N;
     (artt.24 co.2 let.g) e 30 del D.P.R.n.207/2010)
15)-Piano particellare di esproprio.....................................Elab. O;
     (artt.24 co.2 let.i) e 31 del D.P.R.n.207/2010);
16)-Elenco prezzi unitari...............................................Elab. P;
     (artt. 24 co.2 lett. l) e m) e 32 del D.P.R.n.207/2010);
17)-Computo metrico.....................................................Elab. Q;
     (artt. 24 co.2 lett. l) e m) e 32 del D.P.R.n.207/2010);
18)-Quadro di incidenza manodopera......................................Elab. R;
    (art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
19)-Quadro economico, con l’indicazione dei costi della sicurezza.......Elab. S;
     (artt. 16, 24 co.2 lett.l). m) e o)  e 32 del D.P.R.n.207/2010);
20)-Documento contenente le prime indicazioni e 
    disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza..................Elab. T;
     (art. 24 co.2 lett. n) del D.P.R..05.10.2010, n.207);
21)-“Dichiarazioni del progettista”.....................................Elab. U;
    (artt.: 15 D.P.R.n.207/2010; 24 L.n.104/1992 e 21 L. n.503/1996) 
        ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO DEFINITIVO
        (artt.24 co.2 let.d) e 28 del D.P.R..05.10.2010, n.207/2010)
22)-Corografia di inquadramento territoriale strade frazioni –
    Scala 1:12500.....................................................TAV.01.F;
       (artt.24 co.2 let.d) e 28 co.5 lettere:a),b), m) e r) del D.P.R.n.207/2010)
23)-Strumento urbanistico generale, sui quali sono indicati i tracciati
    stradali interessati relativi alle frazioni – Scala 1:25000.......TAV.02.F;
       (artt.24 co.2 let.d) e 28 co.5 lettere:a),b), m) e r) del D.P.R.n.207/2010)
24)-Elaborato “STRADA PONTE PAOLETTI-CASE BASTIANI” contenente:
    Stralcio corografia in scala 1:25000, Immagine satellitare,
    Planimetria Catastale scala 1:10.000; Documentazione
    fotografica; Sezione tipo stradale in Scala 1:200-................TAV.03.F22;
25)-Elaborato “STRADA TICCHIO” contenente:
    Stralcio corografia in scala 1:25000, Immagine satellitare,
    Planimetria Catastale scala 1:10.000; Documentazione
    fotografica; Sezione tipo stradale in Scala 1:200-................TAV.03.F23
26)-Elaborato “CIMITERO DI OSOLI - CROCE” contenente:
    Stralcio corografia in scala 1:25000, Immagine satellitare,
    Planimetria Catastale scala 1:10.000; Documentazione
    fotografica; Sezione tipo stradale in Scala 1:200-................TAV.04.F3);
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	 € 39.800,00
    di cui:
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€    915,40
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera;				€  2.786,00
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
1. I.V.A. lavori 22%						€  8.756,00
2. Lavori in economia, previsti in progetto
   ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
   previa fattura					     		€      0,00
3. I.V.A. 10% su 2)					      €      0,00
4. Rilievi, accertamenti e indagini				€      0,00
5. I.V.A. 22% su 4)					      €      0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi			€      0,00
7. Imprevisti	I.V.A.22% compresa		      €  2.276,24
8. Acquisizione aree o immobili e
   pertinenti indennizzi               			€      0,00
9. Accantonamento di cui all’art. 133,
   commi 3 e 4, del codice	(vedi imprevisti)	      €      0,00
10.1Spese tecniche per progettazione, direzione, 
    contab.e accert.reg.re esec.				€  2.897,44
10.2Spese tecniche per coord.sicurez.			€    286,56
11.C.I.4% su 10.1)+10.2)	       			€    127,36
12.Iva 22% su 10.2)+11)		            		€     65,56
13.Fondo per l’innovazione di cui all’art.113
   comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
   2% (€ 796,00)dell’importo lavori(€ 39.800,00)		€    159,20
14.Incentivo per il responsabile del procedimento		
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016	
   pari al 80% del 2%(€ 796,00)dell’importo lavori.     €    636,80
15.Spesa di cui all’art. 92 comma 7-bis del
   D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.					€      0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione
   di cui all’articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016		€      0,00
17.Contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi 
   dell’art.1 comma 67 della L.266/2005			      
   (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)                        	€      0,00
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
   del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71)			€      0,00
19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
   per opere artistiche						€      0,00
20.Spese per accertamenti di laboratorio e
   Verifiche tecniche previste dal capitolato
   Speciale d’appalto, collaudo tecnico
   Amministrativo, collaudo statico ed altri
   eventuali collaudi specialistici				€      0,00
21.Cnpaia 4% su 20				            €      0,00
22.Iva 22% su 20+21  				      	€      0,00
                                                  SOMMANO		€  15.205,16
TOTALE								            €  55.005,16
09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la “verifica preventiva della progettazione” di cui  all’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata  “prima dell'inizio delle procedure di affidamento”;
10)-PRENDERE ATTO:
-della “Sez.12 – Diverso utilizzo” della Circolare Cassa dd.pp. n.1280 del 27.06.2013 e s.m.i.;
-dell’art.8 (Diverso utilizzo della somma prestata) delle “Condizioni generali di contratto di prestito ordinario (...)” pos.6045738 del 25.06.2018;
11)-DEMANDARE al servizio competente, l’inoltro alla Cassa dd.pp. l’istanza di “Diverso utilizzo” con la relativa documentazione necessaria.

Inoltre,
                          LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

   VISTO l’articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

                               DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.

Inoltre,
                          LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

   VISTO l’articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

         CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

                               DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.