IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:
-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006; 
-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo “Statuto comunale” adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
-del decreto n.7/2019 prot.6664 del 27.07.2019, con il quale il Sindaco:
(omissis)
“VISTO il proprio decreto n.6 del 19 giugno 2019 – Protocollo n.5515, con il quale (...) sono stati prorogati i decreti di nomina dei Responsabili dei servizi di ciascuna delle Aree organizzative dell’Ente, (...) per la durata massima di quarantacinque giorni, a decorrere dal 28 maggio 2019 fino all’11 luglio 2019;
nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi, a termini dell’articolo 50, comma 
(omissis)
DECRETA
(omissis)
2.DI PROROGARE ulteriormente e per la durata massima di quarantacinque giorni, le seguenti nomine dei Responsabili dei servizi:
(omissis)
AREA TECNICA – SERVIZIO OO.PP. PATRIMONIO: Geom. Carlo Trobbiani;
(omissis)
4.DI DARE DECORRENZA alle proroghe e alla nomina 12 luglio 2019 e scadenza 26 agosto 2019.
(omissis)

PREMESSO:
-che con D.C.C. n.44 del 28.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
“PREMESSO che il Comune di Roccafluvione ha partecipato al bando “6.000 Campanili”, riservato ai Comuni di minori dimensioni demografiche, per finanziare opere stradali ammontanti a € 1.000.000,00 circa;
CONSIDERATO che l’intervento non è stato ammesso a finanziamento, viste le modalità particolari di modalità di ammissione, dipese dai tempi di presentazione telematica delle domande all’ANCI;
RITENUTA la necessità di realizzare un primo stralcio delle opere progettuali, ammontare a € 500.000,00, da finanziare con mutuo della durata di anni 30, da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti;
RITENUTO di approvare un atto di indirizzo nei termini indicati;”
veniva disposto di:
1) -DI APPROVARE la premessa alla narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) - DI APPROVARE un atto di indirizzo che prevede la realizzazione di un 1^ stralcio dei lavori di sistemazione della rete viaria del Capoluogo e delle Frazioni, a valere sul progetto iniziale di € 1.000.000,00 circa, dell’importo di € 500.000,00, da finanziare con mutuo trentennale da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti.
3) - DI INCARICARE i competenti Uffici, tecnici e finanziari, degli atti e dei provvedimenti di gestione conseguenti.
(omissis)

DATO ATTO:
-che in attuazione a quanto sopra, con D.G.C. n.31 del 06.03.2018, esecutiva ai sensi di legge veniva disposto di:
 (omissis)
08)-APPROVARE, ai fini della “domanda di prestito” alla Cassa Depositi e Prestiti, il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – I^ Stralcio”, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	€ 385.002,71
    di cui:
(omissis)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
                                                  SOMMANO		€ 114.997,29
TOTALE								            € 500.000,00
09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la “verifica preventiva della progettazione” di cui  all’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata  “prima dell'inizio delle procedure di affidamento”;
10)-DARE ATTO che la spesa di € 500.000,00 verrà finanziata, previa domanda di prestito, con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, giusta D.C.C. n.8/2017.

CONSIDERATO:
-che con D.G.C. n. 74 del 05.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)
02)-PRENDERE ATTO che con nota in data 04.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4921 del 04.06.2018, il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva nota ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – I^ Stralcio – PROGETTO DEFINITIVO – Integrazione e sostituzione elaborati e tavole”,  con la quale, il progettista:
“In sostituzione degli elaborati di progetto, trasmessi con nota prot.2015 del 28.02.2018 si trasmette:
(omissis);
03)-PRENDERE ATTO dell’art.3 comma 1 lett.oo-quinquies del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
04)-DARE ATTO che trattasi di lavori di “straordinaria manutenzione” tesi alla riparazione di strade pubbliche gravemente danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici come sopra descritti;
05)-PRENDERE ATTO del vigente Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. n. 2 del 17/02/99, è successive varianti;
06)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi)  commi 3, 4 e 7, 216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e articoli 15(Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche),16(Quadri economici),24(Documenti componenti il progetto definitivo) e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ;
-dell’art.26(Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
07)-DARE ATTO:
-che l’art.26(Verifica preventiva della progettazione), commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i testualmente dispone:
“1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.” 
-che “La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;” 
-che l’approvazione del progetto di che trattasi è ai fini della “domanda di prestito” alla Cassa Depositi e Prestiti;
08)-APPROVARE, ai fini della “domanda di prestito” alla Cassa Depositi e Prestiti, ed in sostituzione del progetto approvato, con la sopra citata D.G.C. n.31/2018, il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – I^ Stralcio, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	€ 385.002,71
    di cui:
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  8.855,06
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera;				€ 26.950,19
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
                                                  SOMMANO		€ 114.997,29
TOTALE								            € 500.000,00
09)-DARE ATTO, per quanto sopra riportato, la “verifica preventiva della progettazione” di cui  all’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata  “prima dell'inizio delle procedure di affidamento”;
10)-DARE ATTO che la spesa di € 500.000,00 verrà finanziata, previa domanda di prestito, con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, giusta D.C.C. n.8/2017;

TENUTO CONTO:
-che la Cassa DD.PP., con nota prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018, recante: “Affidamento in relazione al prestito di € 500.000,00, per Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico interna ed esterna agli abitati, infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa”, in sintesi comunicava:
“(...) che, in seguito all’esito favorevole dell’istruttoria, è stato deliberato il prestito in oggetto, (pos.6045738) in data 21.06.2018. (...)”;

DATO ATTO:
-che con D.G.C. n.111 del 09.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, veniva disposto di:
(omissis)
03)-PRENDERE ATTO dell’art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
04)-PRENDERE ATTO che con nota prot.6881 del 08.08.2018, lo Sportello Unico per l’Edilizia, di questo Comune, rilasciava “Autorizzazione (paesaggistica) n.12/2018 del 08.08.22018” in “procedimento semplificato”, ai sensi dell’art.146 comma 9 del D.Lgs. n.42/2004 ed art.11 commi 5 e 9 del D.P.R. n.31/2017, con le seguenti prescrizioni:
“1.Parere della Soprintendenza prot. n./////// del///////////://////////////////////;
“2.Parere della Commissione per il paesaggio di cui al verbale n.11/2018 seduta del 13/07/2018, per quanto non in contrasto con le sopra citate prescrizioni vincolanti impartite dalla Soprintendenza con il richiamato parere:
-Il materiale di scavo dovrà essere sistemato e conguagliato possibilmente in loco e le eventuali eccedenze ed i materiali non terrosi dovranno essere conferiti in apposita discarica o in luogo comunque autorizzato;
-venga evitato il danneggiamento delle alberature esistenti e/o delle specie vegetali tutelate dalla legge regionale n.6/2005 eventualmente presenti lungo le aree oggetto di intervento o, se del caso, acquisito preliminarmente il previsto parere forestale presso il competente ufficio dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione.”;
05)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 4 e  9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell’art.26(Verifica preventiva della progettazione) commi 2, 3, 6 e 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-del Titolo VII (Verifica e validazione della progettazione), sub-paragrafo 1.3 delle “Linee Guida n.1 (…) recanti <Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria> ;
-del sub-paragrafo 5.1.3, lett.g), i), j) e k) delle “Linee guida n.3, di attuazione dell’art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016” recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016;
06)-PRENDERE ATTO che con verbale prot.6934 del 09.08.2018, veniva disposta la “Verifica preventiva del progetto definitivo” di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, geom. Mauro Strambi di Roccafluvione:
” Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati, fermo restando le eventuali e necessarie integrazioni in sede di “progettazione esecutiva” e “proporzionalmente” alla natura e complessità dell’opera di cui trattasi: DICHIARA Verificato il “progetto definitivo” inerente i – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA, DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI E SISMICI – I^ STRALCIO”.;
07)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
08)-APPROVARE il “progetto definitivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – I^ Stralcio”, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   							      	€ 385.002,71
    di cui:
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  8.855,06
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera;				€ 26.950,19
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
                                                  SOMMANO		€ 114.997,29
TOTALE								            € 500.000,00
09)-DARE ATTO che l’intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;
10)-IMPUTARE la spesa di € 500.000,00 al Tit.2-Codice 10.05-2.02.01.09.012-Cap.2913-Denominato: “Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP.”, del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

TENUTO CONTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.39 del 16.08.2018, veniva disposto di:
01)-PRENDERE ATTO:
-della “comunicazione” del Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), in qualità di progettista, allegata a nota in data 14.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6994 del 14.08.2018, con cui veniva trasmesso il “progetto esecutivo”, dei lavori di cui trattasi, con cui comunicava, circa “la disponibilità del Geom. Francesco Silvi, ad assumere l’incarico del servizio di “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”  di che trattasi, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’offerta del sottoscritto, del 25.09.2013 ed acclarata al protocollo comunale al n.5761 del 26.09.2013.”
(omissis)
03)-PRENDERE ATTO che il geom. Francesco Silvi nella “dichiarazione sostitutiva” contenente l’”offerta economica”:”DICHIARA
-di prendere atto “della voce relativa a <01d)-Coordinatore per la sicurezza>” dell’offerta del Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), come sopra riportata;
-di offrire, per l’espletamento del servizio tecnico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (articoli: 89 co. 1 lett.e) ed f), 90 commi 3 e 4, 91 co.1, 92 e 98 del d.lgs.09.04.2008, n.81 e s.m.i) dei “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – I^ stralcio -;
01d)-Coordinatore per la sicurezza (articoli 91 e 92 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)  ( Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.90 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) di cui prestazioni parziali:            
N.	Descrizione attività	Importo in cifre	Importo in lettere	
A	Coordinatore nella fase di progettazione
(art.91 D.Lgs.n.81/2008)                                                                                        	 
          400,00	
Quattrocento/00	
B	Coordinatore nella fase di esecuzione lavori
(art.92 D.Lgs.n.81/2008)                                                                                        	
          755,00	
Settecentocinquantacinque/00	
Importo complessivo coordinatore per la sicurezza	        1.155,00	Millecinquecentocinquantacinque/00	
-Che l’”importo complessivo …” ricomprende tutte le attività complementari e accessorie,  nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.”
Cod.Fisc. SLVFNC56P03H390J
P.IVA     00715570446”.
(omissis)
07)-PROCEDERSI all’affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)>>  per “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (articoli: 89 co. 1 lett.e) ed f), 90 commi 3 e 4, 91 co.1, 92 e 98 del d.lgs.09.04.2008, n.81 e s.m.i) dei “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – I^ stralcio - all’operatore economico geom. Francesco Silvi di Roccafluvione (AP), per un importo contrattuale di € 1.155,00 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge;
(omissis)
11)-DARE ATTO che per l’affidamento in argomento, il contratto è da ritenersi stipulato nella forma di cui all’art.32 comma 14, nella parte in cui dispone:”per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi (...);
(omissis)

CONSIDERATO:
-che con D.G.C. n.113 del 16.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:
(omissis)
03)-PRENDERE ATTO:
a)-con verbale prot.7011 del 16.08.2018, veniva disposta la “Verifica preventiva del progetto esecutivo” di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, geom. Mauro Strambi:
“Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e “proporzionalmente” alla natura e complessità dell’opera di cui trattasi: DICHIARA Verificato il “progetto esecutivo” inerente i “LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA – I^ STRALCIO”.
b)-con nota prot.7011-bis del 16.08.2018, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani rimetteva il “rapporto conclusivo”, con il quale veniva “accertato”:
“01)-che con verbale prot.6934 del 09.08.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, la “Verifica preventiva del progetto definitivo ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016”;

02)- )-che con verbale prot.7011 del 16.08.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, la “Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016”;

03)-che il progettista, geom. Mauro Strambi, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati “verbali”, senza formulare alcuna controdeduzione;

04)-che il Direttore dei Lavori, geom. Mauro Strambi, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6994 del 14.08.2018, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:
“Per quanto attiene al progetto esecutivo relativo ai: “LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA – I^ STRALCIO”. 
a) l’ accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 
   dagli elaborati progettuali;
b) l’ assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione   
   del progetto;
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al  
   sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.”;.
c)-con nota prot.7011-ter del 16.08.2018, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
“ACCERTA(TO)
01)-che con verbale prot.6934 del 09.08.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, CON ESITO POSITIVO, la “Verifica preventiva del progetto definitivo ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016”;

02)-che con verbale prot.7011 del 16.08.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista geom. Mauro Strambi, CON ESITO POSITIVO la “Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016”;

IN RIFERIMENTO

-al “rapporto conclusivo (…) riporta (nte) le risultanze dell’attività svolta”, prot.7011-bis del 16.08.2018, in applicazione dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui altresì, veniva “accertato”:
“-che il Direttore dei Lavori, geom. Mauro Strambi, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 6994 del 14.08.2018, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:
“Per quanto attiene al progetto esecutivo relativo ai: “LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA – I^ STRALCIO”
a) l’ accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 
   dagli elaborati progettuali;
b) l’ assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione   
   del progetto;
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al  
   sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.”;
Visto:
-l’art.7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) comma 1 lett.c) del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., che testualmente dispone:
“1.Non si applicano le disposizioni del presente titolo (cfr.titoli abilitativi) per:
(omissis)
c)-opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.” (ora art.26 del D.Lgs. n.50/2016)

Per quanto sopra riportato:

VALIDA

Il progetto esecutivo inerente i “LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE DI USO PUBBLICO, INTERNA ED ESTERNA AGLI ABITATI, E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA – I^ STRALCIO”, redatto dal geom. Mauro Strambi e trasmesso con nota prot.6994 del 14.08.2018.”
04)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell’art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-degli articoli:15,16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 
05)-APPROVARE il “progetto esecutivo” dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – I^ Stralcio”, redatto dal geom. MAURO STRAMBI di Roccafluvione (AP),composto dai seguenti elaborati e tavole:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:
A1)-a misura;   									€ 385.002,71
    di cui:
A2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  8.855,06
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
A3)-Importi per manodopera;				€ 26.950,19
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
1. I.V.A. lavori 22%						€ 84.700,60
2. Lavori in economia, previsti in progetto
   ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
   previa fattura							€      0,00
3. I.V.A. 10% su 2)						€      0,00
4. Rilievi, accertamenti e indagini				€      0,00
5. I.V.A. 22% su 4)					      €      0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi			€      0,00
7. Imprevisti	I.V.A.22% compresa		      €  4.868,67
8. Acquisizione aree o immobili e
   pertinenti indennizzi               			€      0,00
9. Accantonamento di cui all’art. 133,
   commi 3 e 4, del codice	(vedi imprevisti)		€      0,00
10.Spese tecniche per progettazione, direzione, 
   coord.sicurez.,contab.e accert.reg.re esec.		€ 16.010,00
11.C.I.4% su 10)			       			€    640,40
12.Iva 22% su 10+11) 		            		€  3.663,09
13.Fondo per l’innovazione di cui all’art.113
   comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
   2% (€ 7.700,05)dell’importo lavori(€ 385.002,71)		€  1.540,01
14.Incentivo per il responsabile del procedimento		
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016	
   pari al 80% del 2%(€ 7.700,05)dell’importo lavori
   (€ 385.002,71) (45% dell’80% del 2%-Reg.to com.le)	      €  2.772,02
15.Spesa di cui all’art. 92 comma 7-bis del
   D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.					€      0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione
   di cui all’articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016		€      0,00
17.Contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi 
   dell’art.1 comma 67 della L.266/2005			      
   (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)                        	€    225,00
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
   del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71)			€    577,50
19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
   per opere artistiche						€      0,00
20.Spese per accertamenti di laboratorio e
   Verifiche tecniche previste dal capitolato
   Speciale d’appalto, collaudo tecnico
   Amministrativo, collaudo statico ed altri
   eventuali collaudi specialistici				€      0,00
21.Cnpaia 4% su 20				            €      0,00
22.Iva 22% su 20+21  				      	€      0,00
                                                  	SOMMANO	€ 114.997,29
TOTALE										€ 500.000,00
(omissis)

DATO ATTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.40 del 20.08.2018, veniva disposto di:
(omissis)
04)-POTERSI PROCEDERE all’avvio della procedura di affidamento dell’appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016,n.50 e s.m.i., con le modalità di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, tenuto conto altresì del parere formulato dall’ANAC a seguito di  un quesito del MIT;
05)-APPROVARE lo schema di “Avviso esplorativo” per “Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura negoziata, dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati, e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa – I^ Stralcio”, teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
06)-PRENDERE ATTO in particolare del punto 5.1.4, del sub-paragrafo “5.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici”, delle più volte citate “Linee guida n.4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018”
07)-STABILIRE:
-che l’ “Avviso esplorativo” di cui al precedente punto 05) venga pubblicato: all’albo pretorio on line  e sul sito del Comune di Roccafluvione, nella sezione “amministrazione trasparente” – “bandi di gara e contratti”;
-che il termine della ricezione delle istanze di manifestazione di interesse, sia, per le motivazioni di cui ai punti:06), 07) e 10) del dispositivo, della sopra riportata D.G.C. n.113 del 16.08.2018, di 7(sette) giorni dalla data di pubblicazione dell’ “Avviso esplorativo”;
(omissis)

TENUTO CONTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.48 del 04.09.2018, veniva disposto di:
(omissis)
03)-PRENDERE ATTO:
-che l’”Avviso esplorativo” prot.7076 del 22.08.2018, è stato pubblicato: 
 -sul “Sito istituzionale: www.comuneroccafluvione.it, sezione “amministrazione trasparente”, “bandi di gara e contratti”, dal 22.08.2018;
 -all’ “Albo Pretorio on-line del Comune” dal 22.08.2018;
04)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.53(Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
05)-APPROVARE il “Verbale delle operazioni di sorteggio” in data 03.09.2018, acclarato al protocollo comunale al n.7940 del 04.09.2018, con il quale:
 (omissis)
Quanto sopra premesso:
L'anno duemiladiciotto, addì 3 del mese di  settembre, con inizio alle ore 10:30 nella sede comunale, presso l’Ufficio Tecnico-Servizio OO.PP. e Patrimonio, il Geom. Carlo Trobbiani, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Opere pubbliche e patrimonio, alla presenza del Geom. Arduino Manni, responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e l’Ing. Teodorico Centobuchi, Istruttore direttivo <a tempo determinato> dell’ “ufficio sisma” costituito ai sensi dell’art.50-bis del D.L. 17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., in qualità di testimoni, procede:

01)- ad esporre l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli “operatori economici” concorrenti; (cfr. Allegato A);

02)- ad inserire in apposita urna i numeri, dall’ 1 al 129, debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio e dai testimoni, relativi alla istanze ammesse;

03)- all’estrazione di n.15 (quindici) numeri, a cui il protocollo dell’Ente è associato, da invitare alla “procedura negoziata”, di cui all’art.5.1 dell’ Avviso esplorativo prot. 7076 del 22.08.2018, di cui agli allegati B e C, nel rispetto dell’art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

04)- a predisporre l’ elenco degli “operatori economici” non estratti (cfr. Allegato D)  e che si provvederà a pubblicare, nei modi di cui all’art.13.2) dell’ Avviso esplorativo prot. 7076 del 22.08.2018.

ALLEGATI:
A)-elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli 
   “operatori economici” concorrenti;
B)-verifica requisiti e correttezza della richiesta di manifestazione di interesse da parte dei 15(quindici) 
   operatori economici estratti;
C)-elenco dei 15 (quindici) numeri, a cui il protocollo dell’Ente è associato, da invitare alla “procedura 
   negoziata”, di cui all’art.5.1 dell’ Avviso esplorativo prot.7076 del 22.08.2018;
D)-elenco “operatori economici” non estratti.
06)-PRENDERE ATTO:
-che l’art.63(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) a differenza degli articoli: 60(Procedura aperta<cfr.commi 1 secondo periodo e 3>), 61(Procedura ristretta<cfr.commi 2 e 6>) e 62(Procedura competitiva con negoziazione<cfr.commi 4 e 5>)non fissa “il termine minimo per la ricezione delle offerte”;
-delle Linee guida n.4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contrati pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed in particolare di quanto previsto al paragrafo “6. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro”;
-in particolare del paragrafo 6.2, numero 5.2.6;
07)-FORNIRE relativamente agli “elementi” di cui al suddetto sub-paragrafo 4.2.6,  le seguenti informazioni:
(omissis)
08)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) “il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara”.;
(omissis)

DATO ATTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.53 del 17.10.2018, veniva disposto di:
01)-PRENDERE ATTO che con “Verbale n.3 – Apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione”, in data 09.10.2018, relativo alla procedura negoziata di cui trattasi, la S.U.A. della Provincia di Ascoli Piceno, in sintesi, testualmente dispone:
(omissis)
“ultimate le operazioni di gara IL PRESIDENTE
approva la graduatoria finale degli offerenti come sopra riportata;
propone per l’aggiudicazione l’operatore economico
9	SATO SRL – ASCOLI PICENO PI 00743190449	
il quale ha presentato il ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara del 23,20%, pari ad un importo contrattuale di € 289.766,46 (di cui € 288.881,40 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del 23,20% su € 376.147,65 ed € 8.885,06 per oneri della sicurezza a cui non viene  applicato il ribasso d’asta);
evidenzia che il suddetto operatore economico ha dichiarato che intende subappaltare COME INDICATO NELLA Parte II, Sezione D del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentato nella Busta “A – Documenti Amministrativi”;
trasmette il presente verbale all’Ente Committente nella persona del R.U.P. per verificare, prima dell’aggiudicazione, il rispetto di quanto previsto dall’art.97, comma 5, lett.d) (minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali);
dispone di pubblicare il presente verbale sul sito internet SUAPAP, per le finalità previste dal’art.29 c.1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016.”
(omissis)
02)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli: 32(Fasi delle procedure di affidamento) commi: 5, 6 e 7 e, 33(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
03)-APPROVARE il “Verbale n.3 – Apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione”, in data 09.10.2018, di cui al precedente punto 1);
(omissis)

TENUTO CONTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.58 del 25.10.2018, veniva disposto di:
(omissis)
09)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”- all’operatore economico SATO S.R.L. di Ascoli Piceno -P.I.0074319044902731570616, per l’importo contrattuale di € 297.766,46  (di cui euro € 288.881,40 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del 23,20% su € 376.147,65 ed € 8.885,06  per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d’asta),oltre IVA di legge;
10)-DICHIARARE efficace l’aggiudicazione definitiva come disposta al precedente punto, in quanto le verifiche, di cui al punto 06) e relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo;
11)-PRENDERE ATTO che l’operatore economico aggiudicatario, alla lettera “D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità non fa affidamento”, nel punto:
“L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?” del “Documento di gara unico europeo (DGUE)”, testualmente risponde:
 SI  NO
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili elencare i subappaltatori proposti:
“Tutte le opere facenti parte del presente appalto nei termini di legge vigenti.”;
(omissis)
15)-DOVERSI PROCEDERE, in conseguenza a quanto sopra,“all’esecuzione di urgenza”(cfr.art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), in quanto detti lavori, concorrono ad  “ovviare a situazioni di pericolo per persone (…), ovvero per l’igiene e la salute pubblica, (…) ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare,(…)”;
(omissis)

DATO ATTO:
-che in applicazione di quanto disposto al punto 15) della sopra richiamata determinazione, il direttore dei lavori: geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), con “verbale” in data 12.11.2018, debitamente sottoscritto dall’appaltatore Impresa SATO S.r.l. di Ascoli Piceno, procedeva alla “consegna lavori in via d’urgenza”; 

TENUTO CONTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 70 del 30.11.2018, veniva disposto di:
(omissis)
02)-PRENDERE ATTO:
a)-che nella “Richiesta di autorizzazione al subappalto”, il legale rappresentante dell’Impresa SATO S.r.l., testualmente chiede:
l’autorizzazione all’affidamento in subappalto delle seguenti lavorazioni, già indicate al momento della presentazione dell’offerta:
Descrizione	Cat. SOA	
Tutte le opera del presente appalto nei termioni di legge	 OG3	
per un importo complessivo pari a € 89.000,00, IVA esclusa, di cui € 86.400,00 per opere ed € 2.600,00 per oneri per la sicurezza
all’Impresa ASFALTI PICENI S.R.L.
con sede legale a 63079 COLLI DEL TRONTO (AP) Via G.Leopardi n. 33
Codice Fiscale/Partita IVA 01129710446
(omissis)
05)-DARE ATTO:
-che la “relativa richiesta”, completa, è pervenuta in data 07.11.2018, prot.n.9417 del 07.11.2018;
-che nella fattispecie in argomento, trattandosi di richiesta subappalto di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione risultano ridotti della metà e quindi pari a 15(quindici) giorni;
-che pertanto, essendo decorsi i suddetti termini (22.11.2018) risulta applicabile quanto disposto dal terzo periodo del citato comma 18;
06)-DARE ATTO che ai sensi di quanto riportato a precedente punto, fermo restando gli obblighi in capo all’appaltatore e al subappaltatore derivanti dall’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’autorizzazione al subappalto, richiesta dall’Operatore Economico appaltatore a favore dell’Impresa ASFALTI PICENI S.R.L. di Colli del Tronto (AP), di cui ai punti 01) e 02) del presente dispositivo si intende concessa, ai sensi dell’art.105 comma 18 terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
(omissis)
08)-PRENDERE ATTO dell’art.7(Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore)del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;
09)-RACCOMANDARE al D.LL. geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP) il puntuale adempimento in merito alle verifiche di cui al precedente punto;
(omissis)

DATO ATTO:
-che con “Contratto d’appalto” Rep. n.310 del 19.01.2019, i “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”- venivano affidati all’operatore economico SATO S.R.L. di Ascoli Piceno -P.I.0074319044902731570616, per l’importo contrattuale di € 297.766,46  (di cui euro € 288.881,40 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del 23,20% su € 376.147,65 ed € 8.885,06  per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d’asta),oltre IVA di legge;

TENUTO CONTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.2 del 24.01.2019, veniva disposto di:
(omissis)
08)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore del geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), della fattura elettronica n.03/PA/2018 del 05.12.2018, dell’importo di € 10.235,00 oltre C.N.P.A.I.A.4% ed IVA esente in quanto “regime forfettario – art.1, commi 54-89, L. 190/2014, “Per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”
(omissis)

DATO ATTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.3 del 24.01.2019, veniva disposto di:
(omissis)
08)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore del geom. Francesco Silvi di Roccafluvione (AP), della fattura elettronica n.01/PA/2018 del 05.12.2018, dell’importo di € 400,00 oltre C.N.P.A.I.A.4% ed IVA 22%, “Per coordinatore sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”
(omissis)

TENUTO CONTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.11 del 22.02.2019, veniva disposto di:
(omissis)
04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 18.02.2019, acclarata al protocollo comunale al n.1399 del 19.02.2019, il D.LL., geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva:
01)-Relazione relativa (a) verbale concordamento nuovi prezzi;
02)-Analisi dei prezzi(Nr.1-NP7 e Nr.2-NP8 - debitamente sottoscritto dal D.LL.);
03)-Verbale di concordamento nuovi prezzi (n.1) (da NP1 a NP10 - debitamente sottoscritto 
    dal D.LL. e dall’operatore economico affidatario);
inerente i “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”;
05)-PRENDERE ATTO in particolare:
-della “Relazione relativa (a) verbale concordamento nuovi prezzi”;
06)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli: 101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3; 111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2, 216, comma 17 e 217(Abrogazioni) comma 1 lett.u) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-degli articoli: 8(Modifiche, variazioni e varianti contrattuali) comma 5, 6 e 7, e
27(Abrogazioni) del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;
07)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-del paragrafo “6.Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione” lett.l) delle “Linee guida n.3 (...)<<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni>> aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n.1007 dell’11.10.2017 (G.U. n.260 del 07.11.2017) in vigore dal 22.11.2017, testualmente dispone:
“Il responsabile del procedimento: 
(omissis)
l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico; 
(omissis)
08)-PRENDERE ATTO che i suddetti nuovi-prezzi non appaiono, allo stato, determinare maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico in quanto, come altresì riportato dal D.LL. geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), nella “Relazione relativa (a) verbale concordamento nuovi prezzi”:
N.B. I nuovi prezzi, come sopra descritti, afferiscono essenzialmente a “modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale”.
09)-APPROVARE per quanto sopra motivato:
01)-Relazione relativa (a) verbale concordamento nuovi prezzi;
02)-Analisi dei prezzi(Nr.1-NP7 e Nr.2-NP8 - debitamente sottoscritto dal D.LL.);
03)-Verbale di concordamento nuovi prezzi (n.1) (da NP1 a NP10 - debitamente sottoscritto 
    dal D.LL. e dall’operatore economico affidatario);
inerente i “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”;
(omissis)

CONSIDERATO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.12 del 27.02.2019, veniva disposto di:
(omissis)
04)-PRENDERE ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale al n.1400 del 19.02.2019, il D.LL. geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP) rimetteva, “documenti contabili relativi al 1^ S.A.L.” di che trattasi, eseguiti dall’appaltatore a tutto il 12.12.2018 dell’importo complessivo di € 104.850,18 al netto del ribasso contrattuale del 23,20%, costituiti:
01)-Giornale dei lavori (art.14 comma 1 lett.a) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
02)-Libretto delle misure n.1 (art.14 comma 1 lett.b) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
03)-Registro di contabilità (art.14 comma 1 lett.c) D.M.I.T.07.03.2018, n.49);
04)-Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 12.12.2018 (art.14 comma 1 lett.d) 
     D.M.I.T.07.03.2018, n.49), dell’importo complessivo di € 104.850,18 al netto del 
    ribasso d’asta del 23,20% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
05)-Certificato di pagamento n.1 (art.14 comma 1 lett.d), ultimo periodo D.M.I.T.07.03.2018, 
     n.49), dell’importo complessivo di € 104.300,00 al netto del ribasso d’asta del 
    23,20% e ritenuta per infortuni dello 0,5%;
06)-Quadro raffronto lavori eseguiti (rispetto al computo metrico del “progetto esecutivo”);
(omissis)
13)-APPROVARE gli atti contabili, di cui al punto 04), relativi al I° S.A.L. “(...) di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio, dell’importo complessivo di € 104.850,18 al netto del ribasso d’asta del 23,20% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal D.LL. geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP) ed eseguiti dall’affidatario, operatore economico Impresa S.A.T.O.S.R.L. di Ascoli Piceno a tutto il 12.12.2018;
(omissis)
15)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 104.300,00 (al netto del ribasso d’asta del 23,20%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 22%;
(omissis)
17)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di 
€ 104.300,00 (al netto del ribasso d’asta del 23,20%, ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 22%, tenuto conto dell’art.105 (subappalto) comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel modo seguente:
a)-€ 73.300,00 oltre IVA 10% a favore dell’appaltatore Impresa S.A.T.O. S.R.L. di 
   Ascoli Piceno;
b)-€ 31.000,00 oltre IVA 10% a favore del subappaltatore Impresa ASFALTI PICENI SRL di 
   Colli del Tronto (AP);
(omissis)

TENUTO CONTO:
-che con D.G.C. N.40 del 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)
06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la perizia di “variante suppletiva n.1”, redatta dal D.LL.Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), dell’importo complessivo di € 444.994,84, di cui € 342.386,72 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
Aa)-IMPORTO LORDO DELLE LAVORAZIONI:
Aa1)-a misura:   				      	€ 442.739,92
        di cui:
Aa2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Aa3)-Importi per manodopera;				€  30.991,79
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ab)-IMPORTO RIBASSATO DELLE LAVORAZIONI:
Ab1)-a misura al netto del ribasso offerto
    in sede di gara pari al 23,20% e comprensivo
    dell’importo per manodopera:              	€ 332.203,70
Ab2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ac)-IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PERIZIA                             € 342.386,72

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
1. I.V.A. lavori 22%					      € 75.325,08
2. Lavori di cui all’art.14 comma 3 del
   D.M.I.T. n.49/2018 (rimborsi previa fattura        €  2.145,75
3. I.V.A. 22% su 2)					      €    472,06
4. Rilievi, accertamenti e indagini			      €      0,00
5. I.V.A. 22% su 4)					      €      0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi			€      0,00
7. Imprevisti	I.V.A.22% compresa		      €      0,00
8. Acquisizione aree o immobili e
   pertinenti indennizzi               		      €      0,00
9. Accantonamento di cui all’art. 133,
   commi 3 e 4, del codice	(vedi imprevisti)	      €      0,00
10a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	                  € 14.855,00
10b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di
    progettazione ed esecuzione                  	€  1.155,00
11a.C.I.4% su 10a			       		      €    594,20
11b.C.I.4% su 10b			       		      €     46,20
12a.Iva 22% su 10a+11a 		            	      €      0,00
12b.Iva 22% su 10b+11b 		            	      €    264,26
13.Fondo per l’innovazione di cui all’art.113
   comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
   2% (€ 7.700,05)dell’importo lavori(€ 385.002,71)	      €  1.540,01
14.Incentivo per il responsabile del procedimento		
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016	
   pari al 80% del 2%(€ 7.700,05)dell’importo lavori
   (€ 385.002,71) (45% dell’80% del 2%-Reg.to com.le)	      €  2.772,02
15.Spesa di cui all’art. 92 comma 7-bis del
   D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.				      €      0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione
   di cui all’articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	      €      0,00
17.Contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi 
   dell’art.1 comma 67 della L.266/2005			      
   (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)                            €    225,00
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
   del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71)		      €    577,50
19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
   per opere artistiche					      €      0,00
20.Spese per accertamenti di laboratorio e
   Verifiche tecniche previste dal capitolato
   Speciale d’appalto, collaudo tecnico
   Amministrativo, collaudo statico ed altri
   eventuali collaudi specialistici			      €      0,00
21.Cnpaia 4% su 20				            €      0,00
22.Iva 22% su 20+21  				            €      0,00
23a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	- variante        €  2.325,00
23b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di
    progettazione ed esecuzione - variante       	€    175,00
24a.C.I.4% su 23a			       		      €     93,00
24b.C.I.4% su 23b			       		      €      7,00
25a.Iva 22% su 23a+24a 		            	      €      0,00
25b.Iva 22% su 23b+24b 		                  	€     40,04
                                                  SOMMANO		€ 102.608,12
TOTALE								            € 444.994,84
da cui scaturisce una economia, rispetto all’importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.113 del 16.08.2018>, pari ad € 55.005,16 ed un aumento contrattuale di € 44.620,26 (€ 342.386,72 - € 297.766,46);
(omissis)
08)-APPROVARE l’ “atto di sottomissione - Elab.T.a.v1”, “sottoscritto” dall’affidatario-operatore economico SATO S.r.l. di Ascoli Piceno”in segno di accettazione”, dell’importo pari ad € 44.620,26 (euro quarantaquattromilaseicentoventi/26) come appresso specificato:
Importo complessivo lavori di perizia al netto				
del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza             €  342.386,72
A dedurre importo contratto principale al netto				
del 23,20% e comprensivo degli oneri della sicurezza             €  297.766,46
Restano								         	€   44.620,26
(omissis)

DATO ATTO:
-che con nota prot.12378 del 29.05.2019, acclarata al protocollo comunale al n.5112 del 07.06.2019, ad oggetto: “Diverso utilizzo di EURO 55.005,15 per manutenzione straordin. – opere stradali varie – rete viaria comunale, infrastr. accessorie e funzionali” ,la Cassa DD.PP., testualmente:
“autorizza il diverso ultilizzo del prestito di cui alle premesse per l’importo di: EURO 55.005,15 da destinare a: manutenzione straordin. – opere stradali varie – rete viaria comunale, infrastr. accessorie e funzionali.
(omissis)

TENUTO CONTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.49 del 22.08.2019, veniva disposto di:
(omissis)
04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 19.06.2019, acclarata al protocollo comunale al n.5544 del 20.06.2019, il D.LL., geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva:
01)-Relazione relativa (a) verbale concordamento nuovi prezzi n.2;
02)-Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 (NP11 debitamente sottoscritto dal D.LL. 
    e dall’operatore economico affidatario);
inerente i “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”;
05)-PRENDERE ATTO in particolare:
-della “Relazione relativa (a) verbale concordamento nuovi prezzi N.2”;
06)-PRENDERE ATTO:
-degli articoli: 101(Soggetti delle stazioni appaltanti) commi 1 e 3; 111(Controllo tecnico, contabile e amministrativo) commi 1 e 2, 216, comma 17 e 217(Abrogazioni) comma 1 lett.u) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-degli articoli: 8(Modifiche, variazioni e varianti contrattuali) comma 5, 6 e 7, e
27(Abrogazioni) del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;
07)-PRENDERE ATTO:
-dell’art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-del paragrafo “6.Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione” lett.l) delle “Linee guida n.3 (...)<<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni>> aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n.1007 dell’11.10.2017 (G.U. n.260 del 07.11.2017) in vigore dal 22.11.2017, testualmente dispone:
“Il responsabile del procedimento: 
(omissis)
l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico; 
(omissis)
08)-PRENDERE ATTO che i suddetti nuovi-prezzi non appaiono, allo stato, determinare maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico in quanto, come altresì riportato dal D.LL. geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), nella “Relazione relativa (a) verbale concordamento nuovi prezzi n.2”:
N.B. I nuovi prezzi, come sopra descritti, afferiscono essenzialmente a “modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale”.
09)-APPROVARE per quanto sopra motivato:
01)-Relazione relativa (a) verbale concordamento nuovi prezzi n.2;
02)-Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 (NP11 debitamente sottoscritto dal D.LL. 
    e dall’operatore economico affidatario);
inerente i “Lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”;
(omissis)

DATO ATTO:
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.50 del 24.08.2019, veniva disposto di:
(omissis)
11)-APPROVARE gli atti contabili, di cui al punto 03), relativi al II° S.A.L. “(...) di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio, dell’importo complessivo di € 301.359,60 al netto del ribasso d’asta del 23,20% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal D.LL. geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP) ed eseguiti dall’affidatario, operatore economico Impresa S.A.T.O.S.R.L. di Ascoli Piceno a tutto il 23.04.2019;
(omissis)
13)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.2, dell'importo di € 195.500,00 (al netto del ribasso d’asta del 23,20%, ritenuta per infortuni dello 0,50% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 22%;
(omissis)
16)-POTERSI PROCEDERE, potersi procedere alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 195.500,00 (al netto del ribasso d’asta del 23,20%, ritenuta per infortuni dello 0,50% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 10%, tenuto conto dell’art.105 (subappalto) comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel modo seguente:
a)-€ 137.500,00 oltre IVA 22% a favore dell’appaltatore Impresa S.A.T.O. S.R.L. di 
   Ascoli Piceno;
b)-€  58.000,00 oltre IVA 22% a favore del subappaltatore Impresa ASFALTI PICENI SRL 
   di Colli del Tronto (AP);
(omissis)

CONSIDERATO:
-che con nota in data 02.07.2019, acclarata al protocollo comunale al n.6036 del 04.07.2019, il geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva:
-richiesta pagamento quota competenze tecniche al 2^ SAL e redazione della perizia di variante per un importo complessivo di € 5.925,00 oltre C.I. 4%;
-che con nota in data 26.08.2019, acclarata al protocollo comunale al n.7401 del 26.08.2019, il geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva:
-fattura elettronica n.01/PA/2019 del 26.08.2019, dell’importo di € 5.925,00 oltre C.I.4% ed IVA esente in quanto “regime forfettario – art.1, commi 54-89, L. 190/2014:
-“Per DD.LL. e contabilità lavori relativi a manutenzione straordinaria rete viaria comunale (...)-I^ stralcio ...€ 3.600,00;
-Per redazione perizia suppletiva e di variante (...) ...€ 2.325,00”;

TENUTO CONTO:
-che le spese “spese tecniche (...)”, sono individuate nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell’Amm.ne della “variante suppletiva n.1”, approvata con D.G.C. n. 40 del 30.03.2019, come di seguito riportato:
(omissis)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
10a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	                  € 14.855,00
(omissis)
11a.C.I.4% su 10a			       		      €    594,20
(omissis)
12a.Iva 22% su 10a+11a 		            	      €      0,00
(omissis)
23a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	- variante        €  2.325,00
(omissis)
24a.C.I.4% su 23a			       		      €     93,00
(omissis)
25a.Iva 22% su 23a+24a 		            	      €      0,00
(omissis)

DATO ATTO:
-Che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.42 del 26.09.2013, veniva disposto di:
(omissis)
09)-APPROVARE l’offerta formulata dal geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP) pervenuta in data 26.09.2013 ed acclarata al protocollo comunale al n.5761 del 26.09.2013,(...):
-Allegato  "B":Dichiarazione  sostitutiva di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.e i., contenente l'"Offerta economica", con la quale il suddetto architetto testualmente dichiara: 
"di  offrire  il seguente prezzo per le attivita'' inerente l'incarico in    argomento,    suddiviso    nelle   sottoriportate   prestazioni:
(omissis)
01d)-Coordinatore per la sicurezza (articoli 91 e 92 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)  ( Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.90 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) di cui prestazioni parziali:            
N.	Descrizione attività	Importo in cifre	Importo in lettere	
A	Coordinatore nella fase di progettazione
(art.91 D.Lgs.n.81/2008)                                                                                        	€    400,00		
B	Coordinatore nella fase di esecuzione lavori
(art.92 D.Lgs.n.81/2008)                                                                                        	€   755,00		
Importo complessivo coordinatore per la sicurezza	€ 1.155,00		

02a)-Direzione lavori (art.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)
N.	Descrizione attività	Importo in cifre	Importo in lettere	
A	Direzione lavori
(art.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)                                                                                        	€ 4.120,00		
Importo complessivo per direzione lavori	€ 4.120,00		

02b)-Contabilità dei lavori (articoli 203 e segg. D.P.R. n.207/2010  
       e 23 Reg.to Com.le adottato con D.C.C. n.30/2006)                                    
N.	Descrione attività	Importo in cifre	Importo in lettere	
A	Contabilità dei lavori in economia
(art.210  D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)                                                                                        	€      0,00		
Importo complessivo per contabilità lavori in economia	€      0,00		

02c)-Certificato di regolare esecuzione(art.237 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)
N.	Descrizione attività	Importo in cifre	Importo in lettere	
A	Certificato di regolare esecuzione
(art.237  D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)                                                                                        	€    500,00		
Importo complessivo per certificato di regolare esecuzione	€    500,00		

IMPORTO TOTALE PREZZO OFFERTO	€ 16.500,00		
-Che l’”importo totale prezzo offerto” ricomprende tutte le attività complementari e accessorie,  nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate (quali ad es. documentazioni e procedure per ottenimento pareri, nulla-osta ecc.) afferenti alle prestazioni come sopra elencate, nonché tutte le attività di supporto (verifiche, validazioni progetti,  ecc.), nessuna esclusa, necessarie e connesse allo svolgimento dei compiti del responsabile del procedimento  per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori in questione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.i., e D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m. i."
-Che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.5 del 21.02.2014, veniva disposto di:
(omissis)
07)-POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amministrativa delle seguenti fatture, che seppur non materialmente allegate alla presente ne formano parte integrante e sostanziale:
-Fattura n.26/2013 del 02.12.2013, dell'importo complessivo di € 490,00 oltre C.I.4% ed IVA 22% per "Redazione progetto di manutenzione rete viaria ad uso pubblico, interna ed esterna agli abitati ed infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa. Rimborso spese.";
(omissis)
-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.2 del 24.01.2019, veniva disposto di:
(omissis)
08)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore del geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), della fattura elettronica n.03/PA/2018 del 05.12.2018, dell’importo di € 10.235,00 oltre C.I.4% ed IVA esente in quanto “regime forfettario – art.1, commi 54-89, L. 190/2014, “Per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio”
(omissis)

ACCERTATO:
-che l’attività svolta relativa alla direzione e contabilità lavori di che trattasi risulta afferente:

02a)-Direzione lavori (art.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)
N.	Descrizione attività	Importo in cifre	Importo in lettere	
A	Direzione lavori
(art.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)                                                                                        	€ 4.120,00		
Importo complessivo per direzione lavori	€ 4.120,00		
per un importo complessivo di € 4.120,00 oltre C.I. 4%;

TENUTO CONTO:
-che come altresì riportato nella sopra richiamata nota prot.6036 del 04.07.2019: “che l’importo dei lavori contabilizzati al secondo SAL al lordo del ribasso ammonta ad € 389.687,79 pari all’88% dei lavori complessivi (...)”;
-che in conseguenza a quanto sopra, l’importo per “direzione lavori” da liquidarsi ammonta a € 3.625,60 (88% di € 4.120,00)e quindi > di € 3.600,00 richiesto;
 
DATO ATTO:
-che con nota  del 29.07.2019, trasmessa a mezzo PEC, ed acclarata al protocollo comunale al n.6715 del 29.07.2019, la Cassa Geometri di Roma, relativamente alla “posizione contributiva” del Geom. Mauro Strambi, “matricola 795355A”, in sintesi, testualmente comunicava:
“(...) si dichiara che la posizione contributiva del geometra è REGOLARE sino all’anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l’anno 2019 è in corso di riscossione.”;

RITENUTO:
-potersi procedere alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 5.925,00 oltre C.I.4% (I.V.A. esente in quanto “regime forfettario – art.1, commi 54-89, L. 190/2014): 
-“Per DD.LL. e contabilità lavori relativi a manutenzione straordinaria rete viaria comunale (...)-I^ stralcio ...€ 3.600,00;
-Per redazione perizia suppletiva e di variante (...) ...€ 2.325,00”;

DATO ATTO:
-che l’intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;

VISTO:
-l'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
-l’art.18(La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;
-l'art.48-bis(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;
-il D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40, ad oggetto:"Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";
-della D.G.C. n.41 del 07.04.2008 ad oggetto:"Art.48-bis DPR 602/1973-Decreto MEF del 18.01.2008 n.40-Individuazione soggetti abilitati alla verifica dei pagamenti di importo superiore a 10.000,00 Euro-Provvedimenti";

VISTO altresì
-il D.M.dell’Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013, ad oggetto: ”Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

VISTO inoltre:
-l’art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
-la Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell’A.V.C.P.;
-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell’A.V.C.P.;
-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell’A.V.C.P.;

VISTO infine:
-l'art.107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-l'art.13-Attività di gestione-  del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i.;
-gli artt.59-Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- e 60-Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi- dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006; 

D E T E R M I N A                              

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati di:
01)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. N.40 del 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:
(omissis)
06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la perizia di “variante suppletiva n.1”, redatta dal D.LL.Geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), dell’importo complessivo di € 444.994,84, di cui € 342.386,72 per lavori al netto del ribasso del 23,20% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:
(omissis)
e con il seguente quadro economico:
Aa)-IMPORTO LORDO DELLE LAVORAZIONI:
Aa1)-a misura:   				      	€ 442.739,92
        di cui:
Aa2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Aa3)-Importi per manodopera;				€  30.991,79
     (art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ab)-IMPORTO RIBASSATO DELLE LAVORAZIONI:
Ab1)-a misura al netto del ribasso offerto
    in sede di gara pari al 23,20% e comprensivo
    dell’importo per manodopera:              	€ 332.203,70
Ab2)-Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
    non soggetti a ribasso;				€  10.183,02
     (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)
Ac)-IMPORTO NETTO CONTRATTUALE PERIZIA                             € 342.386,72

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
1. I.V.A. lavori 22%					      € 75.325,08
2. Lavori di cui all’art.14 comma 3 del
   D.M.I.T. n.49/2018 (rimborsi previa fattura        €  2.145,75
3. I.V.A. 22% su 2)					      €    472,06
4. Rilievi, accertamenti e indagini			      €      0,00
5. I.V.A. 22% su 4)					      €      0,00
6. Allacciamenti ai pubblici servizi			€      0,00
7. Imprevisti	I.V.A.22% compresa		      €      0,00
8. Acquisizione aree o immobili e
   pertinenti indennizzi               		      €      0,00
9. Accantonamento di cui all’art. 133,
   commi 3 e 4, del codice	(vedi imprevisti)	      €      0,00
10a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	                  € 14.855,00
10b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di
    progettazione ed esecuzione                  	€  1.155,00
11a.C.I.4% su 10a			       		      €    594,20
11b.C.I.4% su 10b			       		      €     46,20
12a.Iva 22% su 10a+11a 		            	      €      0,00
12b.Iva 22% su 10b+11b 		            	      €    264,26
13.Fondo per l’innovazione di cui all’art.113
   comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
   2% (€ 7.700,05)dell’importo lavori(€ 385.002,71)	      €  1.540,01
14.Incentivo per il responsabile del procedimento		
   di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016	
   pari al 80% del 2%(€ 7.700,05)dell’importo lavori
   (€ 385.002,71) (45% dell’80% del 2%-Reg.to com.le)	      €  2.772,02
15.Spesa di cui all’art. 92 comma 7-bis del
   D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.				      €      0,00
16.Spese per attività di verifica e validazione
   di cui all’articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	      €      0,00
17.Contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi 
   dell’art.1 comma 67 della L.266/2005			      
   (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)                            €    225,00
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
   del 03.11.2015 (0,15% di € 385.002,71)		      €    577,50
19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
   per opere artistiche					      €      0,00
20.Spese per accertamenti di laboratorio e
   Verifiche tecniche previste dal capitolato
   Speciale d’appalto, collaudo tecnico
   Amministrativo, collaudo statico ed altri
   eventuali collaudi specialistici			      €      0,00
21.Cnpaia 4% su 20				            €      0,00
22.Iva 22% su 20+21  				            €      0,00
23a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	- variante        €  2.325,00
23b.Spese tecniche per coord.sicurez. in fase di
    progettazione ed esecuzione - variante       	€    175,00
24a.C.I.4% su 23a			       		      €     93,00
24b.C.I.4% su 23b			       		      €      7,00
25a.Iva 22% su 23a+24a 		            	      €      0,00
25b.Iva 22% su 23b+24b 		                  	€     40,04
                                                  SOMMANO		€ 102.608,12
TOTALE								            € 444.994,84
02)-PRENDERE ATTO che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.50 del 24.08.2019, veniva disposto di:
(omissis)
11)-APPROVARE gli atti contabili, di cui al punto 03), relativi al II° S.A.L. “(...) di manutenzione rete viaria comunale di uso pubblico, interna ed esterna agli abitati e infrastrutture accessorie e funzionali alla stessa, danneggiata da eccezionali eventi meteorologici e sismici – 1^ stralcio, dell’importo complessivo di € 301.359,60 al netto del ribasso d’asta del 23,20% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal D.LL. geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP) ed eseguiti dall’affidatario, operatore economico Impresa S.A.T.O.S.R.L. di Ascoli Piceno a tutto il 23.04.2019;
(omissis)
13)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.2, dell'importo di € 195.500,00 (al netto del ribasso d’asta del 23,20%, ritenuta per infortuni dello 0,50% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 22%;
(omissis)
16)-POTERSI PROCEDERE, potersi procedere alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 195.500,00 (al netto del ribasso d’asta del 23,20%, ritenuta per infortuni dello 0,50% e comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA 10%, tenuto conto dell’art.105 (subappalto) comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel modo seguente:
a)-€ 137.500,00 oltre IVA 22% a favore dell’appaltatore Impresa S.A.T.O. S.R.L. di 
   Ascoli Piceno;
b)-€  58.000,00 oltre IVA 22% a favore del subappaltatore Impresa ASFALTI PICENI SRL 
   di Colli del Tronto (AP);
(omissis)
03)-PRENDERE ATTO che con nota in data 02.07.2019, acclarata al protocollo comunale al n.6036 del 04.07.2019, il geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva:
-richiesta pagamento quota competenze tecniche al 2^ SAL e redazione della perizia di variante per un importo complessivo di € 5.925,00 oltre C.I. 4%;
-che con nota in data 26.08.2019, acclarata al protocollo comunale al n.7401 del 26.08.2019, il geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), rimetteva:
-fattura elettronica n.01/PA/2019 del 26.08.2019, dell’importo di € 5.925,00 oltre C.I.4% ed IVA esente in quanto “regime forfettario – art.1, commi 54-89, L. 190/2014:
-“Per DD.LL. e contabilità lavori relativi a manutenzione straordinaria rete viaria comunale (...)-I^ stralcio ...€ 3.600,00;
-Per redazione perizia suppletiva e di variante (...) ...€ 2.325,00”;
04)-PRENDERE ATTO che le spese “spese tecniche (...)”, sono individuate nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell’Amm.ne della “variante suppletiva n.1”, approvata con D.G.C. n. 40 del 30.03.2019, come di seguito riportato:
(omissis)
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
(omissis)
10a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	                  € 14.855,00
(omissis)
11a.C.I.4% su 10a			       		      €    594,20
(omissis)
12a.Iva 22% su 10a+11a 		            	      €      0,00
(omissis)
23a.Spese tecniche per progettazione, direzione,
    contab.e accert.reg.re esec.	- variante        €  2.325,00
(omissis)
24a.C.I.4% su 23a			       		      €     93,00
(omissis)
25a.Iva 22% su 23a+24a 		            	      €      0,00
(omissis)
05)-PRENDERE ATTO:
-della D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.42 del 26.09.2013;
-della D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.5 del 21.02.2014;
-della D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.2 del 24.01.2019;
06)-PRENDERE ATTO che con nota  del 29.07.2019, trasmessa a mezzo PEC, ed acclarata al protocollo comunale al n.6715 del 29.07.2019, la Cassa Geometri di Roma, relativamente alla “posizione contributiva” del Geom. Mauro Strambi, “matricola 795355A”, in sintesi, testualmente comunicava:
“(...) si dichiara che la posizione contributiva del geometra è REGOLARE sino all’anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l’anno 2019 è in corso di riscossione.”;
07)-PRENDERE ATTO:
-l'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
-l’art.18(La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;
-del D.M.dell’Economia e delle Finanze n.55 del 03.04.2013;
08)-POTERSI PROCEDERE, alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore del geom. Mauro Strambi di Roccafluvione (AP), della fattura elettronica n.01/PA/2019 del 26.08.2019, dell’importo di € 5.925,00 oltre C.I.4% ed IVA esente in quanto “regime forfettario – art.1, commi 54-89, L. 190/2014:
-“Per DD.LL. e contabilità lavori relativi a manutenzione straordinaria rete viaria comunale (...)-I^ stralcio ...€ 3.600,00;
-Per redazione perizia suppletiva e di variante (...) ...€ 2.325,00”;
09)-PRENDERE ATTO:
-Dell'art.185 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;
-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;
-Del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;
-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;
10)-PRENDERE ATTO inoltre:
-dell’art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell’A.V.C.P.;
-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell’A.V.C.P.;
-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell’A.V.C.P.;
11)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. ZE00BAAC9D;
12)-DARE ATTO che l’intervento di che trattasi, viene finanziato con Mutuo Passivo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, pos.6045738, giusta nota di concessione prestito, prot. 2060446/18 del 25.06.2018, acclarata al protocollo comunale al n.5576 del 25.06.2018;
13)-IMPUTARE la spesa di € 6.162,00 C.I. 4% compreso, con IVA esente in quanto “regime forfettario – art.1, commi 54-89, L. 190/2014, al:
Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz.CO
2019	
2	10.05-2.02.01.09.012	2913	Spese per opere di manutenzione rete viaria uso pubblico da mutuo Cassa DD.PP.	500.000,00	
del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               
  geom.Carlo Trobbiani