C O M U N E   D I   C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044        TEL. (0736) 84381

CODICE FISCALE 80001250440                 C/C P. 15245632

 

=====================================================================

COPIA DI DETERMINA DEL TECNICO COMUNALE

======================================================================

DETERMINAZIONE NUMERO  71 DEL  02-10-18

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE PUBBLICHE UBICATE IN LOCALITA' GESSO. RATIFICA VERBALE SOMMA URGENZA E AFFIDAMENTO LAVORI.

----------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che:
- gli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e seguenti hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio pubblico, alle residenze private ed a tutto il tessuto culturale nonché al sistema produttivo dei Comuni interessati, rendendo necessarie le conseguenti verifiche di agibilità compiute da personale tecnico;

- in particolare nell’agglomerato in località Gesso si sono verificati crolli di edifici lungo le vie pubbliche, creando gravi problemi di sicurezza per gli edifici circostanti e la principale viabilità comunale adiacente;

VISTE l’OCPM n. 388/2016 e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016;

RILEVATA, la necessità “indifferibile ed urgente” di procedere nel minor tempo possibile alla predisposizione degli atti necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’intero agglomerato di Gesso, al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo presente e potenziale per l’incolumità pubblica;

VISTO il verbale di somma urgenza prot. n. 10475 del 14.12.2017 si è provveduto:

PRESO ATTO che contestualmente all’adozione del suddetto verbale di somma urgenza il Responsabile del Procedimento provvedeva ad affidare l’esecuzione della progettazione della messa in sicurezza all’Ing. Jonathan Lupi di Comunanza;

VISTO il progetto esecutivo relativo all’intervento di messa in sicurezza delle vie pubbliche in loc. Gesso, redatto dal professionista incaricato, dell’importo di euro 138.298,72, di cui euro 104.613,25 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, ed euro 33.685,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO che con nota prot. 448 del 15.01.2018 si è provveduto a trasmettere il suddetto progetto al CCR Marche per l’acquisizione del parere di competenza;

VISTO che la Regione Marche -Servizio Protezione civile- con nota acquisita al protocollo comunale al n. 1034 del 02.02.2018 ha trasmesso il nulla osta agli interventi progettuali condizionato al rispetto della condizione di stralciare dal C.M.E. le voci n. 1-2-3-9-10, in quanto apprestamenti di cantiere in onere all’impresa, non ammissibili a contributo;

DATO ATTO che:
- questo Ente con nota prot. n. 5093 del 28.06.2018 ha trasmesso il progetto in argomento alla Soprintendenza Archeologica, Belli Arti e Paesaggio delle Marche;
- il Sindaco con ordinanza n. 189 del 26.07.2018, prot. n. 5951, ha ordinato le demolizioni degli edifici previste in progetto;

VISTO che con nota prot. n. 5078 del 28.06.2018 si è provveduto a richiedere un’offerta per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza delle vie pubbliche in loc. Gesso alle seguenti ditte di fiducia dell’Amministrazione:
- Sabatini Costruzioni srl, con sede a Maltignano in via Mediana Superiore n. 1/A;
- Costruzioni Brandi Egidio srl, con sede a Pesaro in via Massimo D’Azeglio n. 6;
- Mariotti Costruzioni srl, con sede ad Arcevia in via San Giovanni Battista n. 88;
- Mannocchi Luigino con sede a Montalto Marche in via Piagge n. 3;
- Beani Annibale srl, con sede a Comunanza in via Trieste n. 122;

DATO ATTO che entro le ore 11 del 07.07.2018 , termine stabilito nella lettera d’invito, sono pervenute le seguenti offerte:
- Sabatini Costruzioni srl di Maltignano – offerta prot. n. 5293 del 07.07.2018 – ribasso offerto del 18,40%;
- Costruzioni Brandi Egidio srl di Pesaro – offerta prot. n. 5294 del 07.07.2018 – ribasso offerto del 14,193%;
- Mariotti Costruzioni srl di Arcevia – offerta prot n. 5295 del 07.07.2018 – ribasso offerto del 16,550%;
- Mannocchi Luigino di Montalto Marche – offerta prot. n. 5296 del 07.07.2018 – ribasso offerto del 19,20%;
- Beani Annibale srl di Comunanza – offerta prot. n. 5297 del 07.07.2018 – ribasso offerto del 20,131%;

RITENUTO pertanto:
- prendere atto delle motivazioni che hanno determinato l’emanazione del verbale di somma urgenza da parte del Responsabile del Servizio;
- affidare i lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza delle vie pubbliche in loc. Gesso alla ditta Beani Annibale srl, con sede a Comunanza in via Trieste n. 122, avendo offerto il ribasso del 20,131% sul prezzo posto a base d’asta;

DATO ATTO che al finanziamento dell’intervento in somma urgenza si provvederà imputando la spesa al Cap. 2549, cod. 11.02-2.02.01.09.000, del vigente bilancio comunale;

VISTI gli artt. 36, comma 2, lettera b) e 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATI sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACCERTATO che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, per quanto applicabile agli enti locali;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto del verbale di somma urgenza prot. n. 10475 del 14.12.2017;

3. Di ratificare l’affidamento della progettazione relativa all’intervento di messa in sicurezza delle vie pubbliche in loc. Gesso all’Ing. Jonathan Lupi di Comunanza;

4. Di prendere atto del progetto esecutivo relativo all’intervento di messa in sicurezza delle vie pubbliche in loc. Gesso, redatto dal professionista incaricato, dell’importo di euro 138.298,72, di cui euro 104.613,25 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, ed euro 33.685,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

5. Di prendere atto altresì che la Regione Marche -Servizio Protezione civile- con nota acquisita al protocollo comunale al n. 1034 del 02.02.2018 ha trasmesso il nulla osta agli interventi progettuali condizionato al rispetto della condizione di stralciare dal C.M.E. le voci n. 1-2-3-9-10, in quanto apprestamenti di cantiere in onere all’impresa, non ammissibili a contributo;

6. Di affidare i lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza delle vie pubbliche in loc. Gesso alla ditta Beani Annibale srl, con sede a Comunanza in via Trieste n. 122, avendo offerto il ribasso del 20,131% sul prezzo posto a base d’asta;

7. Di impegnare ed imputare la spesa al Cap. 2549, cod. 11.02-2.02.01.09.000, del vigente bilancio comunale anno 2017;

8. Di specificare in ottemperanza al disposto di cui all’art. 192 del T.U.E.L. e successive modificazioni, quanto appresso:
- il fine che il contratto intende perseguire è garantire la pubblica incolumità;
- l’oggetto del contratto è la messa in sicurezza delle vie pubbliche in località Gesso;
- le modalità di scelta del contraente ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 163 del D.Lgs n. 50/2016;

9. Di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto;

10. Di dare atto che in ordine al presente provvedimento non sussistono ipotesi di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241 del 1990, dell’art. 6 del D.lgs n° 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici;

11. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

12. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 

13. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza, della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

14. Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tar Marche di Ancona entro il Termine di 60 giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Amedeo Vagnoni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO-SPORTELLO UNICO-COMMERCIO

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 4328 del 13.06.2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo – Sportello Unico – Commercio;

Richiamati l’art. 6 della L.241/90, gli art.li 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  relativi alla nomina e  compiti del Responsabile del Procedimento;

Preso atto che la su riportata proposta di determina, formulata dal responsabile del procedimento, è resa ai sensi di quanto espressamente previsto dai citati art. 6 L. 241/90 ed art.li 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto di  quanto riportato nella citata proposta di determina, formulata dal Responsabile del procedimento, è resa ai sensi di quanto espressamente previsto dai citati art. 6 L.241/90 ed art.li 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183 comma 9 del D.Lgs. n.267/00 e diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 c.4, D.Lgs. 267/00. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa  Alessia Caucci

f.to IL RESP. DEL SERVIZIO

======================================================================
PROT. N. In istruttoria                                  lì 02-10-2018

======================================================================
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 02-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to   De Santis Mirella

======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESP.  DEL SERVIZIO 
    Alvaro Cesaroni

======================================================================
N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-08-19 al 28-08-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì