COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Provincia di Macerata

43 045
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO  

N. 17  Data 05-04-19

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI  DI "RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI A SERVI=
ZIO  DEL  NIDO COMUNALE" - APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE NON SOSTANZIALE

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  cinque del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 1820 in data 03/06/2014 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio LL.PP. di questo Ente il geom. Laura Contratti; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2018-2020;

PREMESSO che il Comune di Ripe San Ginesio sta provvedendo alla riqualificazione dell’area antistante il plesso scolastico sito in Loc.tà Passo Ripe, al fine di recuperare il giardino e parco giochi preesistente, in stato di deterioramento, e rendere lo stesso funzionale e fruibile mediante lavori di ristrutturazione, sistemazione del verde e mediante fornitura e posa in opera di nuovi giochi e attrezzature;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 92 del 10.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato riguardante i lavori di “RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI A SERVIZIO DEL NIDO COMUNALE” comportante una spesa complessiva di € 25.526,10, composto da un unico elaborato redatto dal Tecnico Comunale, il cui quadro tecnico economico è il seguente:

A 	LAVORI	
	TOTALE LAVORI 	 	€ 14.884,58	
	Oneri della sicurezza diretti e indiretti	 	€ 446,54	
	LAVORI A BASE D' ASTA	 	€ 14.438,04	
B	FORNITURE	
	TOTALE FORNITURE	 	€ 6.984,49	
										
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA su lavori	10%	€ 1.488,46	
	IVA su forniture	22%	€ 1.536,59	
	Spese Tecniche	2%	€ 297,69	
	LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI (IVA INCLUSA)	 	€ 334,29	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	 	€ 3.657,03	
										
C	TOTALE GENERALE PROGETTO	 	€ 25.526,10	

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile dell’ufficio tecnico n. 70 del 20/12/2018, alla ditta “Edilizia Bruschi Alessandro e Rozzi srl semplificata”, P. IVA 01841760430, avente sede in Sarnano (MC) in c.da Giampereto n. 24, la quale ha offerto un ribasso del 0,50%, determinando l’importo netto dei lavori in € 14.812,39 oltre iva comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 446,54;

- gli stesse sono stati consegnati il giorno 25/02/2019 come da verbale di pari data e sono iniziati il medesimo giorno;

- che nel corso dell'esecuzione delle opere previste, le esigenze dell'Amministrazione sono mutate e si rendono necessarie lavorazioni e modifiche non sostanziali non previste e non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo che non comportano aumento di spesa né modifica del quadro economico trattandosi di una semplice variazione progettuale non suppletiva;
EVIDENZIATO che le varianti apportate riguardano esclusivamente opere di dettaglio relative all’adeguamento del progetto allo stato dei luoghi al fine di conseguire una maggiore funzionalità dell’opera come da evidenziato nel progetto di variante non sostanziale redatto dall’ufficio tecnico il cui quadro tecnico economico è il seguente:

LAVORI	
TOTALE LAVORI 	 	€ 14.884,58	
Oneri della sicurezza diretti e indiretti	 	€ 446,54	
LAVORI A BASE D' ASTA	 	€ 14.438,04	
RIBASSO DEL 0,5 %	 	€ 72,19	
IMPORTO CONTRATTUALE	 	€ 14.812,39	
FORNITURE	
TOTALE FORNITURE	 	€ 6.984,49	
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori	10%	€ 1.481,24	
IVA su forniture	22%	€ 1.536,59	
Spese Tecniche	2%	€ 297,69	
LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI (IVA INCLUSA) 	€ 334,29	
ONERI DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA	 	€ 79,41	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	 	€ 3.729,22	
									
TOTALE GENERALE PROGETTO 	€ 25.526,10	

DATO ATTO che le modifiche apportate al progetto:

- rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
- non comportano nessun maggior onere, risultando l’importo complessivo immutato e l’importo dei lavori in appalto non incrementato rispetto al progetto esecutivo;
- non comportano variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in sede di progettazione esecutiva

ATTESO che:

- il costo dell’opera pari ad € 25.526,10 trova copertura finanziaria al codice di bilancio 12.01-2.02.01.09.017 (ex cap. 2629/4);
- che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell’ufficio tecnico comunale

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare la perizia di variante non sostnziale dei lavori di di “RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI A SERVIZIO DEL NIDO COMUNALE” redatta dall’ufficio tecnico il cui quadro tecnico economico è il seguente:

LAVORI	
TOTALE LAVORI 	 	€ 14.884,58	
Oneri della sicurezza diretti e indiretti	 	€ 446,54	
LAVORI A BASE D' ASTA	 	€ 14.438,04	
RIBASSO DEL 0,5 %	 	€ 72,19	
IMPORTO CONTRATTUALE	 	€ 14.812,39	
FORNITURE	
TOTALE FORNITURE	 	€ 6.984,49	
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori	10%	€ 1.481,24	
IVA su forniture	22%	€ 1.536,59	
Spese Tecniche	2%	€ 297,69	
LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI (IVA INCLUSA) 	€ 334,29	
ONERI DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA	 	€ 79,41	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	 	€ 3.729,22	
									
TOTALE GENERALE PROGETTO 	€ 25.526,10	

3. Di dare atto che il costo complessivo dell’opera, a seguito delle modiche apportate, rimane immutato e quindi pari ad € 25.526,10.

4. Di dare atto che il costo dell’opera pari ad € 25.526,10 trova copertura finanziaria al codice di bilancio 12.01-2.02.01.09.017 (ex cap. 2629/4) del bilancio corrente esercizio;

SERVIZIO BILANCIO
Visto di regolarità contabile
(Art. 153  comma  5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA      

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

li,                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-04-19
IL SEGRETARIO
li, 29-04-19                            f.to    GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

======================================================================