COMUNE DI  RIPE SAN GINESIO
(Provincia di Macerata)
P.zza  Vittorio  Emanuele II,  8  -  c.a.p.  62020  
Tel/Fax 0733/500102 - 500374 
C.F. e Partita IVA:  00267220432

43 045
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63  Data 30-09-13

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI  DI SISTEMAZIONE AREA VERDE SITA IN LOCALI=
TA'  PASSO RIPE SAN GINESIO - APPROVAZIONE PERIZIA
TECNICA - CODICE CIG: Z900BBD5B4

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilatredici, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

======================================================================

TEODORI PAOLO	SINDACO	P	
GASPARRINI PIERINO	VICE SINDACO	P	
CONTRATTI SILVIA	ASSESSORE	P	
GIACOMELLI DAMIANO	ASSESSORE	A	
NALLI MARCO	ASSESSORE	A	

======================================================================

Presenti n.    3                                      Assenti  n.    2

Partecipa il Segretario comunale Signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Ripe San Ginesio è proprietario di una vasta area destinata a verde pubblico sita in località Passo Ripe in via Largo Massetani che intende sistemare per utilizzarlo per finalità sportive e/o ludiche a servizio della popolazione durante le manifestazioni estive realizzate e promosse dalle diverse associazioni locali;

- per ragioni di contenimento della spesa le stesse saranno realizzate in economia diretta con l’ausilio del personale dipendente previo acquisto dei materiali necessari e solo parzialmente tramite ditte locali specializzate nelle diverse lavorazioni, quali scavi, pavimentazioni etc..;

- all’uopo il tecnico comunale in data 08/07/2013 ha redatto apposita perizia per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, costituita da un unico elaborato comprendente:
	- relazione tecnica;
	- computo metrico estimativo;
	- inquadramento intervento;

VISTO il relativo  quadro economico:
a.	lavori a base d’asta						€ 11.738,00

b.	somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sui lavori							€.  2.575,40

Lavori su fattura							€.     186,60
========================================================
TOTALE GENERALE DEL PREVENTIVO			€.14.500,00

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stesso per le motivazioni sopra indicate;

PRESO ATTO inoltre che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a Euro 40.000,00, è nelle facoltà di questa Amministrazione, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 di procedere all’affidamento diretto in economia mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

RICHIAMATO l’art. 8 comma c) del regolamento comunale per la gestione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 35/08 il quale dispone che: “per importi inferiori a 40.000 Euro: il responsabile del servizio provvede direttamente e sotto la sua responsabilità, a concludere gli opportuni accordi con ditte idonee per l’affidamento dei lavori e delle forniture; prima di procedere alla stipula dei predetti accordi il funzionario responsabile avrà cura, di norma, di richiedere preventivi di spesa a più ditte idonee e, comunque, di compiere le opportune indagini di mercato atte a valutare la congruità dei prezzi praticati”.

CONSIDERATO pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento diretto di che trattasi a ditte di fiducia dell’Amministrazione previa verifica della congruità e convenienza delle offerte praticate;

RILEVATO che le seguenti imprese:

- “MAC STRADE s.a.s. di Monteverde Roberto” con sede in Loro Piceno (MC) in c.da Grazie Fiastra n. 4/A, p. iva 01146700438 per i lavori relativi al movimento terra;

- “NUOVA KRONO QUARZ” di Fusari Romina con sede in Corridonia (MC) in via Malerba n. 1, p. iva 01751750439 per i lavori relativi alla realizzazione di un pavimento al quarzo;

- LIFI di Sabani Amdiarif con sede in Loro Piceno (MC) in viale della Vittoria n. 30, p. iva 01250720438 per i lavori relativi alla realizzazione delle strisce;

- “Valbeton s.r.l.” con sede in Urbisaglia (MC) in loc. Montedoro, p. iva 01603220433 per la fornitura del calcestruzzo per il getto della soletta;

- “CE. Fer solai e prefabbricati s.r.l.” con sede in Loro Piceno (MC) in via Vittorio Emanuele II n. 25, p. iva 00177190436 per la fornitura del ferro per la soletta;

risultano in possesso della necessaria abilitazione e idoneità ad eseguire il lavoro, ed hanno espresso la propria disponibilità per l’immediata esecuzione dei lavori “de quo” agli stessi prezzi del preventivo di spesa oggetto di approvazione con il presente atto;

VISTI i pareri dei responsabili del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

D E L I B E R A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare la perizia tecnica predisposta dal tecnico comunale in data 08.07.2013 relativa alla realizzazione dei lavori di “Realizzazione campetto di calcetto a 5”, dell’importo complessivo di € 14.500,00 così suddiviso:
a.	lavori a base d’asta						€ 11.738,00

b.	somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sui lavori							€.  2.575,40

Lavori su fattura							€.     186,60
=========================================================
TOTALE GENERALE DEL PREVENTIVO			€.14.500,00

3) Di dare atto che i lavori verranno eseguiti dalle seguenti ditte:

- per i lavori relativi al movimento terra dall’impresa “MAC STRADE s.a.s. di Monteverde Roberto” con sede in Loro Piceno (MC) in c.da Grazie Fiastra n. 4/A, p. iva 01146700438 per l’importo di euro 3.272,00 oltre l’iva di legge;

- per i lavori relativi alla realizzazione di un pavimento al quarzo dall’impresa “NUOVA KRONO QUARZ” di Fusari Romina con sede in Corridonia (MC) in via Malerba n. 1, p. iva 01751750439 per l’importo di euro 1.760,00 oltre l’iva di legge;

- per i lavori relativi alla realizzazione delle strisce dall’impresa LIFI di Sabani Amdiarif con sede in Loro Piceno (MC) in viale della Vittoria n. 30, p. iva 01250720438 per l’importo di euro 500,00 oltre l’iva di legge;

- per la fornitura del calcestruzzo per il getto della soletta dall’impresa “Valbeton s.r.l.” con sede in Urbisaglia (MC) in loc. Montedoro, p. iva 01603220433 per l’importo di euro 5.510,00 oltre l’iva di legge;

- per la fornitura del ferro per la soletta dall’impresa “CE. Fer solai e prefabbricati s.r.l.” con sede in Loro Piceno (MC) in via Vittorio Emanuele II n. 25, p. iva 00177190436 per l’importo di euro 696,00 oltre l’iva di legge;

4) Di impegnare la spesa complessiva di € 14.500,00 con imputazione al cap. 2780 del bilancio corrente esercizio 2013;

5) Di stabilire che l’Ufficio Tecnico provvederà alla liquidazione degli importi dovuti, senza redazione di ulteriori atti, previa presentazione di regolare fattura, acquisizione del DURC e dopo verifica dei lavori effettuati da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

6) Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio comunale.

Indi con separata unanime votazione resa ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000,
D I C H I A R A
immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
"LAVORI  DI SISTEMAZIONE AREA VERDE SITA IN LOCALI=TA'  PASSO RIPE SAN GINESIO - APPROVAZIONE PERIZIATECNICA - CODICE CIG: Z900BBD5B4"

VISTO:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

			IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
			     F.to Rag. Luca Bettucci 

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica.

			IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
			 F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO
f.to TEODORI PAOLO             f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-10-13
IL SEGRETARIO
li, 08-10-13                           f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
======================================================================
La presente é copia conforme all'originale.
Ripe San Ginesio li ......................       IL SEGRETARIO
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====================================================================
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 08-10-13
[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[]  non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di
altra deliberazione.
IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

======================================================================