COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Provincia di Macerata

43 045
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO  

N. 56  Data 31-10-19

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: SISMA  2016  O.C.S.R.  N. 48/2018 - SMS SOLIDALI -
LAVORI DI "VALORIZZAZIONE E RECUPERO EDIFICIO PUB=
BLICO  DA  DESTINARE  ALLO  SVILUPPO ECONOMICO DEL
TERRITORIO  E IN PARTICOLARE DEL CENTRO STORICO" -
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  trentuno del mese di ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI: 
- il Decreto Sindacale n. 4 del 20.05.2019  con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio LL.PP. di questo Ente il geom. Laura Contratti; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2019-2021;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Municipale n. 58 del 18.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Arch. Taide Rozzi di San Ginesio riguardante i lavori di “VALORIZZAZIONE E RECUPERO EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E IN PARTICOLARE DEL CENTRO STORICO” comportante una spesa complessiva di Euro 51.900,00 come di seguito specificata: 

A) TOTALE OPERE A BASE D'ASTA 			                     € 37.359,74 
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 	€   1.381,63 
                                                                                                --------------- 
Importo totale dei lavori a misura 			                € 38.741,37 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1) IVA 10% su opere in appalto 				                     €   3.874,14 
2) Spese tecniche per prog., d.l. e coord. sicurezza 	€   4.500,00 
3) Cap. 4% e iva 22% su spese tecniche		 	           €   1.209,60 
4) Spese gen. di prog. 2%, Art. 113 D.Lgs. 50/2016 	€      774,83 
5) imprevisti IVA compresa 				                          €   2.800,07 
                                                                                                --------------- 
Totale somme a disposizione 				                        € 13.158,63 
                                                                                                ========== 
TOTALE GENERALE DI PROGETTO 			                        € 51.900,00

- la propria determina n. 43 del 05.09.2019 avente ad oggetto “SISMA 2016 O.C.S.R. N. 48/2018 - INTERVENTI FINANZIATI CON SMS SOLIDALI - LAVORI DI “VALORIZZAZIONE E RECUPERO EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E IN PARTICOLARE DEL CENTRO STORICO” – AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA – DETERMINA A CONTRARRE” con la quale è stato disposto:
1)	… omissis …;
2)	Di dare corso, in ossequio ai principi di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla procedura di TRATTATIVA DIRETTA da attuarsi tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), per l’affidamento dei lavori di “VALORIZZAZIONE E RECUPERO EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E IN PARTICOLARE DEL CENTRO STORICO”;
3)	Di negoziare mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la Ditta VITALI IMPRESA EDILE DI VITALI ANDREA, Partita IVA:01746830437 con sede a San Ginesio (MC) in Contrada Battifolle, n. 4, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo offerto sull'importo a base d'asta stabilito in € 37.359,74 + € 1.381,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10%;
4)	… omissis …;
5)	… omissis …;
6)	… omissis …;
… omissis …;

- la propria determina n. 48 del 26/09/2019, con la quale è stato aggiudicato definitivamente, attraverso la procedura telematica all’interno del portale “acquistinretepa.it”, l‘appalto in premessa alla ditta “VITALI IMPRESA EDILE DI VITALI ANDREA”, Partita IVA:01746830437 con sede a San Ginesio (MC) in Contrada Battifolle, n. 4, che ha presentato un’offerta di ribasso d’asta dello 0,50% sul prezzo posto a base di gara di € 37.359,74  iva esclusa, per un importo netto pari ad € 38.554,57 oltre iva comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.381,63;

- il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” in data 26.09.2019, e la scrittura privata, Rep. n. 867, redatta in modalità elettronica in pari data, che riportano le clausole contrattuali;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 30/09/2019; 

Tenuto conto che durante lo svolgimento dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno determinato la necessità di apportare alcune modifiche in corso d’opera alle lavorazioni previste in progetto, e affinché l’appalto possa procedere con continuità ed utilmente a regola d’arte, è stata redatta apposita variante non sostanziale, a firma dell’Arch. Taide Rozzi, Direttore dei Lavori;

Dato atto che ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante;

Visti gli elaborati trasmessi dall’Arch. Taide Rozzi con nota prot. 5237 del 30.10.2019 relativi alla perizia di variante non sostanziale, allegati alla presente quale parte integrale e sostanziale, di seguito riportati:
-	R1.v: Relazione tecnica (variante non sostanziale)
-	Q.E.v: Quadri tecnici economici a confronto
-	Elenco prezzi e analisi prezzi
-	C1.v: Computo Metrico Estimativo
-	Quadro comparativo
-	Elaborati grafici: architettonico stato modificato e schema degli impianti
-	Atto di sottomissione
-	Verbale di concordamento nuovi prezzi

Evidenziato che le modifiche apportate riguardano esclusivamente opere di dettaglio relative all’adeguamento del progetto allo stato dei luoghi al fine di conseguire una maggiore funzionalità dell’opera come da evidenziato nella perizia di variante non sostanziale di cui sopra, il cui quadro tecnico economico è il seguente:

A) TOTALE OPERE A BASE D'ASTA 			                     € 40.676,23 
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 	€   1.377,40 
Importo a base d’asta		 			                                € 39.298,83 
Ribasso offerto 0,50 %                                                      €      196,49
	---------------
Importo contrattuale di variante	€ 40.479,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1) IVA 10% su opere in appalto 				                     €   4.047,97 
2) Spese tecniche per prog., d.l. e coord. sicurezza 	€   4.500,00 
3) Cap. 4% e iva 22% su spese tecniche		 	          €   1.209,60 
4) Spese gen. di prog. 2%, Art. 113 D.Lgs. 50/2016 	€      774,83 
5) imprevisti IVA compresa 				                          €      887,86 
--------------- 
Totale somme a disposizione 				                    € 11.420,26 
========== 
TOTALE GENERALE DI PROGETTO 			                    € 51.900,00

Dato atto che l’impresa appaltatrice ha accettato la suddetta perizia di variante non sostanziale, impegnandosi ad eseguire i lavori previsti con la sottoscrizione, senza riserve o eccezione alcuna, del verbale di concordamento nuovi prezzi in data 15.10.2019;

Dato atto che: 
- le modifiche apportate al progetto rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e non comportano nessun maggior onere, risultando l’importo complessivo immutato;
- l’importo del contratto subisce una variazione in aumento, inferiore al 5% dell’importo contrattuale di cui alla scrittura privata Rep. n. 867 del 26.09.2019, pari a complessivi € 1.925,16;
- che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;

Atteso che il costo dell’opera pari ad € 51.900,00 trova copertura finanziaria al codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.019 ex cap. 2547/4;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell’ufficio tecnico comunale

Visti:
-	il D. Lgs. 50/2016;
-	il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (per le parti in vigore); 
-	gli artt. 182, 183, 184, 185 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare la perizia di variante non sostanziale relativa ai lavori di “VALORIZZAZIONE E RECUPERO EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E IN PARTICOLARE DEL CENTRO STORICO”, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 dall’Arch. Taide Rozzi, Direttore dei Lavori, e composta dai seguenti elaborati che si allegano alla presente quale parte integrale e sostanziale:
-	R1.v: Relazione tecnica (variante non sostanziale)
-	Q.E.v: Quadri tecnici economici a confronto
-	Elenco prezzi e analisi prezzi
-	C1.v: Computo Metrico Estimativo
-	Quadro comparativo
-	Elaborati grafici: architettonico stato modificato e schema degli impianti
-	Atto di sottomissione
-	Verbale di concordamento nuovi prezzi

il cui quadro tecnico economico è il seguente:

A) TOTALE OPERE A BASE D'ASTA 			                      € 40.676,23 
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 	 €   1.377,40 
Importo a base d’asta		 			                                € 39.298,83 
Ribasso offerto 0,50 %                                                      €      196,49
                                                                                              ---------------
Importo contrattuale di variante                                  € 40.479,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1) IVA 10% su opere in appalto 				                     €   4.047,97 
2) Spese tecniche per prog., d.l. e coord. sicurezza 	€   4.500,00 
3) Cap. 4% e iva 22% su spese tecniche		 	           €   1.209,60 
4) Spese gen. di prog. 2%, Art. 113 D.Lgs. 50/2016 	€      774,83 
5) imprevisti IVA compresa 				                          €      887,86 
                                                                                               --------------- 
Totale somme a disposizione 				                     € 11.420,26 
                                                                                             ========== 
TOTALE GENERALE DI PROGETTO 			                     € 51.900,00

3. di formalizzare il contenuto di tale perizia mediane sottoscrizione di un atto di sottomissione, stipulato attraverso la forma di scrittura privata in modalità elettronica da registrarsi in caso d’uso a cura e spese dell’Impresa esecutrice, secondo lo schema dell’atto di sottomissione allegato;

4. per effetto della perizia di variante non sostanziale l’importo del contratto subisce una variazione in aumento, inferiore al 5% dell’importo contrattuale di cui alla scrittura privata Rep. n. 867 del 26.09.2019, pari a complessivi € 1.925,16; 

5. di dare atto che il costo complessivo dell’opera, a seguito delle modiche apportate, rimane immutato e quindi pari ad € 51.900,00;

6. di dare atto che il costo dell’opera pari ad € 51.900,00 trova copertura finanziaria al codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.019 ex cap. 2547/4 del bilancio corrente esercizio;

7. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per le competenze di legge.

SERVIZIO BILANCIO
Visto di regolarità contabile
(Art. 153  comma  5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA      

======================================================================
E' copia conforme all'originale.

li,                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-11-19
IL SEGRETARIO
li, 04-11-19                            f.to    GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

======================================================================