COMUNE DI ORTEZZANO
Provincia di Fermo
C.A.P. 63851	                            P.zza Umberto  I°, 4
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446       Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N.  112    del Reg.
N.217   del Reg. Gen.
	
Oggetto:
AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE - PROVVEDIMENTI.

CIG: ZBD262ABC7

Data
06-12-2018		

L'anno   duemiladiciotto, il giorno   sei del mese di dicembre, nel proprio ufficio.
Il sottoscritto geom. Luigino Vitali, in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica

   PREMESSO che:
•	L’Amministrazione Comunale intende provvedere alla manutenzione straordinaria delle facciate del Municipio eseguendo lavori di tinteggiatura e sostituendo le parti in eps ammalorate, come le cornici delle finestre, il marcapiano ed il cornicione; 
•	che il personale dell’Area Tecnica del Comune intestato è stato incaricato di redigere apposito progetto per lavori di cottimo di cui trattasi; 
•	i lavori consisteranno principalmente in: 
•	Tinteggiatura di tutte le facciate con tonalità in sintonia all’adiacente chiesa e con il contesto;
•	Demolizione delle cornici delle finestre e del marcapiano tutti in “eps”;
•	Fornitura e posa in opera di nuove cornici in pietra sulle finestre del fronte principale su Piazza Umberto I;
•	Fornitura e posa in opera di nuovo marcapiano del fronte principale su Piazza Umberto I, in materiale “eps”;
•	Sistemazione e/o sostituzione del cornicione in “eps”;

   VISTO, per quanto sopra, il relativo progetto dei lavori di: “Manutenzione straordinaria delle facciate del Palazzo Comunale”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

  VISTA, in merito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 39/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori
 Lavori a base d’asta …………………………………………………………………….…....€  38.130,00
 Oneri per la sicurezza (3% dei lavori a misura)……………………………………...…...€    1.525,20
 Totale Lavori (A) ……………………………………………………………………….…....€  39.655,20

B) Somme a disposizione per la stazione appaltante
IVA al 10% su lavori ……………………………………….….……….€   3.813,00
IVA al 10% su sicurezza..……………………………..…….………..€      152,52
Imprevisti, IVA compresa  ………………………………….…….……€  3.880,00
Cartellonistica e materiale grafico, IVA compresa…………………€  4.500,00
.
Totale somme a disposizione (B) ………………………………………………………€   12.345,52
     =========================================                                                                                                        
TOTALE INTERVENTO (A+B) ……………………………………………………arr.   €    52.000,00

   VISTA la propria precedente determinazione n.77/2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
	“……omissis…..
  .B) di affidare alla Ditta EDIL PM S.r.l. con sede legale a Fermo (FM) in C.da Mossa n. 4, p. IVA 01867200444,  l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle facciate del Palazzo Comunale”, per l’importo di € 35.530,00 ( euro trentacinquemilacinquecentotrenta/00), oltre oneri sicurezza ed I.V.A. nella misura di legge, al netto dell’offerto ribasso del 6.82 % sull’importo a base d’asta;
  .C) di approvare il seguente quadro economico a seguito dell’aggiudicazione dei lavori:

A) Lavori
 Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) ……………………………………………….…..€ 38.130,00
 a detrarre il ribasso d’asta del 6,82%..........................................................................€   2.600,00
 TOTALE LAVORAZIONI AL NETTO DEL RIBASSO………………………………………€ 35.530,00
 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)……………….………………………..….€   1.525,00
 Totale Lavori (A) …………………………………………………………………………….....€ 37.055,00

B) Somme a disposizione per la stazione appaltante
lavori su fattura………….………………………….…….…..…………€ 2.600,00
IVA 10% lavori su fattura...………………………….……………….…€   260,00
IVA al 10% su lavori (A)………………………….…………...……….€  3.705,50
Imprevisti, IVA compresa  ……………………….……………………€  3.880,00
Cartellonistica e materiale grafico, IVA compresa…………..……€  4.500,00

Totale somme a disposizione (B) …………………………………………………… €   14.945,50
   =========================================                                                                                                        
TOTALE INTERVENTO (A+B) …………………………………………………arr.   €    52.000,00

  .D) di considerare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’art.192 del D. Lgs. 267/2000;
…….omissis……”;

  DATO atto che dal quadro economico emergono alcune disponibilità residue derivanti dalle economie da ribasso d'asta conseguite in sede di aggiudicazione alla ditta appaltatrice ad oggi non ancora utilizzate pari ad  euro 2.860 iva inclusa; 

   DATO atto, inoltre, che sempre dal quadro economico emergono altre disponibilità residue derivanti dalla voce “imprevisti” nelle somme a disposizione dell’Ente non ancora utilizzate pari ad  euro 3.880,00 iva inclusa;

   CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori lavorazioni necessarie per la realizzazione a regola d’arte dello stesso progetto, come:
-	Idrolavaggio del paramento murario interessato da successiva tinteggiatura;
-	Ulteriori riprese di intonaco esterno;
-	Rasatura con malta a grana media del muro contro terra;
-	Applicazione di una mano di fissativo su tutta la superficie destinata alla tinteggiatura;
-	Realizzazione di massetto armato;
-	Fornitura e posa in opera di cordoli in travertino per le rampe;
-	Fornitura e posa in opera di pluviali – tubazioni - pozzetti prefabbricati;
-	Fornitura e posa in opera di soglie in travertino;
-	Riparazione della copertura con sostituzione di guaina e di coppi rotti;

  RAVVISATA la necessità di provvedere all’esecuzione delle nuove lavorazioni come sopra specificate, non rientranti nella progettazione approvata ma utili e necessarie al fine di ottenere un lavoro finale completo e a regola d’arte del Palazzo Comunale e dell’area compresa tra lo stesso e la chiesa di Santa Maria;

   RITENUTO quindi di poter procedere attraverso affidamento diretto in favore della sopra indicata ditta, sia per l’immediata disponibilità all’esecuzione del servizio di che trattasi, sia per garantire uniformità all’opera finale, in quanto già affidataria del progetto di “Manutenzione straordinaria delle facciate del Palazzo Comunale”;

   RILEVATO che, al fine di procedere all’esecuzione dei necessari lavori sopra richiamati, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica del Comune intestato, giusta Decreto sindacale n. 9 del 04/08/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016;

   DATO atto, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

   VISTE le linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

     DATO atto che il sottoscritto RUP, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta EDIL PM S.r.l. con sede legale a Fermo (FM);

   VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_14302473, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 02/04/2019;

   VISTA  la Delibera di Consiglio n. 15 del 21/06/2018 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2018”, ed in particolare la variazione di bilancio riguardante alcuni interventi connessi al miglioramento della dotazione infrastrutturale, al recupero di immobili e delle strutture destinate a servizi per la popolazione;
   VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

   VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

   VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

   VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

   VISTO il D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente;

   DATO atto che il Responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ai sensi degli artt.109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;

   VISTO il decreto sindacale n.9 del  04/08/2016 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

   DATO altresì atto che, tra il sottoscritto Responsabile del procedimento ed il soggetto destinatario degli effetti del presente atto, non sussistono situazioni di “conflitto di interesse” ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A

  .A) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

  .B) di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa, l’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta di euro 2.860,00 e dalla voce “imprevisti” di euro 3.880,00 entrambe i iva inclusa, per i lavori di “Manutenzione straordinaria delle facciate del palazzo comunale”;

  .C) di affidare alla ditta EDIL PM S.r.l. con sede legale a Fermo (FM) in C. da Mossa n. 4, p.i. 01867200444,  l’esecuzione delle lavorazioni ulteriori come sopra descritte, per l’importo di euro 6.127,00 + IVA di legge;

  .D) di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 6.739,50 all’interno del Capitolo 2566/0 del bilancio del corrente esercizio, come meglio in appresso specificato;

  .E) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 6.739,50 (euro seimilasettecentotrentanove/50):

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
Anno 2018	Euro  6.739,50	
TOTALE	Euro  6.739,50	

  .F) di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 6.739,50 IVA al 10% inclusa, in base alla seguente tabella: 

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica 
di bilancio	
				Capitolo	
Operatore economico 
EDIL PM
 (Fermo)	€ 6.739,50	2018	2018	2566/0	
TOTALE €  6.739,50	

  .G) di considerare il presente atto determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs. 267/00;

  .H) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

***************************

                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                  f.to Luigino geom. Vitali

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 06-12-2018 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, 06-12-2018
          Il Responsabile delle pubblicazioni
                             (Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
          f.to (Luigino geom. Vitali)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile e la copertura finanziaria

                                                                           Il Responsabile di 
                                                               Ragioneria e Servizio Finanziario
                                                                                   Il Sindaco
                                                                    f.to (Scendoni prof.ssa Giusy)

	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ortezzano, li 06-12-2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
              Luigino geom. Vitali