COMUNE DI ORTEZZANO
Provincia di Fermo
C.A.P. 63851	                            P.zza Umberto  I°, 4
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446       Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N.  122    del Reg.
N.242   del Reg. Gen.
	
Oggetto:
AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI PER CONSILIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE MURA CASTELLANE E DELLA SCALA DI P.ZZA F. CAVALLOTTI - PROVVEDIMENTI.

CIG: ZC7268249F

Data
27-12-2018		

L'anno   duemiladiciotto, il giorno   ventisette del mese di dicembre, nel proprio ufficio.
Il sottoscritto geom. Luigino Vitali, in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica

    PREMESSO che nel mese di marzo 2015 il territorio di questo Comune, come l’intero territorio regionale, è stato interessato da eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno causato, tra l’altro, particolari danni ad alcune infrastrutture viarie comunali;

   VISTA tutta l’intercorsa corrispondenza con i preposti Servizi della Regione Marche, nonché tutti i provvedimenti e documenti inerenti gli interventi emergenziali di che trattasi, in particolar modo quelli relativi all’invio delle “Schede” di rilevazione del danno, a firma del Sindaco e del Responsabile del Procedimento;

   PRESO atto che, a seguito di tutto quanto sopra, con D.C.D. N. 2/CDM15 del 07/10/2015 il Comune di Ortezzano è stato inserito nel piano degli interventi di cui all’art.1, comma 4, dell’Ordinanza del P.C.M. n. 264 del 03/07/2015, al n. 53 del surrichiamato Decreto Regionale, per € 20.000,00 relativi ad interventi da realizzare;

   VISTO il successivo Decreto Regionale del Commissario Delegato Maltempo Marzo 2015, N. 2/CDM15 del 04/03/2016 con il quale, tra l’altro, gli Enti devono presentare al competente Servizio Regionale Marche la progettazione appaltabile relativa agli interventi di cui agli allegati “3” e “4”, come stabilito dal Decreto  N. 2/CDM15 del 07/10/2015;

   VISTO, per quanto sopra, il relativo progetto dei lavori di : “Consolidamento e ripristino delle mura castellane e della scala di piazza Felice Cavallotti”

   VISTA, in merito, la propria determinazione n. 95/2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
“……omissis…..
.A)  Di approvare il progetto esecutivo predisposto dall’Ufficio tecnico di questo Comune in data 05/10/2017, relativo ai lavori di “Consolidamento e ripristino delle mura castellane e della scala di Piazza Felice Cavallotti”, composto dai seguenti elaborati:
•	Relazione tecnica e documentazione fotografica;
•	Elaborato grafico;
•	Quadro Economico e Computo metrico estimativo;
•	Cronoprogramma;
  .B) di approvare il Quadro Economico relativo ai lavori di che trattasi, il quale presenta le seguenti risultanze finali:
•	Importo lavori a base d’asta…………………..		€ 16.392,50
di cui oneri per la sicurezza (€  386,31)
•	I.VA. 22 % su lavori…………………………….		€   3.606,55
                                                      =================================
TOTALE PROGETTO (arrot.)….           € 20.000,00
…….omissis……”;

   VISTA la propria precedente determinazione n. 73/2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale tra l’altro è stato disposto:
1)di approvare il seguente quadro economico a seguito dell’aggiudicazione dei lavori:
A) Lavori
 Importo lavori al netto dell’offerto ribasso………………………………….…..€ 13.515,62
 Oneri per la sicurezza (3% dei lavori a misura)…………….…………………€      491,77
 Totale Lavori (A) …………………………………………………….……….…...€ 14.007,39

   B) Somme a disposizione per la stazione appaltante
IVA al 22% su lavori ………………….……………………….€     3.081,63
         Imprevisti e lavori su fattura…………………………………..€     2.909,83
Totale somme a disposizione (B) ……………………………………………...…€ 5.991,46
                                                                           =================================
TOTALE INTERVENTO (A+B) ……………………………………….…..arrot.  € 20.000,00

2) di affidare alla Ditta EDIL WORLD di Mazzaferri Laura  con sede in Ortezzano (FM) in Via Papetti n. 11, Cod. Fisc. MZZLRA75B50H501D e P.I. 02281260444, l’esecuzione dei lavori di  “Consolidamento e ripristino delle mura castellane e della scala di Piazza Felice Cavallotti” per l’importo di € 17.089,02  (euro diciassettemilaottantanove/02) I.V.A. compresa nella misura vigente, al netto dell’offerto ribasso del 15,00 % sull’importo a base d’asta;
….omissis…..

   DATO atto che dal quadro economico emergono alcune disponibilità residue derivanti dalle economie da ribasso d’asta conseguite in sede di aggiudicazione alla ditta appaltatrice non ancora utilizzate;

   CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di provvedere a lavorazioni ulteriori necessarie per il completamento a regola d’arte dell’opera, ovvero ulteriori riprese di muratura e realizzazione di idoneo gocciolatoio  per tutta la lunghezza della scala al fine di allontanare l’acqua piovana e proteggere la struttura in cls;

   RAVVISATA la necessità di provvedere all’esecuzione delle nuove lavorazioni come sopra specificate, non rientranti nella progettazione approvata ma utili e necessarie al fine di ottenere un lavoro finale completo e a regola d’arte del muro e della scala oggetto di consolidamento;

   VISTA la comunicazione pervenuta al ns prot. n. 4191 del 10/12/2018, con la quale la Regione Marche ha ritenuto ammissibile la nostra richiesta prot. n. 3983 del 22/11/2018 di utilizzo delle economie da ribasso d’asta esclusivamente nell’ambito della progettazione oggetto di finanziamento;

   RITENUTO quindi di poter procedere attraverso affidamento diretto in favore della ditta EDIL WORLD di Mazzaferri Laura, con sede in via Papetti n. 11 nel Comune di Ortezzano (FM), p.i. 02281260444, per la manifestata immediata disponibilità all’esecuzione dei lavori di che trattasi, in quanto già affidataria del progetto di “Consolidamento e ripristino delle mura castellane e della scala di piazza Felice Cavallotti”;

   RILEVATO che, al fine di procedere all’esecuzione dei necessari lavori sopra richiamati, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica del Comune intestato, giusta Decreto sindacale n. 9 del 04/08/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016;

   VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2:
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

  DATO atto, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

   VISTE le linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

   VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_13793475, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 07/03/2019;

   VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

   VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

   VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

   VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

   DATO atto che il Responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ai sensi degli artt.109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;

   VISTO il decreto sindacale n.9 del  04/08/2016 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

   DATO altresì atto che, tra il sottoscritto Responsabile del procedimento ed il soggetto destinatario degli effetti del presente atto, non sussistono situazioni di “conflitto di interesse” ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

  .A) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

  .B) di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa, l’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta di euro 2.910,00 iva inclusa, per i lavori di “Consolidamento  e ripristino delle mura castellane e della scala di piazza Felice Cavallotti”;

  .C) di affidare alla ditta EDIL WORLD di Mazzaferri Laura  con sede in Ortezzano (FM), in Via Papetti n. 11, Cod. Fisc. MZZLRA75B50H501D e P.I. 02281260444,  l’esecuzione delle lavorazioni ulteriori come sopra descritte, per l’importo netto di € 2.385,00 come segue:

Lavori	Quantità	Prezzo unitario	Costo totale	
Descrizione				
Lavorazioni ulteriori necessarie al completamento dell’opera come sopra descritte	Totale		€  2.385,00	
	I.V.A. 22% 	€    524,70	
	Spesa complessiva
Arr.  	€ 2.909,70
€ 2.910,00	

  .D) di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 2.910,00 all’interno del capitolo 1480/0 impegno 00147-2018 del bilancio del corrente esercizio, come meglio in appresso specificato;

  .E) di approvare il seguente crono programma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 2.910,00 (euro duemilanovecentodieci/00):

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
Anno 2018	Euro 2.910,00	
TOTALE	Euro 2.910,00	

  .F) di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 2.910,00 IVA al 22% inclusa, in base alla seguente tabella: 

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica 
di bilancio	
				Capitolo	

Operatore economico

EDIL WORLD
(Ortezzano)	€ 2.910,00	2018	2018	

1480/0	
TOTALE   € 2.910,00	
  .G) di considerare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’art.192 del D. Lgs. 267/2000;

  .H) di demandare, se necessario, a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione resa e regolarità contributiva;

  .I) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

************************

                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                  f.to Luigino geom. Vitali

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 27-12-2018 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, 27-12-2018
          Il Responsabile delle pubblicazioni
                             (Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
          f.to (Luigino geom. Vitali)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile e la copertura finanziaria

                                                                           Il Responsabile di 
                                                               Ragioneria e Servizio Finanziario
                                                                                   Il Sindaco
                                                                    f.to (Scendoni prof.ssa Giusy)

	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ortezzano, li 27-12-2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
              Luigino geom. Vitali