COMUNE DI ORTEZZANO
Provincia di Fermo
C.A.P. 63851	                            P.zza Umberto  I°, 4
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446       Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N.  42    del Reg.
N.79   del Reg. Gen.
	
Oggetto:
LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN CENTRO STORICO" - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER LAVORI IMPREVISTI ED IN ECONOMIA - PROVVEDIMENTI.

CIG: Z252171575

Data
10-05-2018		

L'anno   duemiladiciotto, il giorno   dieci del mese di maggio, nel proprio ufficio.
Il sottoscritto geom. Luigino Vitali, in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica

   PREMESSO che:

•	questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale; 
•	in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel 
     territorio comunale;
•	si sono registrati danni agli edifici, sia pubblici sia privati;
•	esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

   RILEVATO che in data 30/10/2016 si è registrata una nuova fortissima scossa che ha aggravato la preesistente situazione di emergenza;

   RILEVATO, altresì, che in data 18/01/2017 si sono verificate ulteriori frequenze sismiche che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti;

   VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato per giorni 180 dalla data del presente predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi degli eccezionali eventi sismici che ha   interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

   VISTA l’Ordinanza  n. 388 del 26 agosto 2016 “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

   VISTE:
•	la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
•	delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
•	la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
•	la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato di 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni;

   CONSIDERATO che a seguito della ricognizione dei danni riportati dagli edifici siti nel centro storico di questo Comune, si sono riscontrate particolari situazioni di criticità per i seguenti immobili:

Scheda	LOCALIZZAZZIONE	RIF. CATASTALI	PROPRIETA’	PARERE	

1		
	Centro storico 		Fg. 5 part. 126	Comune di Ortezzano	Scheda AeDES
n. 1 del 01/06/2017
“è necessario proteggere il passaggio sul vicolo[…]	

Scheda	LOCALIZZAZZIONE	RIF. CATASTALI	PROPRIETA’	PARERE	

2
		
	Centro storico 		Fg. 5 part. 291-292	Maule Yvonne Rosemarie	Scheda VV.FF.
[…]inaccessibilità totale del fabbricato – intransitabilità […]sottostante al fabbricato […]	

   VISTO che i pericoli riscontrati dalle schede coinvolgono vie pubbliche, patrimonio pubblico e quindi la pubblica incolumità;

   DATO atto che il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica è stato invitato dall’Amministrazione di provvedere all’affidamento del servizio tecnico per la progettazione necessaria degli interventi N.1 e 2 a professionista idoneo ed abilitato;

   RILEVATO pertanto che è necessario ed urgente provvedere all’esecuzione degli interventi avanti citati ed affidare la progettazione e la direzione dei lavori per la MESSA IN SICUREZZA delle opere suddette, a tutela della pubblica e provata incolumità, anche in considerazione dell’imminente stagione invernale che potrebbe ulteriormente aggravare lo stato di pericolo degli immobili da porre in sicurezza;

   VISTA, in merito a quanto precede,  la  propria precedente determinazione n. 82/2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
“…..omissis…….
1)	di affidare il servizio tecnico di “Progettazione, direzione lavori e contabilità per n.2 interventi di messa in sicurezza di immobili nel centro storico di Ortezzano”, al professionista idoneo ed abilitato: De Santis arch. Fernando con studio in Via Vicolo Innominato n. 4, 63854 Santa Vittoria in Matenano, c.f. DNSFNN61P14I315L,…..omissis…….”;
……omissis…….”;

   VISTE le prodotte perizie relative agli interventi di messa in sicurezza di che trattasi, redatte dal suddetto professionista incaricato;

   DATO atto che le stesse sono state formulate, per quanto attiene all’incidenza economica, utilizzando per i relativi computi metrici l’apposito “Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2016”, approvato con Ordinanza 14 dicembre 2016;
    
   VISTA, in merito a quanto tutto precede, la propria precedente determinazione n.83/2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
“……omissis……
  .A) di approvare in linea tecnica le perizie relative alla messa in sicurezza di n.2 immobili ubicati in centro storico di Ortezzano (FM), come in appresso:
….omissis…..
•	Fabbricato centro storico di proprietà Maule Yvonne Rosemarie – Foglio n.5 partt.291-292, composta dai seguenti elaborati:
•	Documentazione fotografica;
•	Computo metrico estimativo che presenta le seguenti risultanze:
Importo lavori compresi oneri sicurezza….	€ 5.952,92
Spese tecniche………………..			€    714,35
IVA su lavori .............................			€    595,29
Inarcassa ed IVA su spese tecniche…….		€    192,09
Lavori in economia ed impresti …………..	€    892,94
                                 ================================
                                  TOTALE PERIZIA…...	€ 8.347,52
…….omissis……..”;

   VISTA, altresì, a seguito della determina di cui al punto che precede, la successiva UTC 85/2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
“….omissis……
  .A) Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore economico ACCIARRI COSTRUZIONI srl, p. IVA 01384970446, con sede a Montalto delle Marche (AP) in Via Valle Falciana n. 3/A,  il contratto per l’espletamento dei lavori di “messa in sicurezza”  Fabbricato centro storico di proprietà Maule Yvonne Rosemarie – Foglio n.5 partt.291-292, per il corrispettivo di € 6.479,82 (euro seimilaquattrocentosettantanove/82) compresa I.V.A. ;
……….omissis…….”;

   DATO atto che, nelle more dell’inizio dei lavori, ed a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato in loco successivamente alla pulizia delle aree adiacenti e circostanti l’immobile oggetto di intervento, così come anche riferito dal professionista incaricato, si è ritenuto necessario rimodulare l’originaria perizia, prevedendo interventi meno impattanti sulla via pubblica ed altresì meno invadenti su edificio privato non direttamente interessato dal sisma;

   VISTA, in merito, la nuova rimodulata perizia redatta dal professionista incaricato, acclarata al protocollo dell’Ente in data 22/03/2018 al n° 1136, composta dai seguenti elaborati:
•	Tavola Unica interventi di messa in sicurezza;
•	Relazione tecnica;
•	Relazione di calcolo tiranti e chiavi;
•	Elenco prezzi;
•	Computo metrico estimativo;
•	Documentazione fotografica;

   DATO quindi atto che, come rilevabile dagli atti di perizia, l’intervento presenta le seguenti risultanze economiche:
Importo lavori compresi oneri sicurezza….	€ 5.952,21
Spese tecniche………………..			€   714,35
IVA su lavori .............................			€    595,22
Inarcassa ed IVA su spese tecniche…….		€    192,02
Lavori in economia ed impresti …………..	€    892,83
                                 ================================
                                  TOTALE PERIZIA…...	€ 8.346,63

   RITENUTO pertanto possibile e doveroso procedere all’approvazione della perizia di che trattasi, contestualmente confermando l’avvenuto affidamento dei lavori disposto con proprio atto n.85/2017 in quanto non variato, se non con leggerissima diminuzione nei centesimi, l’importo affidato;

  VISTA la propria precedente determinazione n.18/2018, esecutiva ai sensi di legge con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
“….omissis……
.A) di approvare la rimodulata perizia relativa alla messa in sicurezza  “Fabbricato centro storico di proprietà Maule Yvonne Rosemarie – Foglio n.5 partt.291-292”, composta dai seguenti elaborati:
•	Tavola Unica interventi di messa in sicurezza;
•	Relazione tecnica;
•	Relazione di calcolo tiranti e chiavi;
•	Elenco prezzi;
•	Computo metrico estimativo;
•	Documentazione fotografica;

  .B) di confermare le risultanze economiche della perizia in parola come segue:
Importo lavori compresi oneri sicurezza….	€ 5.952,21
Spese tecniche………………..			€   714,35
IVA su lavori .............................			€   595,22
Inarcassa ed IVA su spese tecniche…….		€    192,02
Lavori in economia ed impresti …………..	€    892,83
                                 ================================
                                  TOTALE PERIZIA…...	€ 8.346,63

……….omissis…….”;

  DATO atto che il professionista incaricato, Arch. Fernando De Santis, ha chiesto con nota prot. n. 1702 del 09/05/2018 l’autorizzazione per utilizzare gli importi relativi ai “lavori in economie ed imprevisti” previsti nel Quadro Economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;

   DATO atto che le somme occorrono per la messa in sicurezza della sommità di un muro di sostegno in muratura, adiacente e facente parte dell’immobile oggetto di intervento, e che per tale lavoro si computano euro 880,80 IVA inclusa;

   RITENUTO possibile dare il consenso all’utilizzo delle somme suddette per garantire la pubblica incolumità del’area;

     CONSIDERATO che la Ditta ACCIARRI COSTRUZIONI srl, con sede a Montalto delle Marche (AP), è già affidataria dell’intervento principale e quindi si procede all’affidamento diretto alla suddetta ditta ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016:

   DATO atto che il sottoscritto RUP, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta ACCIARRI COSTRUZIONI srl di Montalto delle Marche (AP);

   VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_10714039, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 27/06/2018;

  RILEVATO che, in merito a tutto quanto precede, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica del Comune intestato, giusta Decreto sindacale n.9 del  04/08/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016;

   RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

   VISTO il decreto sindacale n.9 del  04/08/2016 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

   DATO atto che, non comportando in questa fase l’adozione del presente atto alcun onere a carico dell’Ente, non necessita acquisire il parere del Responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale in merito alla copertura finanziaria della spesa;

   VISTI
−	il Decreto Legislativo  n. 192/2005;
−	il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
−	il Decreto Legislativo n.50/2016 nel testo vigente

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

  .A) di approvare l’utilizzo della somma relativa ai “lavori in economie ed imprevisti” prevista nel progetto di messa in sicurezza  “Fabbricato centro storico di proprietà Maule Yvonne Rosemarie – Foglio n.5 partt.291-292”, redatto dall’Arch. Fernando De Santis e composto dai seguenti elaborati:
•	Relazione tecnica;
•	Elaborato Grafico;
•	Elenco prezzi;
•	Computo metrico estimativo;
•	Documentazione fotografica;

  .B) di confermare altresì l’affidamento dei lavori  di “Messa in sicurezza  Fabbricato centro storico di proprietà Maule Yvonne Rosemarie – Foglio n. 5 partt. 291-292” alla ditta ACCIARRI COSTRUZIONI srl, p. IVA 01384970446, con sede a Montalto delle Marche (AP) in Via Valle Falciana n. 3/A, per il corrispettivo di € 6.547,43 (euro seimilacinquecentoquarantasette/43) compresa I.V.A., cifra questa comprensiva di € 880,80 rientrante tra le somme a disposizione dell’Amm.ne del Q.T.E. di perizia;

 .C) di imputare la complessiva spesa pari ad € 880,80 (euro ottocentottanta/80) al Cap. 2550/0 del Bilancio dell’Ente.

****************************

                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                  f.to Luigino geom. Vitali

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 10-05-2018 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, 10-05-2018
          Il Responsabile delle pubblicazioni
                             (Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
          f.to (Luigino geom. Vitali)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile e la copertura finanziaria

                                                                           Il Responsabile di 
                                                               Ragioneria e Servizio Finanziario
                                                                        f.to (Patrizio dr Cipriani)

	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ortezzano, li 10-05-2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
              Luigino geom. Vitali