C O M U N E    D I    O R T E Z Z A N O
Provincia di Fermo
C.A.P. 63851	                                     P.zza Umberto  I°, 4
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446             Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N.  96    del Reg.
N.189   del Reg. Gen.
	
Oggetto:
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE LAVORI DI "RAFFORZAMENTO LOCALE AUDITORIUM" EX CHIESA S. ANTONIO DA PADOVA - PROVVEDIMENTI.

CIG: 

Data
16-09-2019		

L'anno   duemiladiciannove, il giorno   sedici del mese di settembre, nel proprio ufficio.
Il sottoscritto geom. Luigino Vitali, in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica

   PREMESSO che l’art. 1, comma 107, L. 145/2018 recita testualmente:
”Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante”;

   PREMESSO che, in applicazione della suddetta norma questo Comune, con popolazione inferiore a 2000 abitanti, risulta assegnatario della somma di € 40.000,00 come disposto dal D.M. 10.01.2019;

   VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2019, immediatamente eseguibile,  con la quale si è proceduto ad approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, nel quale è stato inserito il suddetto contributo indicandone l’utilizzo, nel rispetto delle finalità di legge, per interventi di messa in sicurezza di immobili diversi di proprietà comunale;

   VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 04/04/2019, immediatamente eseguibile, con la quale, nel fornire gli indirizzi per l’impiego dei suddetti fondi, veniva demandata all’ Ufficio Tecnico Comunale la redazione di n. 2 progetti esecutivi tra cui il progetto di “Lavori di riparazione e rafforzamento locale Auditorium ex Chiesa Sant’Antonio da Padova”;

   VISTO il progetto esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai “Lavori di riparazione e rafforzamento locale Auditorium ex Chiesa Sant’Antonio da Padova” e composto dai seguenti elaborati:
01.	Relazione generale
02.	Documentazione fotografica
03.	Computo metrico 
04.	Elenco prezzi
05.	Elaborati grafici (stato di fatto-stato di danno-stato di progetto) 
06.	Elaborati grafici strutturali
07.	Relazione tecnica di calcolo

   VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 20/04/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra per una spesa complessiva di € 27.202,00 (euro ventisettemiladuecentodue/00) di cui:

- importo lavori a misura.....……………….…….. €  24.102,09
- importo sicurezza………………………………. €        626,99
- IVA al 10% su lavori……………………………. €    2.472,91
                            =================================
                                     TOTALE ……………….. €  27.202,00;

   DATO atto che con la Delibera di Giunta di cui sopra è stato demandato all’Ufficio Tecnico Comunale competente quanto occorrente per la realizzazione delle opere di cui al progetto come approvato, nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero dell’Interno con disposizioni pervenute all’Ufficio protocollo di questo Comune, subordinandosi comunque l’avvio dei lavori al rilascio del parere favorevole della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

   VISTA la propria precedente determina n. 41/2019 con la quale tra l’altro veniva disposto quanto segue: 
“…omissis…
  .B) Di confermare ed affidare, per le ragioni sopra indicate, alla Ditta F.lli Luciani S.N.C. di Luciani Marco & Bruno con sede in via Incancellata n. 149 – 63813 Monte Urano (FM), P.I. 01287110447, l’esecuzione dei “Lavori di riparazione e rafforzamento locale Auditorium ex Chiesa Sant’Antonio da Padova”, per l’importo di € 26.936,86 (euro ventiseimilanovecentotrentasei/86) compresi I.V.A. nella misura vigente ed oneri per la  sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del 1,00% sull’importo a base d’asta;

  .C) Di approvare il seguente quadro economico a seguito dell’aggiudicazione dei lavori:

A)	Lavori
- importo lavori a misura soggetti a ribasso.....……………….….….. €  24.102,09
- a detrarre il ribasso d’asta del 1,00% …………………….........…...€        241,02
- TOTALE LAVORAZIONI AL NETTO DEL RIBASSO ……………..€   23.861,07
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ………………….......€        626,99
Totale Lavori (A) …………………………………………………….... €   24.488,06

B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante
- IVA 10% su lavori (A) …………………………………………………€     2.448,80
- ribasso d’asta…………………………………………………………..€        265,14
Totale Somme (B) …………………………………………………….... €    2.713,94

Totale (A+B) ……….…………………………………………...…….... €  27.202,00
…omissis…”

   DATO atto che in data 10/09/2019 è stata proposta dai Direttori Lavori arch. Acciarri Alice e ing. De Santis Andrea  perizia di assestamento finale costituita dai seguenti elaborati:
1.	Relazione tecnica
2.	Computo metrico estimativo 
3.	Elenco prezzi
4.	Quadro economico di raffronto
5.	Raffronto categorie
6.	Verbale di concordamento nuovi prezzi
7.	Atto di sottomissione;

   RILEVATO che la suddetta perizia è dovuta a maggiori lavorazioni rispetto alle quantità di progetto e a nuove lavorazioni introdotte allo scopo di migliorare l’intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto oltre che per sopraggiunte esigenze concordate con l’Amministrazione;

   DATO ATTO che l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento prezzi sono stati sottoscritti senza riserve dalla ditta affidataria in data 19/08/2019;

   RILEVATO che le modifiche apportate nella perizia di assestamento finale non comportano aumenti o diminuzioni all’importo contrattuale che pertanto rimane invariato nella somma di € 26.936,86 compresi IVA nella misura vigente ed oneri per la sicurezza;

   VERIFICATO che le opere in variante rientrano tra quelle classificabili ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

   RITENUTO quindi di poter approvare la perizia di assestamento finale e i relativi elaborati  redatti dai Direttori Lavori;

   VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

   VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

   VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

   VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

   VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

   DATO atto che, non comportando l’assunzione del presente provvedimento alcun aumento di spesa per l’Ente, non necessita acquisire il parere del Responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale relativo alla relativa copertura finanziaria;

   VISTO il decreto sindacale n.9 del  04/08/2016 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

   DATO altresì atto che, tra il sottoscritto Responsabile del procedimento ed il soggetto destinatario degli effetti del presente atto, non sussistono situazioni di “conflitto di interesse” ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

  .A) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

  .B) di approvare la perizia di variante redatta dai Direttori Lavori arch. Acciarri Alice e ing. De Santis Andrea consistente nei seguenti allegati:
1.	Relazione tecnica
2.	Computo metrico estimativo 
3.	Elenco prezzi
4.	Quadro economico di raffronto
5.	Raffronto categorie
6.	Verbale di concordamento nuovi prezzi
7.	Atto di sottomissione

  .C) di approvare l’Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, già sottoscritti dall’impresa F.lli Luciani S.N.C. di Luciani Marco & Bruno, senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all’esecuzione delle opere previste nella perizia di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;
 
  .D) di dare atto che l’approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente, in quanto la stessa rientra nei limiti dell’importo originario contrattuale;

  .E) di confermare  e considerare il presente atto quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del D. Lgs 267/2000;

  .F) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

  .G) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

***************************************

 

                                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                            f.to Luigino geom. Vitali

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 16-09-2019 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, 16-09-2019
                Il Responsabile delle pubblicazioni
                           (Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
          f.to (Luigino geom. Vitali)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile e la copertura finanziaria

                                                                                  Il Responsabile di   Ragioneria 
                                                                                          e Servizio Finanziario
                                                                                     f.to (Giampaoli dr Andrea)

	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ortezzano, li 16-09-2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica
              Luigino geom. Vitali