C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   IV   -  ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

----------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE NUMERO  133 DEL  18-04-18
REGISTRO GENERALE NUMERO 250

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSTACHIO IN SAN PLACIDO DI USSITA DISTINTA AL N.C.E.U. AL F.43  MAPPALE A. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE COMPENSI.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
-	n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
-	n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
-	n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta é stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
-	n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Commissario Straordinario, dott. Mauro Passerotti, con decreto n. 4 del 21/08/2017 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - Assetto ed uso del Territorio" con decorrenza dal 11.09.2017;
PREMESSO che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumuli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;
RAVVISATO che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni agli immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;
RAVVISATO che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell’incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita “zona rossa”, con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni nell’ordinanza stabilite;
RAVVISATO che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata riperimetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;

ATTESO che il Comune di Ussita è stato a seguito di tali eventi sismici quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, debbono rimanere nella zona (allevatori). L’intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure e di notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;
CONSIDERATO che in questo drammatico contesto vi è l’estrema e urgentissima necessità di ridurre la zona rossa a distanza di oltre un anno dall’ultimo evento sismico onde consentire alla popolazione collocata nelle strutture alberghiere di poter ritornare nel proprio territorio anche tramite l’imminente installazione delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza);

RAVVISATO che per poter ridurre la zona rossa e riaprire la maggior parte della viabilità, sono stati espletati specifici sopralluoghi dal GTS (Gruppo Tecnico di Supporto) formato dai seguenti Enti:
o	Vigili del Fuoco
o	Dipartimento Protezione Civile
o	Tecnico Comunale
o	Unità di Crisi MIBACT (Soprintendenza) 
aventi lo scopo di valutare sia il livello del danno strutturale degli immobili ed i conseguenti interventi di messa in sicurezza da eseguire, sia le modalità dei medesimi, sia il soggetto deputato all’esecuzione degli stessi; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
 
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA l’Ordinanza capo dipartimento protezione civile n. 400 del 31 ottobre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/201; 

RAVVISATO che fino a qualche tempo fa i Vigili del Fuoco eseguivano direttamente alcuni interventi di messa in sicurezza non particolarmente impegnativi, ma ad oggi purtroppo a causa dell’ingente lavoro a fronte delle poche maestranze, i medesimi hanno delegato completamente l’esecuzione degli interventi ai Comuni di appartenenza; 

RICHIAMATE le procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016; 

RAVVISATO che in data 22.02.2017 è stato effettuato il sopralluogo del Gruppo di lavoro per la Salvaguardia e la prevenzione dei Beni Culturali dai rischi naturali in Loc. San Placido per eseguire il rilievo del danno al bene culturale che “… presenta crolli in facciata, sulla parete retrostante l’altare e su una parete laterale si riscontrano problemi dovuti a scarsa qualità della muratura (ammorsamento assente)… “ pertanto risultato inagibile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2017 con il quale è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RAVVISATO che con nota prot. 432 del 05.05.2017 la Curia Arcivescovile di Camerino-S.Severino Marche, ha specificato che alla luce del tavolo tecnico organizzato dal commissario del governo per la ricostruzione è emerso che il soggetto attuatore per la messa in sicurezza delle chiese pericolanti su via Pubblica è il Comune di appartenenza e che occorre pertanto procedere velocemente in tal senso;

RAVVISATO che in data 28.06.2017 è stato effettuato il sopralluogo del G.T.S., C.C.R. n. 3147 del 14.06.2017 per accertare le condizioni di pericolosità su Via Pubblica della Chiesa di S. Eustachio in loc. San Placido di Ussita distinto al N.C. al F. 43 P.lla A di proprietà della Curia Arcivescovile con esito P3 (interventi rilevanti), dal quale si evince la necessità della messa in sicurezza della medesima;

RAVVISATO che occorre procedere, con estrema urgenza alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza previa la redazione della progettazione con specifica perizia estimativa, onde poter poi procedere alla fase esecutiva dell’intervento; 

VISTO che l’ufficio tecnico comunale in questa fase di emergenza non è ancora al completo di personale ed è oberato di lavoro e sommerso dalle molteplici incombenze della ricostruzione per cui non riesce ad espletare la progettazione con i propri tecnici interni in quanto tra l’altro si trova in una sede provvisoria e ristretta priva delle attrezzature di progettazione necessarie;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che in relazione all’affidamento del servizio in parola, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura di affidamento diretto, disciplinata dall’art. 36 del Codice dei contratti, in quanto trattasi di servizi inferiori a quarantamila €, per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RAVVISATO che si ritiene opportuno consultare tecnici che abbiano fatto specifica richiesta, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione secondo la vigente normativa di settore; 

RAVVISATO che all’uopo sono stati contattati per le vie brevi:

-	Ing. Antonio Bettacchi con studio tecnico in Via Roma, 43, Pievetorina (MC), iscritto all’ordine degli Ingegneri di Macerata al n. 326 e all’elenco speciale dei professionisti per la ricostruzione di cui al D.L. 189 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;

-	Arch. Rocco Peluso con studio tecnico in C.so Garibaldi, 133 Isernia (IS), iscritto all’ordine degli architetti di Isernia al n. 55 e all’elenco speciale dei professionisti per la ricostruzione di cui al D.L. 189 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;

RAVVISATO che i medesimi si sono resi disponibili ad eseguire l’incarico per la messa in sicurezza della chiesa di cui sopra in tempi brevi e secondo i compensi professionali stabiliti dalla vigente normativa sul sisma;

CONSIDERATO che l’importo presunto dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Eustachio in loc. San Placido era pari a € 290.000,00 con un ammontare di oneri tecnici pari al 10% e quindi ad € 29.000,00 + cap 4% + iva 22%; 

RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’affidamento del servizio in parola;

RICHIAMATA la propria determina n. 76 del 13.06.2017 con la quale si è stabilito di: 
-	incaricare l’Ing. Antonio Bettacchi con studio tecnico in Via Roma, 43, Pievetorina (MC), iscritto all’ordine degli Ingegneri di Macerata al n. 326 e all’elenco speciale dei professionisti per la ricostruzione e l’Arch. Rocco Peluso con studio tecnico in C.so Garibaldi, 133 Isernia (IS), iscritto all’ordine degli architetti di Isernia al n. 55 e all’elenco speciale dei professionisti per la ricostruzione, per la redazione della perizia per la messa in sicurezza della Chiesa Sant’Eustachio in loc. San Placido, compresa la direzione e contabilità lavori, la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione e il certificato di regolare esecuzione per un importo presunto di lavori pari a € 290.000,00 con un ammontare di oneri tecnici pari al 10% e quindi ad € 29.000,00 + cap. 4% € 1.160,00 +iva 22% € 6.635,20 per un totale di € 36.795,20;
-	dare atto che la somma di cui sopra trova copertura finanziaria al cap.1210 del bilancio 2017 in corso di predisposizione ove verrà prevista la necessaria disponibilità dando atto che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

RAVVISATO che con nota del 14.06.2017 assunta al protocollo comunale al n. 6391 in data 14.06.2017 l’Arch. Rocco Peluso e l’Ing. Antonio Bettacchi hanno consegnato la perizia relativa alla messa in sicurezza della chiesa di cui trattasi distinta al N.C. al F.43 p.lla A, formata dai seguenti elaborati: 

Tav 1 - Relazione generale 
Tav 2 - Documentazione fotografica
Tav 3 – Inquadramento territoriale
Tav 4 – Progetto -Pianta
Tav 5 – Progetto-Prospetti
Tav 6 – Particolari costruttivi
Tav 7 – Elenco Prezzi
Tav 8 – Computo metrico estimativo
Tav 9 – Capitolato speciale d’appalto
Tav 10– Quadro Tecnico Economico
Tav 11 – Relazione di calcolo
Tav 12 – Piano di Sicurezza

RAVVISATO che la suddetta perizia è stata trasmessa dallo scrivente Comune con nota prot. n. 6602 del 22.06.2017 alla Regione Marche per l’approvazione di competenza;

RAVVISATO che la Regione Marche Ufficio Speciale per la Ricostruzione con propria nota prot. n. 791883 del 09.08.2017 assunta al protocollo comunale al n. 7976 del 11.08.2017 ha chiesto “soluzioni tecniche alternative” finalizzate all’economicità dell’intervento;

RAVVISATO che con pec del 18.09.2017 assunta al Protocollo comunale al n. 8876 del 19.09.2017, i tecnici incaricati hanno trasmesso allo scrivente comune la documentazione progettuale richiesta dalla Regione con nota di cui sopra;

RAVVISATO che lo scrivente Comune con pec del 19.09.2017 ha girato la suddetta documentazione progettuale alla Regione Marche per il nullaosta di competenza;

RAVVISATO che la Regione Marche con propria nota prot. 937805 del 25.09.2017 ha comunicato il rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’intervento condizionatamente al rispetto delle prescrizioni di:
-	non inserire in contabilità finale la voce del C.M.E. n.9 “Analisi prezzo 05”;
-	stralciare dal QTE la voce “Spesa manutenzione giunti, ecc.”;

RAVVISATO che i progettisti con nota assunta al protocollo comunale al n. 9053 in data 26.09.2017 hanno consegnato la seguente documentazione in adeguamento alle prescrizioni di cui sopra:

Tav 7 – Elenco Prezzi ed Analisi prezzi unitari
Tav 8 – Computo metrico estimativo
Tav 9 – Capitolato speciale d’appalto
Tav 10– Quadro economico riepilogativo e parcella professionale;

CONSIDERATO che, a seguito delle suddette prescrizioni e per un cambio di direttive da parte dei funzionari dell’U.S.R. di Macerata, per cui le spese tecniche di progettazione vengono riconosciute, non più al 10%, bensì pari al 5% dell’importo presunto dei lavori, rispetto alle somme impegnate al cap. 1210 a favore dei professionisti incaricati per coprire l’ammontare delle spese tecniche per la redazione della perizia tecnica e per il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, relativamente alla messa in sicurezza della chiesa di S. Eustachio pericolante su via pubblica sito in loc. San Placido distinto al N.C. al F. 43 mappale A di proprietà dell’Arcidiocesi di Camerino, si ravvisa un’economia di spesa sugli impegni presi;

RAVVISATO che occorre procedere con estrema urgenza all’approvazione della suddetta perizia onde effettuare quanto prima l’intervento di messa in sicurezza di cui trattasi; 

VISTA la delibera Giunta Municipale n. 66 del 12/10/2015 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la definizione dei criteri di riparto del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 del D. Lgs. 163/2006” (detto Regolamento) per funzioni tecniche di RUP, ora art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 6 - Quantificazione del fondo, comma 1 e 2 del suddetto Regolamento; 

RICHIAMATO l’art. 7 - Ripartizione del fondo, comma 1 lettera b) del suddetto Regolamento;

RAVVISATO che per lavori con importo fino ad € 1.000.000,00 al responsabile unico del procedimento, spetta un compenso pari al 20% del 2% dell’importo lavori a base d’asta;

VISTO che, pertanto, tale compenso lordo nel caso specifico risulta pari a € 337,23 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione comunale;

VISTE le deroghe per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi eccezionali eventi sismici (art. 15-ter D.L. 189/2016 conv. in L.229/2016 – O.C.D.P.C. n. 408/2016) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile con Circolare Prot. n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15.05.2017; 

RICHIAMATA la propria determina n. 186 R.G.346 del 3.10.2017 con la quale si è stabilito: 
-	di approvare la perizia per la messa in sicurezza della Chiesa Sant’Eustachio in loc. San Placido di Ussita, distinto al F. 43 p.lla A, a firma dell’ing. Antonio Bettacchi e l’arch. Rocco Peluso formata dai seguenti elaborati: 

Tav 1 - Relazione generale 
Tav 2 - Documentazione fotografica
Tav 3 – Inquadramento territoriale
Tav 4 – Progetto -Pianta
Tav 5 – Progetto-Prospetti
Tav 6 – Particolari costruttivi
Tav 7 – Elenco Prezzi ed analisi prezzi unitari (integrativi Sett.2017)
Tav 8 – Computo metrico estimativo (integrativi Sett.2017)
Tav 9 – Capitolato speciale d’appalto (integrativi Sett.2017)
Tav 10– Quadro Economico riepilogativo (integrativi Sett.2017)
Tav 11 – Relazione di calcolo
Tav 12 – Piano di Sicurezza
-	di approvare specificatamente il Quadro Tecnico Economico così articolato ed adeguato alle prescrizioni del CCR:

a)	SOMME PER LAVORI		
a.1)	Importo lavori a consuntivo	 € 84.306,50 	
a.2)	Oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	 € 7.205,40 	
	Importo lavori soggetto a ribasso	 € 77.101,10 	
	Oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	 € 7.205,40 	
	IMPORTO CONTRATTUALE	 € 84.306,50 	
b) 	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	IVA su lavori al 10%	 € 8.430,65 	
b.2)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (5%)	 € 4.215,33 	
b.3)	 Spese tecniche per coordinamento sicurezza	 	
	Totale spese tecniche	 € 4.215,33 	
b.4) 	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	 € 168,61 	
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	 € 964,47 	
b.7) 	accantonamento art. 113 D.Lgs.50/16 (20% del 2% di a.1))	 € 337,23 	
b.8) 	Imprevisti (IVA inclusa)	 € 3.279,00 	
	Totale somme a disposizione 	 € 17.395,28 	
	TOTALE INTERVENTO	 € 101.701,78 	
-	di dare atto che, rispetto all’impegno di spesa n. 219_2017 preso al cap. 1210 del bilancio comunale a favore dell’ing. Antonio Bettacchi per la progettazione della messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Eustachio con Determinazione n. 76 (R.G. n. 173) del 13.06.2017, si ravvisa un’economia di spesa pari a € 5.890,20 € pari alla differenza tra quanto precedentemente impegnato (€ 8.564,40 cap 4% e IVA 22% inclusi) e l’importo rideterminato di € 2.674,20 pari al 50% dell’importo per spese tecniche di progettazione e direzione lavori ( € 4.215,33 /2 = € 2.107,67) + cap 4% 84,31 € + IVA 22% 482,23 €;
-	di dare atto che, rispetto all’impegno di spesa n. 220_2017 preso al cap. 1210 del bilancio comunale a favore arch. Rocco Peluso per la progettazione della messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Eustachio con Determinazione n. 76 (R.G. n. 173) del 13.06.2017, si ravvisa un’economia di spesa pari a € 5.890,20 € pari alla differenza tra quanto precedentemente impegnato (€ 8.564,40 cap 4% e IVA 22% inclusi) e l’importo rideterminato di € 2.674,20 pari al 50% dell’importo per spese tecniche di progettazione e direzione lavori ( € 4.215,33 /2 = € 2.107,67) + cap 4% 84,31 € + IVA 22% 482,23 €;
-	di impegnare a favore del geom. Patrizia Ortenzi, la somma di € 373,23 quale incentivo per funzioni tecniche di RUP, ex art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016, a carico della contabilità speciale relativa a al sisma e calcolato come segue in base al 20% del 2% dell’importo lavori:

importo lordo	 € 337,23 	 	 	
incentivo RUP	 € 251,10 	 	 	
Contributi CPDEL	 € 59,76 	 € 64,78 	23,80%	
INAIL 2,00%	 € 5,02 		2%	
IRAP 8,50% 	 € 21,34 	 € 21,34 	8,50%	
Totale Oneri Riflessi	 € 86,13 	 	 	

-	di dare atto che le somme di cui sopra trovano copertura finanziaria ai vari capitoli del bilancio 2017, e secondo i relativi impegni, come nella seguente tabella, in corso di predisposizione ove verrà prevista la necessaria disponibilità e che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma:

incentivo CAP. 1212	 IMP. 422/2017	 € 251,10 	
contributi CAP. 1213	 IMP. 423/2017	 € 64,78 	
IRAP CAP. 1214	 IMP. 424/2017	 € 21,34 	

-	di impegnare la somma di € 96.016,15 per l’esecuzione dei lavori inclusi IVA al 10% ed imprevisti (€ 84.306,50 + IVA 10% € 8.430,65 + imprevisti € 3.279,00) al cap. 1211 del bilancio 2017 in corso di predisposizione ove verrà prevista la necessaria disponibilità e che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma.
RAVVISATO che i suddetti elaborati approvati con propria determinazione n. 186 R.G.346 del 3.10.2017 saranno posti a base di gara da espletare ai fini di individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori; 
RAVVISATA la necessità di redigere la presente determinazione a contrattare per la determinazione delle modalità di appalto; 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 388 del 26.08.2016 art. 5 comma 3 che testualmente recita:
“Per l’espletamento delle attività previste nella presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1 comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del D.Lgs. 50 2016”;
RAVVISATO che l’edificio di cui trattasi è pericolanti su via pubblica e che pertanto la messa in sicurezza del medesimo deve avvenire immediatamente, avvalendosi per motivi d’urgenza dettati dalla tutela della pubblica incolumità delle procedure previste dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in quanto vi sono i relativi specifici presupposti; 
RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016 art. 63, Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara comma 2 lettera c) che testualmente recita recita: “Nel caso di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, può esere utilizzata: …. C) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016 art. 63 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara comma 6 che testualmente recita: “Le Amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”;
RITENUTO opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura d’appalto dei lavori di cui trattasi, in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito, di avvalersi della facoltà concessa dalle norme sopra riportate per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
VISTA, altresì, la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 5 del 8 ottobre 2008 ad oggetto “Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici” e ritenuto che, non essendo caratterizzato l’appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso in applicazione dell’art. 82 del Codice dei contratti;
RILEVATO di dovere individuare, nel rispetto dei princìpi fissati dalle norme di cui sopra, almeno cinque operatori economici da invitare a presentare offerta in termini estremamente ristretti non superiori a 7 giorni, stante l’urgenza più volte ribadita e motivata di pubblica incolumità; 

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrattare n. 220 (R.G. n. 409) del 06/11/2017 con la quale si è stabilito di:
1.	procedere per tutte le motivazioni e finalità di cui in premessa che integralmente si richiamano, all’appalto ex art.63 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa Sant’Eustachio in loc. San Placido di Ussita, distinto al F. 43 p.lla A pericolante su via pubblica, individuando ed indicando qui di seguito, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
OGGETTO
DEL CONTRATTO
	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Lavori di messa in sicurezza della Chiesa Sant’Eustachio in loc. San Placido di Ussita, distinto al F. 43 p.lla A 	
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
	Ordinanza 388/2016 Codice dei contratti
Art. 63	La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione dell’ordinanza OCDPC n. 388 del 26.08.2016 ed in particolare del combinato disposto dell’articolo 1 comma 2 lettera c) e articolo 5, comma 3. 
D.Lgs. n. 50/2016 Art. 63 comma 2 lettera c) e comma 6. 	
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
	Codice dei contratti
Art. 95 comma 4	La selezione della migliore offerta, in applicazione dell’art. 95 del Codice dei contratti, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a “ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara” trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare – “a corpo”.
	
2.	invitare a presentare offerta per l'appalto, n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell' elenco che, ai sensi dell'art. 13, comma 2. lettera b), del codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
3.	approvare i seguenti modelli di gara: 
-	Lettera d’invito 
-	Modello offerta economica
-	Modello Attestazione di sopralluogo
4.	dare atto che gli impegni di spesa sia per lavori che per spese tecniche della messa in sicurezza sono stati assunti con propria determina di approvazione della perizia n. 186 (R.G. 346) del 03.10.2017.

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 199 (R.G. 353) del 26/10/2017 di “Inagibilità con provvedimenti in ordine alla messa in sicurezza di edificio denominato "Chiesa S. Eustachio" sito in Loc. San Placido (foglio 43 - part. a). proprietario: parrocchia di S. Andrea Apostolo - C.F. 90003310431”,

RICHIAMATA la propria Determinazione U.T. n. 228 (R.G. n. 424) del 13.11.2017 con cui si è stabilito di 

- nominare la Commissione esaminatrice delle offerte della gara per i lavori di messa in sicurezza della Chiesa Sant’Eustachio in loc. San Placido di Ussita, distinta al F. 43 p.lla, così costituita:
- Geom. Patrizia Ortenzi - Responsabile Settore Quarto Assetto ed Uso del Territorio: Presidente,
- Ing. Romina Fattoretti - Istruttore tecnico Direttivo: Componente,
- Ing. Rodolfo Galeone - Istruttore tecnico Direttivo: Componente;
- dare atto che la stessa determina non comporta impegno di spesa.

RAVVISATO che in data 13 novembre 2017 si è esperita la gara ed è necessario approvare l'allegato verbale delle operazioni svolte dalla commissione nominata per l’apertura delle buste, onde poter procedere nell'iter burocratico della pratica e successivamente dar velocemente corso ai lavori; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 234 del 16.11.2017 (R.G. n. 434) con la quale si è stabilito di: 
-	dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
-	approvare l'allegato verbale delle operazioni svolte dalla commissione nominata per l’apertura delle buste pervenute per la gara mediante procedura negoziata senza previo pubblicazione di un bando d gara per l'appalto di messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Eustachio in loc. San Placido di Ussita, distinta catastalmente al F. 43 p.lla A, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria con sede in Via Spinabello, 6 – 62034 Muccia (MC), P.IVA/C.F. 01882260431, che ha effettuato il ribasso d’asta del 6,901% sull’importo totale dei lavori soggetto a ribasso di € 77.101,10 pari ad € 5.320,75 per un netto di € 71.780,35 più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.205,40 per un totale contrattuale di € 78.985,75 + iva nei termini di legge; 
-	affidare alla Ditta EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria con sede in Via Spinabello, 6 – 62034 Muccia (MC), P.IVA/C.F. 01882260431, i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Eustachio in loc. San Placido di Ussita, distinta catastalmente al F. 43 p.lla A con un ribasso d’asta del 6,901% sull’importo totale dei lavori soggetto a ribasso di € 77.101,10 pari ad € 5.320,75 per un netto di € 71.780,35 più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.205,40 per un totale contrattuale di € 78.985,75 + iva nei termini di legge; 
-	dare atto che il responsabile del procedimento procederà alla verifica dei requisiti generali e di capacità tecnico-economica previsti dalla vigente normativa D.Lgs. 50/2006; 
-	dare atto che la presente determina diverrà immediatamente esecutiva dopo l'esito positivo dell'espletamento della fase di controllo di cui sopra;
-	impegnare definitivamente a favore dell’impresa EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria con sede in Via Spinabello, 6 – 62034 Muccia (MC), P.IVA/C.F. 01882260431 per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, la somma di € 78.985,75 + IVA al 10% pari a € 7.898,58 per un totale di € 86.884,33, al capitolo 1211 del bilancio 2017 in corso di predisposizione ove verrà prevista la necessaria disponibilità e che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma.

VISTO il DURC della ditta EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria - C.F. HRNNLC74T60Z129H rilasciato con Prot. INPS_87577708 e data di scadenza 29/03/2018, avente esito regolare;

RAVVISATO che con nota Prot. 11540 del 06.12.2017 lo scrivente Comune comunicava l’efficacia dell’aggiudicazione alla ditta EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Eustachio in loc. San Placido di Ussita, distinta catastalmente al F. 43 p.lla A;

RAVVISATO che i lavori, consegnati dalla Direzione Lavori alla ditta aggiudicataria in data 22.11.2017, sospesi per condizioni atmosferiche avverse in data 06.12.2017 e ripresi in data 08.01.2018, nuovamente sospesi per il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse in data 07.02.2018 e ripresi in data 01.03.2018, sono stati ultimati in data 12.03.2018 entro il termine previsto da capitolato speciale di appalto, che con le interruzioni sopra menzionate, veniva fissato per il giorno 16.03.2018, come si evince dai relativi verbali sottoscritti tra l’impresa, la direzione lavori e il R.U.P.;

RAVVISATO che durante il corso dei lavori, la Direzioni Lavori con propria nota del 24.01.2018 ha chiesto il parere di competenza, avendo ravvisato la necessità di intervenire con il bloccaggio dei setti murari esterni residui mediante sbruffatura di malta, e che tale intervento è stato autorizzato con nota Prot. n. 3469 del 15.02.2018 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, assunta al protocollo comunale n. 1366 del 15.02.2018;

RAVVISATO che i tecnici all’uopo incaricati, ing. Antonio Bettacchi con studio tecnico in Via Roma, 43, Pievetorina (MC) – P.Iva 00625130430 – C.F. BTTNTN51P24G657O, e arch. Rocco Peluso con studio tecnico in C.so Garibaldi, 133 Isernia (IS) – P.IVA 00312640949 – C.F. PLSRCC60T18I682F con nota del 30.03.2018 assunta al protocollo comunale n. 2967 del 04.04.2018, hanno consegnato la perizia tecnica di stato finale dei lavori inerente l’intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Eustachio in loc. San Placido di Ussita, distinta al N.C.E.U. al F. 43 P.lla A, formata dai seguenti elaborati:
-	Certificato di ultimazione dei lavori;
-	Verbale n. 1 di coordinamento dei nuovi prezzi e Analisi prezzi unitari;
-	Libretto delle misure;
-	Registro di contabilità;
-	Sommario del Registro di Contabilità;
-	Stato finale dei lavori;
-	Quadro economico riepilogativo dello stato finale;
-	Relazione sul conto finale;
-	Certificato di regolare esecuzione;

VISTO che come si evince dal “Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi e Analisi di prezzi unitari”, dedotti dal Prezzario Unico del Cratere e dal Prezzario Regionale Marche 2016 in corso d’opera la Direzione Lavori, nelle persone dell’ing. Antonio Bettacchi e arch. Rocco Peluso, ha concordato con l’impresa EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria, nella persona del procuratore, geom. Flaviano Onesini, nuovi prezzi per riconoscere l’onere conseguente all’esecuzione dei lavori di bloccaggio dei setti murari esterni residui mediante sbruffatura di malta, preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza;

RAVVISATO che in conseguenza dello “Stato Finale dei Lavori” rispetto all’impegno n. 513 assunto al cap. 1211 del bilancio 2018 residui passivi 2017 di € 86.884,33 (= € 78.985,75 oltre IVA al 10% € 7.898,58)a favore dell’impresa EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio in San Placido, con determina n. 234 del 16.11.2017 (R.G. n. 434), è maturata una maggiore spesa di  € 8.561,47 (= € 7.783,15 oltre IVA al 10% € 778,32) sull’importo a consuntivo dei lavori eseguiti all’impresa, che ammontano ad un totale di € 95.445,79 (= € 86.768,90 oltre IVA al 10% € 8.676,89);

RAVVISATO che pertanto rispetto all’impegno n. 219 assunto al cap. 1210 del bilancio 2018 residui passivi 2017 di € 2.674,20 - pari al 50% dell’importo per spese tecniche di progettazione e direzione lavori (€ 2.107,67 + cap 4% 84,31 € + IVA 22% 482,23) - a favore dell’ing. Antonio Bettacchi con determina n. 186 R.G.346 del 03.10.2017 a fronte dell’espletamento della prestazione professionale di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità finale della messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Eustachio, è maturata una maggiore spesa di € 263,51, per un totale di € 2.937,71 (= € 2.315,35 + cap 4% € 92,61 + iva al 22% € 529,75);

RAVVISATO che pertanto rispetto all’impegno n. 220 assunto al cap. 1210 del bilancio 2018 residui passivi 2017 di € 2.674,20 - pari al 50% dell’importo per spese tecniche di progettazione e direzione lavori (€ 2.107,67 + cap 4% 84,31 € + IVA 22% 482,23) - a favore dell’arch. Rocco Peluso con determina n. 186 R.G.346 del 03.10.2017 a fronte dell’espletamento della prestazione professionale di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità finale della messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Eustachio, è maturata una maggiore spesa di € 263,51, per un totale di € 2.937,71 (= € 2.315,35 + cap 4% € 92,61 + iva al 22% € 529,75);

RAVVISATO che pertanto rispetto agli impegni nn. 422 – 423 – 424 assunti rispettivamente ai capitoli 1212- 1213-1214 del bilancio 2018 residui passivi 2017 e pari rispettivamente a € 251,10 - € 64,78 - € 5,02, per un totale di € 337,23 a favore del geom. Patrizia Ortenzi quale incentivo per funzioni tecniche di RUP, ex art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016, con determina n. 186 (R.G. n.346) del 03.10.2017, è maturata una maggiore spesa di € 9,85, per un totale di € 347,08 di incentivi per funzione tecniche di R.U.P., così distinta:
importo lordo	 €  337,23 	+	 €   9,85 	=	 €  347,08 	
 	 				 	
incentivo RUP	 €  251,10 	+	 €   7,33 	=	 €  258,43 	
Contributi	 €   59,76 	+	 €   1,75 	=	 €   61,51 	
INAIL 2,00%	 €    5,02 	+	 €   0,15 	=	 €    5,17 	
IRAP 8,50%	 €   21,34 	+	 €   0,62 	=	 €   21,97 	

ATTESO che la ditta EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria con sede in Via Spinabello, 6 – 62034 Muccia (MC), P.IVA/C.F. 01882260431 C.F. HRNNLC74T60Z129H ha presentato fattura n. 2 del 30.03.2018 a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio in S. Placido per un importo di € 86.768,90 oltre IVA al 10% € 8.676,89 per un totale di € 95.445,79;

ATTESO che il tecnico all’uopo incaricato, ing. Antonio Bettacchi con studio tecnico in Via Roma, 43, Pievetorina (MC) – P.Iva 00625130430 – C.F. BTTNTN51P24G657O ha presentato fattura n. 3_18 del 30.03.2018 a fronte della quota parte pari al 50% delle spese tecniche per la prestazione professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità finale relativa ai lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio, per un importo di € 2.315,35 + cap 4% € 92,61 + iva al 22% € 529,75, pari al totale di € 2.937,71;

ATTESO che il tecnico all’uopo incaricato, arch. Rocco Peluso con studio tecnico in C.so Garibaldi, 133 Isernia (IS) – P.IVA 00312640949 – C.F. PLSRCC60T18I682F, ha presentato fattura n. 5_18 del 09.04.2018 a fronte della quota parte pari al 50% delle spese tecniche per la prestazione professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità finale relativa ai lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio, per un importo di € 2.315,35 + cap 4% € 92,61 + iva al 22% € 529,75, pari al totale di € 2.937,71;

VISTO il DURC della ditta EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria - C.F. HRNNLC74T60Z129H rilasciato con Prot. INPS_10180653 e data di scadenza 27/07/2018, avente esito regolare

Visto il CIG: ZA61F175C9 (Ing. Bettacchi)
Visto il CIG: Z361F175FE (Arch. Peluso)
Visto il CIG: 72225046D8 (Lavori)
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;
l’OCDPC n. 388 del 26.08.2016
l’OCDPC n. 394 del 19.09.2016
	
Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A
Di APPROVARE la perizia tecnica di stato finale e relativa contabilità riguardanti i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio in Loc. San Placido di Ussita (MC), distinta al NCEU al F. 43 P.lla A, di proprietà della Parroccchia di S. Andrea Apostolo in Calcara di Ussita (MC), presentata dai tecnici all’uopo incaricati, ing. Antonio Bettacchi con studio tecnico in Via Roma, 43, Pievetorina (MC) – P.Iva 00625130430 – C.F. BTTNTN51P24G657O, e arch. Rocco Peluso con studio tecnico in C.so Garibaldi, 133 Isernia (IS) – P.IVA 00312640949 – C.F. PLSRCC60T18I682F con nota del 30.03.2018 assunta al protocollo comunale n. 2967 del 04.04.2018, formata dai seguenti elaborati:
-	Certificato di ultimazione dei lavori;
-	Verbale n. 1 di coordinamento dei nuovi prezzi e Analisi prezzi unitari;
-	Libretto delle misure;
-	Registro di contabilità;
-	Sommario del Registro di Contabilità;
-	Stato finale dei lavori;
-	Quadro economico riepilogativo dello stato finale;
-	Relazione sul conto finale;
-	Certificato di regolare esecuzione;

di APPROVARE specificatamente il Quadro Tecnico Economico di spesa Finale dell’intervento come di seguito articolato:
MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI S. EUSTACHIO IN SAN PLACIDO				
a)	SOMME PER LAVORI				
a.1)	Importo lavori a consuntivo	€  92.613,95 			
a.2)	Oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€   7.915,41 			
	Importo lavori soggetto a ribasso	€  84.698,54 			
	ribasso del 6,901%	€   5.845,05 			
	importo ribassato	€  78.853,49 		€  78.853,49 	
	Oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso			€   7.915,41 	
	importo totale dei lavori			€  86.768,90 	
b) 	SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1)	IVA su lavori al 10%	€   8.676,89 			
b.2)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (5%)	€   4.630,70 			
b.3)	 Spese tecniche per coordinamento sicurezza				
	Totale spese tecniche	€   4.630,70 			
b.4) 	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€    185,23 			
b.5)	IVA su spese tecniche (22%)	€   1.059,50 			
b.7) 	accantonamento art. 113 D.Lgs.50/16 (20% del 2% di a.1))	€      347,08 			
b.8) 	Imprevisti (IVA inclusa)	€            -   			
	Totale somme a disposizione 	€  14.899,40 		€  14.899,40 	
	TOTALE INTERVENTO			€ 101.668,30 	

Di APPROVARE specificatamente l’importo dei lavori eseguiti e il credito residuo dell’impresa EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio in San Placido, presentato dalla Direzione Lavori con la consegna del “Certificato di Regolare Esecuzione” che ammonta ad un totale di € 95.445,79 (= € 86.768,90 oltre IVA al 10% € 8.676,89)

Di IMPEGNARE pertanto al cap. 1211 del bilancio del 2018 a favore dell’impresa EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria con sede in Via Spinabello, 6 a Muccia 62034 (MC), P.IVA 01882260431 e C.F. HRNNLC74T60Z129H, la somma di € 8.561,47 (= € 7.783,15 oltre IVA al 10% € 778,32), quale maggiore spesa resasi necessaria per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio di in loc. San Placido, rispetto all’impegno n. 513 assunto al cap. 1211 del bilancio 2018 residui passivi 2017 di € 86.884,33 (= € 78.985,75 oltre IVA al 10% € 7.898,58) con determina n. 234 del 16.11.2017 (R.G. n. 434), dando atto che tale spesa rimane a carico della contabilità speciale del sisma 2016;

di LIQUIDARE la fattura n. 2 del 30.03.2018 presentata dall’impresa EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria con sede in Via Spinabello, 6 – 62034 Muccia (MC), P.IVA/C.F. 01882260431 C.F. HRNNLC74T60Z129H a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio in S. Placido per un importo di € 86.768,90 oltre IVA al 10% € 8.676,89 per un totale di € 95.445,79;

di APPROVARE specificatamente l’importo complessivo degli onorari relativi allo Stato finale dei Lavori, presentato dalla Direzione Lavori con la consegna del “Riepilogo delle Spese Tecniche” a fronte della prestazione professionali relativa alla progettazione, D.L., coordinamento della sicurezza e contabilità, per un importo complessivo di € 5.875,43 (= € 4.630,70 oltre cap al 4% € 185,23 e IVA al 22% € 1.059,50), equamente ripartito come di seguito:
a favore del dott. Ing. Antonio Bettacchi, l’importo pari a € 2.315,35 + cap 4% € 92,61 + IVA al 22% € 529,75, per un totale di € 2.937,71;
a favore del dott. Arch. Rocco Peluso, l’importo pari a € 2.315,35 + cap 4% € 92,61 + IVA al 22% € 529,75, per un totale di € 2.937,71; 

di IMPEGNARE pertanto al cap. 1210 del bilancio del 2018 a favore del dott. Ing. Antonio Bettacchi con studio tecnico in Via Roma, 43, Pievetorina (MC) – P.Iva 00625130430 – C.F. BTTNTN51P24G657O, la somma di € 263,51 (= € 207,69 oltre cap al 4% € 8,31 e IVA al 22% € 47,52), quale maggiore onere per la prestazione professionale maturato a seguito delle modifiche resesi necessarie per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio di in loc. San Placido, rispetto all’impegno n. 219 assunto al cap. 1210 del bilancio 2018 residui passivi 2017 di € 2.674,20 - pari al 50% dell’importo per spese tecniche di progettazione e direzione lavori (€ 2.107,67 + cap 4% 84,31 € + IVA 22% 482,23) - con determina n. 186 (R.G. n. 346) del 03.10.2017, dando atto che tale spesa rimane a carico della contabilità speciale del sisma 2016;

di LIQUIDARE la fattura n. 3_18 del 30.03.2018 presentata dall’ing. Antonio Bettacchi con studio tecnico in Via Roma, 43, Pievetorina (MC) – P.Iva 00625130430 – C.F. BTTNTN51P24G657O a fronte della quota parte pari al 50% delle spese tecniche per la prestazione professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità finale relativa ai lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio, per un importo di € 2.315,35 + cap 4% € 92,61 + iva al 22% € 529,75, pari al totale di € 2.937,71;

di IMPEGNARE pertanto al cap. 1210 del bilancio del 2018 a favore del dott. arch. Rocco Peluso con studio tecnico in C.so Garibaldi, 133 Isernia (IS) – P.IVA 00312640949 – C.F. PLSRCC60T18I682F, la somma di € 263,51 (= € 207,69 oltre cap al 4% € 8,31 e IVA al 22% € 47,52), quale maggiore onere per la prestazione professionale maturato a seguito delle modifiche resesi necessarie per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio di in loc. San Placido, rispetto all’impegno n. 220 assunto al cap. 1210 del bilancio 2018 residui passivi 2017 di € 2.674,20 - pari al 50% dell’importo per spese tecniche di progettazione e direzione lavori (€ 2.107,67 + cap 4% 84,31 € + IVA 22% 482,23) - con determina n. 186 (R.G. n. 346) del 03.10.2017, dando atto che tale spesa rimane a carico della contabilità speciale del sisma 2016;

di LIQUIDARE la fattura n. 5_18 del 09.04.2018 presentata dall’arch. Rocco Peluso con studio tecnico in C.so Garibaldi, 133 Isernia (IS) – P.IVA 00312640949 – C.F. PLSRCC60T18I682F a fronte della quota parte pari al 50% delle spese tecniche per la prestazione professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità finale relativa ai lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio, per un importo di € 2.315,35 + cap 4% € 92,61 + iva al 22% € 529,75, pari al totale di € 2.937,71;

di VARIARE gli impegni relativi all’incentivo per funzioni tecniche di R.U.P., ex art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 assunti a favore del R.U.P., geom. Patrizia Ortenzi con determina n. 186 (R.G. n.346) del 03.10.2017 ai vari capitoli 1212, 1213 e 1214 del bilancio 2018 residui passivi 2017 a seguito dello “Stato Finale dei Lavori”, come da seguente schema:
 	CAP. 	Impegno	Determina N.346_2017	Importo Finale	Maggiore spesa	
incentivo RUP	1212	422_2017	 € 251,10 	 € 258,43 	 €  7,33 	
Contributi	1213	423_2017	 €  64,78 	 €  66,68 	 €  1,90 	
INAIL 2,00%						
IRAP 8,50%	1214	424_2017	 €  21,34 	 €  21,97 	 €  0,62 	
importo lordo			 € 337,23 	 € 347,08 	 €  9,85 	
dando atto che tali somme trovano copertura finanziaria al capitolo 1215 del bilancio 2018 in coso di predisposizione ove verrà prevista la necessaria disponibilità e che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

di APPROVARE l’importo totale di € 258,43 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione comunale, a favore del R.U.P., geom. Patrizia Ortenzi, per incentivi per funzioni tecniche di R.U.P. nell’ambito dell’intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio in S. Placido di Ussita (MC);

di LIQUIDARE a favore del R.U.P., geom. Patrizia Ortenzi, l’importo netto di € 258,43 a saldo degli incentivi per funzioni tecniche di R.U.P. nell’ambito dell’intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Eustachio in S. Placido di Ussita (MC).

OGGETTO: SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSTACHIO IN SAN PLACIDO DI USSITA DISTINTA AL N.C.E.U. AL F.43  MAPPALE A. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE COMPENSI.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
F.to Boccaccini Gianluca

----------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

---------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
ORTENZI PATRIZIA