C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   IV   -  ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

----------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE NUMERO  268 DEL  05-07-18
REGISTRO GENERALE NUMERO 454

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: SISMA 2016: MESSA IN SICUREZZA LOC. SORBO F. 25 P.LLA 192 SUB 7/8 PORZ. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
-	n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
-	n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
-	n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta é stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
-	n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Commissario Straordinario, dott. Mauro Passerotti, con decreto n. 4 del 21/08/2017 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - Assetto ed uso del Territorio" con decorrenza dal 11.09.2017;
PREMESSO che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;
RAVVISATO che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni agli immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;
RAVVISATO che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell’incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita “zona rossa”, con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni stabilite nell’ordinanza;
RAVVISATO che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata riperimetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;
ATTESO che il Comune di Ussita è stato a seguito di tali eventi sismici quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, debbono rimanere nella zona (allevatori). L’intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure e di notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;
CONSIDERATO che in questo drammatico contesto vi è l’estrema e urgentissima necessità di ridurre ulteriormente la zona rossa a distanza di oltre un anno dall’ultimo evento sismico onde consentire alla popolazione collocata nelle strutture alberghiere di poter ritornare nel proprio territorio anche tramite l’imminente installazione delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza);

RAVVISATO che per poter ridurre la zona rossa e riaprire la maggior parte della viabilità, sono stati espletati specifici sopralluoghi dal GTS (Gruppo Tecnico di Supporto) formato dai seguenti Enti:
o	Vigili del Fuoco
o	Dipartimento Protezione Civile
o	Tecnico Comunale
o	Unità di Crisi MIBACT (Soprintendenza) 
aventi lo scopo di valutare sia il livello del danno strutturale degli immobili ed i conseguenti interventi di messa in sicurezza da eseguire, sia le modalità dei medesimi, sia il soggetto deputato all’esecuzione degli stessi; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
 
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA l’Ordinanza capo dipartimento protezione civile n. 400 del 31 ottobre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/201; 

RAVVISATO che fino a qualche tempo fa i Vigili del Fuoco eseguivano direttamente alcuni interventi di messa in sicurezza non particolarmente impegnativi, ma ad oggi purtroppo a causa dell’ingente lavoro a fronte delle poche maestranze, i medesimi hanno delegato completamente l’esecuzione degli interventi ai Comuni di appartenenza; 

RICHIAMATE le procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016; 

RAVVISATO che in data 10/05/2017 è stato effettuato il sopralluogo del G.T.S in Loc. Sorbo, sulla via di Santa Croce, per valutare gli interventi di messa in sicurezza e/o demolizione da effettuare sugli edifici pericolanti prospicenti tale via, onde poterla riaprire alla viabilità; 

VISTO il GTS del 10/05/2017, scheda n. 015, relativo all’edificio distinto al N.C. al F. 25 p.lla 193 di proprietà di GHEZZI LUISA / ROSI MARCELLA, avente esito “Demolizione totale” non eseguibile dai Vigili del Fuoco;

RAVVISATO che occorre procedere da parte dello scrivente Comune, alla redazione della progettazione della messa in sicurezza dei suddetti immobili pericolanti su via pubblica, con specifica perizia estimativa, onde poter poi procedere alla fase esecutiva dell’intervento; 

VISTO che l’ufficio tecnico comunale in questa fase di emergenza non è ancora al completo di personale ed è oberato di lavoro e sommerso dalle molteplici incombenze della ricostruzione per cui non riesce ad espletare la progettazione con i propri tecnici interni in quanto tra l’altro si trova in una sede provvisoria e ristretta priva delle attrezzature di progettazione necessarie;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

CONSIDERATO che in relazione all’affidamento del servizio in parola, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura di affidamento diretto, disciplinata dall’art. 36 del Codice dei contratti, in quanto trattasi di servizi inferiori a € 40.000,00 per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RAVVISATO che si ritiene opportuno consultare tecnici che abbiano fatto specifica richiesta, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione secondo la vigente normativa di settore; 

RAVVISATO che per motivi logistici, di celerità, di uniformità, di efficacia e correttezza della progettazione delle demolizioni, si rende opportuno e necessario che la medesima venga effettuata da un unico professionista per tutta la via di cui trattasi; 

RAVVISATO che all’uopo è stato contattato per le vie brevi il Geom. Orlando Calicchio con studio tecnico in Via Degli Orti, 9 - S. Angelo A Cupolo (BN), C.F. CLCRND67D28I277S P.IVA 01684270620, iscritto all’ordine degli Geometri della provincia di Benevento al n. 1745 ed iscritto con il n. EP_015258_2017 all’elenco speciale dei professionisti per la ricostruzione di cui al D.L. 189 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017; 
	
RAVVISATO che il medesimo si è reso disponibile ad eseguire l’incarico professionale secondo quanto pattuito nello schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’affidamento dei servizi in parola;

RICHIAMATA la propria determina n. 203 del 17.10.2017 (R.G. n. 377) con la quale si è stabilito fra l’altro di: 

1.	incaricare il Geom. Orlando Calicchio con studio tecnico in Via Degli Orti, 9 - S. Angelo A Cupolo (BN), C.F. CLCRND67D28I277S P.IVA 01684270620, iscritto all’ordine degli Geometri della Provincia di Benevento al n. 1745, per la redazione delle perizie per la messa in sicurezza e/o demolizione parziale o totale del seguente fabbricato pericolante su via pubblica, compresa la direzione, coordinamento in materia di sicurezza nella fase della progettazione laddove previsto, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione:

1.1) 	F.25 p.lla 193 di proprietà di:
GHEZZI LUISA
ROSI MARCELLA
ove sono previsti lavori di Demolizione totale 
per l’importo presunto dei lavori pari ad € 7.553,00 e pertanto per un ammontare presunto di oneri tecnici pari ad € 377,65 + cap. 4% pari ad € 15,11 + iva 22% pari ad € 86,41 per un totale di € 479,16;

RAVVISATO che il Geom. Orlando Calicchio con protocollo comunale in arrivo al n. 0010027 in data 25.10.2017, ha consegnato in n. 2 copie cartacee e copia informatizzata, perizie tecniche relativa alla messa in sicurezza mediante demolizione controllata dei fabbricati pericolanti su via pubblica distinti al N.C. al F. 25 p.lla 193, formata dai seguenti elaborati:
-	Relazione tecnica illustrativa 
-	Elaborato fotografico
-	Computo metrico e Quadro Tecnico economico
-	Elenco Prezzi
-	Capitolato speciale d’appalto;

SENTITA per le vie brevi la ditta CIANI GROUP SRL con sede in Corso Cavour, 9 - 06034 - FOLIGNO (PG), C.F./P.IVA 02644440543 già iscritta nell’elenco degli operatori approvato con determina U.T. n. 80 del 16.06.2017 e iscritta all’anagrafe antimafia della prefettura ai sensi della vigente normativa;

VISTO il Durc della ditta CIANI GROUP SRL rilasciato con prot. INPS_9037718 e data di scadenza validità 01/02/2018;

VISTO il Certificato di iscrizione alla CCIAA della ditta CIANI GROUP SRL rilasciato in data 01/09/2017;

RAVVISATO che la medesima si è resa disponibile ad eseguire l’intervento in tempi brevissimi effettuando un ribasso d’asta del 15% sull’importo dei lavori esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la propria determina n. 278 del 19.12.2017 (R.G. n. 503) con la quale si è stabilito di:
 
1)	approvare la perizia tecnica finale (protocollo di arrivo n. 0010027 del 25.10.2017) redatta dal Geom. Orlando Calicchio per i lavori di messa in sicurezza tramite demolizione controllata del fabbricato pericolante su via pubblica, distinto al N.C. al F.25 p.lla 193, costituita dai seguenti elaborati:
-	Relazione tecnica illustrativa 
-	Elaborato fotografico
-	Computo metrico e Quadro Tecnico economico
-	Elenco Prezzi
-	Capitolato speciale d’appalto

2)	approvare il Quadro Economico Finale compilato dal Direttore Lavori così articolato:

a) SOMME PER LAVORI			
1) Lavori a base d'asta	 €	19.868,93	
oneri per la sicurezza	 €	 993,45	
Totale appalto	 €	20.862,38	
			
b) SOMME A DISPOSIZIONE			
Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto IVA incl.	 €	 - 	
1 I.V.A. su lavori (voce a.1) al 10% 	 €	 2.086,24	
2 Spese tecniche per progettazione e D.L e contab.	 €	 1.043,12	
			
4 CNIA	 €	 41,72	
5 I.V.A. su 2+4 al 22% 	 €	 238,67	
6 Incentivi RUP ex art. 113 comma 2 D.L 50/2016 (0,04% Tot. App.)	 €	 83,45	
7 imprevisti 	 €	 2.086,24	
			
Totale somme a disposizione 	 €	 5.579,43	
TOTALE COSTO INTERVENTO 	 €	26.441,81	

3)	affidare alla Ditta CIANI GROUP SRL con sede in Corso Cavour, 9 Cap. 06034 - FOLIGNO (PG), C.F./P.IVA 02644440543, già iscritta nell’elenco degli operatori approvato con determina U.T. n. 80 del 16.06.2017 e iscritta all’anagrafe antimafia della prefettura ai sensi della vigente normativa, i lavori di messa in sicurezza mediante demolizione controllata del fabbricato pericolante su via pubblica distinto al N.C. al F.25 P.lla 193 per il seguente importo:
€ 16.888,59 al netto del ribasso d’asta del 15% su € 17.882,04  pari ad € 5.675,95 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 993,45 per un totale contrattuale di € 17.882,04 + iva 10% pari ad € 1.788,20;

VISTO il verbale di consegna del 23.11.2017 relativi ai lavori di messa in sicurezza mediante demolizione controllata del fabbricato pericolante su via pubblica distinto al N.C. al F.25 P.lla 193; 
VISTI i verbali di sospensione dei lavori n. 1 del 4.12.2017 e di ripresa lavori del 8.01.2018 motivati dalla necessità di rimuovere una canna fumaria in cemento amianto, rilevata a ridosso del fabbricato in demolizione, da parte di opportune maestranze specializzate;
VISTA la comunicazione inviata via PEC, prot. in arrivo n. 293 del 10.01.2018, con cui l’impresa affidataria dei lavori, Ciani Group srl, evidenzia criticità nell’edificio contiguo a quello già oggetto di lavori di demolizione, identificato al f.25 p.lla 192, ed il rischio del suo possibile crollo per induzione durante i lavori di demolizione della p.lla 193;
VISTA la comunicazione di questo Comune, prot. in partenza n. 354 del 11.01.2018, con cui si chiede al Geom. Orlando Calicchio di predisporre tempestivamente una perizia a sé stante relativa alla messa in sicurezza tramite demolizione parziale dell’edificio distinto al F25 P.lla 192 sub.7/8
VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Ussita n. 27 del 13.01.2018 (R.G. n.27) “PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SITO IN LOC. LOC. SORBO VIA SANTA CROCE NUOVA (FOGLIO 25 - PART. 192 - AGGREGATO 00404). PROPRIETARI: MARINI VINCENZO - C.F. MRNVCN63M15A462I; CARRARA ENRICO - C.F. CRRNRC63B25H501C; CARRARA MICHELA - C.F. CRRMHL69B42H501T; GUIDUCCI MADDALENA - C.F. GDCMDL41C68H501J. REVOCA ORDINANZA COMMISSARIALE N. 391 DEL 08/11/2017”;

VISTE le deroghe per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi eccezionali eventi sismici (art. 15-ter D.L. 189/2016 conv. In L.229/2016 – O.C.D.P.C. n. 408/2016) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile con Circolare Prot. n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15.05.2017;

RICEVUTA dal Geom. Orlando Calicchio la perizia tecnica (protocollo di arrivo n. 358 del 11.01.2018) redatta per i lavori di messa in sicurezza tramite demolizione controllata del fabbricato pericolante su via pubblica, distinto al N.C. al F.25 P.192 sub 7/8 costituita da:
-	Relazione tecnica illustrativa 
-	Elaborato fotografico
-	Computo metrico e Quadro Tecnico economico
-	Elenco Prezzi
-	Capitolato speciale d’appalto

RICHIAMATA la propria determina n. 5 del 12.01.2018 (R.G. n. 16) con la quale si è stabilito di:

1.	incaricare il Geom. Orlando Calicchio con studio tecnico in Via Degli Orti, 9 - S. Angelo A Cupolo (BN), C.F. CLCRND67D28I277S P.IVA 01684270620, iscritto all’ordine degli Geometri della Provincia di Benevento al n. 1745, per la redazione della perizia per la messa in sicurezza tramite demolizione dell’edificio distinto al F25 P.lla 192 sub 7/8, compresa la direzione, coordinamento in materia di sicurezza nella fase della progettazione laddove previsto, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione e secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato alla stessa determina, per l’importo presunto dei lavori pari ad € 37.191,40 e pertanto per un ammontare presunto di oneri tecnici pari ad € 1.859,57 + cap. 4% pari ad € 74,38 + iva 22% pari ad € 425,47 per un totale di € 2.359,42;

2.	impegnare le somme di cui sopra al cap. 1210 del bilancio 2018 in corso di predisposizione ove verrà prevista la necessaria disponibilità dando atto che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma.

SENTITA per le vie brevi la ditta CIANI GROUP SRL con sede in Corso Cavour, 9 - 06034 - FOLIGNO (PG), C.F./P.IVA 02644440543 già iscritta nell’elenco degli operatori approvato con determina U.T. n. 80 del 16.06.2017 e iscritta all’anagrafe antimafia della prefettura ai sensi della vigente normativa, già affidataria dei lavori di messa in sicurezza mediante demolizione controllata dell’edificio pericolante distinto al NCEU al F.25 P.lla 193, contiguo all’edificio distinto alla P.lla 192 sub 7/8porz.; 

RAVVISATO che la medesima si è resa disponibile ad eseguire l’intervento in tempi brevissimi effettuando un ribasso d’asta del 15% sull’importo dei lavori esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la propria determina n. 12 del 18.01.2018 (R.G. n. 34) con la quale si è stabilito di:

1.	approvare le perizia tecnica (protocollo di arrivo n. 358 del 11.01.2018) redatta per i lavori di messa in sicurezza tramite demolizione controllata del fabbricato pericolante su via pubblica, distinto al N.C. al F.25 P.192 sub 7/8 costituita da:
-	Relazione tecnica illustrativa 
-	Elaborato fotografico
-	Computo metrico e Quadro Tecnico economico
-	Elenco Prezzi
-	Capitolato speciale d’appalto

2.	approvare il Quadro Economico compilato dal Direttore Lavori così articolato:

a) SOMME PER LAVORI			
1) Lavori a base d'asta	 €	35.331,83   	
oneri per la sicurezza	 €	 1.859,57   	
Totale appalto	 €	37.191,40   	
b) SOMME A DISPOSIZIONE			
Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto IVA incl.	 €	 - 	
1 I.V.A. su lavori (voce a.1) al 10% 	 €	3.719,14   	
2 Spese tecniche per progettazione e D.L e contab.	 €	 1.859,57   	
			
4 CNIA	 €	 74,38   	
5 I.V.A. su 2+4 al 22% 	 €	 425,47   	
6 Incentivi RUP ex art. 113 comma 2 D.L 50/2016 (0,04% Tot. App.)	 €	 148,77   	
7 imprevisti 	 €	 1.859,57   	
			
Totale somme a disposizione 	 €	 8.086,90   	
TOTALE COSTO INTERVENTO 	 €	45.278,30 	

4)	DI AFFIDARE alla Ditta CIANI GROUP SRL con sede in Corso Cavour, 9 Cap. 06034 - FOLIGNO (PG), C.F./P.IVA 02644440543, già iscritta nell’elenco degli operatori approvato con determina U.T. n. 80 del 16.06.2017 e iscritta all’anagrafe antimafia della prefettura ai sensi della vigente normativa, i lavori di messa in sicurezza mediante demolizione controllata del fabbricato pericolante su via pubblica distinto al N.C. al F.25 P.lle 192 sub 7/8, per i seguenti importi:
€ 30.032,06 al netto del ribasso d’asta del 15% su € 35.331,83 pari ad € 5.299,77 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.859,57 per un totale contrattuale di € 31.891,63 + iva 10% pari ad € 3.189,16;
5)	DI IMPEGNARE la somma di € 35.080,79 di cui sopra al cap. 1211 del bilancio 2017 in corso di predisposizione ove verrà prevista la necessaria disponibilità dando atto che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

CONSIDERATO che i lavori sono stati 
-	consegnati in data 23.01.2018; 
-	sospesi in data 08.02.2018;
-	ripresi in data 03.04.2018, con data ultima di fine lavori traslata al 15.04.2018;
-	conclusi in tempo utile in data 07.04.2018 come da verbale di ultimazione lavori consegnato dal D.L. Geom. Orlando Calicchio; 

   Richiamata la propria determina n. 151 del 04.05.2018 con la quale si e’ stabilito:
 
1.	DI APPROVARE la perizia di stato finale ricevuta con prot. in arrivo al Comune di Ussita n. 3162 del 10.04.2018 inerente i lavori di messa in sicurezza della via pubblica mediante demolizione controllata del fabbricato pericolante distinto al NCEU al F.25 P.lla 192 Sub 7/8porz. composta dai seguenti elaborati: 
-	Relazione tecnica illustrativa
-	Quadro comparativo
-	Computo metrico estimativo
-	Elenco prezzi
-	Quadro tecnico economico, aggiornato al progetto in variante;

2.	DI APPROVARE specificatamente il Quadro Tecnico Economico, aggiornato in base alle modifiche resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori, così articolato:

a) SOMME PER LAVORI			
1) Lavori a base d'asta	 €	 33.468,10   	
oneri per la sicurezza	 €	 1.761,47   	
Totale appalto	 €	 35.229,57   	
Sconto di gara 7,2%	 €	 5.020,22   	
Importo ribassato	 €	 28.447,89   	
Totale Di Contratto	 €	 30.209,36   	
			
b) SOMME A DISPOSIZIONE			
Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto IVA incl.	 €	 -     	
1 I.V.A. su lavori (voce a.1) al 10% 	 €	 3.020,94   	
2 Spese tecniche per progettazione e D.L e contab.	 €	 1.814,45   	
			
4 CNIA	 €	 72,58   	
5 I.V.A. su 2+4 al 22% 	 €		
6 Incentivi RUP ex art. 113 comma 2 D.L 50/2016 (0,04% Tot. App.)	 €	 140,92   	
7 imprevisti 	 €		
			
Totale somme a disposizione 	 €	 5.048,88   	
TOTALE COSTO INTERVENTO 	 €	 35.258,24  	

Ditta CIANI GROUP SRL
DI DARE ATTO che, rispetto all’impegno n. 15/2018 assunto a favore della ditta CIANI GROUP SRL si è verificata una economia di spesa pari € 1.850,49 (€ 35.080,79 - € 33.230,30);

DI APPROVARE il certificato di pagamento n.1 a favore della Ditta CIANI GROUP SRL per un importo di € 30.209,36 + iva 10% € 3.020,30 per un totale di € 33.230,30 a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio distinto al F. 25 P.lla 192 Sub 7/8porz.;

DI LIQUIDARE la fattura FATTPA 2_18 del 12.04.2018 emessa dalla Ditta CIANI GROUP SRL con sede in Via Piersanti Mattarella 2, 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA/C.F. 01374430435, a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio distinto al F. 25 P.lla 192 Sub 7/8porz. per un importo pari ad € 30.209,36 + iva 10% € 3.020,30 per un totale di € 33.230,30; 

Geom. Orlando Calicchio
DI DARE ATTO che, rispetto all’impegno n. 13/2018 assunto a favore del Direttore Lavori Geom. Orlando Calicchio, si è verificata una economia di spesa pari ad € 472,39 (€ 2.359,41 - € 1.877,03);

DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 1 a favore del Geom. Orlando Calicchio per un importo pari ad € 1.878,67 + c.p. pari ad € 75,15 per un totale di € 1.953,82 (esente iva) a fronte dell’esecuzione dei lavori messa in sicurezza della via pubblica mediante demolizione del fabbricato pericolante distinto al F.25 P.lla 192 Sub 7/8porz. per un importo pari 1.814,45 + c.p. pari ad € 72,58 per un totale di € 1.887,03 (esente iva);

DI LIQUIDARE la fattura n. 7-2018-el del 12.04.2018 emessa dal Geom. Orlando Calicchio a fronte dei servizi di progettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza della via pubblica mediante demolizione del fabbricato pericolante distinto al F.25 P.lla 192 Sub 7/8porz. per un importo pari 1.814,45 + c.p. pari ad € 72,58 per un totale di € 1.887,03 (esente iva);

Funzioni Tecniche
DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento, verranno impegnate e liquidate le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche e che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma.

      Ravvisato che le competenze del Rup non sono state mai accreditate al Comune di Ussita dalla Regione Marche in quanto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche non era stato adeguato al D.Lgs. 50/2016; 

Ravvisato che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 30.03.2018 è stato approvato il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche in adeguamento al D.Lgs. 50/2016; 

Ravvisato che il suddetto Regolamento all’art. 10 norma transitoria, prevede “Le modifiche apportate con il presente regolamento si applicano a tutti i lavori pubblici e a tutte le attività poste in essere dopo il 19.04.2016. Per i lavori già iniziati alla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento al precedente regolamento di ripartizione degli incentivi”;

Ravvisato che per l’intervento in questione, si e’ nella fattispecie di cui sopra; 

Preso atto che le percentuali di cui all’allegato A al nuovo regolamento, da prendere in considerazione ai fini della ripartizione sono quelle di cui al punto A) Ufficio del Responsabile e B) Struttura per attività di verifica ed appalto-  della medesima, in quanto le fasi C) e D) rispettivamente di esecuzione dei lavori e di collaudo vengono eseguite da tecnici esterni all’uopo incaricati; 
 
Ravvisato che le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui ai punti A) e B) dell’Allegato A al regolamento sono state svolte dal seguente nucleo tecnico: 
Patrizia Ortenzi, Gianluca Boccaccini, Rodolfo Galeone , Arianna Reversi, Elisa Moretti, Roberta Caprodossi, Giuseppe Riccioni;  

Ravvisato che l’importo complessivo da ripartire tra i componenti del suddetto nucleo tecnico ammonta ad € 37.191,40 (comprensivo di contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP a carico dell’Ente), come di seguito determinato ai sensi del nuovo regolamento di ripartizione:
BASE DI GARA						                  € 37.191,40
Fondo costituito ai sensi dell’art. 113 co. 2 D.Lgs.50/2016 €   743,38
Somma da ripartire (punto A) 40% + punto B) 10%)	            €   371,91

Ravvisato che occorre procedere al nuovo impegno di spesa per gli incentivi per funzioni tecniche aggiornati in base al nuovo regolamento Approvato con delibera Commissario Straordinario n. 13 del 30.03.2018, con i poteri della Giunta Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017; 

DETERMINA

Di dare atto che le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui ai punti A) e B) dell’Allegato A al regolamento sono state svolte dal seguente nucleo tecnico: 
Patrizia Ortenzi, Gianluca Boccaccini, Rodolfo Galeone, Arianna Reversi, Elisa Moretti, Roberta Caprodossi, Giuseppe Riccioni; 

Di stabilire che in coerenza con quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nonché dal regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 30.03.2018, la nuova commisurazione degli incentivi tecnici è così determinata: 

Ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche	
Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell’art. 113, c. 2, del D.lgs. 50/2016	
	BASE DI GARA 	37.191,40				
compensi tecnici 2% (base di calcolo su cui applicare le percentuali sotto specificate) = 	743,83 €			
						
A)	UFFICIO DEL RESPONSABILE	 	297,53 €	40,00%	
 	Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto	 	
 	A1	RUP	70%	208,27 €	 	
 	A2	SUPPORTO	30%	89,26 €	 	
						
B)	STRUTTURA PER L’ATTIVITÀ DI VERIFICA ED APPALTO	 	74,38 €	10,00%	
 	B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10%	7,44 €	 	
 	B2	VERIFICA DEI PROGETTI	30%	22,31 €	 	
 	B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	30%	22,31 €	 	
 	B4	SUPPORTO	30%	22,31 €	 	
 	 	 	TOTALE	371,91 €	50,00%	
						
 	SUDDIVISIONE:	 	 	 		
A)	A1 - RUP:	 	Ortenzi	208,27 €		
 	A2 - SUPPORTO:	Boccaccini	89,26 €		
 	 	 	 	 		
B)	B1 - PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA:	Reversi	7,44 €		
 	B2 - VERIFICA DEI PROGETTI:	Galeone 	22,31 €		
 	B3 - PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA:	Galeone	22,31 €		
 	B4 - SUPPORTO	 	Caprodossi	14,88 €		
 	 	 	Riccioni	3,72 €		
 	 	 	Moretti	3,72 €		
 	 	 	 	371,91 €		

  

Di dare atto che per effetto delle modifiche di cui sopra, il Q.T.E. finale diviene come segue: 

a) SOMME PER LAVORI			
1) Lavori a base d'asta	 €	 33.468,10   	
oneri per la sicurezza	 €	 1.761,47   	
Totale appalto	 €	 35.229,57   	
Sconto di gara 7,2%	 €	 5.020,22   	
Importo ribassato	 €	 28.447,89   	
Totale Di Contratto	 €	 30.209,36   	
			
b) SOMME A DISPOSIZIONE			
Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto IVA incl.	 €	 -     	
1 I.V.A. su lavori (voce a.1) al 10% 	 €	 3.020,94   	
2 Spese tecniche per progettazione e D.L e contab.	 €	 1.814,45   	
			
4 CNIA	 €	 72,58   	
5 I.V.A. su 2+4 al 22% 	 €		
6 Incentivi RUP ex art. 113 comma 2 D.L 50/2016 	 €	 371,91   	
7 imprevisti 	 €		
			
Totale somme a disposizione 	 €	 5.048,88   	
TOTALE COSTO INTERVENTO 	 €	 35.489,23  	

Di impegnare pertanto allo scopo la somma di € 371,91(comprensivo di contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP a carico dell’Ente) al cap. 1215 - bilancio 2018 - ove è prevista la necessaria disponibilità, da porre a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

OGGETTO: SISMA 2016: MESSA IN SICUREZZA LOC. SORBO F. 25 P.LLA 192 SUB 7/8 PORZ. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
F.to Boccaccini Gianluca

----------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

---------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
ORTENZI PATRIZIA