C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   IV   -  ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

----------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE NUMERO  461 DEL  18-12-18
REGISTRO GENERALE NUMERO 790

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA, MEDIANTE DEMOLIZIONE, DI EDIFICI PERICOLANTI SU VIA PUBBLICA SITI IN LOC. VALLESTRETTA DI USSITA (MC), DISTINTI AL N.C. AL F. 11 P.LLE 466 - 190 - 185 DI PROPRIETA' DEI SIG.RI DI ANTONIO ANGELO, DI ANTONIO ALESSANDRO, DI ANTONIO ITALO, NORI ONELIA, DI ANTONIO LOREDANA, DI ANTONIO GIANCARLO DI ANTONIO MARIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
-	n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
-	n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
-	n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
-	n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Commissario Straordinario, dott. Mauro Passerotti, con decreto n. 4 del 21/08/2017 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - Assetto ed uso del Territorio" con decorrenza dal 11.09.2017;

PREMESSO che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumuli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;
RAVVISATO che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni agli immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;
RAVVISATO che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell’incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita “zona rossa”, con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni nell’ordinanza stabilite;
RAVVISATO che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ri-perimetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;
ATTESO che il Comune di Ussita è stato a seguito di tali eventi sismici quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, debbono rimanere nella zona (allevatori). L’intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure e di notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;
CONSIDERATO che, nonostante la popolazione abbia fatto rientro nel territorio comunale grazie all’installazione delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza), vi è ancora l’estrema e urgentissima necessità di ridurre la zona rossa onde permettere il più possibile di usufruire della intera viabilità e permettere la cantierizzazione all’interno dei borghi per far rientro alla normalità;

RAVVISATO che per poter ridurre la zona rossa e riaprire la maggior parte della viabilità, sono stati espletati specifici sopralluoghi dal GTS (Gruppo Tecnico di Supporto) formato dai seguenti Enti:
o	Vigili del Fuoco
o	Dipartimento Protezione Civile
o	Tecnico Comunale
o	Unità di Crisi MIBACT (Soprintendenza) 
aventi lo scopo di valutare sia il livello del danno strutturale degli immobili ed i conseguenti interventi di messa in sicurezza da eseguire, sia le modalità dei medesimi, sia il soggetto deputato all’esecuzione degli stessi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;
VISTO il DPCM 5 Ottobre 2018, con il quale è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA l’Ordinanza capo dipartimento protezione civile n. 400 del 31 ottobre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/201; 
RAVVISATO che fino a maggio 2017 i Vigili del Fuoco eseguivano direttamente alcuni interventi di messa in sicurezza non particolarmente impegnativi, ma ad oggi purtroppo a causa dell’ingente lavoro a fronte delle poche maestranze, i medesimi hanno delegato completamente l’esecuzione degli interventi ai Comuni di appartenenza; 
RICHIAMATE le procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016; 
VISTE le deroghe per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi eccezionali eventi sismici (art. 15-ter D.L. 189/2016 conv. In L.229/2016 – O.C.D.P.C. n. 408/2016) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile con Circolare Prot. n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15.05.2017;
VISTO il DPCM 5 Ottobre 2018, con il quale è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
RICHIAMATE:

l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Ussita n. 21 (R.G. 21) del 03.01.2018 “PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SITO IN LOC. VALLESTRETTA (FOGLIO 11 - PART. 466 - AGGREGATO 02300). PROPRIETARI: DI ANTONIO ALESSANDRO - C.F. DNTLSN43B18H501S, DI ANTONIO ANGELO - C.F. DNTNGL46M21H501Y, DI ANTONIO ITALO - C.F. DNTTLI44L17L517M.”
l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Ussita n. 39 (R.G. 39) del 17.01.2018 “PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SITO IN LOC. VALLESTRETTA (FOGLIO 11 - PART. 190). PROPRIETARIA: NORI ONELIA - C.F. NRONLO41E44L517X.”
l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Ussita n. 10 (R.G. 10) del 03.01.2018 “PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SITO IN LOC. VALLESTRETTA (FOGLIO 11 - PART. 185). PROPRIETARI: DI ANTONIO MARIA - C.F. DNTMRA29R45L517F, DI ANTONIO GIANCARLO - C.F. DNTGCR77S02H501T, DI ANTONIO LOREDANA - C.F. DNTLDN63S42H501U.”
VISTA la relativa scheda n. 6 del verbale GTS prot. comunale n. 3063 del 05.04.2018 eseguito nella medesima data, per accertare le condizioni di pericolosità su Via Pubblica dell’edificio distinto al N.C.U. al F. 11 p.lla 466 di proprietà dei sig.ri Di Antonio Angelo, Di Antonio Alessandro, Di Antonio Italo; la quale scheda prescrive una totale demolizione dell’immobile, mantenendo in sito porzione delle murature d’ambito;
VISTA la relativa scheda n. 7 del verbale GTS prot. comunale n. 3063 del 05.04.2018 eseguito nella medesima data, per accertare le condizioni di pericolosità su Via Pubblica dell’edificio distinto al N.C.U. al F. 11 p.lla 190 di proprietà della sig.ra Nori Onelia la quale scheda prescrive una totale demolizione dell’immobile, mantenendo in sito porzione delle murature d’ambito;
VISTO che, a seguito dei sopralluoghi dei tecnici UTC in Loc. Vallestretta per accertare le condizioni di pericolosità su Via Pubblica dell’edificio distinto al N.C.U. al F. 11 p.lla 185 di proprietà dei sig.ri Di Antonio Loredana, Di Antonio Giancarlo, Di Antonio Maria, dai quali è emersa la necessità di effettuare un intervento di puntellamento dell’immobile in argomento;
RAVVISATO che occorreva procedere, con estrema urgenza alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza previa la redazione della progettazione con specifica perizia estimativa, onde poter poi procedere alla fase esecutiva dell’intervento; 
RICHIAMATA la propria determinazione U.T. n. 52 (R.G. n. 119 del 19.02.2018 con la quale si è stabilito fra l’altro di:

1.	incaricare il Geom. Alessandro Maiolatesi, con studio professionale in Via Ugo La Malfa n. 6, Serra San Quirico (AN), P.IVA 02098460427, per la redazione della perizia per la messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti su via pubblica in Loc. Vallestretta di Ussita, distinti al N.C.E.U. al F. 11 P.lle 185 – 190 e 466, di proprietà dei sigg. Di Antonio Maria, Di Antonio Giancarlo, Di Antonio Loredana,  Nori Onelia, Di Antonio Alessandro, Di Antonio Angelo, Di Antonio Italo, compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione, e secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato alla presente, per l’importo presunto dei lavori pari ad € 83.000,00 e pertanto per un ammontare presunto di oneri tecnici pari ad € 4.150,00 + cap. 4% pari ad € 166,00 + iva 22% pari ad € 949,52 per un totale di € 5.265,52;

2.	impegnare le somme di cui sopra al cap. 1210 del bilancio 2018 in corso di predisposizione ove verrà prevista la necessaria disponibilità dando atto che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma.

VISTA la nota assunta al Prot. comunale n. 2606 del 23.03.2018 e n. 2705 del 27.03.2018 con la quale il tecnico all’uopo incaricato, il Geom. Alessandro Maiolatesi con studio tecnico in Via Ugo La Malfa n. 6 – 60048 Serra San Quirico (AN) ha consegnato la perizia relativa alla messa in sicurezza mediante demolizione e puntellamento dei succitati edifici, composta dai seguenti elaborati:

1-	Relazione Illustrativa con doc fotografica Elaborati Grafici;
2-	Elenco Prezzi Lavori; 
3-	Computo metrico dei lavori; 
4-	Quadro Tecnico Economico di Progetto;
5-	Capitolato Speciale di Appalto;

RAVVISATO che, a seguito di istruttoria e successiva richiesta da parte dello scrivente comune per le vie brevi, il Geom. Alessandro Maiolatesi con studio tecnico in Via Ugo La Malfa n. 6 – 60048 Serra San Quirico (AN) ha consegnato con nota assunta al Prot. comunale n. 4192 del 10.05.2018 i seguenti elaborati modificati:

1-	Elenco Prezzi Lavori (modificato); 
2-	Computo metrico dei lavori (modificato); 
3-	Quadro Tecnico Economico di Progetto (modificato);

RAVVISATO che con nota protocollo comunale n. 4293 del 12.05.2018 è stato inviato il progetto al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche per la richiesta di parere.
RAVVISATO che, con propria nota prot. 557881 del 21.05.2018 assunta al protocollo comunale al n. 4624 del 21.05.2018, il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche ha richiesto integrazioni. 
RAVVISATO che con pec del 22.05.2018 il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche.
RAVVISATO che il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche con propria nota prot. 565461 del 22.05.2018 assunta al protocollo comunale al n. 4715 del 23.05.2018 ha rilasciato il richiesto nulla osta agli interventi progettuali con prescrizioni;
RAVVISATO che in conseguenza il tecnico all’uopo incaricato, Geom. Alessandro Maiolatesi con studio tecnico in Via Ugo La Malfa n. 6 – 60048 Serra San Quirico (AN), ha consegnato la perizia di cui trattasi, con propria nota assunta al protocollo comunale al n. 4792 del 25.05.2018 aggiornata secondo le prescrizioni impartite dal Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, sopra riportate, costituita dai seguenti elaborati:

2-	Elenco Prezzi Lavori(aggiornato); 
3-	Computo metrico dei lavori (aggiornato); 
4-	Quadro Tecnico Economico di Progetto (aggiornato);

e a seguito di segnalazione di uno dei proprietari, il suddetto tecnico ha consegnato con propria nota assunta al protocollo comunale al n. 4965 del 30.05.2018 in duplice originale in formato cartaceo oltre a copia digitale il seguente elaborato aggiornato:

1-	Relazione Illustrativa con doc fotografica Elaborati Grafici (aggiornata);

RICHIAMATA la propria determinazione U.T. n. 237 (R.G. n. 414) del 20.06.2018 con la quale si è stabilito tra l’altro di:

1.	APPROVARE la perizia tecnica relativa all’intervento di messa in sicurezza mediante demolizione degli edifici pericolanti su via pubblica siti in loc. Vallestretta di Ussita e distinti al N.C.U. al F. 11 p.lle 466-190 e puntellamento dell’edificio distinto al N.C.U. al F. 11 alla p.lla 185 di proprietà dei sig.ri Di Antonio Angelo, Di Antonio Alessandro, Di Antonio Italo, Nori Onelia, Di Antonio Loredana Di Antonio Giancarlo Di Antonio Maria, redatta dal Geom. Alessandro Maiolatesi con studio tecnico in Via Ugo La Malfa n. 6 – 60048 Serra San Quirico (AN), composta dai seguenti elaborati:

1-	Relazione Illustrativa con doc fotografica Elaborati Grafici (aggiornata);
2-	Elenco Prezzi Lavori(aggiornato); 
3-	Computo metrico dei lavori (aggiornato); 
4-	Quadro Tecnico Economico di Progetto (aggiornato);

2.	APPROVARE specificatamente il Quadro Tecnico Economico così articolato:

3.	NOMINARE i componenti del nucleo tecnico con le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui ai punti A) e B) dell’Allegato A al regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 30.03.2018:
Patrizia Ortenzi, Gianluca Boccaccini, Marta Leonardi, Arianna Reversi, Elisa Moretti, Roberta Caprodossi, Giuseppe Riccioni;

4.	STABILIRE che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nonché dal regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 30.03.2018, la nuova commisurazione degli incentivi tecnici è così determinata:

5.	IMPEGNARE pertanto allo scopo la somma di € 642,58 (comprensiva di contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP a carico dell’Ente) al capitolo 1215 - bilancio 2018 - ove è prevista la necessaria disponibilità da porre a carico della contabilità speciale relativa al sisma

6.	DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare le maggiori o minori spese maturate rispetto a quanto già impegnato a favore il Geom. Alessandro Maiolatesi con studio tecnico in Via Ugo La Malfa n. 6 – 60048 Serra San Quirico (AN) con precedente determinazione U.T. n. 52 (Reg. Gen. n. 119) del 19.02.2018, e che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare le somme al cap. 1211 del bilancio 2018 a fronte dell’esecuzione dei lavori a favore di ditta da definire, e che tali spese sono tutte a carico della contabilità speciale per il sisma.

RAVVISATO che i suddetti elaborati approvati con propria determinazione U.T. n. 237 (R.G. n. 414) del 20.06.2018 sono stati posti a base di gara ai fini di individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori mediante propria determinazione a contrattare U.T. n. 240 (R.G. 417) del 20.06.2018 per determinare le modalità di appalto;
RAVVISATO che con propria determinazione U.T. n. 272 (R.G. n. 460) del 11.07.2018 si è stabilito fra l’altro di:
1.	APPROVARE il verbale delle operazioni svolte dal nucleo di valutazione delle offerte designato per l’apertura delle buste pervenute per la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pericolanti su via pubblica siti in Loc. Vallestretta di Ussita, mediante demolizione di quelli distinti al N.C.U. al F. 11 p.lle 466-190 e puntellamento di quello distinto al N.C.U. al F. 11 alla p.lla 185, dal quale verbale, risulta aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato dalle imprese PEDICONI ANDREA sita in Loc. Lanciano n. 16 - 62022 Castelraimondo (MC) C.F. PDCNDR72R10B474Z P.IVA 01607390430 in qualità di Capogruppo Mandataria e l’impresa NEFER S.R.L. sita in Via P. Mattarella, 10 - 62036 Pievetorina (MC) in qualità di Mandante C.F./P.IVA 01562710432, che ha effettuato il ribasso d’asta del 7,22 % sull’importo soggetto a ribasso di € 51.789,68 pari ad € 3.739,21 per un netto di € 48.050,47 più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.467,88 per un totale contrattuale di € 60.518,35 + iva nei termini di legge; 

2.	AFFIDARE al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalla ditta PEDICONI ANDREA sita in Loc. Lanciano n. 16 - 62022 Castelraimondo (MC) C.F. PDCNDR72R10B474Z P.IVA 01607390430 in qualità di Capogruppo Mandataria e dall’impresa NEFER S.R.L. sita in Via P. Mattarella, 10 - 62036 Pievetorina (MC) in qualità di Mandante C.F./P.IVA 01562710432, i lavori di messa in sicurezza degli edifici pericolanti su via pubblica siti in loc. Vallestretta di Ussita, mediante demolizione di quelli distinti al N.C.U. al F. 11 p.lle 466-190 e puntellamento di quello distinto al N.C.U. al F. 11 alla p.lla 185, con un ribasso d’asta del 7,22 % sull’importo soggetto a ribasso di € 51.789,68 pari ad € 3.739,21 per un netto di € 48.050,47 più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.467,88 per un totale contrattuale di € 60.518,35 + iva nei termini di legge;

3.	DARE ATTO che il responsabile del procedimento procederà alla verifica dei requisiti generali e di capacità tecnico-economica previsti dalla vigente normativa D.Lgs. 50/2006; 

4.	IMPEGNARE a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalla ditta PEDICONI ANDREA sita in Loc. Lanciano n. 16 - 62022 Castelraimondo (MC) C.F. PDCNDR72R10B474Z P.IVA 01607390430 in qualità di Capogruppo Mandataria e dall’impresa NEFER S.R.L. sita in Via P. Mattarella, 10 - 62036 Pievetorina (MC) in qualità di Mandante C.F./P.IVA 01562710432,, per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, la somma di € 54.634,66 + IVA al 10% pari a € 5.463,47 per un totale di € 60.098,13, al capitolo 1211 del bilancio 2018 ove è prevista la necessaria disponibilità e che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

CONSIDERATO che, dai numerosi sopralluoghi esperiti dalla ditta e dal D.L. di concerto con i tecnici U.T.C., è emersa una difficoltà oggettiva nell’eseguire la demolizione senza danneggiare gli edifici vicini, visto l’esiguo spazio di manovra delle macchine operatrici e considerata la morfologia del territorio.

PRESO ATTO CHE a seguito di tutto ciò, è stato richiesto un ulteriore sopralluogo all’Arch. Salvati, funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche che ha redatto un verbale avente protocollo comunale n.8536 del 14.09.2018, prescrivendo, in luogo del puntellamento, la demolizione dell’edificio distinto al F. 11 P.lla 185, ponendo tale lavorazione come condizione essenziale per eseguire il complessivo intervento.

RICHIAMATA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Ussita n. 42 (R.G. 143) del 15.10.2018 “PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DEMOLIZIONE DI EDIFICIO SITO IN LOC. VALLESTRETTA (FOGLIO 11 - PART. 185). PROPRIETARI: DI ANTONIO MARIA - C.F. DNTMRA29R45L517F, DI ANTONIO GIANCARLO - C.F. DNTGCR77S02H501T, DI ANTONIO LOREDANA - C.F. DNTLDN63S42H501U. REVOCA DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 10 DEL 03.01.2018.”

VISTI i verbali di:
-	consegna lavori del 05.11.2018, che prevedeva che i lavori dovessero essere eseguiti entro 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di consegna stessa; 
-	ultimazione lavori del 20.11.2018, ultimazione avvenuta entro il tempo utile contrattuale;

ATTESO che il tecnico all’uopo incaricato, Geom. Alessandro Maiolatesi, con studio professionale in Via Ugo La Malfa n. 6, Serra San Quirico (AN), ha consegnato al protocollo comunale con n. 11552 in data 27.11.2018 la perizia di assestamento finale e relativa contabilità, riguardanti i lavori di messa in sicurezza degli edifici pericolanti su via pubblica in Loc. Vallestretta di Ussita (MC), distinti al N.C.E.U. al F. 11 P.lle 185 – 190 e 466, di proprietà dei sigg. Di Antonio Maria, Di Antonio Giancarlo, Di Antonio Loredana, Nori Onelia, Di Antonio Alessandro, Di Antonio Angelo, Di Antonio Italo, composta dai seguenti elaborati:
-	Certificato di ultimazione lavori;
-	Certificato di regolare esecuzione;
-	Fascicolo contabile: (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato di avanzamento lavori, Quadro economico);
-	Relazione sullo Stato finale dei lavori;
-	Certificati di pagamento;
-	Rapporto fotografico;

ATTESO che l’impresa PEDICONI ANDREA sita in Loc. Lanciano n. 16 - 62022 Castelraimondo (MC) C.F. PDCNDR72R10B474Z P.IVA 01607390430 in qualità di Capogruppo Mandataria, a fronte dei lavori di cui trattasi, ha presentato fattura n. 10/2018 del 05.12.2018, per un importo pari a € 5.887,34 + IVA la 10% di € 588,73, per un totale di € 6.476,07;
ATTESO che l’impresa NEFER S.R.L. sita in Via P. Mattarella, 10 - 62036 Pievetorina (MC) C.F./P.IVA 01562710432, in qualità di Mandante, a fronte dei lavori di cui trattasi, ha presentato fattura n. 22/2018 del 03.12.2018, per un importo pari a € 40.000,00 + IVA la 10% di € 4.000,00, per un totale di € 44.000,00;
ATTESO che il Geom. Alessandro Maiolatesi iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureti della Provincia di Ancona (AN) al n. 1892, con studio professionale in Via Ugo La Malfa n. 6, Serra San Quirico (AN), P.IVA 02098460427 e C.F. MLTLSN79D03E388B a fronte dell’incarico professionale di cui trattasi, ha presentato fattura n. 16/2018 del 28.11.2018 per un importo pari a € 4.112,88 + cap al 4% di € 164,52, + iva al 22% di € 941,03 per un totale di € 5.218,43;
VISTO il Durc dell’impresa PEDICONI ANDREA rilasciato con prot.  INAIL_13694966 e scadenza in data 02/03/2019;
VISTO il Durc dell’impresa NEFER S.R.L. rilasciato con prot. INPS_12721288 e scadenza in data 03/03/2019;
VISTO che il CIG: 7544132EA8 – ATI tra imprese Pediconi Andrea e Nefer - Foglio 11 Part.lle 185 – 190 – 466, riportato nelle determinazioni U.T. n. 240 (R.G. 417) del 20.06.2018, U.T. n. 272 (R.G. 460) del 11.07.2018, è stato cancellato d’ufficio dall’ANAC e di conseguenza è stato richiesto un nuovo CIG.
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO il CIG: Z462259690 – Geom. Alessandro Maiolatesi - Foglio 11 Part.lle 185 – 190 – 466;

VISTO il CIG: 7694313BF1 – RTI tra imprese Pediconi Andrea e Nefer - Foglio 11 Part.lle 185 – 190 – 466;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;

D E T E R M I N A

1.	DI APPROVARE la perizia tecnica di assestamento finale relativa alla messa in sicurezza mediante demolizione degli edifici pericolanti su via pubblica in Loc. Vallestretta, distinti al F. 11 P.lle 185 – 190 e 466, di proprietà dei sigg. Di Antonio Maria, Di Antonio Giancarlo, Di Antonio Loredana, Nori Onelia, Di Antonio Alessandro, Di Antonio Angelo, Di Antonio Italo, formata dai seguenti elaborati:
-	Certificato di ultimazione lavori;
-	Certificato di regolare esecuzione;
-	Fascicolo contabile: (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato di avanzamento lavori, Quadro economico);
-	Relazione sullo Stato finale dei lavori;
-	Certificati di pagamento;                                                   
-	

 DI APPROVARE specificatamente il Quadro Tecnico Economico finale così articolato:

L’intervento riporta globalmente un’economia di spesa pari a
€ 21.611,60.

3.	DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 1 a favore del Raggruppamento Temporaneo tra le imprese PEDICONI ANDREA, con sede legale in Loc. Lanciano n. 16 - 62022 Castelraimondo (MC) C.F. PDCNDR72R10B474Z P.IVA 01607390430 in qualità di Capogruppo Mandataria e NEFER S.R.L. sita in Via P. Mattarella, 10 - 62036 Pievetorina (MC) C.F./P.IVA 01562710432, in qualità di Mandante per il pagamento dei lavori di demolizione eseguiti degli edifici pericolanti su via pubblica in località Vallestretta distinti al N.C. al F. 11 P.lle 185 – 190 e 466 per un importo pari a € 45.887,34 + IVA al 10% pari a € 4.588,73, per un totale di € 50.476,07;

4.	DI DARE ATTO che rispetto all’impegno n. 380/2018 assunto al cap. 1211 del bilancio 2018 con Determinazione U.T. n. 272 (R.G.460) del 11.07.2018, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato dalle imprese PEDICONI ANDREA sita in Loc. Lanciano n. 16 - 62022 Castelraimondo (MC) C.F. PDCNDR72R10B474Z P.IVA 01607390430 in qualità di Capogruppo Mandataria e l’impresa NEFER S.R.L. sita in Via P. Mattarella, 10 - 62036 Pievetorina (MC) in qualità di Mandante C.F./P.IVA 01562710432, a fronte dell’importo per lavori per la messa in sicurezza de quo, si ravvisa una minore spesa di € 9.622,06, pari alla differenza maturata tra l’importo iniziale di € 54.634,66 + IVA al 10% (€ 5.463,47) per un totale di € 60.098,13 e l’importo finale pari a € 45.887,34 + IVA al 10% (€ 4.588,73) per un totale di € 50.476,07;

5.	DI LIQUIDARE pertanto la fattura n. 10/2018 del 05/12/2018 presentata dall’impresa PEDICONI ANDREA sita in Loc. Lanciano n. 16 - 62022 Castelraimondo (MC) C.F. PDCNDR72R10B474Z P.IVA 01607390430 in qualità di Capogruppo Mandataria, a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante demolizione degli edifici pericolanti su via pubblica in località Vallestretta distinti al N.C. al F. 11 P.lle 185 – 190 e 466, di proprietà dei sigg. Di Antonio Maria, Di Antonio Giancarlo, Di Antonio Loredana, Nori Onelia, Di Antonio Alessandro, Di Antonio Angelo, Di Antonio Italo, per un importo pari a € 5.887.34 + IVA al 10% pari a (€ 588,73), per un totale di € 6.476,07;

6.	DI LIQUIDARE pertanto la fattura n. 22/2018 del 03/12/2018 presentata NEFER S.R.L. sita in Via P. Mattarella, 10 - 62036 Pievetorina (MC) in qualità di Mandante C.F./P.IVA 01562710432, a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante demolizione degli edifici pericolanti su via pubblica in Loc. Vallestretta distinti al N.C. al F. 11 P.lle 185 – 190 e 466, di proprietà dei sigg. Di Antonio Maria, Di Antonio Giancarlo, Di Antonio Loredana, Nori Onelia, Di Antonio Alessandro, Di Antonio Angelo, Di Antonio Italo, per un importo pari a € 40.000,00 + IVA al 10% pari a (€ 4.000,00), per un totale di € 44.000,00;
7.	DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 1 a favore del Geom. Alessandro Maiolatesi, con studio professionale in Via Ugo La Malfa n. 6, Serra San Quirico (AN), P.IVA 02098460427 e C.F. MLTLSN79D03E388B, a fronte degli oneri per spese tecniche di progettazione della perizia di messa in sicurezza per un importo pari a € 4.112,88 + cap al 4% (€ 164,52) + IVA al 22% (€ 941,03) per un totale di € 5.218,03;

8.	DI DARE ATTO che rispetto all’impegno n. 69/2018 assunto al cap. 1210 del bilancio 2018 con Determinazione U.T. n. 52 (R.G. n. 119) del 19.02.2018, a favore del Geom. Alessandro Maiolatesi, con studio professionale in Via Ugo La Malfa n. 6, Serra San Quirico (AN), P.IVA 02098460427 e C.F. MLTLSN79D03E388B, a fronte degli oneri per spese tecniche di progettazione e direzione lavori di messa in sicurezza de quo, si ravvisa una minore spesa di € 47,09 (oneri previdenziali al 4% inclusi), pari alla differenza maturata tra l’importo iniziale di € 4.150,00 + cap al 4% (€ 166,00) + IVA al 22% (€ 949,52) per un totale di € 5.265,52 e l’importo finale pari a € 4.112,88 + cap al 4% (€ 164,52) + IVA al 22% (€ 941,03) per un totale di € 5.218,43;

9.	DI LIQUIDARE fattura n. 16/18 del 28.11.2018 presentata dal Geom. Alessandro Maiolatesi, con studio professionale in Via Ugo La Malfa n. 6, Serra San Quirico (AN), P.IVA 02098460427 e C.F. MLTLSN79D03E388B, a fronte della progettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza mediante demolizione degli edifici pericolanti su via pubblica in località Vallestretta distinti al N.C. al F. 11 P.lle 185 – 190 e 466, di proprietà dei sigg. Di Antonio Maria, Di Antonio Giancarlo, Di Antonio Loredana, Nori Onelia, Di Antonio Alessandro, Di Antonio Angelo, Di Antonio Italo, compresa direzione lavori, sicurezza, contabilità, e certificato di regolare esecuzione, per un importo pari a € 4.112,88 + cap al 4% (€ 164,52) + IVA al 22% (€ 941,03) per un totale di € 5.218,43;
10.	DI LIQUIDARE la somma di € 642,58 (comprensiva di contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP a carico dell’Ente) relativa ai compensi tecnici così come ripartita nella tabella di “Ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche” a pag.7 della presente determinazione;
11.	DI IMPUTARE la spesa (come indicato nel Q.T.E. del presente atto) per l’importo di € 1.573.80 lavori di “rialimentazione di fabbricati rimasti sprovvisti di energia elettrica in seguito alla demolizione degli edifici distinti al N.C. al F. 11 P.lle 185 – 190 e 466” a favore di A.S.SE.M. S.p.A. sull’impegno n. 50/2018 CIG. ZCD220904C assunto con Determinazione U.T. n. 32 (R.G. 82) del 06.02.2018 al cap. 1191 del bilancio 2018 ove è prevista la necessaria disponibilità e che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma.

12.	DI DARE ATTO che con precedente determinazione U.T. n. 444 (R.G. 758) del 28.11.2018 è stata liquidata a GOLDENGAS S.p.A. la spesa di € 292,80 per intervento di rimozione/ piombatura contatori presso edifici pericolanti siti in Loc. Vallestretta distinti al N.C. al F. 11 P.lle 185-466-190. al cap. 1191 del bilancio 2018 ove è prevista la necessaria disponibilità e che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma.

OGGETTO: SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA, MEDIANTE DEMOLIZIONE, DI EDIFICI PERICOLANTI SU VIA PUBBLICA SITI IN LOC. VALLESTRETTA DI USSITA (MC), DISTINTI AL N.C. AL F. 11 P.LLE 466 - 190 - 185 DI PROPRIETA' DEI SIG.RI DI ANTONIO ANGELO, DI ANTONIO ALESSANDRO, DI ANTONIO ITALO, NORI ONELIA, DI ANTONIO LOREDANA, DI ANTONIO GIANCARLO DI ANTONIO MARIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
F.to Boccaccini Gianluca

----------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

---------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
ORTENZI PATRIZIA