C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV -  LAVORI PUBBLICI,URBANISTICA ED EDILIZIA,RICOSTRUZIONE. 

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

----------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE NUMERO  127 DEL  18-05-19
REGISTRO GENERALE NUMERO 266

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2018/2019 - PROROGA AFFIDAMENTO.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
-	n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
-	n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
-	n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
-	n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vicenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione  " con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che il 26/06/2019 andrà a scadere l’affidamento alla ditta FRANCONI FRANCESCO di Ussita (MC) relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una nuova procedura di affidamento, al fine di assicurare il servizio di manutenzione di cui al punto precedente, attraverso l’indizione di una procedura di affidamento ai sensi della normativa vigente in materia;

Vista la nota del 05/05/2019 assunta al prot. comunale n. 4621 del 15/05/2019 della ditta FRANCONI FRANCESCO di Ussita (MC) con cui, viste le condizioni meteo avverse della scorsa primavera, chiede una proroga tecnica di 60 giorni dell’affidamento per concludere, agli stessi patti e condizioni, alcune lavorazioni iniziate, programmate e da concludere;

Atteso che nelle more del perfezionamento della procedura di appalto si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio e la conclusione di quanto programmato e quindi disporre la proroga del servizio in essere dal 26/06/2019 al 31/08/2019 mantenendo le stesse condizioni previste ed accettate nell’affidamento sopra citato;

Ritenuto pertanto di dover disporre una proroga dell’affidamento in essere dal 26/06/2019 al 31/08/2019;

Visto il D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 “attuazione delle direttive 201/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
	Visto l’art. 106, comma 11 del Decreto Legislativo 50/2016;

Visti:

-	il D.Lgs 50/2016;
-	la L. 241/90 e successive modifiche;
-	il D.Lgs 33/2013;
-	il D.P.R. 445/2000; 	

Confermato il CIG n. ZF3236FE5C rilasciato dal’ANAC;

DETERMINA

1)	che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2)	Per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto dei limiti di Legge, di prorogare l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria alla ditta FRANCONI FRANCESCO dal 26/06/2019 al 31/08/2019;
3)	di dare atto che la proroga di cui sopra non comporta per il Comune di Ussita alcun aumento di spesa fuori dagli impegni già assunti;           

  

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2018/2019 - PROROGA AFFIDAMENTO.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
F.to Boccaccini Gianluca

----------------------------------------------------------------------
N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

---------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
ORTENZI PATRIZIA