C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   IV   -  ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

----------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE NUMERO  433 DEL  20-11-18
REGISTRO GENERALE NUMERO 741

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PERICOLANTI SU VIA PUBBLICA. IN LOC. CALCARA DI USSITA, MEDIANTE PUNTELLAMENTO DEGLI EDIFICI DISTINTI AL N.C. AL F. 27 P.LLE 45-47-48 E DEMOLIZIONE DI QUELLO ALLA PART.LLA 49 DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI MICHELANGELI, DOMINICI, FIORELLI, BELLANTI (USUFRUTTUARIA), GIOIA, POLI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO DELL'ING. NICOLA MARIA GALLINA.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
-	n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
-	n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
-	n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
-	n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Commissario Straordinario, dott. Mauro Passerotti, con decreto n. 4 del 21/08/2017 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - Assetto ed uso del Territorio" con decorrenza dal 11.09.2017;
PREMESSO che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumuli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;
RAVVISATO che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni agli immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;
RAVVISATO che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell’incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita “zona rossa”, con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni nell’ordinanza stabilite;
RAVVISATO che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ri-perimetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;
ATTESO che il Comune di Ussita è stato a seguito di tali eventi sismici quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, debbono rimanere nella zona (allevatori). L’intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure e di notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;
CONSIDERATO che, nonostante la popolazione abbia fatto rientro nel territorio comunale grazie all’installazione delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza), vi è ancora l’estrema e urgentissima necessità di ridurre la zona rossa onde permettere il più possibile di usufruire della intera viabilità e permettere la cantierizzazione all’interno dei borghi per far rientro alla normalità;

RAVVISATO che per poter ridurre la zona rossa e riaprire la maggior parte della viabilità, sono stati espletati specifici sopralluoghi dal GTS (Gruppo Tecnico di Supporto) formato dai seguenti Enti:
o	Vigili del Fuoco
o	Dipartimento Protezione Civile
o	Tecnico Comunale
o	Unità di Crisi MIBACT (Soprintendenza) 
aventi lo scopo di valutare sia il livello del danno strutturale degli immobili ed i conseguenti interventi di messa in sicurezza da eseguire, sia le modalità dei medesimi, sia il soggetto deputato all’esecuzione degli stessi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA l’Ordinanza capo dipartimento protezione civile n. 400 del 31 ottobre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/201; 
RAVVISATO che fino a maggio 2017 i Vigili del Fuoco eseguivano direttamente alcuni interventi di messa in sicurezza non particolarmente impegnativi, ma ad oggi purtroppo a causa dell’ingente lavoro a fronte delle poche maestranze, i medesimi hanno delegato completamente l’esecuzione degli interventi ai Comuni di appartenenza; 
RICHIAMATE le procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2017 con il quale è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la scheda di valutazione n. 21 del verbale GTS del 08.04.2017 eseguito per accertare le condizioni di pericolosità su Via Pubblica degli edifici distinti al N.C.U. al F. 27 p.lle 45-47-48 di proprietà dei sig.ri Michelangeli Ivano, Dominici Antonella, Fiorelli Antonio, Fiorelli Giulia, Bellanti Felice (usufruttuaria), Gioia Patrizia, Poli Emiliano, Poli Gianni la quale riporta la dicitura “GTS sospeso per impossibilità di accesso all’interno finalizzata alla valutazione completa dell’aggregato” e vista la scheda di valutazione n. 20 del verbale GTS del 08.04.2017 in Loc. Calcara per accertare le condizioni di pericolosità su Via Pubblica dell’edificio distinto al N.C.U. al F. 27 p.lla 49 di proprietà del sig. Fiorelli Antonio la quale riporta esito P2 Interventi minori: “necessita di opere provvisionali (cerchiatura) da eseguirsi da parte di ditte specializzate”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Ussita n. 14 (R.G. 14) del 03.01.2018 “PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN LOC. CALCARA VIA LA CROCETTA (FOGLIO 27 - P.LLE 45 - 47- 48 - 49). PROPRIETARI: MICHELANGELI IVANO - C.F. MCHVNI52D17B114H; DOMINICI ANTONELLA - C.F. DMNNNL64S64H501T; FIORELLI ANTONIO - C.F. FRLNTN51A12M078E; FIORELLI GIULIA - C.F. FRLGLI57L60H501Z; BELLANTI FELICE - C.F. BLLFLC55C51G657T (usufrutto); GIOIA PATRIZIA - C.F. GIOPRZ72M54H501X; POLI EMILIANO - C.F. PLOMLN77C19B474B; POLI GIANNI - C.F. PLOGNN73A12B474N.”
RAVVISATO che occorreva procedere, con estrema urgenza alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza previa la redazione della progettazione con specifica perizia estimativa, onde poter poi procedere alla fase esecutiva dell’intervento; 
RICHIAMATA la propria determinazione U.T. n. 15 (R.G. n. 38) del 19.01.2018 con la quale si è stabilito fra l’altro di:

1.	INCARICARE l’Ing. Nicola Maria Gallina, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia (PG) al n. A2867, con studio tecnico in Via dell’Anna n. 10 – 06030 Valtopina (PG),  C.F. GLLNLM75C20D653P e P.I.03578280541, iscritto all’elenco speciale dei professionisti per la ricostruzione di cui al D.L. 189 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 al n. EP_016416_2017,per la redazione della perizia necessaria alla messa in sicurezza mediante puntellamento degli edifici pericolanti su via pubblica siti in Loc. Calcara di Ussita e distinti al N.C.U. al F. 27 p.lle 45-47-48 e demolizione della part.lla 49 di proprietà dei sig.ri EREDE Montebovi Irma: Michelangeli Ivano; Dominici Antonella, Fiorelli Antonio, Fiorelli Giulia, Bellanti Felice (usufruttuaria), Gioia Patrizia, Poli Emiliano, Poli Gianni, compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione, e secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato alla presente, per l’importo presunto dei lavori pari ad € 30.000,00 e pertanto per un ammontare presunto di oneri tecnici pari ad € 1.500,00 + cap. 4% pari ad € 60,00 + iva 22% pari ad € 343,20 per un totale di € 1.903,20;

2.	IMPEGNARE le somme di cui sopra al cap.1210 del bilancio 2018 ove verrà prevista la necessaria disponibilità dando atto che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

VISTA la scheda n. 4 del verbale GTS prot. comunale n. 3409 del 17.04.2018 eseguito nella medesima data, per accertare le condizioni di pericolosità su Via Pubblica degli edifici distinti al N.C.U. al F. 27 p.lle 45-47-48 di proprietà dei sig.ri Michelangeli Ivano, Dominici Antonella, Fiorelli Antonio, Fiorelli Giulia, Bellanti Felice (usufruttuaria, Gioia Patrizia, Poli Emiliano, Poli Gianni la quale prescrive una messa in sicurezza mediante mirata progettazione e(come da relativa scheda di valutazione n. 5 del verbale GTS prot. comunale n. 3409 del 17.04.2018 in Loc. Calcara per accertare le condizioni di pericolosità su Via Pubblica dell’edificio distinto al N.C.U. al F. 27 p.lla 49 di proprietà del sig. Fiorelli Antonio la quale prescrive una totale demolizione mantenendo in sito porzione delle murature d’ambito;
RICHIAMATA la propria determinazione U.T. n. 270 (R.G. n. 457) del 06.07.2018 con la quale si è stabilito fra l’altro di:

1.	APPROVARE la perizia tecnica relativa all’intervento di messa in sicurezza mediante puntellamento degli edifici pericolanti su via pubblica siti in Loc. Calcara di Ussita e distinti al N.C.U. al F. 27 p.lle 45-47-48 e demolizione della p.lla 49 di proprietà dei sig.ri Michelangeli Ivano; Dominici Antonella, Fiorelli Antonio, Fiorelli Giulia, Bellanti Felice (usufruttuaria), Gioia Patrizia, Poli Emiliano, Poli Gianni, redatta dall’Ing. Nicola Maria Gallina con studio tecnico in Via dell’Anna n. 10 – 06030 Valtopina (PG), composta dai seguenti elaborati:

1-	Relazione illustrativa modificata; 
2-	Documentazione fotografica; 
3-	Elaborati grafici; 
4-	Schede S.T.O.P. PR/B (R3) 
5-	Relazione fotografica 
6-	Relazione sui materiali 
7-	Computo metrico estimativo 
8-	Elenco prezzi 
9-	Quadro economico
10-	Capitolato Speciale di Appalto

2.	APPROVARE specificatamente il Quadro Tecnico Economico così articolato: 

3.	DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare le maggiori o minori spese maturate rispetto a quanto già impegnato a favore l’Ing. Nicola Maria Gallina con studio tecnico in Via dell’Anna n. 10 – 06030 Valtopina (PG) con precedente determinazione U.T. n. 15 (Reg. Gen. n. 38) del 19.01.2018, e che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare le somme al cap. 1211 del bilancio 2018 a fronte dell’esecuzione dei lavori a favore di ditta da definire, e che tali spese sono tutte a carico della contabilità speciale per il sisma.
RAVVISATO che, visto il carattere di urgenza era necessario eseguire subito e contemporaneamente i tre interventi di messa in sicurezza di cui trattasi;
RAVVISATO che, la configurazione dello stato dei luoghi alquanto disagevole non consentiva l’esecuzione contemporanea dei tre interventi di messa in sicurezza di cui sopra se non con l’individuazione di un unico operatore economico e procedere quindi ad un unico appalto;
RAVVISATO che il suddetto elaborato approvato con proprie determinazioni: U.T. n. 263 (R.G. n. 449) del 04.07.2018, U.T. n. 265 (R.G. n. 451) del 04.07.2018, U.T. n. 270 (R.G. n. 457 del 06.07.2018 è tato posto insieme agli altri relativi alle particelle 62 e 64, sono stati posti a base di un’unica gara espletata ai fini di individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori; 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare U.T. n. 165 (R.G. n. 303) del 10.05.2018 con la quale si è stabilito fra l’altro di:
 
1.	PROCEDERE per tutte le motivazioni e finalità di cui in premessa che integralmente si richiamano, all’appalto ex art.63 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pericolanti su via pubblica siti in Loc. Calcara di Ussita, mediante puntellamento di quelli distinti al N.C.U. al F. 27 p.lle 62-64-45-47-48 e demolizione di quello distinto alla p.lla 49, individuando ed indicando qui di seguito, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO
	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Messa in sicurezza degli edifici pericolanti su via pubblica siti in Loc. Calcara di Ussita, mediante puntellamento di quelli distinti al N.C.U. al F. 27 p.lle 62-64-45-47-48 e demolizione di quello distinto alla p.lla 49 di proprietà Dei sigg.ri, Cesarini Cesare, Ceselli Iolanda, Bartocci Piero, Bartocci Bernardino, Dominici Antonella, Fiorelli Antonio, Fiorelli Giulia, Bellanti Felice (usufruttuaria), Gioia Patrizia, Poli Emiliano, Poli Gianni.	
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
	Ordinanza 388/2016 Codice dei contratti
Art. 63	La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione dell’ordinanza OCDPC n. 388 del 26.08.2016 ed in particolare del combinato disposto dell’articolo 1 comma 2 lettera c) e articolo 5, comma 3. 
D.Lgs. n. 50/2016 Art. 63 comma 2 lettera c) e comma 6. 	
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
	Codice dei contratti
Art. 95 comma 4	La selezione della migliore offerta, in applicazione dell’art. 95 del Codice dei contratti, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a “ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara” trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare – “a misura”.	

2.	INVITARE a presentare offerta per l'appalto, n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell'elenco che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lettera b), del codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

3.	APPROVARE i seguenti modelli di gara: 
-	Lettera d’invito 
-	Modello offerta economica
-	Modello Attestazione di sopralluogo

RAVVISATO che in data 25 luglio 2018 si è esperita la gara alla presenza del nucleo tecnico di valutazione delle offerte composta da i tecnici:

- Geom. Patrizia Ortenzi – Responsabile Unico del Procedimento,
- Geom. Angelo Cipro - Istruttore tecnico,
- Geom. Marta Leonardi - Istruttore tecnico,

ed era necessario approvare il verbale delle operazioni svolte dai tecnici designati per l’apertura delle buste, onde poter procedere nell'iter burocratico della pratica e successivamente dar velocemente corso ai lavori;

RICHIAMATA la propria determinazione di approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori all’impresa edile RE.RI.T. U.T. n. 293 (R.G. n. 494) del 27.07.2018 con la quale si è stabilito, relativamente agli immobili alle particele 45-47-48-49 fra l’altro di:

DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE il verbale delle operazioni svolte dal nucleo tecnico di valutazione designato per l’apertura delle buste pervenute per la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pericolanti su via pubblica siti in Loc. Calcara di Ussita, mediante puntellamento di quelli distinti al N.C. al F. 27 p.lle 45-47-48 e demolizione di quello distinto alla p.lla 49, dal quale verbale risulta aggiudicataria l’impresa  edile RE.RI.T. s.r.l. con sede in Via Delle Officine, 19 – 06049 Spoleto (PG), C.F./P.IVA 02718060540, che sull’importo soggetto a ribasso di € 35.138,84), ha effettuato il ribasso d’asta del 23,40% (ventitre/40 percento), pari ad € 8.222,49) per un importo netto (ribassato) di € 26.916,35) più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.633,20); per un totale contrattuale di € 29.549,55 = (€ 26.916,35 + € 2.633,20) per l’intervento sull’edificio in Loc. Calcara - Foglio 27 P. 45-47-48-49, + iva nei termini di legge; 

AFFIDARE all’impresa l’Impresa Edile RE.RI.T. s.r.l. con sede in Via Delle Officine, 19 – 06049 Spoleto (PG), C.F./P.IVA 02718060540, i lavori di messa in sicurezza mediante puntellamento degli edifici pericolanti su via pubblica siti in Loc. Calcara di Ussita (MC)censiti catastalmente al F. 27 p.lle 45-47-48-49, con un ribasso d’asta del 23,40% sull’importo soggetto a ribasso di € 35.138,84), pari ad  € 11.191,54 + € 8.222,49) per un importo netto (ribassato) di € 26.916,35) più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.633,20), per un totale contrattuale di € 29.549,55 = (€ 26.916,35 + € 2.633,20) per l’intervento sull’edificio in Loc. Calcara - Foglio 27 P. 45-47-48-49, + iva nei termini di legge; 

DARE ATTO che il responsabile del procedimento procederà alla verifica dei requisiti generali e di capacità tecnico-economica previsti dalla vigente normativa D.Lgs. 50/2006; 

IMPEGNARE a favore dell’impresa RE.RI.T. s.r.l. con sede in Via Delle Officine, 19 – 06049 Spoleto (PG), C.F./P.IVA 02718060540, la somma di € 32.504,51 per l’intervento sull’edificio in Loc. Calcara - Foglio 27 P. 45-47-48-49; al capitolo 1211 del bilancio 2018 in cui è prevista la necessaria disponibilità e che tale spesa sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma.

DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare, al cap. 1211 del bilancio 2018, le maggiori o minori spese maturate rispetto a quanto già impegnato a favore dell’impresa RE.RI.T. s.r.l. con sede in Via Delle Officine, 19 – 06049 Spoleto (PG), C.F./P.IVA 02718060540 e che tali spese sono tutte a carico della contabilità speciale per il sisma.

DARE ATTO che la presente determina diverrà immediatamente esecutiva dopo l'esito positivo dell'espletamento della fase di controllo di cui sopra.

VISTA la comunicazione di aggiudicazione definitiva all’impresa RE.RI.T. s.r.l. di cui al protocollo comunale n. 8554 del 15.09.2018 

VISTO il verbale di consegna del 18.09.2018

CONSIDERATO che, la ditta, RE.RI.T. s.r.l. a seguito di sopralluogo sul posto, insieme al Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Nicola Maria Gallina hanno valutato una modifica al progetto di messa in sicurezza, modifica che rimane più vantaggiosa sia in termini di praticità di montaggio che in termini di fruizione della pubblica via che viene messa in sicurezza a seguito di tale intervento su detti edifici.

VISTA la nota assunta al Prot. comunale n. 10131 in data 24.10.2018 con la quale il tecnico all’uopo incaricato, l’Ing. Nicola Maria Gallina con studio tecnico in Via dell’Anna n. 10 – 06030 Valtopina (PG), ha consegnato la variane alla perizia relativa alla messa in sicurezza mediante demolizione e puntellamento degli edifici distinti al N.C. al F. 27 P.lle 45-47-48-49, composta dai seguenti elaborati:

1-	Relazione illustrativa modificata; 
2-	Documentazione fotografica; 
3-	Elaborati grafici; 
4-	Schede S.T.O.P.
5-	Relazione fotografica 
6-	Relazione sui materiali 
7-	Computo metrico estimativo 
8-	Elenco prezzi 
9-	Quadro economico

RAVVISATO che si rende necessario approvare la suddetta variante;

VISTO il CIG: Z1321CBAB8 – Ing. Nicola Maria Gallina - Foglio 27, Part.lle 45 – 47 – 48 – 49;

VISTO il il CIG: Z31244A75E – Impresa Edile RE.RI.T. s.r.l. - Foglio 27 Part.lle 45 – 47 – 48 – 49;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;
VISTO l’OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
VISTO l’OCDPC n. 394 del 19.09.2016;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.	di APPROVARE la perizia tecnica relativa all’intervento di messa in sicurezza mediante puntellamento degli edifici pericolanti su via pubblica siti in loc. Calcara di Ussita e distinti al N.C.U. al F. 27 p.lle 45-47-48 e demolizione della p.lla 49 di proprietà dei sig.ri EREDE Montebovi Irma: Michelangeli Ivano; Dominici Antonella, Fiorelli Antonio, Fiorelli Giulia, Bellanti Felice (usufruttuaria), Gioia Patrizia, Poli Emiliano, Poli Gianni,, redatta dall’Ing. Nicola Maria Gallina con studio tecnico in Via dell’Anna n. 10 – 06030 Valtopina (PG), composta dai seguenti elaborati:

1-	Relazione illustrativa modificata; 
2-	Documentazione fotografica; 
3-	Elaborati grafici; 
4-	Schede S.T.O.P.
5-	Relazione fotografica 
6-	Relazione sui materiali 
7-	Computo metrico estimativo 
8-	Elenco prezzi 
9-	Quadro economico

2.	

di APPROVARE specificatamente il Quadro Tecnico Economico così articolato:
3.	di DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare le maggiori o minori spese maturate rispetto a quanto già impegnato a favore l’Ing. Nicola Maria Gallina con studio tecnico in Via dell’Anna n. 10 – 06030 Valtopina (PG) con precedente determinazione U.T. n. 15 (Reg. Gen. N. 38) del 19.01.2018, e che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare le somme al cap. 1211 del bilancio 2018 a fronte dell’esecuzione dei lavori a favore di ditta da definire, e che tali spese sono tutte a carico della contabilità speciale per il sisma.

OGGETTO: SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PERICOLANTI SU VIA PUBBLICA. IN LOC. CALCARA DI USSITA, MEDIANTE PUNTELLAMENTO DEGLI EDIFICI DISTINTI AL N.C. AL F. 27 P.LLE 45-47-48 E DEMOLIZIONE DI QUELLO ALLA PART.LLA 49 DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI MICHELANGELI, DOMINICI, FIORELLI, BELLANTI (USUFRUTTUARIA), GIOIA, POLI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO DELL'ING. NICOLA MARIA GALLINA.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
F.to Boccaccini Gianluca

----------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

---------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
ORTENZI PATRIZIA