C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   IV   -  ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

----------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE NUMERO  443 DEL  28-11-18
REGISTRO GENERALE NUMERO 757

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA DI VIA PUBBLICA MEDIANTE INTERVENTO SUI FABBRICATI PERICOLANTI DISTINTI AL N.C.E.U. RISPETTIVAMENTE AL FOGLIO 25 P.LLE 164 E 478/PORZ. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
-	n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
-	n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
-	n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
-	n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Commissario Straordinario, dott. Mauro Passerotti, con decreto n. 4 del 21/08/2017 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - Assetto ed uso del Territorio" con decorrenza dal 11.09.2017;
PREMESSO che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumuli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;

RAVVISATO che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni agli immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;

RAVVISATO che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell’incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita “zona rossa”, con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni nell’ordinanza stabilite;

RAVVISATO che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ri-perimetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;

ATTESO che il Comune di Ussita è stato, a seguito di tali eventi sismici, quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, debbono rimanere nella zona (allevatori). L’intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure e di notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;

CONSIDERATO che, nonostante la popolazione abbia fatto rientro nel territorio comunale grazie all’installazione delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza), vi è ancora l’estrema e urgentissima necessità di ridurre la zona rossa onde permettere il più possibile di usufruire della intera viabilità e permettere la cantierizzazione all’interno dei borghi per far rientro alla normalità;

RAVVISATO che per poter ridurre la zona rossa e riaprire la maggior parte della viabilità, sono stati espletati specifici sopralluoghi dal GTS (Gruppo Tecnico di Supporto) formato dai seguenti Enti:
o	Vigili del Fuoco
o	Dipartimento Protezione Civile
o	Tecnico Comunale
o	Unità di Crisi MIBACT (Soprintendenza) 
aventi lo scopo di valutare il livello del danno strutturale degli immobili, i conseguenti interventi di messa in sicurezza da eseguire, le modalità dei medesimi, il soggetto deputato all’esecuzione degli stessi; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA l’Ordinanza capo dipartimento protezione civile n. 400 del 31 ottobre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; 

RAVVISATO che fino a maggio 2017 i Vigili del Fuoco eseguivano direttamente alcuni interventi di messa in sicurezza non particolarmente impegnativi, ma ad oggi purtroppo a causa dell’ingente lavoro a fronte delle poche maestranze, i medesimi hanno delegato completamente l’esecuzione degli interventi ai Comuni di appartenenza; 

RICHIAMATE le procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2017 con il quale è stato nominato il nuovo Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RAVVISATO che occorre procedere da parte dello scrivente Comune, con estrema urgenza alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza previa la redazione della progettazione con specifica perizia estimativa relativa agli interventi di cui sopra, onde poter poi procedere alla fase esecutiva degli interventi; 
VISTO il GTS n. 5182/2018 del 06/05/2018, scheda n. 005, relativo all’edificio in località Sorbo di Ussita distinto al N.C. al F. 25 p.lla 164 di proprietà di BARBONI NATALIA, DE SANCTIS MANGELLI GIORGIO, DE SANCTIS MANGELLI PAOLO, DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, GUIDUCCI MADDALENA, che ne prescrive lo “smontaggio controllato fino al solaio di calpestio del piano stradale”;

VISTO il GTS n. 5182/2018 del 06/05/2018, scheda n. 006, relativo all’edificio in località Sorbo di Ussita distinto al N.C. al F. 25 p.lla 478/porz. di proprietà ROSI VALERIA, che ne prescrive la demolizione totale;

RAVVISATO che occorre procedere da parte dello scrivente Comune, alla redazione della progettazione della messa in sicurezza dei suddetti immobili pericolanti su via pubblica, con specifica perizia estimativa, onde poter poi procedere alla fase esecutiva degli interventi; 

VISTO che l’Ufficio Tecnico Comunale in questa fase di emergenza è oberato di lavoro e sommerso dalle molteplici incombenze della ricostruzione per cui non riesce ad espletare la progettazione con i propri tecnici interni in quanto tra l’altro si trova in una sede provvisoria e ristretta priva delle attrezzature di progettazione necessarie;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

CONSIDERATO che in relazione all’affidamento del servizio in parola, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente può essere seguita la procedura di affidamento diretto, disciplinata dall’art. 36 del Codice dei contratti, in quanto trattasi di servizi inferiori a € 40.000,00 per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RAVVISATO che si ritiene opportuno consultare tecnici che abbiano fatto specifica richiesta, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione secondo la vigente normativa di settore; 

RAVVISATO che all’uopo è stato contattato per le vie brevi l’Ing. Federico Moretti con studio in Via Madonna delle Carceri 2 - Monte Castello di Vibio (PG), C.F. MRTFRC81P24L188G P.IVA 02951660543, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3551 dal 12 marzo 2013, e iscritto con il n. EP_012522_2017 all’Elenco di cui all’art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i.;
	
RAVVISATO che il medesimo si è reso disponibile ad eseguire l’incarico professionale secondo quanto pattuito nello schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATO che per l'intervento di cui trattasi non sarà necessario seguire il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, in quanto non è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici;

RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’affidamento dei servizi in parola;

RICHIAMATA la determina n. 203 (R.G. 364) del 7.06.2018 in cui si è determinato, fra l’altro, di:

1.	DI INCARICARE il professionista, Ing. Federico Moretti con studio in Via Madonna delle Carceri 2 - Monte Castello di Vibio (PG), C.F. MRTFRC81P24L188G P.IVA 02951660543, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3551 dal 12 marzo 2013, e iscritto con il n. EP_012522_2017 all’Elenco di cui all’art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i.; 
-	F.25 P.lla 164 di proprietà di:
BARBONI NATALIA 
DE SANCTIS MANGELLI GIORGIO
DE SANCTIS MANGELLI PAOLO
DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA
GUIDUCCI MADDALENA
ove sono previsti lavori di Demolizione controllata per un importo presunto pari d € 38.000,00 e pertanto per un ammontare presunto di oneri tecnici pari ad € 1.900,00 + cap. 4% pari ad € 76,00 + iva 22% pari ad € 434,72 per un totale di € 2.410,72;

-	F.25 P.lla 478/porz. di proprietà di:
ROSI VALERIA 
ove sono previsti lavori di Demolizione totale per un importo presunto pari ad € 8.000,00, e pertanto per un ammontare presunto di oneri tecnici pari ad € 400,00 + cap. 4% pari ad € 16,00 + iva 22% pari ad € 91,52 per un totale di € 507,52; 
 
compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione, e secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato alla presente;

RICEVUTA dal tecnico incaricato ing. Federico Moretti con prot. n. 8125 del 02.09.2018, la perizia per la messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbodistinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478 composta dai seguenti elaborati:

-	Relazione tecnica 
-	Capitolato Speciale di Appalto
-	Computo Metrico Estimativo
-	Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.)
-	Elaborati grafici

SENTITA per le vie brevi la Ditta DIEMME SERVICE SRLS. con sede in Isernia Loc. Rio Snc cap 86170, CF/P.IVA 00963360946 già iscritta nell’elenco degli operatori approvato con determina U.T. n. 80 del 16.06.2017 e iscritta all’anagrafe antimafia della prefettura ai sensi della vigente normativa;
RICHIAMATA la determina n. XXX (R.G. XXX) del XX.XX.2018 in cui si è determinato, fra l’altro, di:

1.	DI APPROVARE perizia tecnica ricevuta dal tecnico incaricato ing. Federico Moretti con prot. n. 8125 del 02.09.2018, la perizia per la messa in sicurezza della viabilità mediante demolizione dei fabbricati dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478 composta dai seguenti elaborati:
-	Relazione tecnica 
-	Capitolato Speciale di Appalto
-	Computo Metrico Estimativo
-	Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.)
-	Elaborati grafici

2.	DI APPROVARE il seguente Quadro Tecnico Economico:

a) SOMME PER LAVORI			
1)Lavori a base d'asta	 €	27.590,11	
oneri per la sicurezza	 €	5.813,28	
Totale appalto	 €	33.403,39	

b) SOMME A DISPOSIZIONE			
Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto IVA incl.	 €	 -	
1 I.V.A. su lavori (voce a.1) al 10% 	 €	3.340,34	
2 Spese tecniche per progettazione e D.L e contab.	 €	1.670,17	
			
4 CNIA	 €	 66,81	
5 I.V.A. su 2+4al 22% 	 €	382,13	
6 Incentivi RUP ex art. 113 comma 2 D.L 50/2016	 €	334,03	
7 imprevisti 	 €	1.002,10	
			
Totale somme a disposizione 	 €	6.795,58	
TOTALE COSTO INTERVENTO 	 €	40.198,97	

3.	DI AFFIDARE alla Ditta DIEMME SERVICE SRLS. con sede in Isernia Loc. Rio snc, cap 86170, CF/P.IVA 00963360946, iscritta all’anagrafe antimafia della prefettura ai sensi della vigente normativa, i lavori di messa in sicurezza della viabilità mediante demolizione dei fabbricati dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478, per l’importo di € 23.451,59 al netto del ribasso d’asta del 15% su € 27.590,11 pari a € 4.138,52 più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.813,28 per un totale contrattuale di € 29.264,87 + iva 10% pari a € 2.926,49;

CONSIDERATO che con verbale del 08.10.2018 è stata effettuata la consegna dei lavori all’impresa appaltatrice DIEMME SERVICES SRLS;

CONSIDERATO che il giorno 23.10.2018 è stato compilato un verbale di sospensione lavori poiché si sono verificati, durante la lavorazione, imprevisti crolli locali delle murature del primo piano sotto strada già fortemente lesionate, che hanno determinato il collasso del solaio di piano;

CONSIDERATA la comunicazione via pec del 24.10.2018 con cui il tecnico incaricato, ing. Federico Moretti, a fronte della suddetta imprevista circostanza, ha richiesto un sopralluogo a questo Comune per valutare congiuntamente le modalità di prosecuzione dell’intervento, a seguito concordata in termini di demolizione totale del fabbricato;

VISTA la nota pec del 25.10.2018 con cui questo ufficio autorizzava la totale demolizione del fabbricato distinto al NCEU al Foglio 25 P.lla 164, invitando il Direttore dei lavori a a redigere, al termine della esecuzione dei lavori, opportuna perizia di assestamento che tenesse conto delle modifiche intervenute;

VISTO il verbale di ripresa lavori del 25.10.2018;

CONSIDERATO che si sono conclusi i lavori di demolizione del fabbricato distinto al NCEU al Foglio 25 P.lla 164, come da verbale di ultimazione del 29.10.2018;

RICEVUTA dal tecnico incaricato ing. Federico Moretti con prot. n. 11173 del 16.11.2018, la perizia di assestamento finale per la messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478 composta dai seguenti elaborati:
-	Perizia di assestamento finale 
-	Verbale di concordamento nuovi prezzi
-	Computo Metrico Consuntivo
-	Libretto delle misure
-	Registro di contabilità 
-	Sommario del Registro di contabilità 
-	Quadro Tecnico Economico di assestamento finale 
-	Quadro tecnico comparativo
-	Certificato di regolare esecuzione
-	Certificati di pagamento

VISTO il certificato di pagamento n.1 a favore dell’impresa affidataria Ditta DIEMME SERVICE SRLS con sede in Isernia Loc. Rio snc, cap 86170, CF/P.IVA 00963360946 per il pagamento della rata n.1 di € 25.067,18 + iva al 10% pari ad € 2.506,72 per un totale di € 27.573,90 a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478;
ATTESO che la Ditta alla Ditta DIEMME SERVICE SRLS. con sede in Isernia Loc. Rio snc, cap 86170, CF/P.IVA 00963360946 già iscritta nell’elenco degli operatori approvato con determina U.T. n. 80 del 16.06.2017 e iscritta all’anagrafe antimafia della prefettura ai sensi della vigente normativa ha presentato fattura n. 3/PA del 27.11.2018 a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478 per un importo pari a € 25.067,18 + iva al 10% pari ad € 2.506,72 per un totale di € 27.573,90;
VISTO il DURC della Ditta DIEMME SERVICE SRLS rilasciato con prot. INAIL_13304641 in data 01.10.2018 e con data di scadenza validità 29/01/2019;
VISTO il certificato di pagamento n.1 a favore dell’ing. Federico Moretti per il pagamento della rata n. 1 di € 1.704,71 + cp pari ad € 68,19 + iva al 22% pari a € 390,04 per un totale di € 2.162,30 a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478;
ATTESO che l’ing. Federico Moretti con studio in Via Madonna delle Carceri 2 - Monte Castello di Vibio (PG), C.F. MRTFRC81P24L188G P.IVA 02951660543, ha presentato fattura n. FPA 2/18 del 23.11.2018 a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478 per un importo pari a € 1.704,71 + cp pari ad € 68,19 + iva al 22% pari a € 390,04 per un totale di € 2.162,30;
VISTE le deroghe per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi eccezionali eventi sismici (art. 15-ter D.L. 189/2016 conv. in L.229/2016 – O.C.D.P.C. n. 408/2016) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile con Circolare Prot. n. UC/TERAG_SM/0032777 del 15.05.2017;

Visto il CIG: Z37243F785 - Ing. Moretti Federico - F.25 P.lle 164 e 478 porz.
Visto il CIG: ZE2251D4D3 – Ditta DIEMME SERVICE - Lavori

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1.	DI APPROVARE la perizia di assestamento finale, ricevuta tecnico incaricato ing. Federico Moretti con prot. n. 11173 del 16.11.2018, relativa alla messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478/porz., formata dai seguenti elaborati:

-	Perizia di assestamento finale 
-	Verbale di concordamento nuovi prezzi
-	Computo Metrico Consuntivo
-	Libretto delle misure
-	Registro di contabilità 
-	Sommario del Registro di contabilità 
-	Quadro Tecnico Economico di assestamento finale 
-	Quadro tecnico comparativo
-	Certificato di regolare esecuzione
-	Certificati di pagamento

2.	DI APPROVARE specificatamente il Quadro Tecnico Economico Finale così articolato: 

a) SOMME PER LAVORI			
1)Lavori a base d'asta	€	 22.651,65 	
oneri per la sicurezza	€	 5.813,28 	
Totale appalto	€	 28.464,93 	
Sconto di gara 15%	€	 3.397,75 	
Importo ribassato	€	 19.253,90 	
Totale Di Contratto	€	 25.067,18 	
			
b) SOMME A DISPOSIZIONE			
Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto IVA incl.	€	- 	
1 I.V.A. su lavori (voce a.1) al 10% 	€	 2.506,72 	
2 Spese tecniche per progettazione e D.L e contab.	€	 1.704,71 	
4 CNIA	€	68,19 	
5 I.V.A. su 2+4al 22% 	€	390,04 	
6 Incentivi RUP ex art. 113 comma 2 D.L 50/2016(0,04% Tot. App.)	€	334,03 	
			
Totale somme a disposizione 	€	 5.003,68 	
TOTALE COSTO INTERVENTO 	€	 30.070,87 	

3.	DI VARIARE l’impegno n. 559 assunto al cap. 1211 del bilancio 2018 a favore della Ditta DIEMME SERVICE SRLS. con sede in Isernia Loc. Rio snc, cap 86170, CF/P.IVA 00963360946 con Det. R.G. 576 del 19.09.2018, in quanto si è verificata una economia di spesa pari ad € 4.617,46 (= € 32.191,36 - € 27.573,90);

4.	DI APPROVARE il certificato di pagamento n.1 a favore dell’impresa affidataria DIEMME SERVICE SRLS. con sede in Isernia Loc. Rio snc, cap 86170, CF/P.IVA 00963360946 per il pagamento della rata n.1 di € 25.067,18 + iva al 10% pari ad € 2.506,72 per un totale di € 27.573,90 a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478/porz.;

5.	DI LIQUIDARE a favore dell’impresa DIEMME SERVICE SRLS con sede in Isernia Loc. Rio snc, cap 86170, CF/P.IVA 00963360946, la fattura n. 3/PA del 27.11.2018 emessa a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478/porz. per un importo pari ad € 25.067,18 + iva al 10% pari ad € 2.506,72 per un totale di € 27.573,90; 

6.	DI VARIARE l’impegno di spesa a favore dell’ing. Federico Moretti, essendosi verificata una economia di spesa pari ad € 755,30 (€ 2.918,24 - € 2.162,94) per cui è necessario ridurre l’impegno n. 367/2018 assunto al cap. 1210 con Det. R.G. 364 del 07.06.2018;

7.	DI APPROVARE il certificato di pagamento n.1 a favore dell’ing. Federico MORETTI per il pagamento della rata n. 1 di € 1.704,71 + cp pari ad € 68,19 + iva al 22% pari a € 390,04 per un totale di € 2.162,30 a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478/porz.;

8.	DI LIQUIDARE a favore dell’ing. Federico MORETTI, la fattura n. FPA 2/18 del 23.11.2018 a fronte dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Ussita Loc. Sorbo distinti al N.C.E.U. al F. 25 – P.lle 164 e 478/porz. per un importo pari a € 1.704,71 + cp pari ad € 68,19 + iva al 22% pari a € 390,04 per un totale di € 2.162,30.

OGGETTO: SISMA 2016. MESSA IN SICUREZZA DI VIA PUBBLICA MEDIANTE INTERVENTO SUI FABBRICATI PERICOLANTI DISTINTI AL N.C.E.U. RISPETTIVAMENTE AL FOGLIO 25 P.LLE 164 E 478/PORZ. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
F.to Boccaccini Gianluca

----------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------
N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

---------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
ORTENZI PATRIZIA