ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000,  il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  26-04-2019

	Il Responsabile del Servizio Finanziario	
	f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi 
dal      07-05-2019      al      22-05-2019

Lì  07-05-2019

	IL Responsabile delle Pubblicazioni	
	Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L’ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Castelli, 24-04-2019					Il Responsabile del Settore
               Geom. Daniele DI BONAVENTURA

		
	COPIA	
COMUNE DI CASTELLI
(Provincia di Teramo)
Settore TECNICO

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

N° 59   DEL  24-04-2019

Registro di Settore
N°55  del 24-04-2019		Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Ponte Grue a margine della S.P. n.37. Finanziamento 8xMille a diretta gestione statale. Approvazione atti contabili finali e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione spettanze ditta esecutrice.	
			
Importo			
€   294.093,09			
			
CIG			
57983673D1			

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno  duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di aprile, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

Premesso che:
•	con deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 25/09/2012, come successivamente modificata con Deliberazione di G.C. n.78 del 23/12/2013, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico in loc. Ponte Grue a margine della strada prov.le n.37, assegnando allo scopo la necessaria dotazione finanziaria;
•	con determinazione n.118 del 16/08/2014, a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi degli artt.57 e 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006, provvedeva ad aggiudicare definitivamente l'effettuazione dei lavori in oggetto alla ditta MORETTI Quintilio srl con sede in Crognaleto (TE), per un importo, al netto del ribasso offerto, di € 226.126,95 oltre ad € 15.180,71 per oneri sulla sicurezza, per un totale complessivo di lavori contratto pari ad euro 241.307,66 oltre iva;
•	in data 12/01/2015 venivano consegnati i lavori del caso previa sottoscrizione di specifico verbale, redatto ai sensi dell'art.154 del D.P.R. n.207/2010;
•	successivamente, in data 03/03/2015 veniva redatto specifico verbale di sospensione dei lavori in virtù degli eventi calamitosi culminati nella dichiarazione di stato di emergenza per il maltempo di febbraio e marzo 2015 {Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2015) che causava una compromissione dello stato dei luoghi tale da comportare la necessità di rimodulare e variare il progetto originario;
•	con Deliberazione di G.C. n.24 DEL 27/07/2017 veniva, allo scopo, approvata specifica perizia suppletiva e di variante relativa ai “lavori di mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico in loc. Ponte Grue a margine della strada prov.le n.37”, redatta dalla Direzione lavori, confermando l’importo netto contrattuale in euro € 241.307,00 oltre iva;
•	con verbale del 24/07/2017 veniva disposta la ripresa dei lavori e che, a seguito dei ripetuti ed intensi fenomeni meteorologici, della sensibilità morfologica dei luoghi e della loro complessa accessibilià, nonché in virtù dell'articolata fase di predisposizione ed installazione degli impianti tecnoclogici di rilevamento, si registravano diverse sospensioni e riprese dei lavori secondo il seguente calendario:
- sospensione n. 2 in data 13/10/2017
- ripresa n. 2 in data 9/11/2017
- sospensione n. 3 in data 14/11/2017
- ripresa n. 3 in data 24/7/2018
- sospensione n. 4 in data 9/8/2018
- ripresa n. 4 in data 24/9/2018
- sospensione n. 5 in data 16/10/2018
- ripresa n. 5 in data 4/3/2019
Accertato che, conseguentemente, i lavori sopra richiamati sono stati portati regolarmente a termine in data 15/03/2019;
Vista la documentazione contabile finale, redatta dal Direttore dei Lavori nonché il relativo Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:
•	lo stato finale dei lavori da cui discende un importo generale di lavori eseguiti pari ad € 248.696,91 al lordo del ribasso offerto in sede di gara, per un totale, quindi, netto di € 241.059,91 oltre iva;
•	la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito per l’impresa netto di € 241.059,91;

Dato atto:
▪	i lavori in parola, sono assistiti totalmente da fondi a valere sulla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale (annualità 2010), di cui alla comunicazione della Presidenza del Consigli dei Ministri del 14/02/2011 prot. n.DICA2255, nonché quella del 03/12/2013 prot. n.DICA25108, ed iscritti nel bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 1461 rr.pp.;
▪	della regolarità contributiva  della ditta esecutrice dei lavori come risultante dal d.u.r.c. emesso allo scopo;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto IL D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1.	Di approvare gli atti contabili finali, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori condotta dall'Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un importo lavori eseguiti pari ad € 241.059,91 quale risultante credito d'impresa, oltre iva al 22% pari ad € 53.033,18 per un totale di € 294.093,09.
2.	di dare atto del seguente quadro economico assestato redatto a conclusione dei lavori e ricomprendente la specificazione delle spese effettivamente sostenute, o ancora da sostenere, compreso le economie derivanti dalle lavorazioni non effettuate o dal ribasso effettuato in sede di affidamento dei lavori, il tutto al fine di procedere con la rendicontazione delle spese sostenute al  Dipartimento specificatamente individuato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale incaricato di monitorare l'utilizzo dei fondi derivanti dall'8xMille a diretta gestione statale:

Comune di Castelli – Provincia di Teramo	
Progetto esecutivo	
QUADRO ECONOMICO ASSESTATO FINALE	
					VARIANTE	STATO 
FINALE ASSESTATO	
I M P O R T O D I P R O G E T T O	€	387.631,15	387.631,15	
	TOTALE LAVORI			€		248.951,98	
A)	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA come da C.R.E.			€	241.307,66	241.059,91	
	Di cui oneri per la sicurezza			€	15.160,97	15.180,71	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :						
B1)	Lavori e forniture in economia esclusi dall’appalto 			€	2.000,00	0,00	
B2)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio (prog. originario)			€	11.314,66	11.315,40	
B3)	Gestione e manutenzione del sistema di allertamento			€	4.350,00	17.688,56	
B4)	Imprevisti			€	4.825,43	0,00	
B5)	Acquisizione aree o immobili			€	0,00	0,00	
B6)	Spese tecniche:						
B6.1)a	Progettazione 			€	12.755,56	12.755,56	
B6.1)b	coord. sicurezza in fase di progettazione			€	1.926,73	1.926,73	
B6.1)c 	Direzione dei Lavori, perizia di variante, coord. per la sicurezza in fase di eecuzione, contabilità e C.R.E. 			€	17.414,30	17.414,30	
B6.3)a	Relazione geologica (su progetto originario)			€	7.600,35	7.600,35	
B6.3)b	Relazione geologica integrativa (su perizia di variante)			€	1.802,70	1.802,70	
B.6.4)	Consulenza per valutazione di incidenza			€	655,74	655,74	
B7) 	Spese per funzioni di Resp. del proc.			€	3.281,78	3.281,78	
B8)	Contributo ANAC			€	225,00	225,00	
B9)	Verifiche, prove di laboratorio, collaudi			€	1.165,00	1.165,00	
B10)	Economie di gara			€	7.644,35	0,00	
B11)a	Cassa Ingegneri-Architetti 	4,00%	di B6.1)a + B6.1)b	€	587,29	587,29	
B11)b	Cassa Ingegneri-Architetti	4,00%	di B6.1) c	€	696,57	696,57	
B12)	Cassa Geologo 	2,00%	di B6.3) a + B6.3)b	€	188,06	188,06	
B13)	I.V.A.:						
B13)a	I.V.A. sui lavori	22,00%	di A)	€	53.087,68	53.033,18	
B13)b	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	B6.1)a+B6.1)b+B6.1)c+B6.3)a+B6.3)b+B6.4)+B11)a+B11)b+B12)	€	9.598,01	9.598,01	
B13)c	I.V.A. su accertamenti, verifiche e collaudi	22,00%	di B9)	€	256,30	256,30	
B13)d	I.V.A. su indagini geognostiche e prove	22,00%	di B2)	€	2.489,23	2.489,23	
B13)e	I.V.A. su gestione e manutenzione sistema di allertamento	22,00%	di B3)	€	957,00	3.891,48	
B13)f	I.V.A. su lavori in economia	22,00%	di B1)	€	440,00	0,00	
B13)g	I.V.A. su imprevisti	22,00%	di B4)	€	1.061,75	0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		 totale	€	146.324,06	146.571,24	
	TOTALE INTERVENTO ( A + B)	€	387.631,15	387.631,15	
3.	Di liquidare alla Ditta MORETTI QUINTILIO s.r.l. con sede in Crognaleto (TE) – fraz. Tottea l’importo di € 294.020,00 compreso iva al 22%, quale corrispettivo per il pagamento a saldo della fattura n.9/pa del 08/04/2019 relativa alla 1^ rata del credito complessivo relativo alle risultanze del C.R.E. ammontante ad € 294.039,09.
4.	Di dare atto che l'intervento in parola è individuato ai codici C.U.P. H27B11000030001 - CIG 57983673D1.
5.		Di dare, altresì, atto che la spesa che comporta il presente provvedimento, dell'importo di € 294.020,00 è ricompresa totalmente nei finanziamenti fondi a valere sulla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale (annualità 2010), di cui alla comunicazione della Presidenza del Consigli dei Ministri del 14/02/2011 prot. n.DICA2255, nonché quella del 03/12/2013 prot. n.DICA25108, ed iscritti nel bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 1461 rr.pp del corrente esercizio finanziario, nella modalità che segue:

N. Capitolo	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs.118/2011	Importo	
	Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello		
1461 rr.pp.	9	2	05.4	2	5	99	99	999	€ 241.000,00	
1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 53.020,00	

1.	Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di   competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	Il Responsabile dell’Area Tecnica	
	F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA