ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Numero    24

Seduta del 27-07-2017 

Oggetto	Intervento di mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico in loc. Ponte Grue a margine della S.P. n.37. Perizia di variante e suppletiva. Approvazione.	

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 13:15 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
SECA RINALDO	SINDACO	P	
FAIANI ALESSANDRO	ASSESSORE	P	
PETRILLI ANDREA FRANCO	VICE SINDACO	A	
Presenti n.   2 assenti n.    1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SECA RINALDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-07-2017	
Il Responsabile del servizio interessato	

Di Bonaventura Daniele	

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data:           	
Il Responsabile del servizio interessato	

DI CLAUDIO GIOVANNI	

LA  GIUNTA  COMUNALE
Premesso che:
•	con deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 25/09/2012, come successivamente modificata con Deliberazione di G.C. n.78 del 23/12/2013, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico in loc. Ponte Grue a margine della strada prov.le n.37, assegnando allo scopo la necessaria dotazione finanziaria;
•	con determinazione n.118 del 16/08/2014, a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi degli artt.57 e 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006, provvedeva ad aggiudicare definitivamente l'effettuazione dei lavori in oggetto alla ditta MORETTI Quintilio srl con sede in Crognaleto (TE), per un importo, al netto del ribasso offerto, di € 226.126,95 oltre ad € 15.180,71 per oneri sulla sicurezza, per un totale complessivo di lavori contratto pari ad euro 241.307,66 oltre iva;
RILEVATO che
- i lavori in parola, sono assistiti totalmente da fondi a valere sulla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale (annualità 2010), di cui alla comunicazione della Presidenza del Consigli dei Ministri del 14/02/2011 prot. n.DICA2255, nonché quella del 03/12/2013 prot. n.DICA25108, ed iscritti nel bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 1461 rr.pp.;
- in data 12/01/2015 venivano consegnati i lavori del caso previa sottoscrizione di specifico verbale, redatto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.154 del D.P.R. n.207/2010;
- successivamente, in data 03/03/2015 veniva redatto specifico verbale di sospensione dei lavori in virtù degli eventi calamitosi culminati nella dichiarazione di stato di emergenza per il maltempo di febbraio e marzo 2015 {Gazzetta Ufficiale n.108 del12 maggio 2015) con la consequenziale necessità di rimodulare e variare il progetto di che trattasi;
VISTO:
- che lo stato dei luoghi è risultato notevolmente modificato nonché fortemente compromesso dai richiamati eventi meteorolgici al punto di comportare la necessità di rimodulare molte scelte progettuali iniziali, prevedendo una serie di nuovi interventi in sostituzione parziale di quelli originariamente previsti;
- che tali modifiche possono congruamente rientrare nella casistica degli interventi conseguenti a cause impreviste ed imprevedibili all'atto della progettazione;
- che, allo scopo, la medesima Direzione dei Lavori predisponeva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs. n°50/2016, una proposta di perizia di variante e suppletiva senza aumento dell'importo complessivo dell'appalto ne' dell'importo contrattuale dei lavori come composta dei seguenti elaborati:
Elab. n. 1	 Tav. 1 Elaborati Grafici	
Elab. n. 2	Relazione generale	
Elab. n. 3	Atto d sottomissione 	
Elab. n. 4	Capitolato speciale d'appalto – Parte seconda, disciplinare degli elementi tecnici	
Elab. n. 5	Analisi dei prezzi	
Elab. n. 6	Elenco dei prezzi unitari	
Elab. n. 7	Stima di progetto	
Elab. n. 8	Quadro comparativo	
Elab. n. 9	Cronoprogramma	
Elab. n. 10	Piano di manutenzione	
Elab. n. 11	Piano di sicurezza e coordinamento	
Elab. n. 12	Quadro comparativo di raffronto per le singole voci di computo metrico	
Elab. n. 13	Quadro di incidenza percentuale della manodopera	
Elab. n. 14	Quadro di incidenza percentuale della sicurezza	
Elab. n. 15	Elenco elaborati	
DATO ATTO che la necessità di redigere una perizia di variante deriva dal fatto che, non appena iniziati i lavori, si sono appalesati eventi imprevisti ed imprevedibili in misura tali da inficiare le previsioni progettuali iniziali;
PRESO ATTO CHE:
-	l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere risorse aggiuntive rispetto all'importo totale di quadro economico di € 387.631,05 già prevista e finanziata come sopra richiamato ed approvata con la sopra menzionata deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 23/12/2013 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento. 
-	il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre nuove diverse lavorazioni è così suddiviso:

				VARIANTE	PROGETTO
ORIGINARIO	
€	387.631,15	387.631,15	
						
	TOTALE  LAVORI		€		248.951,98	
A)	TOTALE  LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA	€	241.307,00	241.307,66	
	Di cui oneri per la sicurezza	€	15.160,97	15.180,71	
	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :				
B1)	Lavori e forniture in economia esclusi dall’appalto	€	2.000,00	5.000,00	
B2)	Indagini geognostiche e prove di laboratorio GIA’ EFFETTUATE	€	11.314,66	10.200,00	
B3)	Gestione e manutenzione del sistema di allertamento	€	4.350,00		
B4)	Imprevisti		€	4.826,14	3.698,03	
B5)	Acquisizione aree o immobili		€	0,00	13.164,12	
B6)	Spese tecniche:					
B6.1) A	Progettazione GIA’ EFFETTUATA		€	12.755,56	
25.335,07	
B6.1) B	Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento alla sicurezza	€	17.414,30		
B6.2) A	Spese per coordinamento sicurezza GIA’ EFFETTUATE	€	1.926,73		
B6.3) A	Relazione geologica GIA’ EFFETTUATA	€	7.600,35	7.600,00	
B6.3) B	Relazione geologica		€	1.802,70		
B.6.4)	Consulenza per valutazione di incidenza GIA’ EFFETTUATA	€	655,74		
B7) A	Spese per funzioni di Resp. del proc.	€	3.281,78	4.979,04	
B8)	Contributo ANAC		€	225,00	497,90	
B9)	Verifiche, prove di laboratorio, collaudi	€	1.165,00	3.000,00	
B10)	Economie di gara		€	7.644,35		
B11) A	Cassa Ingegneri-Architetti GIA’ EFFETTUATA	4,0% di B6.1) A e B6.2) A	€	587,29	1.013,40	
B11) A	Cassa Ingegneri-Architetti	4,0% di B6.1) B e B6.2) B	€	696,57		
B12)	Cassa Geologo GIA’ EFFETTUATA	2,0% di B6.3) A	€	152,01	152,00	
	Cassa Geologo	2,0% di B6.3) B	€	36,05		
B13)	I.V.A.					
	I.V.A. sui lavori	22% di A)+B1)	€	53.087,54	52.279,92	
	I.V.A. su spese tecniche	22% di B7.1)+B7.2)+B7.3)+B12)+B13)	€	9.598,01	7.161,00	
	I.V.A. su accertamenti, verifiche e collaudi	22% di B10)	€	256,30	630,00	
	I.V.A. su indagini	22% di B2)	€	2.489,23	2.142,00	
	I.V.A. su gestione e manutenzione sistema di allertamento	22% di B2)	€	957,00		
	I.V.A. su lavori in economia	22% di B1)	€	440,00	1.050,00	
	I.V.A. su imprevisti	22% di B4)	€	1.061,75	776,59	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	totale	€	146.324,06	138.679,07	
	TOTALE  GENERALE	€	387.631,06	387.631,05	
- Vista la relazione del responsabile del procedimento sull’ammissibilità della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.161 - d.p.r. 207/2010;
-Visto lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi riportato in allegato al presente atto, regolarmente firmato per accettazione dall’Impresa appaltatrice dei lavori;
- Dato atto che con il suddetto atto di sottomissione l’impresa si è obbligata ad eseguire i lavori nell’arco di tempo fissato nel contratto principale;
Visto il D.Lgs. 267/2000
Visto il D.lgs. n.50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora in vigore);
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1.	le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente.
2.	Approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai “lavori di mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico in loc. Ponte Grue a margine della strada prov.le n.37)”, redatta dalla Direzione lavori e composta dagli elaborati richiamati in premessa che conferma l’importo netto contrattuale in euro € 241.307,00 oltre iva;
3.	Approvare lo schema di atto di sottomissione ed verbale concordamento nuovi prezzi allegati al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritti per accettazione dall’Impresa appaltatrice, immediatamente impegnativi per la stessa mentre subordinati ad approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 
4.	Dare atto che i lavori in parola, sono assistiti totalmente da fondi a valere sulla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale (annualità 2010), di cui alla comunicazione della Presidenza del Consigli dei Ministri del 14/02/2011 prot. n.DICA2255, nonché quella del 03/12/2013 prot. n.DICA25108, ed iscritti nel bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 1461 rr.pp.
5.	Dare, altresì, mandato ai responsabili dei rispettivi Servizi, per quanto di competenza, di dare piena e consequenziale attuazione a quanto riportato nel presente atto.
INOLTRE
a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, ricorrendone i presupposti di legge, 
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario						IL SINDACO
		Dr. Di Felice Jean Dominique			   Rinaldo Seca

Prot. n._______

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

•	Che la presente deliberazione:
o	E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
o	E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000);
o	E’ stata trasmessa al competente organo di controllo:
•	In quanto trattasi di materia prevista dall’art. 126-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000;
•	Per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);
•	A richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);

Castelli, li_____________
Il Responsabile del Servizio

_______________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
•	Che la presente deliberazione:

o	E’ immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;
o	E’ divenuta esecutiva il giorno_________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, c.3, T.U., n. 267/2000)

Castelli, li_____________
Il Responsabile del Servizio

______________________