SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  169 / 386  Del  08-08-17

______________________________________________________
Oggetto:	TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI PRESSO LA SEDE DELLA
		COMUNITA' MONTANA DEL GRAN SASSO. APPROVAZIONE PE=
		RIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE.

Tossicia, lì  08-08-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  08-08-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       TARQUINI FRANCO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

 “PREMESSO  che gli eventi sismici del 24/08/2016, del 30/10/2016 e del 18/01/2017 che hanno colpito il territorio del Comune di Tossicia hanno danneggiato  l’edificio denominato Palazzo Marchesale sede degli uffici comunali;
CHE, precauzionalmente, dopo gli episodi sopracitati gli uffici sono stati  trasferiti nella porzione di Palazzo denominata “ex Carceri” già sede dell’ufficio di Vigilanza ;
CHE dal sopralluogo effettuato in data 18/02/2017 dalla squadra AEDES  P1847  è stato attribuito un esito “E”, totalmente inagibile; all’edificio PALAZZO MARCHESALE e “ e un  esito “F”, inagibile per pericolo esterno; all’edificio” EX CARCERI;
CHE con Ordinanza sindacale n.98 del 15/03/207 è stata dichiarata  la totale inagibilità del piano primo e del piano sottotetto del Palazzo Marchesale sede degli uffici comunali;
CHE si è reso necessario trasferire gli uffici comunali in altra sede individuando come sede idonea un’ala dell’edificio della Comunità Montana Gran Sasso in Contrada Piano San Liberatore;
CHE  la presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ha rilasciato l’Autorizzazione  prot.n.DIP/TERAG SM/0027251 del 19/04/2017;

CHE la  Comunita’ Montana del Gran Sasso ha rilasciato l’autorizzazione   prot.n. 390 del 21/04/2017 pervenuta a questo ente in pari data al n.1779 di prot. ;
CHE con  delibera di G.M n.29  del 24/04/2017  è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo per  i lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI PER NUOVA SEDE COMUNALE PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA DEL GRAN SASSO  predisposto dal responsabile dell’ufficio tecnico manutentivo   con il seguente quadro economico:
A. IMPORTO   LAVORI
1	Importo lavori edili				   	 € 31.233,27
2	di cui oneri per la Sicurezza              			 €   869,27   ( non soggetti a ribasso )
B. SOMME A DISPOSIZIONE						
Lavori in economia					€   15.428,84
Di cui 
Impianto di rete                                                                    €. 3.329,29 (compreso €. 85,16 per sicurezza)
Impianto elettrico                                                                €. 12.099,55(compreso €.311,57 per sicurezza)
Imprevisti 					               €    3.072,22
Iva  							€   10.265,67
							
Costo Totale dell'Intervento					  € 60.000,00

CHE all’intervento è stato assegnato il codice CUP 184H17000210005 mentre il CIG per i lavori edili è ZDC1E545C8, per l’impianto elettrico  è ZA71E558D5  e per l’impianto di rete è Z131E55924;

CHE con DETERMINA  del settore tecnico manutentivo  n. 134/304 del 31/05/2017è stata affidata,ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016, l’esecuzione dei lavori edili alla ditta C.E.D. Tarquini Rag. Bruno  con sede in Viale Duca Degli Abruzzi 64046 Montorio al Vomano (TE) p. IVA 00874290679 che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta  di €.31.233,27(di cui €.869,27 per la sicurezza non soggetti a ribasso) pari al 11,314%  per l’importo totale offerto di €. 27.797,61 di cui €. 869,27 per oneri della sicurezza oltre IVA per un totale complessivo di €. 33.913,43;

CHE con DETERMINA  del settore tecnico manutentivo  n. 123/264 del 16/05/2017è stata affidata,ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016, l’esecuzione dei lavori dell’impianto di rete alla ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. con sede in Via circonvallazione ,131 62024 Matelica (MC) p. IVA 00384350435 che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta  di €.3.329,29(di cui €.85,16 per la sicurezza non soggetti a ribasso) pari al 3,06%  per l’importo totale offerto di €. 3.230,00 di cui €. 85,16 per oneri della sicurezza oltre IVA per un totale complessivo di €. 3.940,60;

CHE con DETERMINA  del settore tecnico manutentivo  n. 135/305 del 31/05/2017è stata affidata,ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016, l’esecuzione dei lavori elettrici ditta S.I.T.EL srl   con sede in Via di Sotto m,165 65125 Pescara p. IVA 0142926068 che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta  di €.12.099,55 (di cui €.311,57per la sicurezza non soggetti a ribasso)) pari al 10,23%  per l’importo totale offerto di €. 10.893,37 di cui €. 311,57 per oneri della sicurezza oltre IVA per un totale complessivo di €. 13.289,91;

CONSIDERATO che il responsabile del settore tecnico manutentivo nella veste di direttore dei lavori ha ritenuto di predisporre una perizia di variante suppletiva relativamente ai lavori edili e all’impianto elettrico , ai sensi dell’art 106, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare l’impostazione progettuale e nel perseguimento degli obbiettivi di intervento per i seguenti nuovi importi contrattuali, e nello specifico relativamente ai :
LAVORI EDILI : nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta, di €. 30.050,28( comprensivo degli oneri della sicurezza ), con un aumento percentuale del+8,10% . pari ad €.2.252,39 (compreso gli oneri per la sicurezza)   oltre iva   come per legge rispetto al contratto originario;
LAVORI IN ECONOMIA -IMPIANTO ELETTRICO : nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta ,di €.12.418,50 (comprensivo degli oneri della sicurezza) con un aumento percentuale del 14,007%…. pari ad €.1.525,13…..oltre iva come per legge rispetto al contratto originario;

VISTI gli atti di perizia di variante suppletiva ,redatta dall’arch. Anna Cicconi ,responsabile del settore tecnico manutentivo in qualità di direttore dei lavori costituita dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica perizia di variante;
Computo variante lavori edili,
Computo di variante lavori impianto elettrico;
Computo di variante lavori impianto di rete;
Quadro economico complessivo di variante;
Analisi prezzi relativi alla perizia di variante;
Quadro comparativo;
 Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi (lavori edili);
Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi (lavori impianto elettrico;

DATO ATTO che la perizia di variante suppletiva di che trattasi :
•	non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
•	non comporta nuove categorie di lavoro;
•	prevede un importo in aumento per i lavori edili al netto del ribasso d’asta pari a €. €.2.252,39 ,oltre iva come per legge, che comporta rispetto al contratto originario un aumento del  8,10%;
•	prevede un importo in aumento per i lavori elettrici al netto del ribasso d’asta pari a €. 1.525,13 ,oltre iva come per legge, che comporta rispetto al contratto originario un aumento del 14,00%;

VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto in data 10/07/2017 dalla ditta C.E.D. Tarquini Rag. Bruno  con sede in Viale Duca Degli Abruzzi 64046 Montorio al Vomano (TE) p. IVA 00874290679 che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad €.2.252,39 al netto del ribasso d’asta ed oltre iva come per legge;

VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto in data 10/07/2017 dalla ditta S.I.T.EL srl   con sede in Via di Sotto m,165 65125 Pescara p. IVA 0142926068 che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad €.1.525,13 al netto del ribasso d’asta ed oltre iva come per legge;

RITENUTO pertanto , provvedere ad approvare la perizia di variante suppletiva ed il quadro economico rideterminato , come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	

		Q.E. approvato con D.G.C. N. 29/2017	Q.E.aggiudicazione	Q.E. al netto del ribasso in variante	Variazione 
contrattuale	Variazione percentuale	
A)	Importo lavori edili	€uro	€uro	€uro	€uro	%	
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	30.364,00	26.928,62	29.170,69	+2.242,07	+8,13	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribassoi	869,27	869,27	887,13	+17,86	+8,13	
	Importo lavori da applatare	31.233,27	27.797,89	30.057,82	+2.259,93	+8,13	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€uro	€uro	€uro	€uro	%	
B1	Somme in economia	15.428,84	14.123,37	15.648,41	+1.525,04	+10,80	
B1a	Impianto di rete 	3.329,29	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	
B1a1	Importo lavori soggetti a ribasso	3.244,13	3.144,84	3.144,84	0,00	0,00	
B1a2	Oneri della sicurezza	85,16	85,16	85,16	0,00	0,00	
B1b	Impianto elettrico	12.099,55	10.893,37	12.418,41	+1.525,04	+14,00	
B1b1	Importo lavori soggetti a ribasso	11.787,98	10.581,80	12.064,08	+1.482,28	+14,00	
B1b2	Oneri della sicurezza	311,57	311,57	354,33	+42,76	+14,00	
B2	Imprevisti	3.072,22	3.072,22	3.072,22	0,00	0,00	
B3	IVA	10.265,67	9.222,68	10.055,37	+832,69	+9,03	
B4	ECONOMIE DI RIBASSO 	0,00	5.783,84	1.166,18	 
 	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.766,73	32.202,11	29.942,18	 	
	TOTALE COMPLESSIVO	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

Riconosciuta la propria competenza all’approvazione della perizia di variante di cui sopra in quanto gli interventi rientrano tra quelli previsti all’art.106 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016  e s.m. e ii.;
VISTO il dpr 207/2010;
VISTO il D.lgs.50/2016;

DETERMINA

APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, il progetto DI VARIANTE SUPPLETIVA PER L’ ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI   NUOVA SEDE COMUNALE PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA DEL GRAN SASSO  avente il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO	

		Q.E. approvato con D.G.C. N. 29/2017	Q.E.aggiudicazione	Q.E. al netto del ribasso in variante	Variazione 
contrattuale	Variazione percentuale	
A)	Importo lavori edili	€uro	€uro	€uro	€uro	%	
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	30.364,00	26.928,62	29.170,69	+2.242,07	+8,13	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribassoi	869,27	869,27	887,13	+17,86	+8,13	
	Importo lavori da applatare	31.233,27	27.797,89	30.057,82	+2.259,93	+8,13	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€uro	€uro	€uro	€uro	%	
B1	Somme in economia	15.428,84	14.123,37	15.648,41	+1.525,04	+10,80	
B1a	Impianto di rete 	3.329,29	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	
B1a1	Importo lavori soggetti a ribasso	3.244,13	3.144,84	3.144,84	0,00	0,00	
B1a2	Oneri della sicurezza	85,16	85,16	85,16	0,00	0,00	
B1b	Impianto elettrico	12.099,55	10.893,37	12.418,41	+1.525,04	+14,00	
B1b1	Importo lavori soggetti a ribasso	11.787,98	10.581,80	12.064,08	+1.482,28	+14,00	
B1b2	Oneri della sicurezza	311,57	311,57	354,33	+42,76	+14,00	
B2	Imprevisti	3.072,22	3.072,22	3.072,22	0,00	0,00	
B3	IVA	10.265,67	9.222,68	10.055,37	+832,69	+9,03	
B4	ECONOMIE DI RIBASSO 	0,00	5.783,84	1.166,18	 
 	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.766,73	32.202,11	29.942,18	 	
	TOTALE COMPLESSIVO	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

APPROVARE  gli atti   di perizia di variante suppletiva ,redatta dall’arch. Anna Cicconi ,responsabile del settore tecnico manutentivo in qualità di direttore dei lavori costituita dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica perizia di variante;
Computo variante lavori edili,
Computo di variante lavori impianto elettrico;
Computo di variante lavori impianto di rete;
Quadro economico complessivo di variante;
Analisi prezzi relativi alla perizia di variante;
Quadro comparativo;
 Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi (lavori edili);
Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi (lavori impianto elettrico;

DARE ATTO CHE la  ditta C.E.D. Tarquini Rag. Bruno  con sede in Viale Duca Degli Abruzzi 64046 Montorio al Vomano (TE) p. IVA 00874290679 ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data   10/07/2017 impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia , per l’importo complessivo netto  di €.30.057,82 compreso degli oneri della sicurezza ,oltre iva, per un maggior importo contrattuale di €. 2.259,93 corrispondente ad un aumento percentuale pari al 8,13%;

DARE ATTO che i lavori relativi all’impianto di rete non sono oggetto di variante per cui l’importo contrattuale resta pari ad €. 3.230,00 oltre IVA;

DARE ATTO CHE la  ditta S.I.T.EL srl   con sede in Via di Sotto,165 65125 Pescara p. IVA 0142926068  ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data   10/07/2017 impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia , per l’importo complessivo netto  di €.12.418,41  compreso degli oneri della sicurezza ,oltre iva, per un maggior importo contrattuale di €. 1.525,04 corrispondente ad un aumento percentuale pari al 14,00%;

DARE ATTO CHE il CUP attribuito al presente lavoro e' 184H17000210005 mentre il CIG per lavori edili è ZDC1E545C8 ,per l’impianto elettrico è  ZA71E558D5 e per l’impianto di rete è Z131E55924;

DARE ATTO CHE la spesa sarà finanziata con fondi della protezione civile giusta nota del 19/04/2017 prot.n. DP/TERAG_SM/0027251 e che trova disponibilità all’impegno n.167  al cap. 1116/1 del bilancio corrente esercizio finanziario;

_______________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 21-08-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

_______________________________________________________________

RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________