____________________________________________________________________________
Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero  68   del 26-06-19 

Oggetto:	PROGETTO DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETI=
		CO  E  OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE DI UN IMPIANTO
		SPORTIVO   ESISTENTE   NEL   COMUNE   DI  TOSSICIA
		(TE) "PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII - APPRO=

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 12:30, in Tossicia, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

   Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
RISPOLI EMANUELA	SINDACO	P	

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
MANETTA PAMELA	ASSESSORE	P	

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
TIMOTEO NANDO	ASSESSORE	   A	

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e  verbalizzazione (art. 97, D.Lgs. del 18/08/2000 n.267) il Segretario Comunale DOTT.SSA DI GIAMBERARDINO CARLA.

Risultato legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la discussione della proposta di deliberazione appresso trascritta. Nessuno interviene.

Si procede, quindi, alla votazione per l’approvazione della proposta che viene espressa per alzata di mano.

Il presidente ne proclama l’esito che è il seguente:

APPROVATA ALL’UNANIMITA’

Richiamati i seguenti atti:

-	Delibera di Giunta Comunale  n. 73 del 07/07/2015 veniva approvato il Progetto Preliminare per “PROGETTO DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE DI UN IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE NEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) “PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII”” dell’importo complessivo di €  377.363,81 di cui €. 293.221,56,00  per lavori ed €. 84.142,25 per somme in amministrazione, redatto dal Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica arch. Cicconi Anna;

-	Determina del Responsabile del servizio IV settore LL.PP. n. 116/801 del 19/12/2015 veniva affidato l’incarico congiunto all’Ing. Luca Di Carlo c.f. DCRLCU77M05L103W - partita IVA n. 01520830678 iscritto all’ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 864, e all’Ing. Luana Di Carlo c.f. DCRLNU80P47L103Z - partita IVA  01618620676  iscritta all’ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 1044, con studio Via Bologna n° 7, Castelnuovo Vomano 64020 Castellalto (TE) per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per i lavori relativi al “PROGETTO DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE DI UN IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE NEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) “PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII”;

-	Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 29/08/2017 veniva approvato il progetto definitivo per i lavori relativi al “PROGETTO DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE DI UN IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE NEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) “PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII” redatto dai tecnici Ing. Luca Di Carlo e Ing. Luana Di Carlo;

-	Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 31/07/2018 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi al “PROGETTO DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE DI UN IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE NEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) “PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII” redatto dai tecnici Ing. Luca Di Carlo e Ing. Luana Di Carlo;

-	Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 71/414 del 24/08/2018 avente per oggetto “LAVORI RELATIVI AL “PROGETTO DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE DI UN IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE NEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) “PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII” - DETRMINA A CONTRARRE - sono  stati fissati i contenuti della procedura di gara e del contratto;

-	Determina del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza, n. 12/415, in data 24/08/2018 è stato stabilito di procedere all’affidamento dei “LAVORI RELATIVI AL “PROGETTO DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE DI UN IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE NEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) “PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII” – INDIZIONE GARA”   mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le modalità stabilite dall’art. 36. comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con contestuale approvazione degli elaborati di gara,  Il tutto attraverso un sistema di gara Telematica, a busta chiusa; 

-	Determina n. 25/551 del 23/10/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza vi è stata l’aggiudicazione definitiva  della procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “LAVORI RELATIVI AL “PROGETTO DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE DI UN IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE NEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) “PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII”  a favore dell’ A.T.I. costituita dalla Ditta IERVELLI COSTRUZIONI SRL con sede legale in località Ponte Vezzola – 64100 Teramo (TE)    P.IVA e C.F. 00928140672 e dalla Ditta  IDRI SRL con sede legale in Via Casette, 7 – 64010 Ancarano (TE) P.IVA e C.F. 00092470673, che ha presentato un'offerta economica pari al 31,110% di ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 167.267,86 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad  Euro 5.000,00;

-	Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 92/578 del 06/11/2018 si è preso atto della Determina n. 25/551 del 23/10/2018  del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “LAVORI RELATIVI AL “PROGETTO DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI COMPLETAMENTO VARIE DI UN IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE NEL COMUNE DI TOSSICIA (TE) “PIETRINO DI NATALE E DOMENICO FABII”  a favore dell’A.T.I. costituita dalla Ditta  IERVELLI COSTRUZIONI SRL con sede legale in località Ponte Vezzola – 64100 Teramo (TE)    P.IVA e C.F. 00928140672 e dalla Ditta  IDRI SRL con sede legale in Via Casette, 7 – 64010 Ancarano (TE) P.IVA e C.F. 00092470673, alle condizioni riportate nella lettera di invito sottoscritta in sede di gara, che ha presentato un'offerta economica pari al 31,110% di ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 167.267,86 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad  Euro 5.000,00.

-	che in data 04/12/2018 è stato stipulato il Contratto di appalto rep. n. 785/2018 registrato a Teramo il 11/12/2018 tra l’Amministrazione e l’A.T.I. aggiudicataria dei lavori;

-	che in data 16/01/2019 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori;

-	che in data 11/02/2019 si è proceduto alla consegna definitive dei  lavori

ATTESO CHE:
-	durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune lavorazioni e/o variazioni aggiuntive maturate da cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale e di mutate lavorazioni che sostanzialmente non alterano la natura dei lavori verificatisi in corso d’opera, non prevedibili nella fase di progetto [art.106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.50/16], quindi per la regolare esecuzione delle opere di che trattasi è necessario provvedere anche all’esecuzione di alcune opere complementari come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante;
-	le suddette opere, non sono state comprese nel progetto esecutivo né nel contratto iniziale e, rilevato che la suddette opere rientrano nella fattispecie prevista dall’art. art.106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.50/16, in quanto pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale sono strettamente necessarie al suo perfezionamento, si è proceduto a contattare la direzione lavori, al fine di verificare la disponibilità della predetta all'esecuzione del servizio complementare;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, trasmessa dal D.L. in data 25/06/2019, acclarata al protocollo comunale al n. 12287, composta dei seguenti elaborati:

-	Tav. 3/v - Planimetria con recinzione di progetto e particolari costruttivi;
-	Tav. 4/v - Piante, prospetti e sezioni spogliatoio attuale e di progetto;
-	Tav. 7/v - Impianto elettrico: lay-out planimetrico con schema elettrico e quadro generale;
-	Tav. 10/v - Relazione tecnico illustrativa con quadri economici di confronto;
-	Tav. 11/v- Elenco prezzi unitari;
-	Tav. 12/v - Analisi dei prezzi unitari;
-	Tav. 13/v - Computo metrico estimativo di variante;
-	Tav. 14/v- Computo metrico estimativo di variante con incidenza della manodopera e sicurezza;
-	Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 

A) IMPORTO DEI LAVORI
A1 IMPORTO DEI LAVORI ……………...................................................€ 338.876,58
A2 ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso).........................€    5.000,00
A IMPORTO DEI LAVORI al lordo del ribasso (A1+A2)...... ..............€  343.876,58
A3 IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso (31,11%)
        compreso oneri della sicurezza………………………………… …€  238.452,08.....€ 238.452,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 SPESE TECNICHE GENERALI (calcolate su A)..…………………………....€   44.480,76
B2 CNI (4% di B1).............................................................................€    1.779,23
 Sommano €   46.259,99
B3 ONERI RIFLESSI (invariati rispetto al QE a base di gara)…........................€     4.810,98
B4 ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSI ……………………………………………………€    5.882,93
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE.....€   56.953,90.....€    56.953,90
C) IMPREVISTI E IVA
C1 IMPREVISTI 2% di A......................................................................€         0,00
C2 IVA 10% SUI LAVORI al netto del ribasso ………...............................€ 23.845,21
C3 IVA 22% SU SPESE TECNICHE E CNI (B1+B2).................................€ 10.177,20
C4 IVA 10% SU IMPREVISTI................................................................€        0,00

  Sommano € 34.022,41......€ 34.022,41

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO A+B+C…....................................€ 329.428,39

da cui risulta una maggiore spesa complessiva dei lavori pari ad €. 71.184,22

DATO ATTO che il RUP ha accertato che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale; 

Che in particolare le predette motivazioni sono ascrivibili alla declaratoria di cui all'art. 106 comma 1 lettera b), e c), in quanto rientra nelle condizioni previste dalla predetta norma ed in particolare la modifica contrattuale introdotta con la perizia risulta essere è al di sotto dei valori previsti dal comma 7):
- Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 

RITENUTO di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che,  al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, per la procedura da espletare sono stati acquisiti:

-	CUP (Codice Unico di Progetto): CUP I84H15001030004
-	CIG (Codice Identificativo di Gara) CIG 76055244F3

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA
1.	LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.	DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, trasmessa dal D.L. in data 25/06/2019, acclarata al protocollo comunale al n. 12287, composta dei seguenti elaborati:

-	Tav. 3/v - Planimetria con recinzione di progetto e particolari costruttivi;
-	Tav. 4/v - Piante, prospetti e sezioni spogliatoio attuale e di progetto;
-	Tav. 7/v - Impianto elettrico: lay-out planimetrico con schema elettrico e quadro generale;
-	Tav. 10/v - Relazione tecnico illustrativa con quadri economici di confronto;
-	Tav. 11/v- Elenco prezzi unitari;
-	Tav. 12/v - Analisi dei prezzi unitari;
-	Tav. 13/v - Computo metrico estimativo di variante;
-	Tav. 14/v- Computo metrico estimativo di variante con incidenza della manodopera e sicurezza;
-	Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 

A) IMPORTO DEI LAVORI
A1 IMPORTO DEI LAVORI ……………...................................................€ 338.876,58
A2 ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso).........................€    5.000,00
A IMPORTO DEI LAVORI al lordo del ribasso (A1+A2)...... ..............€  343.876,58
A3 IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso (31,11%)
        compreso oneri della sicurezza………………………………… …€  238.452,08.....€ 238.452,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 SPESE TECNICHE GENERALI (calcolate su A)..…………………………....€   44.480,76
B2 CNI (4% di B1).............................................................................€    1.779,23
 Sommano €   46.259,99
B3 ONERI RIFLESSI (invariati rispetto al QE a base di gara)…........................€     4.810,98
B4 ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSI ……………………………………………………€    5.882,93
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE.....€   56.953,90.....€    56.953,90
C) IMPREVISTI E IVA
C1 IMPREVISTI 2% di A......................................................................€         0,00
C2 IVA 10% SUI LAVORI al netto del ribasso ………...............................€ 23.845,21
C3 IVA 22% SU SPESE TECNICHE E CNI (B1+B2).................................€ 10.177,20
C4 IVA 10% SU IMPREVISTI................................................................€        0,00

  Sommano € 34.022,41......€ 34.022,41

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO A+B+C…....................................€ 329.428,39

da cui risulta una maggiore spesa complessiva dei lavori pari ad €. 71.184,22

3.	DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, già sottoscritto dall’A.T.I. costituita dalla Ditta  IERVELLI COSTRUZIONI SRL con sede legale in località Ponte Vezzola – 64100 Teramo (TE)    P.IVA e C.F. 00928140672 e dalla Ditta  IDRI SRL con sede legale in Via Casette, 7 – 64010 Ancarano (TE) P.IVA e C.F. 00092470673, con il quale la stessa si impegna, senza alcuna eccezione e riserva,  all’esecuzione delle opere previste nella presente perizia suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;

4.	DI DARE ATTO che l’approvazione della presente perizia trova copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale con imputazione al Capitolo 2530/ 0 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO - FINANZIAMENTO REGIONALE + MUTUO + ALTRI (VEDI RIS. 530-531-532);

5.	DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento Ing. Magiste Trosini Responsabile del Settore LL.PP. e Protezione Civile l’adozione di ogni atto successivo e consequenziale il presente provvedimento;

6.	DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, con separata e unanime votazione separata favorevole.

PARERI  Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Settore						Ufficio

IN ORDINE AL PARERE TECNICO: si esprime parere Favorevole.

Lì 25-06-2019

Il Responsabile del Settore
F.to Trosini Magiste

IN ORDINE AL PARERE CONTABILE: si esprime parere Favorevole.

Lì 25-06-2019

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to Zuccarini Gabriella

Motivazione adottata dalla Giunta Comunale per l’assunzione della deliberazione in presenza dei pareri contrari sopra riportati.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che,previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE	
f.to RISPOLI EMANUELA	f.to DOTT.SSA DI GIAMBERARDINO CARLA	
.
SI  AT T E S T A
Che la presente deliberazione :				Prot. N. __________

•	E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1°, della legge 18.06.2009 n. 69);
•	E’ stata compresa nell’elenco n. ________, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari  (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì 03-07-2019	Il Responsabile dell’Area Amministrativa	
	f.to CRUCIANI SILVANA	

______________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
•	è immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
•	è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
•	E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune, come prescritto dall’art. 124, c.2, D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal _________, al ________             

Li   	f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa

_______________________________________________________________

RIFERIMENTO PER SERVIZI FINANZIARI	Capitolo					Anno		
	Pr. Imp.					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno