SETTORE AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP.

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  19 / 162  Del  08-04-19

______________________________________________________
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO DI PIAZZA UMBERTO I
		-  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUP=
		PLETIVA N. 2

Tossicia, lì  08-04-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     Trosini Magiste

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  03-07-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO che:                                                          
-	Il Comune di Tossicia intende realizzare la riqualificazione di una zona della città avente come fulcro la Piazza Umberto I mediante un progetto unitario da realizzarsi in:
o	Realizzazione di un parcheggio superficiale in area limitrofa alla piazza oggetto di un precedente intervento di consolidamento e quindi idonea alla funzione di destinazione;
o	Riqualificazione delle connessioni infrastrutturali;
o	Intervento illuminotecnico, idraulico e di valorizzazione del fontanile storico.

-	la suddetta opera  verrà realizzata su  un’area  di proprietà pubblica senza occupazione di terreni privati;
Richiamati:
-	La Delibera di G.C. n. 49 del 01/06/2016 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al “RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO DI PIAZZA UMBERTO I”  dell’importo complessivo di € 215.000,00 redatto dal Responsabile del settore Lavori Pubblici e Protezione Civile, Ing. Magiste Trosini;
-	La Determina n. 79/411 del 01/09/2017 del responsabile del settore lavori pubblici e protezione civile dell’incarico congiunto relativamente ai lavori di  “RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO DI PIAZZA UMBERTO I”  per la progettazione definitiva esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza ai professionisti  Arch. Tiziana Lancia ed Ing. Matteo Patriarca i quali hanno trasmesso in data 30/01/2018 prot. N. 469 il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di che trattasi, costituito dagli elaborati previsti dall’art. 23 del D.lgs 50/2016;
-	La Delibera di G.C. n. 8 del 30/01/2018 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO DI PIAZZA UMBERTO I”  dell’importo complessivo di € 215.000,00 di cui € 149.900,71 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 65.109,39 per somme in amministrazione;
-	La determinazione del Responsabile AREA LL. PP. del Comune di Tossicia n. 13/84 del 19/02/2018  avente per oggetto: “RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO DI PIAZZA UMBERTO I” determina a contrarre procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. e lett. b) con la quale sono  stati fissati i contenuti della procedura di gara e del contratto; 
-	la Determinazione del Responsabile del Servizio IV Settore LL.PP. e Protezione Civile n. 34/206 del 30/04/2018  con la quale si è preso atto della Determina n. 4/205 del 30.04.2018  del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO DI PIAZZA UMBERTO I” - CUP: I84E16000380004 – CIG: 7369876611 in favore della Ditta 1° classificata Ing. Marano  C. srl  con sede legale in Largo Rosciano n. 12  - Montorio Al Vomano (TE)  P.I. n. 0145673078 alle condizioni riportate nella lettera di invito sottoscritta in sede di gara, per un importo netto di Euro 115.666,35 oltre Euro 2.027,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi Euro 117.693,95 oltre IVA 10%;
- in data 13.06.2018 si è quindi stipulato il contratto in modalità elettronica rep. n. 781;
- in data 19.06.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori;
Considerato che con determina del Responsabile del Servizio LL.PP. è stata approvata una perizia di variante, trasmessa dal D.L. in data 05/12/2018, ed acclarata al protocollo comunale al n. 5057, composta dagli elaborati previsti dalla norma e per l’importo complessivo di € 215.010,10 di cui € 163.973,95 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 51.036,16 per somme in amministrazione.

Atteso che:

- durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, verificatisi in corso d’opera, e di rinvenimenti non prevedibili nella fase di progetto [art.106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.50/16], quindi per la regolare esecuzione delle opere di che trattasi è necessario provvedere anche all’esecuzione di alcune opere complementari come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante tecnica;
- le suddette opere, non sono state comprese nel progetto esecutivo né nel contratto iniziale e, rilevato che la suddette opere rientrano nella fattispecie prevista dall’art. art.106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.50/16, in quanto pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale sono strettamente necessarie al suo perfezionamento, si è proceduto a contattare la direzione lavori, al fine di verificare la disponibilità della predetta all'esecuzione del servizio complementare;
Vista la perizia di variante tecnica e suppletiva N. 2, trasmessa dal D.L. in data 08/04/2019, acclarata al protocollo comunale al n. 1258, composta dei seguenti elaborati:
− Relazione descrittiva e quadro economico;
− Quadro di raffronto;
− Analisi nuovi prezzi;
− Computo metrico estimativo; 
− Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
Avente il seguente quadro economico:

da cui risulta una maggiore spesa complessiva di € 58.653,06;

Dato atto che il RUP ha accertato che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale; 

Che in particolare le predette motivazioni sono ascrivibili alla declaratoria di cui all'art. 106 comma 1 lettera b), e c), in quanto rientra nelle condizioni previste dalla predetta norma ed in particolare la modifica contrattuale introdotta con la perizia risulta essere è al di sotto dei valori previsti dal comma 7):
- Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 

Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che,  al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, per la procedura da espletare sono stati acquisiti:

-	CUP (Codice Unico di Progetto): I84E16000380004
-	CIG (Codice Identificativo di Gara) 7369876611

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

1.	le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	Approvare in via amministrativa la perizia di variante tecnica e suppletiva N. 2, trasmessa dal D.L. in data 08/04/2019, acclarata al protocollo comunale al n. 1258, composta dei seguenti elaborati:
− Relazione descrittiva e quadro economico;
− Quadro di raffronto;
− Analisi nuovi prezzi;
− Computo metrico estimativo; 
− Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
Avente il seguente quadro economico:

da cui risulta una maggiore spesa complessiva di € 58.653,06;

3.	Approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, già sottoscritto dall’impresa Ing. Marano  C. srl  con sede legale in Largo Rosciano n. 12  - Montorio Al Vomano (TE)  P.I. n. 0145673078 senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all’esecuzione delle opere previste nella presente perizia suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;

4.	 di dare atto che l’approvazione della presente perizia trova copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale con imputazione Capitolo 2504/10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA UMBERTO I - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE del bilancio, gestione residui;

5.	di demandare al Responsabile del Procedimento Ing. Magiste Trosini Responsabile del Settore LL.PP. e Protezione Civile l’adozione di ogni atto successivo e consequenziale il presente provvedimento;

_______________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 03-07-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

_______________________________________________________________

RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _____________