COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

COPIA DI DELIBERAZIONE   
DELLA
GIUNTA COMUNALE    

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  13 DEL  30-03-17

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SAN MICHELE.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 17:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

======================================================================

Cavasassi Agostino	SINDACO	P	
SPOSETTI FIORELLA	VICE SINDACO	P	
DELLA VECCHIA CLAUDIO	ASSESSORE	A	

======================================================================

Assegnati n.  3  In carica n.  3 Presenti n.   2  Assenti n.   1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. D.SSA MARISA CARDINALI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cavasassi Agostino nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,   

D E L I B E R A

IL documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI approvare integralmente in ogni sua parte la proposta allegata.

INOLTRE, considerata l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, resi in modo palese,

D E L I B E R A

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4^ - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                     

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267;                           
DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA                              

Premesso che a seguito della forti scosse sismiche del 24 Agosto 2016 sul territorio comunale si sono verificati gravi danni alle strutture pubbliche e private, con situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, che necessitano interventi urgenti ed immediati;

Preso atto che:
•	il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/08/2016 con appositi DPCM pubblicati sulla GU n. 198 del 25/08/2016 ha dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila nonché quelle delle province di Fermo e Macerata;
•	La Presidenza del Consiglio dei Ministri con Ordinanze n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 389 del 28 agosto 2016 avente per oggetto rispettivamente :
o	“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 388).”
o	“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 389).” 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016 ha dettato le prime disposizioni di coordinamento degli interventi nella prima fase di emergenza con il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni sismici;

Vista la nota a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Fabrizio Curcio prot n. UC/Terag16/0044398 del 03/09/2016 pervenuta via mail in data 03/09/2016 con la quale vengono indicate le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse;

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 143 del 31/10/2016 con la quale a seguito di sopralluogo speditivo del Responsabile dell’U.T.C. è stata confermata l’inagibilità della Chiesa di San Michele e disposto il restringimento della carreggiata della Strada Provinciale n. 45 “Faleriense Ginesina” per il pericolo di crollo della facciata della Chiesa stessa sulla pubblica via;

Visto il verbale del sopralluogo effettuato dal GTS in data 3 novembre 2016 dal quale risulta la necessità di mettere in sicurezza la facciata della Chiesa di San Michele  mediante l'esecuzione di opere provvisionali al fine di ripristinare la viabilità principale e con il quale si da atto dell’impossibilità di realizzazione in tempi brevi da parte delle squadre VVF, e, quindi, della possibilità della realizzazione diretta dell’intervento da parte del Comune di Sant’Angelo in Pontano;

Vista la determinazione del Responsabile dell’U.T.C. Di Luca Sidozzi Fabio n. 86 del 4/11/2016 con la quale viene disposto l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE” per un importo presunto dei lavori di € 26.128,20 all’Ing. Mochi Anastasia di Loro Piceno;

Visto l’atto di Giunta Comunale n.91 del 26.11.2016 di Approvazione della perizia dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SAN MICHELE A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 30/10/2016” redatta dalla professionista incaricata;

Dato atto che al fine di assicurare la necessaria tempestività di azione ci si è avvalsi delle deroghe di cui gli art.5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 e art. 5 dell’ dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016;

Precisato che le opere in argomento, indifferibili ed urgenti per la messa in sicurezza dell’Immobile denominato Chiesa San Michele che minaccia crollo sulla pubblica via, rientrano fra le tipologie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, in quanto riferite con lo stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), B) e c) della sopra richiamata Ordinanza n° 388/2016 e s.m.i. emessa dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che l’intervento sarà finanziato con gli appositi fondi erogati dalla Regione Marche a seguito di rendicontazione sull’apposito applicativo telematico COHESIONWORKPA con imputazione al bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico geom. Di Luca Sidozzi Fabio n. 10 del 3 febbraio 2017 con la quale veniva avviata un’indagine di mercato per la richiesta di preventivi-offerte informali ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l’affidamento diretto di prestazioni di servizio per importi inferiori a € 40.000,00;

Vista altresì la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico geom. Di Luca Sidozzi Fabio n. 14 del 23 febbraio 2017 con la quale venivano affidati i lavori alla ditta “Fiorelli Costruzioni” di Francavilla d’Ete con un ribasso del 28,22%;

Rilevato che nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una variante per il peggioramento della porzione sud ovest della costruzione a seguito delle ulteriori scosse sismiche del mese di gennaio 2017, unite alle copiose nevicate che hanno colpito il territorio comunale, peggioramento che si concentra soprattutto nella zona della muratura esterna prospiciente lo spazio retrostante l’edificio  e lesioni oblique attestanti un inizio di ribaltamento dell’angolata al di sotto del campanile;

Vista la perizia di variante in corso d’opera dei LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE” redatta dal progettista e D.L. Arch. Ing. Anastasia Mochi, composta dai seguenti elaborati:
-	TAV. 1/v: PROGETTO piante, prospetti e sezioni;
-	TAV. 2: Relazione generale;
-	TAV. 3: Computo metrico estimativo;
-	TAV. 4: Quadro tecnico economico;
-	TAV. 5: Quadro tecnico economico di raffronto;
-	TAV. 6: Analisi prezzo;
con il seguente quadro economico:

LAVORI	PROGETTO IN APPALTO	PERIZIA DI VARIANTE	
Importo sogg. ribasso	25.427,24	22.022,73	
Costo sicurezza	700,96	851,37	
IVA sui lavori	2.612,82	2.287,41	
Spese tecniche	2.717,33	2.717,33	
IVA su spese tecniche	597,81	597,81	
Imprevisti e lav. su fatt.	2.612,82	2.287,41	
Indennità rup	  261,28	261,28	
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	34.930,26	31.025,34	

Preso atto che l’aumento dell’importo dei lavori previsti in variante trova copertura nel ribasso d’asta e rientra nel quadro economico iniziale, che anzi presenta un’economia di spesa rispetto all’importo inizialmente previsto;

Ritenuto dover approvare la variante di cui sopra;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

C) PROPOSTA                                                           

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

Di approvare la 1^ perizia di variante in corso d’opera dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SAN MICHELE A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 30/10/2016” redatta dalla professionista incaricata Arch. Ing. Anastasia Mochi, composta dagli elaborati elencati in istruttoria e con il seguente quadro economico:

LAVORI	PROGETTO IN APPALTO	PERIZIA DI VARIANTE	
Importo sogg. ribasso	25.427,24	22.022,73	
Costo sicurezza	700,96	851,37	
IVA sui lavori	2.612,82	2.287,41	
Spese tecniche	2.717,33	2.717,33	
IVA su spese tecniche	597,81	597,81	
Imprevisti e lav. su fatt.	2.612,82	2.287,41	
Indennità rup	  261,28	261,28	
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	34.930,26	31.025,34	

Di dare atto che l’intervento sarà finanziato con gli appositi fondi erogati dalla Regione Marche a seguito di rendicontazione sull’apposito applicativo telematico COHESIONWORKPA con imputazione al bilancio pluriennale 2016/2018.

DI PROVVEDERE alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4^ - del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell’azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Di Luca Sidozzi Fabio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell’azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Dotti

Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cavasassi Agostino                F.to D.SSA MARISA CARDINALI
-------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
					       D.SSA MARISA CARDINALI

-------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale,visti gli atti di Ufficio,
A T T E S T A 
- che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11-05-17 al 26-05-17 ,come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.L.gs.N.267 del 18.8.2000, senza reclami;

[] E'stata comunicata, con lettera n. 2425   in data 11-05-17      ai signori capigruppo consiliari cosi come prescritto dall'art.125, del D.L.gs N.267 del 18.8.2000;

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs.vo n.267/2000).

Dalla Residenza municipale, li
Il Segretario Comunale
  F.to D.SSA MARISA CARDINALI